1210/2022-127611(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-11159/2022  

от 14 декабря 2022 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Обязать Некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Архангельской области» (ОГРН 

<

***>) устранить в  рамках гарантийных обязательств недостатки, допущенные при производстве капитального  ремонта крыши многоквартирного дома № 27 по пр. Труда в г. Северодвинске в срок до  01.09.2023 г. с предварительным согласованием проекта производства работ, а именно:  

• выполнить работы по установке карнизного свеса шириной 2500 мм. с соединенными  картинами двойным лежачим фальцем по всему периметру крыши с заменой материала на  новый;  

• выполнить работы по устройству картин настенного желоба, соединенными  двойными лежачими фальцами с подсечкой по стоку воды по всему периметру крыши с  заменой материала на новый;  

• выполнить работы по устройству сплошного карнизного щита из досок толщиной 60  мм под всю ширину карнизного свеса, обработанных антисептирующими и  антипирирующими составами по всему периметру крыши;  

• выполнить работы по устройству подкладочного слоя рулонного материала под всю  ширину карнизного свеса, а на стыках картин, желобов и разжелобков помимо рулонного  материала следует подкладывать лист кровельной стали по всему периметру крыши;  

• выполнить работы по устройству обрешетки из черепных брусков сечением 60x60 под  кровлю из волнистых асбоцементных листов, обработанных антисептирующими и  антипирирующими составами по всей площади крыши;  

• выполнить работы по зачеканке цементным раствором с добавлением волокнистых  материалов стыка шириной не менее 150 мм волнистого асбоцементного листа и картины  карнизного свеса по всему периметру крыши;  

• выполнить работы по устройству компенсационных швов с шагом 12 м по длине на  кровле из волнистых асбоцементных листов по всей площади крыши;  

• заменить асбоцементные листы на новые и выполнить работы по раскладке  волнистых асбоцементных листов с нормативными значениями подрезки в углах по всей  площади крыши;  

• выполнить работы по креплению волнистых асбоцементных листов к обрешетке  оцинкованными гвоздями по всей площади крыши;  

• выполнить работы по установке противоветровых скоб при устройстве карнизного  ряда волнистых асбоцементных листов по всей площади крыши;  

• выполнить работы по монтажу волнистых асбоцементных листов к обрешетке с  количеством креплений не менее четырех на один лист по всей площади крыши;  

• выполнить работы по монтажу леерного ограждения по всему периметру крыши, в  соответствии с ГОСТ «Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных  

маршей и площадок. Общие технические условия», способом, исключающим  

протекание в местах крепления ограждения к желобу. В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с Некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Архангельской области" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  в пользу Северодвинского муниципального унитарного предприятия "Управляющая  организация "Созидание" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 20 738 руб. в  возмещение судебных издержек, а также 6000 руб. в возмещение расходов по уплате  государственной пошлины.  

Возвратить Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию  "Управляющая организация "Созидание" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) из  федерального бюджета 2000 руб. уплаченной государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья В.А. Крылов  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 17.12.2021 7:38:07

Кому выдана Крылов Вадим Александрович