Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, 

<

...>

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-6705/2025

15 января 2026 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 25.12.2025

Мотивированное решение изготовлено 15.01.2026

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Гоголевой М.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания Жерготовой В.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 23.07.2025 № 261 к акционерному обществу «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 21 205 976,2 рублей,

при участии:

от истца посредством веб-конференцсвязи: ФИО1, личность установлена по паспорту, полномочия подтверждены доверенностью от 13.01.2025, представлен диплом; ФИО2, личность установлена по паспорту, полномочия подтверждены доверенностью от 01.09.2025, представлен диплом

от ответчика: ФИО3, личность установлена по паспорту, полномочия подтверждены доверенностью от 01.08.2024, представлен диплом,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Сибирь» (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к акционерному обществу «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский» (далее – ответчик) с требованием о взыскании 21 205 976,2 руб., состоящих из следующих задолженностей:

- гарантийные удержания по договору подряда № С0100032206 от 04.09.2020 в размере 104 281,69 руб., договорную неустойку в размере 7 768,98 руб.;

- гарантийные удержания по договору подряда № С01000З6l8З от 1З.05.202lг. в размере 9 791 585,61 руб., договорную неустойку в размере 504 266,65 руб.;

- гарантийные удержания по договору подряда № 39114 от 03.12.2022021 в размере 1 947 453,48 руб., договорную неустойку в размере 39 754,12 руб.;

- гарантийные удержания по договору подряда № 39119 от 03.12.2021,г, в размере 1 403254,02 руб., договорную неустойку в размере 61743,17 руб.;

- гарантийные удержания по договору подряда № 37746 от 0З.12.2021г. в размере 1 5421,67,33 руб., договорную неустойку в размере 79 421,61 руб.;

- гарантийные удержания по договору подряда № 37414 от 13.08.2021 в размере 1 947 453,48 руб., договорную неустойку в размере 26 777,48 руб.;

- гарантийные удержания по договору подряда № 40470 от 17.03.2022 в размере 5265733,57 руб., договорную неустойку в размере 34 227,27 руб.;

а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 437 060 руб. Определением суда от 30.09.2025 исковое заявление принято к производству.

В связи с удовлетворением судом ходатайства истца об участии в судебном заседании посредством онлайн-заседания, судебное заседание проведено через систему онлайн-заседания с ведением аудио и видеозаписи судебного заседания.

В материалы дела до судебного заседания поступили:

от истца – ходатайство от 15.12.2025 об уточнении исковых требований (с приложением), просит взыскать 20 425 661,69 руб. (18 750 591,95 руб. гарантийных удержаний, 1 675 069,74 руб. договорной неустойки), состоящих из следующих задолженностей:

- гарантийные удержания по договору подряда № С0100032206 от 04.09.2020 в размере 104 281,69 руб., договорную неустойку в размере 10 428,17 руб. за период с 30.08.2024 по 15.12.2025 и далее по день фактического исполнения обязательств, но не более 10 % от суммы задолженности;

- гарантийные удержания по договору подряда № С01000З6l8З от 1З.05.2021. в размере 9 791 585,61 руб., договорную неустойку в размере 979 158,56 руб. за период с 01.11.2024 по 15.12.2025 и далее по день фактического исполнения обязательств, но не более 10 % от суммы задолженности;

- гарантийные удержания по договору подряда № 39114 от 03.12.2022 в размере 397 541,22 руб., договорную неустойку в размере 39 754,12 руб. за период с 01.05.2023 по 15.12.2025 и далее по день фактического исполнения обязательств, но не более 10 % от суммы задолженности;

- гарантийные удержания по договору подряда № 39119 от 03.12.2021,г, в размере 1 403 254,02 руб., договорную неустойку в размере 133 309,13 руб. за период с 01.12.2024 по 15.12.2025 и далее по день фактического исполнения обязательств, но не более 10 % от суммы задолженности;

- гарантийные удержания по договору подряда № 37746 от 0З.12.2021г. в размере 1 542 167,33 руб., договорную неустойку в размере 154 216,73 руб. за период с 01.11.2024 по 15.12.2025 и далее по день фактического исполнения обязательств, но не более 10 % от суммы задолженности;

- гарантийные удержания по договору подряда № 37414 от 13.08.2021 в размере 246 028,51 руб., договорную неустойку в размере 15 930,35 руб. за период с 01.04.2024 по 15.12.2025 и далее по день фактического исполнения обязательств, но не более 10 % от суммы задолженности;

- гарантийные удержания по договору подряда № 40470 от 17.03.2022 в размере 5 265 733,57 руб., договорную неустойку в размере 342 272,68 руб. за период с 31.03.2024 по 15.12.2025 и далее по день фактического исполнения обязательств, но не более 10 % от суммы задолженности;

от ответчика – отзыв от 11.12.2025 на исковое заявление (с приложениями согласно перечню).

Уточнение требований судом принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители сторон выступили с пояснениями, ответили на вопросы суда, устно ходатайствовали об объявлении перерыва.

Судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв в судебном заседании с 16.12.2025 до 25.12.2025. После объявленного перерыва судебное заседание было продолжено 25.12.2025 в том же составе суда, при ведении протокола и аудиозаписи тем же секретарем судебного заседания.

В материалы дела во время перерыва от ответчика поступил контррасчёт от 23.12.2025 размера исковых требований (с обоснованием) (с приложениями согласно перечню).

Возражений относительно приобщения поступивших доказательств лицами, участвующими в деле, не заявлено.

Поступившие документы приобщены судом к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители истца выступили с пояснениями, исковые требования поддержали с учетом принятого уточнения, просили удовлетворить.

Представитель ответчика выступил с пояснениями, ответил на вопросы суда, просил суд отказать в удовлетворении исковых требований.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Сибирь» (Подрядчик) и акционерным обществом «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский» (Заказчик) заключены следующие договоры подряда:

- № СО 100032206 от 04.09.2020 на выполнение общестроительных и отделочных работ по Объекту «Главный корпус № 1» ОФ «Инаглинская-2» АО «ГОК «Инаглинский» (далее по тексту - Договор № С0100032206), по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить общестроительные и отделочные работ по Объекту: «Главный корпус № 1» ОФ «Инаглинская-2» АО «ГОК «Инаглинский» (далее - Работы) и сдать Заказчику Работы по актам приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с техническим заданием (Приложением № 1 к Договору), локальным сметным расчетом № 1 (Приложением № 2 к Договору), рабочей документации шифр Р19951-2.10.1-АР1, а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную Договором стоимостью.

В соответствие с пунктом 2.1. цена по договору является приблизительной, определяется локальным сметным расчетом № 1 (Приложением № 2 к Договору) и составляет 12 330 738,00 руб.

Пунктом 4.1 договора установлено, что Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Работ по Договору (в сумме не более 3 699 221,40 руб. в течение 10 рабочих дней от даты подписания Сторонами Договора и предоставления Подрядчиком счета на оплату.

Согласно пункту 4.3. договора оплату выполненных и принятых Работ Заказчик производит ежемесячно в следующем порядке:

- Заказчик удерживает 15 % от стоимости подлежащих оплате выполненных и принятых Работ за отчетный месяц в счет погашения аванса (пункт 4.3.1).

- Заказчик производит гарантийные удержания в размере 5 % от стоимости подлежащих оплате выполненных и принятых Работ за отчетный месяц (пункт 4.3.2).

Согласно пункту 4.5. договора Гарантийные удержания, указанные в п. 4.3.2. Договора выплачиваются Подрядчику в течение 30 календарных дней после окончания

гарантийного срока на результат выполненных Работ, указанного в п. 8.2. Договора, которым установлено, что гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 2 года и исчисляется с момента выполнения всего объема Работ по Договору и подписания Сторонами последнего акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- № С0100036183 от 13.05.2021 на выполнение общестроительных работ по Объекту: АБК шахты «Инаглинская» АО «ГОК «Инаглинский» (далее по тексту - Договор № СО 100036183) , по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить общестроительные работы по Объекту: АБК шахты «Инаглинская» АО «ГОК «Инаглинский» (далее - Работы) и сдать Заказчику Работы по актам приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с локальным сметным расчетом № 1 (Приложением № 1 к Договору), рабочей документации шифр Р21152-11.4.1-АР изм. 3, а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную Договором стоимость.

В соответствие с пунктом 2.1. цена по договору является приблизительной, определяется локальным сметным расчетом № 1 (Приложением № 2 к Договору) и составляет 182 276 806 руб.

Пунктом 4.1 договора установлено, что Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 8 % от стоимости Работ по Договору (в сумме не более 14 600 000 руб. в течение 10 рабочих дней от даты подписания Сторонами Договора и предоставления Подрядчиком счета на оплату.

Согласно пункту 4.3. договора оплату выполненных и принятых Работ Заказчик производит ежемесячно в следующем порядке:

- Заказчик удерживает 8 % от стоимости подлежащих оплате выполненных и принятых Работ за отчетный месяц в счет погашения аванса (пункт 4.3.1).

- Заказчик производит гарантийные удержания в размере 5 % от стоимости подлежащих оплате выполненных и принятых Работ за отчетный месяц (пункт 4.3.2).

Согласно пункту 4.5. договора Гарантийные удержания, указанные в п. 4.3.2. Договора выплачиваются Подрядчику в течение 30 календарных дней после окончания гарантийного срока на результат выполненных Работ, указанного в п. 8.2. Договора, которым установлено, что гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 2 года и исчисляется с момента выполнения всего объема Работ по Договору и подписания Сторонами последнего акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- № 39114 от 03.12.2021 на выполнение работ по устройству наружных сетей канализации в районе АБК шахты «Инаглинская» АО «ГОК «Инаглинский» (далее по тексту - Договор № 39114), по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству наружных сетей канализации в районе АБК шахты «Инаглинская» АО «ГОК «Инаглинский», (далее - Работы) и сдать Заказчику Работы по актам приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с рабочей документацией шифр Р19951-НК1, Р21152-НК1, локальным сметным расчетом № 13-10 (Приложением № 3 к Договору), а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную Договором стоимость.

В соответствие с пунктом 2.1. цена по договору является приблизительной, определяется локальным сметным расчетом № 1 (Приложением № 2 к Договору) и составляет 4 926 096 руб.

Пунктом 4.1 договора установлено, что Оплату выполненных и принятых Работ Заказчик производит ежемесячно за минусом гарантийного удержания в размере 5 % от стоимости подлежащих оплате выполненных и принятых Работ в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами за отчетный месяц УПД, акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком исполнительной документации.

Согласно пункту 4.2. договора Гарантийные удержания, указанные в п. 4.1. Договора выплачиваются Подрядчику в течение 30 календарных дней после окончания гарантийного срока на результат выполненных Работ.

Пунктом 8.2. Договора установлено, что гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 1 год и исчисляется с момента выполнения всего объема Работ по Договору и подписания Сторонами последнего акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- № 39119 от 03.12.2021 на выполнение работ по устройству подводящих сетей тепло-водоснабжения на Объект «Развитие железнодорожной инфраструктуры АО «ГОК «Инаглинский». Строительство железнодорожной станции «Инаглинская-2» (далее по тексту -Договор № 39119), по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству подводящих сетей тепло-водоснабжения на Объект «Развитие железнодорожной инфраструктуры АО «ГОК «Инаглинский». Строительство железнодорожной станции «Инаглинская-2», (далее - Работы) и сдать Заказчику Работы по актам приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с

рабочей документацией шифр 08-2021.НВС, локальным сметным расчетом № 1 (Приложением № 3 к Договору), а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную Договором стоимость.

В соответствие с пунктом 2.1. цена по договору является приблизительной, определяется локальным сметным расчетом № 1 (Приложением № 3 к Договору) и составляет 31 367 002,80 руб.

Пунктом 4.1 договора установлено, что Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Работ по Договору (в сумме не более 9 410 100,84 руб. в течение 10 рабочих дней от даты подписания Сторонами Договора и предоставления Подрядчиком счета на оплату.

Согласно пункту 4.2. договора оплату выполненных и принятых Работ Заказчик производит ежемесячно в следующем порядке:

- Заказчик удерживает 30 % от стоимости подлежащих оплате выполненных и принятых Работ за отчетный месяц в счет погашения аванса (пункт 4.2.1).

- Заказчик производит гарантийные удержания в размере 5 % от стоимости подлежащих оплате выполненных и принятых Работ за отчетный месяц (пункт 4.2.2).

Согласно пункту 4.4. договора Гарантийные удержания, указанные в п. 4.2.2. Договора выплачиваются Подрядчику в течение 30 календарных дней после окончания гарантийного срока на результат выполненных Работ, указанного в п. 8.2. Договора, которым установлено, что гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 2 года и исчисляется с момента выполнения всего объема Работ по Договору и подписания Сторонами последнего акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- № 37746 от 03.12.2021 на выполнение работ по устройству тепловых сетей от блочно-модульной угольной котельной до бойлерно-калориферной промплощадки существующего конвейерного штрека пл. Д19 АО «ГОК «Инаглинский» (далее по тексту - Договор № 37746) , по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству тепловых сетей от блочно-модульной угольной котельной до бойлерно-калориферной промплощадки существующего конвейерного штрека пл. Д19 АО «ГОК «Инаглинский», (далее - Работы) и сдать Заказчику Работы по актам приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с техническим заданием (Приложением № 1 к Договору), рабочей документацией шифр НВ 08-2021, локальным сметным расчетом № 1 (Приложением № 3 к Договору), а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную Договором стоимость.

В соответствие с пунктом 2.1. цена по договору является приблизительной, определяется локальным сметным расчетом № 1 (Приложением № 3 к Договору) и составляет 43 746 370,10 руб.

Пунктом 4.1 договора установлено, что Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Работ по Договору (в сумме не более 13 123 911,03 руб. в течение 10 рабочих дней от даты подписания Сторонами Договора и предоставления Подрядчиком счета на оплату.

Согласно пункту 4.2. договора оплату выполненных и принятых Работ Заказчик производит ежемесячно в следующем порядке:

- Заказчик удерживает 30 % от стоимости подлежащих оплате выполненных и принятых Работ за отчетный месяц в счет погашения аванса (пункт 4.2.1).

- Заказчик производит гарантийные удержания в размере 5 % от стоимости подлежащих оплате выполненных и принятых Работ за отчетный месяц (пункт 4.2.2).

Согласно пункту 4.4. договора Гарантийные удержания, указанные в п. 4.2.2. Договора выплачиваются Подрядчику в течение 30 календарных дней после окончания гарантийного срока на результат выполненных Работ, указанного в п. 8.2. Договора, которым установлено, что гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 2 года и исчисляется с момента выполнения всего объема Работ по Договору и подписания Сторонами последнего акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- № 37414 от 13.08.2021 на выполнение специальных работ по разделам рабочей документации «ЭО», «ЭМ» на объекте: «АБК шахты «Инаглинская» АО «ГОК «Инаглинский» (далее по тексту - Договор № 37414), по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить специальные работы по разделам ЭО,ЭМ на Объекте: АБК шахты «Инаглинская» АО «ГОК «Инаглинский» (далее - Работы) и сдать Заказчику Работы по актам приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с локальными сметными расчетами № 1, № 2 (Приложениями № 1, № 2 к Договору), рабочей документации шифр Р21152-1-1.4.1-ЭО, Р21152-1-1.4.1-ЭМ , а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную Договором стоимость.

В соответствие с пунктом 2.1. цена по договору является приблизительной, определяется локальным сметным расчетом № 1 (Приложением № 2 к Договору) и составляет 36 944 784 руб.

Пунктом 4.1 договора установлено, что Оплату выполненных и принятых Работ Заказчик производит ежемесячно за минусом гарантийного удержания в размере 5 % от стоимости подлежащих оплате выполненных и принятых Работ в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами за отчетный месяц УПД, акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком исполнительной документации.

Согласно пункту 4.2. договора Гарантийные удержания, указанные в п. 4.1. Договора выплачиваются Подрядчику в течение 30 календарных дней после окончания гарантийного срока на результат выполненных Работ.

Пунктом 8.2. Договора установлено, что гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 2 года и исчисляется с момента выполнения всего объема Работ по Договору и подписания Сторонами последнего акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- № 40470 от 17.03.2022 на выполнение работ по устройству наружных сетей канализации на территории промплощадки «Западная» АО «ГОК «Инаглинский» (далее по тексту - Договор № 40470), по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству наружных сетей канализации на территории промплощадки «Западная» АО «ГОК «Инаглинский», (далее - Работы) и сдать Заказчику Работы по актам приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в соответствии с техническим заданием (Приложением № 1 к Договору), рабочей документацией шифр Р19951/Р21152-НК1, локальными сметными расчетами № 1 и № 2 (Приложения № 3 и № 4 к Договору), а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную Договором стоимость.

В соответствие с пунктом 2.1. цена по договору является приблизительной, определяется локальным сметным расчетом № 1 (Приложением № 2 к Договору) и составляет 98 816 076,48 руб.

Пунктом 4.1 договора установлено, что Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Работ по Договору (в сумме не более 29 644 822,94 руб. в течение 10 рабочих дней от даты подписания Сторонами Договора и предоставления Подрядчиком счета на оплату.

Согласно пункту 4.2. договора оплату выполненных и принятых Работ Заказчик производит ежемесячно в следующем порядке:

- Заказчик удерживает 30 % от стоимости подлежащих оплате выполненных и принятых Работ за отчетный месяц в счет погашения аванса (пункт 4.2.1).

- Заказчик производит гарантийные удержания в размере 5 % от стоимости подлежащих оплате выполненных и принятых Работ за отчетный месяц (пункт 4.2.2).

Согласно пункту 4.4. договора Гарантийные удержания, указанные в п. 4.2.2. Договора выплачиваются Подрядчику в течение 30 календарных дней после окончания гарантийного срока на результат выполненных Работ, указанного в п. 8.2. Договора, которым установлено, что гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 2 года и исчисляется с момента выполнения всего объема Работ по Договору и подписания Сторонами последнего акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Истец полагая, что ему не возвращены гарантийные удержания по истечению гарантийного срока, направил в адрес ответчика уведомления об оплате гарантийных удержаний (исх. № 60 от 04.03.2025 и № 61 от 05.03.2025), выставлены счета на оплату, с просьбой произвести оплату гарантийных удержаний в срок до 30.03.2025, однако не по одному из вышеперечисленных договоров подряда ни писем о сроках оплаты, ни денежных средств от Ответчика в адрес Истца не поступило.

01.04.2025 в адрес ответчика была направлена Досудебная претензия № 96, в которой указывалось требование в срок до 05.04.2025 произвести оплату сумм гарантийных удержаний по всем вышеуказанным договорам подряда.

Требования истца ответчиком оставлены без удовлетворения, что послужило основанием для обращения его в суд с рассматриваемым иском.

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований указывает, что стороны подписали акт зачета встречных однородных требований, которым прекратили взаимные обязательства путем проведения зачета встречных однородных требований, срок которых наступил, на общую сумму 1 701 424,97 руб., в связи с чем полагает, что истцом неверно произведен расчет задолженности.

Истец с учетом возражений ответчика уточнил исковые требования.

С учетом уточнения исковых требований, у сторон разногласий по сумме гарантийных удержаний, подлежащих возврату истцу не имеется, с учетом состоявшегося зачета общая сумма составила 18 750 591,89 руб.

Разногласия сторон возникли по размеру заявленной неустойки за просрочку возврата гарантийных удержаний, и порядку расчета.

Суд, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пришел к следующим выводам.

Согласно статье 123 Конституции Российской Федерации, статьям 7, 8, 9 АПК РФ, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон.

В соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Кодексом.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Заключенный между сторонами договор является договором подряда, отношения по которому регулируются параграфами 1, 3 главы 37 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 722 ГК РФ, в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 ГК

РФ). Перечень возможных способов обеспечения исполнения обязательств является открытым (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора, поэтому стороны вправе предусмотреть в договоре и такой способ обеспечения исполнения обязательств, как гарантийное удержание (пункты 1, 2 статьи 1, подпункт 1 пункта 1 статьи 8, статья 421 ГК РФ).

Из указанного принципа следует право сторон по своему усмотрению определить порядок уплаты всей или части стоимости при ненаступлении какого-либо обстоятельства в течение определенного срока после передачи результата работ (например, оплата производится, если в гарантийный период не будут выявлены скрытые недостатки переданного объекта), что согласно сложившейся практике деловых отношений именуется гарантийным удержанием. Такой порядок оплаты с экономической точки зрения выполняет обеспечительную функцию, является относительно распространенным в обороте и не противоречит пункту 2 статьи 746 ГК РФ (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2013 № 4030/13, определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2017 № 304-ЭС17-1977).

Гарантийное удержание представляет собой договорное условие о возможности удержания заказчиком части стоимости работ для покрытия возможных расходов, вызванных ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств в отношении качества работ. Поскольку гарантийное удержание законодательством не предусмотрено, стороны при включении данного условия в договор должны согласовать размер, порядок удержания при оплате работ; в договоре также могут быть согласованы порядок и срок возврата гарантийного удержания (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.12.2021 № 305-ЭС21-14922 по делу № А40-94432/2020).

Иными словами, гарантийное удержание представляет собой часть денежной суммы, которая причитается к выплате одной стороне договора за предоставленное ею исполнение и удерживается ее контрагентом в качестве способа обеспечения исполнения обязательств. Если свои обязательства такая сторона договора выполняет в полном объеме, сумма гарантийного удержания подлежит перечислению в сроки, установленные таким договором.

Факт выполнения истцом обязательств по договорам подтверждается материалами дела и сторонами.

Судом установлено, что гарантийные удержания составляют:

по Договору № С0100032206 – 104 281,69 руб., последние формы КС-2 и КС-3 подписаны 30.07.2022, следовательно, гарантийный срок истек 30.07.2024;

по Договору № С0100036183 – 9 791 585,61 руб., последние формы КС-2 и КС-3 подписаны 30.09.2022, следовательно, гарантийный срок истек 30.09.2024;

по Договору № 39114 – 397 541,22 руб., последние формы КС-2 и КС-3 подписаны 31.03.2022, следовательно, гарантийный срок истек 31.03.2023;

по Договору № 39119 – 1 403 254,02 руб., последние формы КС-2 и КС-3 подписаны 31.10.2022, следовательно, гарантийный срок истек 31.10.2024;

по Договору № 37746 – 1 542 167,32 руб., последние формы КС-2 и КС-3 подписаны 30.09.2022, следовательно, гарантийный срок истек 30.09.2024;

по Договору № 37414 – 246 028,51 руб., последние формы КС-2 и КС-3 подписаны 28.02.2023, следовательно, гарантийный срок истек 28.02.2025;

по Договору № 40470 – 5 265 733,52 руб., последние формы КС-2 и КС-3 подписаны 28.02.2023, следовательно, гарантийный срок истек 28.02.2025.

Расчет суммы гарантийных удержаний судом проверен, признан верным, правильность расчета заказчиком не опровергнута, разногласий по сумме у сторон не имеется, доказательств оплаты гарантийных удержаний по договорам также не представлено.

При изложенных обстоятельствах суд удовлетворяет требование истца о взыскании с ответчика 18 750 591,89 рублей гарантийных удержаний по договорам подряда № С0100032206 от 04.09.2020, № С01000З618З от 1З.05.2021, № 39114 от 03.12.2021, № 39119 от 03.12.2021, № 37746 от 0З.12.2021, № 37414 от 13.08.2021, № 40470 от 17.03.2022.

Также истец просит взыскать 1 675 069,74 руб. неустойки на основании пунктом 9.2 договоров подряда, начисленные на сумму гарантийного удержания.

В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (статья 331 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 9.2. Договоров подряда в случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты выполненных Работ. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,025 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности. Начисление неустойки осуществляется с учетом пункта 9.8. Договоров.

Пунктом 9.8. Договоров установлено, что при не достижении соглашения, споры по Договору разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана принять меры к ее разрешению и направить ответ другой Стороне в течение 30 календарных дней, от даты её получения. В указанный период начисление неустойки не производится.

Рассмотрев материалы дела, суд полагает, что на сумму гарантийного удержания неустойка не подлежит начислению.

Условиями договоров не предусмотрена ответственность заказчика за нарушение срока возврата гарантийного удержания. Размер гарантийного удержания не входит в сумму задолженности, поскольку природа гарантийного удержания иная, чем оплата (является способом обеспечения обязательства).

Данная правовая позиция отражена в определениях Верховного суда Российской Федерации № 305-ЭС18-24788 от 21.01.2019, № 309-ЭС20-14897 30.09.2020.

В отсутствие прямого указания на начисление неустойки за нарушение сроков возврата гарантийного удержания, спорное условие договора подлежит толкованию в пользу лица, привлекаемого к ответственности.

Несмотря на то, что в рассматриваемом случае формирование гарантийного фонда было произведено не путем внесения (перечисления) денежных средств заказчику, а путем уменьшения суммы, подлежащей оплате заказчиком за поставленное оборудование, правовая природа переходящих фонд гарантийного удержания денежных средств и задолженности по оплате товара различна. По существу переходящие в согласованном сторонами порядке фонд гарантийного удержания денежные средства имеют природу обеспечительного платежа, который обеспечивает денежное обязательство поставщика

(которое может возникнуть в будущем), связанное с качеством поставленного оборудования и выполненных работ по его монтажу (статья 381.1 ГК РФ). Такой платеж, в силу его компенсационного характера, направлен на обеспечение контрагентом существующего обязательства по договору, в том числе, обязанности по возмещению убытков или уплате неустойки в случае имевших место с его стороны нарушений. Формирование гарантийного фонда призвано упростить процедуру удовлетворения соответствующих требований заказчика (определения Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2019 № 305-ЭС18-24788, от 30.09.2020 № 309-ЭС20-14897).

Таким образом, начисление неустойки на сумму гарантийного удержания неправомерно.

На основании изложенного, суд удовлетворяет требования истца в части взыскания с ответчика суммы гарантийных удержаний в размере 18 750 591,89 руб. В удовлетворении остальной части иска суд отказывает.

В силу статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 46 от 11.07.2014 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» сумма государственной пошлины исчисляется в полных рублях: сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля.

Государственная пошлина при цене иска 20 425 661,63 руб. составляет 429 257 руб., при подаче искового заявления истец уплатил государственную пошлину в размере 437 060 руб. по платежному поручению от 23.07.2025 № 493.

Учитывая результат рассмотрения настоящего спора, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего иска в размере 394 054 руб. пропорционально удовлетворенным требованиям (18 750 591,89 * 429 257 / 20 425 661,63), истцу подлежит возвратить из федерального бюджета 7 803 рублей государственной пошлины излишне уплаченной платежным поручением от 23.07.2025 № 493.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с акционерного общества «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 18 750 591,89 руб., состоящее из суммы гарантийных удержаний по договорам подряда № С0100032206 от 04.09.2020, № С01000З618З от 1З.05.2021, № 39114 от 03.12.2021, № 39119 от 03.12.2021, № 37746 от 0З.12.2021, № 37414 от 13.08.2021, № 40470 от 17.03.2022; а также расходы по оплате государственной пошлины 394 054 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину 7 803 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья М.Н. Гоголева