1615/2018-251225(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-2657/2018

г. Казань

27 ноября 2018 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Сотова А.С., 

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания  

помощником судьи Ефремовой Т.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

истца - акционерного общества "Агропромышленный парк "Казань", г. Казань (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ответчику - публичному акционерному обществу "Камгэсэнергострой",  

г.Набережные Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

при участии третьих лиц - Министерство земельных и имущественных отношений  

Республики Татарстан, г.Казань, государственное казенное учреждение "Главное  

инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан", г.Казань и государственное  

унитарное предприятие Республики Татарстан "Головная территориальная проектно- 

изыскательская научно-производственная фирма "Татинвестгражданпроект"  

об обязании безвозмездно устранить недостатки выполненных в рамках  

государственного контракта № 200/2 от 27.09.2011г. работ и 

о взыскании судебной неустойки за неисполнения судебного акта в размере 50 000  

рублей за каждый день неисполнения судебного акта с участием представителей: 

от истца - ФИО1, по доверенности от 09.01.2018 г.  от ответчика –ФИО2, по доверенности от 09.01.2018 г.  от третьего лица (ГУП «ТИГП») –ФИО3, по доверенности от 25.12.2017 г.  

от третьих лиц (МЗиО и ГКУ «ГИСУ») – не явились, извещены  

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 174 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество "Камгэсэнергострой", г.Набережные Челны,  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течении трех месяцев с момента вступления  настоящего решения в законную силу на объекте «Агропромышленный парк «Казань»,  расположенного по адресу: 

<

...> (далее объект) устранить следующие  недостатки выполненных работ по устройству покрытия кровли в блоках №№ 1, 2, 3, 4, и 5 и  работы по устройству межэтажных перекрытий объекта в объемах, установленных в  экспертных заключениях общества с ограниченной ответственностью «Институт  негосударственной экспертизы» № 359/18 и № 374/18 и способом в них указанном:  

Кровли блока № 5, участок № 1: 

- образовавшиеся вздутия кровельного ковра (с водой, воздушных) по оси 51/А-Л  устранить путем просушки кровли, частичной замены теплоизоляции, полной замены стяжки  и рулонного ковра;  

- слой пароизоляции не заведен на поверхность стены по периметру стен устранить  путем монтажа пароизоляции на поверхность стены в соответствии с требованиями п.5.12 СП  17.13330.2011;  

- протечки в местах примыкания кровельного покрытия к парапетам и другим  вертикальным поверхностям устранить путем замены примыканий и рулонного ковра кровли  Блока 5 в осях 51-54/А-Л;  

- отсутствие прижимной рейки крепления кровельного ковра к стене со слоем  герметизирующей мастики по периметру парапета устранить путем крепление рулонного  ковра к стене по требованию норм и установке прижимной рейки и заделки герметиком;  

- дефекты сопряжения мембраны с элементами ограждения, трещины в местах  примыкания устранить путем выполнения сопряжения мембраны с элементами ограждения в  соответствии с требованиями норм;  

- отсутствие защитного фартука парапета с уклоном и свесом его от поверхности стены  не менее 60 мм устранить путем выполнения защитного фартука из оцинкованной кровельной  стали с учетом требований норм;  

- отсутствие защитного фартука из кровельной стали над стойками фахверка с уклоном  и свесом от поверхности стойки устранить путем выполнения защитного фартука из  кровельной стали в соответствии с требованиями норм.  

Примыкание мембранной кровли к зенитному фонарю блока № 5:  

- нарушение герметичности примыкания мембранной кровли к зенитному  фонарю устранить путем проведения ремонтных работы, завести мембрану на поверхность  стенки зенитного фонаря;  

- отсутствие уплотнителя в месте примыкания поликарбоната к алюминиевому  профилю фонаря устранить путем установки уплотнителя.  

Устройство парапета по оси 54/А-Л блока № 5: 

- протекание кровли в месте парапета устранить путем заведения гидроизоляции на  парапет и выполнения фальцевых стыков листов защитного фартука парапета и элемента  фасада согласно нормативным документам.  

Устройство воронок внутреннего водостока в осях 54/А-Л блока № 5: 

- отсутствует листвоуловитель воронки внутреннего водостока рулонной кровли и  дополнительный слой рулонного ковра в зоне воронки путем Исправить уклон в радиусе  действия воронки.  

Примыкание рулонного ковра к стенам. Участок № 3. Блок № 5: 

- отсутствие примыкания рулонного ковра кровли к стене под навесным фасадом и  рулонный ковер не закреплен к стене устранить путем выполнения узла по проекту и  требованиям норм.  

Лестница выхода на кровлю в осях 53-54/К-Л. Участок № 4. Дверной проем. Блок № 5: 

- лестницы выхода на кровлю. Отметка низа дверного проема расположена на  расстоянии менее 150 мм от уровня кровли путем выполнения дверного проема согласно  требованиям норм и узла проекта;  

- рулонный ковер не заведен на стену лестницы и не прикреплен прижимной рейкой  под вентфасадом путем выполнения устройства дверного проема согласно требованиям норм  и узла проекта;  

- отсутствие галтели из теплоизоляции в месте примыкания к стене устранить путем  выполнения устройства дверного проема согласно требованиям норм и узла проекта.  

Лестница выхода на кровлю в осях 53-54/К-Л. Участок № 4. Устройство кровли и  парапета. Блок № 5:  

- устройство парапета из сэндвич-панелей по наружным стенам, протечки внутри  помещения лестницы, следы коррозии стоек фахверка и ригелей наружных стен устранить  путем выполнения: заглушки из стали по верху стоек фахверка, утепления стойки на всю  высоту парапета по периметру и внутри ивыполнения по верху парапета защитного фартук с  уклоном и свесами от поверхности стены не менее 60 мм;  

- отслаивание кровельного ковра в месте примыкания к парапету устранить путем  выполнения этого узла в соответствии с проектом.  

Кровля в осях 51-54/К-Л. Устройство примыканий кровли к стойкам площадки под  оборудование. Блок № 5:  

- трещины, сплошные каверны и нарушение герметичности примыкания в  местах примыкания кровли к стойкам оборудования путем гидроизоляции мест примыкания  восстановления и установки обжимных хомутов из стали с промазкой стыков герметиком.  

Блок № 4. Участок № 5. Протечки в покрытии в местах прохода вентшахт через кровлю:  

- трещины в местах заделки примыканий установки вентиляционного оборудования  устранить путем установки компенсатора в месте примыкания 2-х шахт из оцинкованной  кровельной стали, с заделкой их герметиком;  

- дефекты примыкания фланцев вентиляционного оборудования утстранить путем  выпрямления фланцов вентиляционного оборудования, крепления их к стакану болтом и  восстановления герметика.  

Блок № 4. Участок № 6. Лестница выхода на кровлю в осях 38-40/ОП. Покрытие. 

- неплотное прилегание мембранного покрытия к поверхности парапета лестницы,  сползание мембраны с поверхности кровли устранить путем закрепления мембранного  покрытия лестницы к парапету в соответствии с требованиями норм;  

- протечки кровли лестницы устранить путем выполнения защитного фартука из  оцинкованной кровельной стали на все ширину парапета;  

- отметка низа проема расположена на расстоянии менее 150 мм, мембрана не  закреплена прижимной рейкой к стене устранить путем выполнения устройства дверного  проема согласно требованиям норм и узла проекта;  

- механические повреждения мембраны в отдельных местах устранить путем  выполнения ходовых дорожек на поверхности мембранной кровли.  

Устройство парапета Блока № 4 

- отсутствие защитного фартука из кровельной стали по стене и над стойками фахверка  с уклоном и свесом от поверхности стен устранить путем установки защитного фартука из  оцинкованной стали;  

- неплотное соединение листов сэндвич-панели парапета без герметизации стыка и  уклона устранить путем установки защитного фартука из оцинкованной стали с уклоном,  фальцевыми стыками листов и герметизацией швов.  

Блок № 3. Участок № 7. Покрытие входов по оси 16/Г-Ж 

- следы протекания кровли на плите покрытия устранить путем устранения протечки,  ремонта кровли, парапета и мест примыканий к стенам и витражам;  

- наросты мха удалить путем очистки рулонного ковра; 

- трещины кровельного ковра и разрушение его покрытия устранить путем полной  замены покрытия кровли;  

- рулонный ковер не заведен на парапет, сползание кровельного материала с  вертикальной поверхности парапета и отсутствие галатели по периметру парапета устранить  путем заведения и крепления рулонного ковра на парапет.  

Блок № 1. Санузлы. 

- следы протечки кровли на потолке устранить путем выполнения защитного фартука  из кровельной стали в соответствии с требованиями норм, выполнения ходовых дорожек на  поверхности мембранной кровли и ремонта мембранной кровли;  

Блок № 1. Узел опирания металлического ограждения на стойку. 

- трещины в швах примыкания мембраны к ограждению устранить путем выполнения  устройства узла по проекту;  

- отсутствие заглушки из листовой стали Б=4 мм торца прямоугольного профиля  ограждения устранить путем приваривания заглушки из стали б=4 мм в торце ограждения.  

Блок № 1 и № 2. Парапет кровли. 

- стыки листов фасонных элементов по верху сэндвич-панели выполнены внахлестку,  не плотное примыкание листов к парапету, отсутствие герметизации швов и отсутствие  гидроизоляции листов устранить путем плотного прижимания стыков листов к поверхности  стены и промазывания стыков герметиком, выполнения защитного фартука из оцинкованной  кровельной стали по верху парапета в соответствии с требованиями норм;  

- отсутствие защитного фартука из кровельной стали на стене и стойках фахверка  парапета с уклоном и свесом от поверхности стойки устранить путем выполнения защитного  фартука в соответствии с требованиями норм.  

Блок № 1. Участок примыкания витражной системы фасада 

- нарушение герметичности профилей стоек витража, выступающих из плоскости  фасада в виду отсутствия заглушек стоек витража устранить путем установки заглушек по  верху стоек витража и кровельного фартука по верху витража.  

Блок № 1. Участок покрытия кровли в местах установки вент.оборудования 

- отслоение мембраны по швам в местах примыканий к вентшахте устранить путем  устройства примыканий кровель из мембраны в соответствии с требованиями;  

- проколы и трещины в результате механического повреждения мембраны устранить  путем выполнения ходовых дорожек на поверхности мембранной кровли.  

- в помещении № 800 «РПЦ Рыбопереработка» выполнить демонтаж плинтуса из  керамогранитной плитки высотой 100 мм общей длиной 51,39 м, облицевать стены  помещения керамической плиткой на высоту 2500 мм общей площадью 130,58 м2, выполнить  демонтаж бетонного пола (толщиной 50 мм) с полимерным покрытием площадью 237,15 м2 с  последующим устройство бетонного пола с полимерным покрытием с устройством  разуклонки площадью 237,15 м2.;  

- в помещении № 794 «Раздевальная Ж» выполнить демонтаж плинтуса из  керамогранитной плитки высотой 100 мм общей длиной 10,455 м с последующей облицовкой  

- в помещении № 793 «Душевая Ж» выполнить демонтаж напольного покрытия из  керамогранитной плитки площадью 8,12 м2 с последующим устройство напольного покрытия  из керамогранитной плитки с разуклонки площадью 8,12 м2  

- в помещении № 815 «Коридор» выполнить демонтаж плинтуса из керамогранитной  плитки высотой 100 мм общей длиной 34,35 м с последующей облицовкой стен керамической  плиткой на высоту 2100 мм общей площадью 72,135 м2.  

- в помещении № 806 «Фасовка и упаковка готовой продукции» выполнить демонтаж  плинтуса из керамогранитной плитки высотой 100 мм общей длиной 7,74 м и демонтаж  керамической плитки стен на высоту 1600 мм общей площадью 12,384 м2 с последующей  облицовкой стен керамической плиткой на высоту 2500 мм общей площадью 19,35 м2,  демонтаж полимерного покрытия площадью 15,37 м2 и устройство напольного покрытия из  керамической плитки площадью 15,37 м2.  

- в помещении № 810 «Универсальная термокамера» выполнить демонтаж плинтуса из  керамогранитной плитки высотой 100 мм общей длиной 6,46 м и демонтаж керамической  плитки стен на высоту 1600 мм общей площадью 10,62 м2 с последующей облицовкой стен  керамической плиткой на всю высоту общей площадью 25,58 м2; демонтаж полимерного  покрытия площадью 14,97 м2 с последующим устройством напольного покрытия из  керамической плитки с разуклонкой площадью 14,97 м2.  

- в помещении № 817 «Коридор» выполнить демонтаж плинтуса из керамогранитной  плитки высотой 100 мм общей длиной 18,27 м и демонтаж облицовки из керамической плитки  высотой 1600 мм площадью 12,89 м2 с последующей облицовкой стен керамической плиткой  на высоту 2100 мм общей площадью 16,92 м2; демонтаж полимерного покрытия площадью  29,38 м2 с последующим устройством напольного покрытия из керамогранитной плитки со  шлифованной поверхностью с разуклонкой площадью 29,38 м2.  

- в помещении № 824 «Помещение отходов и упаковки» выполнить демонтаж плинтуса  из керамогранитной плитки высотой 100 мм общей длиной 8,2 м с последующей облицовкой  стен керамической плиткой на высоту 2100 мм общей площадью 17,22 м2; выполнить  демонтаж полимерного покрытия площадью 7,52 м2 с последующим устройством напольного  покрытия из керамической плитки площадью 7,52 м2.  

- в помещении № 811 «Моечная внутрицеховой тары» выполнить дооблицовку стен  керамической плиткой на всю высоту (без демонтажа существующей плитки) общей  площадью 19,0 м2; выполнить демонтаж полимерного покрытия площадью 10,26 м2с  последующим устройством напольного покрытия из керамической плитки с разуклонкой  площадью 10,26 м2.  

- в помещении № 808 «Кладовая специй» выполнить демонтаж полимерного покрытия  площадью 8,77 м2 с последующим устройством напольного покрытия из керамической плитки  

- в помещении № 807 «Кладовая упаковки материалов» выполнить демонтаж  полимерного покрытия площадью 10,4 м2 с последующим устройством напольного покрытия  из керамической плитки с разуклонкой площадью 10,4 м2.  

- в помещении № 803 «Моечная оборотной тары» выполнить дооблицовку стен  керамической плиткой на всю высоту (без демонтажа существующей плитки) общей  площадью 7,02 м2; демонтаж полимерного покрытия площадью 6,71 м2 с последующим  устройством напольного покрытия из керамической плитки площадью 6,71 м2.  

- в помещеним № 804 «Кладовая чистой тары» выполнить дооблицовку стен  керамической плиткой на всю высоту (без демонтажа существующей плитки) общей  площадью 6,21 м2; демонтаж полимерного покрытия площадью 5,4 м2 с последующим  устройством напольного покрытия из керамической плитки площадью 5,4 м2.  

- в помещении № 864 «Резерв» выполнить демонтаж бетонного пола (толщиной 50 мм) с  

полимерным покрытием площадью 216,6 м2 с последующим устройством бетонного пола с  

полимерным покрытием с разуклонкой площадью 216,6 м2. 

- в помещении № 908 «МПЦ» выполнить дооблицовку стен керамической плиткой на  всю высоту (без демонтажа существующей плитки) общей площадью 100,11 м2; демонтаж  бетонного пола (толщиной 50 мм) с полимерным покрытием площадью 167,63 м2 с  последующим устройством бетонного пола с полимерным покрытием с устройством  разуклонки площадью 167,63 м2.  

- в помещении № 912 «Помещение фасовки и упаковки готовой продукции» выполнить  дооблицовку стен керамической плиткой на всю высоту (без демонтажа существующей  плитки) общей площадью 31,11 м2; демонтаж бетонного пола (толщиной 50 мм) с  полимерным покрытием площадью 25,43 м2 с последующим устройством бетонного пола с  полимерным покрытием с устройством разуклонки площадью 25,43 м2.  

- в помещении № 911 «Помещение охлаждения и отдыха готовой продукции»  выполнить дооблицовку стен керамической плиткой на всю высоту (без демонтажа  существующей плитки) общей площадью 27,75 м2; демонтаж бетонного пола (толщиной 50 м)  с полимерным покрытием площадью 21,04 м2 с последующим устройством бетонного пола с  полимерным покрытием с устройством разуклонки площадью 21,04 м2.  

- в помещении № 910 «Помещение универсальных термокамер» выполнить  дооблицовку стен керамической плиткой на всю высоту (без демонтажа существующей  плитки) общей площадью 30,0 м2; демонтаж бетонного пола (толщиной 50 мм) с полимерным  покрытием площадью 25,06 м2 с последующим устройством бетонного пола с полимерным  покрытием с устройством разуклонки площадью 25,06 м2.  

- в помещении № 902 «ЦПП» выполнить дооблицовку стен керамической плиткой на  всю высоту (без демонтажа существующей плитки) общей площадью 124,95 м2; демонтаж  

последующим устройством бетонного пола с полимерным покрытием с устройством  разуклонки площадью 136,20 м2.  

Взыскать с публичного акционерного общества "Камгэсэнергострой", г.Набережные  Челны, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества  "Агропромышленный парк "Казань", г. Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей и оплате  судебной экспертизы в размере 220 000 рублей.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Председательствующий судья А.С. Сотов