107_33170026 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(в порядке статьи 176 АПК РФ) 

 

Дело № А40-94106/22-107-603

07 сентября 2022 года

г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при  ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело № А40-94106/22-107-603 по иску ООО "СМК"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 28.04.2015, 125480, 

<

...>, этаж подвал/помещ/офис 0/III/8 ком. 8) к  ответчику ООО "Круг" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации  30.05.1994, 140000, 

<

...> литер Р, этаж 3  помещ. 301) о взыскании суммы неустойки по договору № СМК-39/21 от 07.06.2021 в  размере 2 294 561,04 р., неустойки в размере 0,03 % от цены договора начиная с  19.03.2022 по день фактического исполнения обязательств, штрафа в размере 300 000 р.  по пункту п. 8.1.16.1 договора, штрафа в размере 1 200 000 р. по пункту 8.1.19  договора, штрафа в размере 1 300 000 р. по пункту 8.1.44 договора, встречного иска  ООО "Круг" к ООО "СМК" с требованием о взыскании задолженности за выполненные  работы по договору № СМК-39/21 от 07.06.2021 в размере 2 792 385,8 р., при участии  представителя истца (ответчика по встречному иску): ФИО2, доверенность  от 11.05.2022, паспорт, диплом, представителей ответчика (истца по встречному иску):  ФИО3, доверенность от 18.03.2021, удостоверение адвоката,  

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования ООО "СМК" к ООО "Круг" частично.  

Взыскать с ООО "Круг" в пользу ООО "СМК" сумму неустойки за нарушение  

срока выполнения работ по договору № СМК-39/21 от 07.06.2021 за период с  

20.09.2021 по 31.03.2022 в размере 2 460 279,34 р. и государственную пошлину в  

размере 23 408 р. В остальной части отказать в удовлетворении иска. 

Удовлетворить встречные исковые требования ООО "Круг" к ООО "СМК"  

полностью. 

Взыскать с ООО "СМК" в пользу ООО "Круг" сумму задолженности за  

выполненные работы по договору № СМК-39/21 от 07.06.2021 в размере 2 792 385,8 р.  

и государственную пошлину в размере 36 963 р. Произвести зачет первоначальных и встречных требований. 

Взыскать с ООО "СМК" в пользу ООО "Круг" сумму задолженности за  

выполненные работы по договору № СМК-39/21 от 07.06.2021 в размере 332 106,46 р. и  

государственную пошлину в размере 13 555 р. Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  

течении месяца со дня принятия. 

СУДЬЯ М.В. Ларин