Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело  №

А04-1018/2019

г. Благовещенск

22 марта 2019 года

изготовление решения в полном объеме

18 марта 2019 года

объявлена резолютивная часть решения

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Швец О.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Амурская дорожная строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к

акционерному обществу «Амурские коммунальные системы» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 18 270 769,25 руб., (с учетом уточнения 5 986 828,19 рублей)

при участии в заседании: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 10.01.2018 № 5;

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 24.08.2016 № 46 (до перерыва).

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Амурская дорожная строительная компания» (далее – истец, ООО «АДСК») с исковым заявлением к акционерному обществу «Амурские коммунальные системы» (далее – ответчик, АО «АКС») о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда от 26.04.2018 № 06-/-14130 в сумме 18 270 769 руб.

Заявленные требования обоснованы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору подряда от 26.04.2018 № 06-/-14130 в части оплаты выполненных истцом работ. 

Истец в предварительном судебном заседании заявил ходатайство об уточнении заявленных требований о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда от 26.04.2018 № 06-/-14130 в сумме 5 986 828 руб.

Ответчик в предварительном судебном заседании отзыв не представил, подтвердил наличие задолженности по оплате выполненных истцом работ по договору подряда от 26.04.2018 № 06-/-14130 в размере 5 986 828 руб..

В предварительном судебном заседании 18.03.2019 в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) объявлялся перерыв.

Истец в предварительном судебном заседании после перерыва заявил ходатайство об уточнении заявленных требований о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда от 26.04.2018 № 06-/-14130 за период с 10.09.2018 по 27.11.2018 в сумме 5 986 828 руб.

Судом уточненные исковые требования приняты к рассмотрению на основании части 1 статьи 49 АПК РФ.

Ответчик в предварительное судебное заседание после перерыва не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом в соответствии со статьями 121-123 АПК РФ.

Предварительное судебное заседание после перерыва проводилось в отсутствие представителя ответчика на основании части 5 статьи 163 АПК РФ.

Судом открыто судебное заседание в первой инстанции после завершения предварительного заседания, поскольку от лиц, участвующих в деле, не поступило возражений против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании непосредственно после завершения предварительного заседания, о чем вынесено протокольное определение (часть 4 статьи 137 АПК РФ).

В судебном заседании истец поддержал  уточненные требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Исследовав доводы истца, материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

26.04.2018 между АО «АКС» (заказчик) и ООО «АДСК» (подрядчик) заключен договор подряда № 06-/-14130 (далее – договор), согласно пункту 1.1 которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство, квалифицированно и качественно выполнить работы по восстановлению дорожного покрытия после ремонта инженерных сетей согласно техническому заданию (приложение № 1 к договору) в соответствии с заявками заказчика по: восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части, восстановлению асфальтобетонного покрытия дворового подъезда, восстановлению асфальтобетонного тротуара, восстановлению дорожного бордюрного (бортового) камня, восстановлению тротуарного бордюрного (бортового) камня, восстановлению асфальтобетонного покрытия вокруг колодца, восстановлению покрытия тротуара из тротуарной плитки (включая стоимость плитки), содержанию перекопов и обратной засыпке.

В пункте 1.2 договора сторонами согласовано, что место выполнения работ, а также сроки выполнения работ по каждому объекту определяются в заявке заказчика, направляемой подрядчику письменно, по факсу или электронной почтой на реквизиты указанные в пункте 14 договора.

Срок выполнения работ установлен в пункте 2.1 договора:                                                              работы выполняются в течение 2 дней с момента получения заявок от заказчика; начало производства работ - с 01.05.2018; окончание производства работ - до 30.11.2018.

Согласно пункту 3.1 договора стоимость выполняемых работ по договору определяется из расчета объема работ определенного в заявке заказчика и стоимости единицы работы, указанной в локальных сметных расчетах (приложение № 2 к договору) и не может превышать суммы 29 470 769,28 руб., в том числе НДС 4 491 541, 08 руб. 

Расчет за выполненные работы по договору производится заказчиком в течение 30 календарных дней на основании счетов и счетов-фактур, которые должны быть выставлены заказчику не позднее 5 дней после подписания справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и акта приемки выполненных работ по форме КС-2 (пункт 3.2 договора).

В соответствии с пунктом 3.3 договора оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, после приемки результатов выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки работ.

Пунктом 12.1 договора предусмотрено, что договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Дополнительным соглашением от 09.10.2018 стороны изменили пункт 3.1 договора, изложив его в новой редакции, согласно которой стоимость выполняемых работ по договору определяется из расчета объема работ определенного в заявке заказчика и стоимости единицы работы, указанной в локальных сметных расчетах (приложение № 2 к договору) и не может превышать суммы 35 226 337,28 руб., в том числе НДС 5 373 509,08 руб. 

В техническом задании к договору стороны согласовали основные требования к выполняемым работам, в локальных сметных расчетах №№ 1-9 заказчиком и подрядчиком согласованы виды и стоимость восстановительных работ.

В доказательство выполнения подрядчиком работ по восстановлению дорожного покрытия после ремонта инженерных сетей по договору подряда от 26.04.2018 № 06-/-14130 на общую сумму 33 280 341,93 руб. ООО «АДСК» в материалы дела представлены подписанные обеими сторонами акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Истец указывает, что выставленные ответчику счета-фактуры для оплаты выполненных работ по восстановлению дорожного покрытия после ремонта инженерных сетей были оплачены ответчиком частично на общую сумму 27 293 513,74 руб., в подтверждение чего в материалы дела представлены платежные документы, подписанный истцом и ответчиком акт сверки взаимных расчетов по договору  за период с 01.01.2018 по 20.12.2018, акт сверки взаимных расчетов по за период с 01.01-2019 по 15.03.2019.

Претензией от 12.12.2018 ответчику предложено оплатить возникшую задолженность в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии, которая оставлена ответчиком без исполнения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями. 

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает необходимым уточненные исковые требования удовлетворить в полном объеме по следующим основаниям.

Исходя из толкования условий заключенного договора от 26.04.2018 № 06-/-14130 и возникших обязательственно-правовых отношений между сторонами, суд приходит к выводу, что в спорных правоотношениях подлежат применения нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Согласно нормам статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В пункте 1 статьи 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со статьями 307, 309 ГК РФ в силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности; обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Статья 310 ГК РФ предусматривает недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.

Судом установлено, что ООО «АДСК» на основании договора подряда от 26.04.2018 № 06-/-14130 обязалось осуществить работы по восстановлению дорожного покрытия после ремонта инженерных сетей согласно техническому заданию (приложение № 1 к договору), а АО «АКС» обязалось оплатить эти работы в течение 30 календарных дней на основании счетов и счетов-фактур, которые должны быть выставлены заказчику не позднее 5 дней после подписания справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

Факт выполнения истцом работ по восстановлению дорожного покрытия после ремонта инженерных сетей по договору подряда от 26.04.2018 № 06-/-14130 на общую сумму 33 280 341,93 руб. подтверждается подписанными обеими сторонами актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписаны сторонами без возражений и замечаний, в том числе в отношении работ, выполненных подрядчиком по договору подряда от 26.04.2018 № 06-/-14130 в период с 10.09.2018 по 27.11.2018 на общую сумму 5 986 828,19 руб., а именно: № АВК-49 от 10.09.2018 на сумму 102 054,66 руб., № АВК-50 от 10.09.2018 на сумму 896,80 руб.,  № АВК-51 от 10.09.2018 на сумму 40 397,30 руб.,  № АВК-52 от 10.09.2018 на сумму 26 219,60 руб.,  № АВК-53 от 10.09.2018 на сумму 4 592,56 руб.,  № АВК-54 от 10.09.2018 на сумму 1 970 446,60 руб., № АВК-55 от 03.10.2018 на сумму 10 684,90 руб.,  № АВК-56 от 03.10.2018 на сумму 568 251,42 руб., № АВК-57 от 03.10.2018 на сумму 47 109,14 руб.,  № АВК-58от 03.10.2018на сумму 36 109,18 руб.,  № АВК-59 от 03.10.2018 на сумму 27 553,00 руб., № АВК-60 от 03.10.2018 на сумму 21 173,92 руб., № АВК-61 от 03.10.2018 на сумму 397 425,18 руб.,  № АВК-62 от 03.10.2018 на сумму 128 186,94 руб., № АВК-63 от 23.10.2018 на сумму 56 039,38 руб., № АВК-64 от 25.10.2018 на сумму 73 918,74 руб., № АВК-65 от 25.10.2018 на сумму 384 160,80 руб., № АВК-66 от 25.10.2018 на сумму 54 409,80 руб.,  № АВК-67 от 26.10.2018 на сумму 36 338,10 руб.,  № АВК-68 от 26.10.2018 на сумму 23 496,16 руб.,  № АВК-69 от 26.10.2018 на сумму 38 678,04 руб., № АВК-70 от 07.11.2018 на сумму 561 490,02 руб., № АВК-71 от 07.11.2018 на сумму 16 902,32 руб., № АВК-72 от 07.11.2018 на сумму 50 075,66 руб.,  № АВК-73 от 07.11.2018 на сумму 84 085,62 руб.,  № АВК-74 от 07.11.2018 на сумму 11 910,92 руб., № АВК-75 от 07.11.2018 на сумму 13 567,64 руб., № АЭСС-7 от 01.10.2018 на сумму 52 390,82 руб.,  № АЭСС-25 от 10.09.2018 на сумму 35 800,02 руб., № АЭСС-26 от 10.09.2018 на сумму 3 890,46 руб., № АЭСС-27 от 10.09.2018 на сумму 40 241,54 руб.,  № АЭСС-28 от 02.10.2018 на сумму 11 388,18 руб., № АЭСС-29 от 02.10.2018на сумму 2 481,54 руб., № АЭСС-30 от 02.10.2018 на сумму 9 488,38 руб., № АЭСС-31 от 23.10.2018 на сумму 17 873,46 руб., № АЭСС-32 от 23.10.2018 на сумму 10 820,60 руб., № АЭСС-33 от 23.10.2018 на сумму 4 014,36 руб., № АЭСС-34 от 06.11.2018 на сумму 41 934,84 руб.,  № АЭСС-35 от 06.11.2018 на сумму 4 264,52 руб., № АЭСС-36 от 06.11.2018 на сумму 2 275,04 руб., № ТП-АВК-3 от 28.08.2018 на сумму 228 385,71 руб.,  № ТП-АВК-4 от 10.09.2018 на сумму 36 549,32 руб., № ТП-АВК-5 от 03.10.2018 на сумму 29 397,34 руб.,  № ТП-АВК-6 от 03.10.2018 на сумму 12 133,94 руб.,  № ТП-АВК-7 от 03.10.2018 на сумму 122 957,18 руб., № ТП-АВК-8 от 26.10.2018 на сумму 60 194,16 руб., № ТП-АВК-9 от 26.10.2018 на сумму 83 771,74 руб., № ТП-АВК-10 от 26.10.2018 на сумму 343 057,86 руб.,  № ТП-АВК-11 от 27.11.2018 на сумму 47 342,78 руб.

Материалами дела, в том числе платежными поручениями, актами сверок взаимных расчетов подтверждается и не оспаривается ответчиком, что выполненные истцом работы по восстановлению дорожного покрытия после ремонта инженерных сетей по договору подряда от 26.04.2018 № 06-/-14130 на общую сумму 33 280 341,93 руб. оплачены заказчиком частично.

По счетам-фактурам, выставленным для оплаты работ, выполненных в период с 10.09.2018 по 27.11.2018 на общую сумму 5 986 828,19 руб., оплата ответчиком произведена не была, в том числе по счетам-фактурам № 172 от 10.09.2018, № 173 от 10.09.2018, № 174 от 10.09.2018, № 175 от 10.09.2018, № 176 от 10.09.2018, № 177 от 10.09.2018, № 197 от 03.10.2018, № 198 от 03.10.2018, № 199 от 03.10.2018, № 200 от 03.10.2018, № 201 от 03.10.2018, № 202 от 03.10.2018, № 203 от 03.10.2018 № 204 от 03.10.2018 № 228 от 23.10.2018, № 229 от 25.10.2018, № 230 от 25.10.2018, № 231 от 25.10.2018, № 232 от 26.10.2018, № 233 от 26.10.2018, № 234 от 26.10.2018, № 253 от 07.11.2018, № 254 от 07.11.2018, № 255 от 07.11.2018, № 256 от 07.11.2018, № 257 от 07.11.2018, № 258 от 07.11.2018, № 51 от 01.10.2018, № 182 от 10.09.2018, № 183 от 10.09.2018, № 184 от 10.09.2018, № 216 от 02.10.2018, № 217 от 02.10.2018, № 218 от 02.10.2018, № 242 от 23.10.2018, № 243 от 23.10.2018, № 244 от 23.10.2018, № 247 от 06.11.2018, № 248 от 06.11.2018, № 249 от 06.11.2018, № 152 от 28.08.2018, № 178 от 10.09.2018, № 205 от 03.10.2018, № 206 от 03.10.2018, № 207 от 03.10.2018, № 235 от 26.10.2018, № 236 от 26.10.2018, № 237 от 26.10.2018, № 261 от 27.11.2018.

По уточненному расчету истца задолженность ответчика по оплате выполненных за период с 10.09.2018 по 27.11.2018 работ по договору подряда от 26.04.2018 № 06-/-14130 составила 5 986 828,19 руб. 

Доказательств оплаты указанной задолженности с приложением соответствующих документов, на момент рассмотрения настоящего спора, сторонами не представлено.

Положениями статьи 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В силу части 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Названная правовая позиция сформулирована в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование своих требований, наличие задолженности перед истцом по оплате работ по восстановлению дорожного покрытия после ремонта инженерных сетей по договору подряда от 26.04.2018 № 06-/-14130, арифметический расчет задолженности ответчиком не оспорены, контррасчет не представлен. Расчет задолженности судом проверен и признан верным.

При таких обстоятельствах требования истца о взыскании с ответчика задолженности за выполненные работы по договору подряда от 26.04.2018 № 06-/-14130 за период с 10.09.2018 по 27.11.2018 в сумме 5 986 828,19 руб., являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины с уточненной суммы исковых требований составляет 52 934 руб.

При подаче искового заявления ООО «АДСК» уплачена государственная пошлина в сумме 114 349 руб. по платежному поручению № 48 от 31.01.2019.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации при уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном статьей 333.40 настоящего Кодекса.

ООО «АДСК» надлежит возвратить из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 61 415 руб., уплаченную по платежному поручению № 48 от 31.01.2019.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца в сумме 52 934 руб.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 и 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

Взыскать с акционерного общества «Амурские коммунальные системы» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Амурская дорожная строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность по договору № 06-/-14130 от 26.04.2018 за период с 10.09.2018 по 27.11.2018 в размере 5 986 828,19 руб., расходы по уплате госпошлины в сумме 52 934 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Амурская дорожная строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета госпошлину в размере 61 415 руб. (платежное поручение № 48 от 31.01.2019)

 Решение может быть обжаловано в течение месяца в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья О.В. Швец