Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-7489/2022

09 ноября 2022 года

город Якутск

 

Резолютивная часть решения объявлена 07 ноября 2022 года.

Мотивированное решение изготовлено 09 ноября 2022 года.

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Семёновой У. Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «НерюнгриТеплоНаладка» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 16.09.2022 № 465 к обществу с ограниченной ответственностью "Сибстройсервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 640 761 рублей задолженности. 

при участии представителей:

от истца: не явились, извещены;

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 20.01.2022, паспорт, диплом (посредством Веб-конференции);

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «НерюнгриТеплоНаладка» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением от 16.09.2022 № 465 к обществу с ограниченной ответственностью "Сибстройсервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 640 761 рублей.

Суд руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил рассмотреть дело в отсутствие представителей истца, извещенных о времени и месте проведения судебного заседания.

От истца поступили: 26.10.2022 ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит взыскать с ответчика 1 596 426 руб. 25 коп., в том числе основной долг в размере 1 550 031 руб. 60 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 16 986 руб. 65 коп.; 03.11.2022 ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца. 

Ответчик ходатайствует об отложении судебного заседания для ознакомления с материалами дела.

Суд руководствуясь статьями 158, 159, 66, 49, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации:

- отказал ответчику в удовлетворении ходатайства ответчика об отложении судебного заседания, так как ответчик имел достаточно времени для ознакомления с материалами дела, в том числе в электронном виде, действия ответчика направлены на затягивание процесса;

- приобщил к материалам дела поступившие документы; 

- принимает уточнение исковых требований, так как оно не противоречит закону,  не нарушает прав других лиц, подписано полномочным лицом. 

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью «НерюнгриТеплоНаладка» (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Сибстройсервис" (заказчик) заключен договор подряда от 31.08.2021 № 31-08/21, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить монтаж трубопроводов наружных сетей тепло и водоснабжения строящегося объекта: «строительство двух очередей АО ГОК «Инаглинский» для разработки Чульмакинского и Верхне-Талуминского каменноугольных месторождений в Республике Саха (Якутия) Нерюнгринский район по адресу: Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, южнее улицы Мира между проспектом Ленина и улицей Южно-Якуткая, согласно проектной документации «Сети теплоснабжения – шифр: 20/2020-П-СМ-ИОС4.3» и «Сети водоснабжения – шифр: 20/2020-П-СМ-ИОС2.2.».

Согласно пункту 3.1. стоимость работ по договору определена на основании локального ресурсного сметного расчета № 1-ТВС и составляет 2 750 031 руб. 60 коп., в том числе НДС 20 % - 458 338 руб. 60 коп.

В соответствии с пунктом 3.2. заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет подрядчику предоплату в размере 1 200 000 руб. с учетом НДС 20 % в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора.

Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет подрядчику сумму в размере 1 200 000 руб. с учетом НДС 20 % в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 после завершения I этапа работ (пункт 3.3.).

Пунктом 3.4. установлено, что окончательная оплата по договору производится после сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный сторонами срок. Заказчик оплачивает подрядчику стоимость работ на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в течение 5 дней с момента предъявления счета.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по договору в соответствии с действующим Гражданским законодательством Российской Федерации (пункт 5.2.).

Дополнительным соглашением от 01.11.2021 к договору подряда от 31.08.2021 № 31-08/21 стороны установили окончание выполнения работ – 15.03.2022.

В подтверждение выполнения работ по договору на сумму 2 750 031 руб. 60 коп. в материалы дела представлены подписанные сторонами акт о приемке выполненных работ от 30.12.2021 № 1 за период с 01.12.2021 по 30.12.2021, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.12.2021 № 1 на сумму 1 163 002 руб. 80 коп., акт о приемке выполненных работ от 15.03.2022 № 2 за период с 31.12.2021 по 15.03.2022, справка о стоимости работ от 15.03.2022 № 2 на сумму 1 587 028 руб. 80 коп., а также в материалы дела представлены счет-фактуры от 30.12.2021 № 169 и от 15.03.2022 № 97.

Оплата по договору произведена на сумму 1 200 000 руб. по платежному поручению от 03.09.2021 № 2281.

Ненадлежащее исполнение обязательств по оплате выполненных работ послужило основанием для направления истцом в адрес ответчика претензии от 20.07.2022 № 327 с требованием произвести оплату задолженности в размере 1 550 031 руб. 60 коп.

Претензия истца осталась без удовлетворения в связи, с чем истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Ответчик в материалы дела не представил письменный мотивированный отзыв на исковое заявление в связи, с чем суд в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело по имеющимся в материалах дела доказательствам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации названы договоры и иные сделки.

Между сторонами заключен договор подряда, отношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Факт выполнения истцом и принятия ответчиком работ по спорным договорам подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается.

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Принимая во внимание отсутствие доказательств, подтверждающих оплату ответчиком задолженности, суд приходит к выводу о правомерности и обоснованности заявленного истцом требования о взыскании суммы основного долга в размере 1 550 031 руб. 60 коп.

Истцом также заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 16 986 руб. 65 коп., в том числе за период с 21.03.2022 по 31.03.2022 в размере 9 342 руб. 66 коп., за период с 02.10.2022 по 25.10.2022 в размере 7 643 руб. 99 коп.

Пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Учитывая, что истцом доказан факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору, требование по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами обоснованно.

Судом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами проверен и признан не верным в части периода начисления процентов.

Начальной датой исчисления пени следует считать 22.03.2022 с учетом положений статьи 191 и 193 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день (20.03.2022 не рабочий день), днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (21.03.2022).

На основании изложенного, судом произведен расчет за период с 22.03.2022 по 31.03.2022 

Период

Дней в периоде

Ставка, %

Дней в году

Проценты, 

22.03.2022 – 31.03.2022

10

20

365

8 493,32

 

На основании изложенного, требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами является обоснованным и подлежащим удовлетворению в размере 16 137 руб. 32 коп., в том числе за период с 22.03.2022 по 31.03.2022 в размере 8 493 руб. 33 коп., за период с 02.10.2022 по 25.10.2022 в размере 7 643 руб. 99 коп. в остальной части требований о взыскании неустойки следует отказать.

При подаче искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в размере 29 408 руб. по платежному поручению от 15.09.2022 № 834.

С учетом уточнения исковых требований размер государственной пошлины составляет 28 964 руб.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом результатов рассмотрения дела расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат возмещению ответчиком в размере 28 662 руб.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, могут получить информацию о движении дела в общедоступной базе данных Картотека арбитражных дел по адресу www.kad.arbitr.ru.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибстройсервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «НерюнгриТеплоНаладка» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 566 168,92 рублей задолженности, в том числе 1 550 031,60 рублей основного долга, 16 137,32 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 12 663,86 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья

Семёнова У. Н.