Арбитражный  суд  Брянской  области

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации   

 

Решение

Дело №А09-1735/2024

город Брянск

25 июля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 17.07.2024. 

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи  Ивашиной Я.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Акуленко Л.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании в режиме веб-конференции дело по иску ООО «Лукас Групп», г. Рязань, 

к ООО «Феникс», г. Брянск, 

третье лицо: АО «Транснефть-Дружба», г. Брянск,

о взыскании 6 623 333,77 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, доверенность б/н от 11.03.2024,

от ответчика: не явились, уведомлены,

от третьего лица: не явились, уведомлены, 

 

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Лукас Групп» (далее – ООО «Лукас Групп») обратилось в Арбитражный суд Брянской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Феникс» (далее – ООО «Феникс») о взыскании 6 623 333,77 руб., в том числе 5 393 288,31 руб. задолженности по контрактам, 1 755 293, 55 руб. законной и договорной неустойки по контрактам, а также пени с 21.02.2024 по день фактического погашения суммы долга, исходя из размера 1/360 двойной ключевой ставки, установленной ЦБ РФ за каждый день просрочки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено акционерное общество «Транснефть-Дружба» (далее – «Транснефть-Дружба»).

Ответчик и третье лицо, своих представителей в судебное заседание не направили, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом в соответствии со ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на интернет-сайте Арбитражного суда Брянской области (http://www.bryansk.arbitr.ru).

Дело рассмотрено по имеющимся материалам в отсутствие представителей ответчика и третьего лица в порядке, установленном ст. 156 АПК РФ.

Истец заявил ходатайство об уточнении размера исковых требований до 6 508 311, 04 руб., в том числе 5 393 288, 31 руб. задолженности по контрактам, 1 114 705, 56 руб. пени по контрактам, 317,17 руб. законной неустойки исчисленной по правилам статьи 395 ГК РФ, а также пени с 21.02.2024 по день фактического погашения суммы долга, исходя из размера 1/360 двойной ключевой ставки, установленной ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Ходатайство судом удовлетворено в соответствии со ст.49 АПК РФ, дело рассмотрено в рамках уточненных исковых требований.

Истец уточненные исковые требования поддержал в полном объеме.

До принятия судом окончательного судебного акта от ответчика поступил отзыв, в котором он признал исковые требования в полном объеме.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, 10.02.2020 между ООО «Феникс» (подрядчик) и ООО «Лукас Групп» (субподрядчик) заключен контракт № ТДР-3418/100-04-04/19-Л на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организации системы «Транснефть» при реализации программ развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта по объектам ТПР Программы ТПР и КР АО «Транснефть-Дружба» 2020г.

     Между сторонами в порядке исполнения контракта подписано дополнительное соглашение № 2  от 23.10.2020, согласно которому внесены изменения в пункт 4.1. статьи 4 контракта, контрактная цена работ и услуг, подлежащая оплате Субподрядчику, составила 8 411 344, 85 руб., кроме того НДС по ставке 20% - 1 682 268, 95 руб. Итого сумма контракта составила 10 093 613, 80 рубля.

На основании части 5.1. статьи 5 контракта работы, предусмотренные контрактом по Объекту, должны быть начаты Субподрядчиком в сроки согласно Приложению 2 «График выполнения работ» и полностью завершены не позднее 25 октября 2020 года.

Контракт истцом был исполнен в полном объеме, что подтверждается:

1)  справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 13.04.2020 на сумму 442324,52 руб.; актом о приемке выполненных работ № 1 от 13.04.2020 на сумму 442324,52 руб.; счетом-фактурой № 2 от 13.04.2020 на сумму 442324,52 руб.;

2)  справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.04.2020 на сумму 119161,03 рубля; актом о приемке выполненных работ №2 от 25.04.2020 на сумму 119161,03 рубля; счетом-фактурой № 3 от 25.04.2020 на сумму 119 161, 03 рубля;

3)  справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 08.05.2020 на сумму 47931 рубля; актом о приемке выполненных работ №3 от 08.05.2020 на сумму 47931 рубля; счетом-фактурой № 4 от 08.05.2020 года на сумму 47931 рубля;

4)  справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 25.05.2020 на сумму 317075,17 рубля; актом о приемке выполненных работ №4 от 25.05.2020 на сумму 317075,17 рубля; счетом-фактурой № 5 от 25.05.2020 на сумму 317075,17 рубля;

5)  справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 25.06.2020 на сумму 383000,76 рубля; актом о приемке выполненных работ № 5 от 25.06.2020 на сумму 383000,76 рубля; счетом-фактурой № 7 от 25.06.2020 на сумму 383000,76 рубля;

6)  справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 25.07.2020 на сумму 418494,49 рубля; актом о приемке выполненных работ № 6 от 25.07.2020 на сумму 418494,49 рубля; счетом-фактурой № 9 от 25.07.2020 на сумму 418494,49 рубля;

7)  справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 25.08.2020 на сумму 1036135,64 рубля; актом о приемке выполненных работ № 7 от 25.08.2020 на сумму 1036135,64 рубля; счетом-фактурой № 12 от 25.08.2020 на сумму 1036135,64 рубля;

8)  справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 25.09.2020 на сумму 241006,40 рубля; актом о приемке выполненных работ № 8 от 25.09.2020 на сумму 241006,40 рубля; счетом-фактурой № 13 от 25.09.2020 на сумму 241006,40 рубля;

9)     справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 9 от 09.10.2020 на сумму 1148693,45 рубля; актом о приемке выполненных работ № 9 от 09.10.2020 на сумму 1148693,45 рубля; счетом-фактурой № 14 от 09.10.2020 на сумму 1148693,45 рубля;

10)  справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 10 от 25.10.2020 на сумму 5939791,34 рубля; актом о приемке выполненных работ № 10 от 25.10.2020 на сумму 5939791,34 рубля; счетом-фактурой № 15 от 25.10.2020 на сумму 5939791,34 рубля.

     Ответчиком произведена оплата контракта на сумму 9 588 933, 09 рубля.

     Сумма задолженности составила 10 093 613, 80 руб. – 9 588 933, 09 руб. =           504 680, 71 руб.

Согласно пункту 6.5.3. контракта оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ осуществляется Подрядчиком в течение 30 календарных дней, следующих за датой получения Подрядчиком оригинала счета, счета-фактуры, оформленных Субподрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон.

Оплату за выполненные работы производить путем ежемесячного (начиная с первой сдачи-приемки выполненных Работ) удержания Подрядчиком в качестве гарантийного обеспечения денежных средств в размере 5 % от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ по Контракту.

Контрактом предусмотрено в соответствии с пунктом 6.5.6. что, Подрядчик оплачивает последний платеж за выполненные Субподрядчиком Работы по Контракту в размере 5 % (пять процентов) от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком объемов Работ на дату подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36, Приложение 46) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36, Приложение 46).

Последний платеж в размере 5 % от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по Контракту (либо стоимости Сезонных и прочих Работ) на весь период Гарантийного срока в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту взамен требований к Подрядчику по предоставлению безусловной и безотзывной банковской гарантии исполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок.

Пунктом 28.4 Контракта предусмотрен гарантийный срок, который соответствует 2 (двум) годам. 

Работы по договору сданы в полном объеме 25.10.2020. Претензий с момента передачи выполненных работ со стороны Подрядчика не имеется, следовательно, удержанные в качестве обеспечительной меры исполнения обязательств в гарантийный срок в размере 5% от суммы контракта денежных средств подлежат возврату в пользу истца.

Два года на гарантийные обязательства обеспеченные 5% от стоимости выполненных работ истекли 26.10.2022. Однако, денежная сумма в размере                        504 680, 71 руб. истцу не возвращена, в связи с чем истец имеет право требовать, как взыскание основной суммы долга и неустойки, предусмотренной пунктом 29.15 Контракта в случае, если Подрядчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Статье 6 Контракта, на срок свыше 30 календарных дней, Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России на дату предъявления требования от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы задержанного/просроченного платежа.

Сумма процентов за период с 26.10.2022 до 20.02.2024 составила 138 745, 12 руб.

504 680,71 руб. - 5% = 25 234, 03 руб. – размер пени подлежащей взысканию с ответчика.

Пунктом 29.19. контракта устанавливает, что общая сумма штрафов, пеней, неустоек и/или иных санкций, предъявляемых сторонами по контракту, не может превышать 20% от контрактной цены.

Между ООО «Феникс» (подрядчик) и ООО «Лукас Групп» (субподрядчик) заключен контракт 27.04.2020 № ТДР-754/100-04-04/20-Л на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организации системы «Транснефть» при реализации программ развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта по объектам ТПР Программы и КР АО «Транснефть-Дружба» 2020г.

Между сторонами подписано дополнительное соглашение № 5  от 30.07.2021, согласно которому внесены изменения в пункт 4.1. статьи 4 контракта, контрактная цена Работ и услуг, подлежащая оплате Субподрядчику, составляет 3 598 568,75 руб., кроме того НДС по ставке 20% - 719 713,77 руб.  Итоговая стоимость контракта составила 4318282, 52 руб. 

Между сторонами в порядке исполнения контракта подписано дополнительное соглашение № 2 от 24.08.2020, согласно которому внесены изменения в пункт 5.1. статьи 5 контракта работы, предусмотренные контрактом по объекту, должны быть начаты Субподрядчиком в сроки согласно Приложению 26 «График выполнения работ» и полностью завершены не позднее 25 июня 2021 года.

     Контракт истцом был исполнен в полном объеме, что подтверждается:

1)         справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.06.2020 на сумму 148708,78 рубля; актом о приемке выполненных работ № 1 от 25.06.2020 на сумму 148708,78 рубля; счетом-фактурой № 8 от 25.06.2020 на сумму 148708,78 рубля;

2)         справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 10.08.2020 на сумму 698770,67 рубля; актом о приемке выполненных работ №2 от 10.08.2020 на сумму 698770,67 рубля; счетом-фактурой № 10 от 10.08.2020 на сумму 698770,67 рубля;

3)         справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 25.08.2020 на сумму 141751 рубля; актом о приемке выполненных работ №3 от 25.08.2020 на сумму 141751 рубля; счетом-фактурой № 11 от 25.08.2020 на сумму 141751 рубля;

4)         справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 25.10.2020 на сумму 216736,93 рублей; актом о приемке выполненных работ №4 от 25.10.2020 на сумму 216736,93 рублей; счетом-фактурой № 16 от 25.10.2020 года на сумму 216736,93 рублей;

5)     справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 25.12.2020 на сумму 201364,84 рубля; актом о приемке выполненных работ № 5 от 25.12.2020 на сумму 201364,84 рубля; счетом-фактурой № 17 от 25.12.2020 года на сумму 201364,84 рубля;

6)         справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 12.05.2021 на сумму 367402,66 рубля; актом о приемке выполненных работ № 6 от 12.05.2021 года на сумму 367402,66 рубля; счетом-фактурой № 3 от 12.05.2021 на сумму 367402,66 рубля;

7)         справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 25.05.2021 на сумму 905239,42 рубля; актом о приемке выполненных работ № 7 от 25.05.2021 на сумму 905239,42 рубля; счетом-фактурой № 4 от 25.05.2021 на сумму 905239,42 рубля;

8)         справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 23.06.2021 на сумму 353661,12 рубля; актом о приемке выполненных работ № 8 от 23.06.2021 на сумму 353661,12 рубля; счетом-фактурой №6 от 23.06.2021 на сумму 353661,12 рубля;

9)         справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 9 от 25.06.2021 на сумму 1284647,10 рублей; актом о приемке выполненных работ № 9 от 25.06.2021 на сумму 1284647,10 рублей; счетом-фактурой № 7 от 25.06.2021 на сумму 1284647,10 рублей;

10)     соглашение об отступном от 31.01.2024 года на сумму 1 400 000 рублей; счетом-фактурой № 4 от 02.02.2024 года на сумму 1400000 руб.

           Ответчиком произведена оплата контракта на сумму 3 945 975, 60 рублей.

   Сумма задолженности составляет 4 318 282, 52 руб. – 3 945 975 руб. =                            372 306, 92 руб.

Согласно пункту 6.5.3. контракта оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ осуществляется Подрядчиком в течение 30 календарных дней, следующих за датой получения Подрядчиком оригинала счета, счета-фактуры, оформленных Субподрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями сторон.

Работы по договору сданы в полном объеме 25.06.2021. 

Ответчик в период действия договора регулярно допускал просрочку оплаты выполненных работ и материалов.

Задолженность по контракту 27.04.2020 № ТДР-754/100-04-04/20-Л составила            372 306, 92 руб., в связи с чем истец имеет право требовать, как взыскание основной суммы долга и неустойки, предусмотренной пунктом 29.15 контракта, в случае, если Подрядчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Статье 6 контракта, на срок свыше 30 календарных дней, Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России на дату предъявления требования от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы задержанного/просроченного платежа.

Сумма процентов за период с 25.07.2020 до 20.02.2024 составила 1 052 976,04 руб.

Пунктом 29.19. контракта устанавливает, что общая сумма штрафов, пеней, неустоек и/или иных санкций, предъявляемых сторонами по контракту, не может превышать 20% (двадцать процентов) от контрактной цены.

Следовательно, сумма неустойки составляет: 4 318 282, 52 руб. - 20% =                   863 656, 50 руб.

Между ООО «Феникс» (подрядчик) и ООО «Лукас Групп» (субподрядчик) заключен контракт 24.02.2021 № ТДР-13/100-04-04/21-Л на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организации системы «Транснефть» при реализации программ развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта по объектам АО «Транснефть-Дружба».

Между сторонами в порядке исполнения контракта подписано дополнительное соглашение № 1  от 29.11.2021, согласно которому внесены изменения в   пункт 4.1. статьи 4 контракта, контрактная цена работ и услуг, подлежащая оплате Субподрядчику, составляет 3 045 358,41 руб., кроме того НДС по ставке 20% - 609 071,68 руб. 

Итого стоимость контракта составила 3 654 430, 09 рублей.

На основании части 5.1. статьи 5 контракта работы, предусмотренные контрактом по объекту, должны быть начаты Субподрядчиком в сроки согласно Приложению 2 «График выполнения работ» и полностью завершены не позднее 25 сентября 2021 года.

Контракт истцом был исполнен в полном объеме, что подтверждается:

1)                   справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.04.2021 на сумму 14766,30 рубля; актом о приемке выполненных работ № 1 от 25.04.2021 на сумму 14766,30 рубля; счетом-фактурой № 2 от 25.04.2021 на сумму 14766,30 рубля;

2)     справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.06.2021 на сумму 384741,59 рубля; актом о приемке выполненных работ №2 от 25.06.2021 на сумму 384741,59 рубля; счетом-фактурой № 5 от 25.06.2021 на сумму 384741,59 рубля;

3)     справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 25.07.2021 на сумму 153673,42 рубля; актом о приемке выполненных работ №3 от 25.07.2021 на сумму 153673,42 рубля; счетом-фактурой № 8 от 25.07.2021 года на сумму 153673,42 рубля;

4)     справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 25.08.2021 на сумму 174560,51 рубля; актом о приемке выполненных работ №4 от 25.08.2021 на сумму 174560,51 рубля; счетом-фактурой № 9 от 25.08.2021 на сумму 174560,51 рубля;

5)     справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 15.10.2021 на сумму 1035803,87 рубля; актом о приемке выполненных работ № 5 от 15.10.2021 на сумму 1035803,87 рубля; счетом-фактурой № 12 от 15.10.2021 на сумму 1035803,87 рубля;

6)     справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 25.10.2021 на сумму 1890884,40 рубля; актом о приемке выполненных работ № 6 от 25.10.2021 на сумму 1890884,40 рубля; счетом-фактурой № 13 от 25.10.2021 на сумму 1890884,40 рубля.

Ответчиком оплата контракта произведена на сумму 1 885 387, 52 рубля.

   Сумма задолженности составляет 3 654 430, 09 руб. – 1 885 387, 52 руб. =               1 769 042, 57 рублей.

Согласно пункту 6.5.3. контракта оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ осуществляется Подрядчиком в течение 30 календарных дней, следующих за датой получения Подрядчиком оригинала счета, счета-фактуры, оформленных Субподрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон.

Оплату за выполненные работы производить путем ежемесячного (начиная с первой сдачи-приемки выполненных Работ) удержания Подрядчиком в качестве гарантийного обеспечения денежных средств в размере 5 % от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ по Контракту.

Контрактом предусмотрено в соответствии с пунктом 6.5.6. подрядчик оплачивает последний платеж за выполненные Субподрядчиком работы по контракту в размере 5 % (пять процентов) от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком объемов Работ на дату подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36, Приложение 46) в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36, Приложение 46).

Последний платеж в размере 5 % от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по Контракту (либо стоимости Сезонных и прочих Работ) на весь период Гарантийного срока в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту взамен требований к Подрядчику по предоставлению безусловной и безотзывной банковской гарантии исполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок.

Пунктом 28.4 Контракта предусмотрен гарантийный срок, который соответствует 2 (двум) годам. 

Работы по договору сданы в полном объеме 25.09.2021. Претензий с момента передачи выполненных работ со стороны Подрядчика не имеется, следовательно, удержанные в качестве обеспечительной меры исполнения обязательств в гарантийный срок в размере 5% от суммы контракта денежных средств подлежат возврату в пользу истца.

Два года на гарантийные обязательства обеспеченные 5% от стоимости выполненных работ истекли 26.09.2023. Однако, денежная сумма в размере                          182 721, 50 рублей истцу не возвращена, в связи с чем истец имеет право требовать, как взыскание основной суммы долга и неустойки, предусмотренной пунктом 29.15 Контракта «в случае, если Подрядчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Статье 6 Контракта, на срок свыше 30 календарных дней, Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России на дату предъявления требования от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы задержанного/просроченного платежа».

Сумма процентов за период с 25.05.2021 до 20.02.2024 составила 293725,84 руб.

1769042,57 руб. - 5% = 88 452, 13 руб. – размер пени подлежащей взысканию с ответчика.

Пунктом 29.19. Контракта устанавливает, что общая сумма штрафов, пеней, неустоек и/или иных санкций, предъявляемых сторонами по контракту, не может превышать 20% от контрактной цены.

Между ООО «Феникс» (подрядчик) и ООО «Лукас Групп» (субподрядчик) 18.03.2021 заключен Договор № ТДР-2703/100-03-14-02/20-Л возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию /текущему ремонту/ приведению к нормативному состоянию систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, систем газового/порошкового пожаротушения.

Согласно пункту 4.1. статьи 4 договора стоимость услуг по договору составляет              126 869,80 руб., в том числе НДС по ставке 20%, установленной действующим законодательством Российской Федерации, в сумме 21144,97 руб. 

Срок окончания работ по договору 31.03.2021. 

Согласно пункту 4.2 договора оплата услуг Субподрядчика в размере, предусмотренном п. 4.1 договора, осуществляется Подрядчиком в течение 45  календарных дней, а при заключении настоящего договора с субъектом малого и среднего предпринимательства в течение 15 рабочих дней с момента получения Подрядчиком соответствующего счета Субподрядчика и Акта, при условии подписания Подрядчиком Акта без замечаний и предоставлении Подрядчику банковской гарантии или обеспечительного платежа в соответствии с условиями Договора.

    На основании части 5.1. статьи 5 договора, настоящий договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и действует до «31» марта 2021 года, а в части исполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора - до полного их исполнения.

Договор истцом был исполнен в полном объеме 31.03.2021, что подтверждается: актом об оказании услуг № 1 от 31.03.2021 на сумму 126 869, 80 руб. и счетом-фактурой № 1 от 31.03.2021 на сумму 126 869, 80 руб.

Срок оплаты истек 15.05.2021. Оплата стоимости договора произведена ответчиком 01.06.2021.

С связи с несвоевременным исполнение обязательств по оплате договора истец полагает имеются основания для взыскания с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам статьи 395 ГК РФ.

Сумма процентов (законная неустойка) за период с 15.05.2021 до 01.06.2021 составила 317, 17 руб.

Между ООО «Феникс» (подрядчик) и ООО «Лукас Групп» (субподрядчик) 09.03.2022 заключен контракт № ТДР-01-2022-90-Л на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации Программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта по объектам АО "Связьтранснефть":  7.1.1.12 "Текущий ремонт здания Заводоуправление (Рязанская обл., г. Рязань, р-н Южный Промузел,7) инв. Р35-2".  7.1.1.13 "Текущий ремонт здания производственного УС Филино (Владимирская обл., Ковровский район, п. Филино, территория НПС Филино) инв. 10097004".

Между сторонами в порядке исполнения контракта подписано дополнительное соглашение № 4 от 23.09.2022, согласно которому внесены изменения в   пункт 4.1. статьи 4 контракта, контрактная цена работ и услуг, подлежащая оплате Субподрядчику, составилат 3 649 681, 77 руб., кроме того НДС по ставке 20% - 729 936, 35 руб., в том числе пообъектно:

            7.1.1.12 «Текущий ремонт здания Заводоуправление (Рязанская обл., г. Рязань, р-н Южный Промузел,7) инв. Р35-2» - 2 788 148, 57 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством (20%) - 557 629, 71 руб..

            7.1.1.13 «Текущий ремонт здания производственного УС Филино (Владимирская обл., Ковровский район, п. Филино, территория НПС Филино) инв. 10097004» - 861 533,20 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством (20%) - 172 306, 64 руб.». 

Итого сумма контракта составила 4 379 618, 12 руб.

На основании части 5.1. статьи 5 Контракта и дополнительного соглашения №4 от 23.09.2022 работы, предусмотренные контрактом по объекту, должны быть начаты Субподрядчиком в сроки согласно Приложению 2 "График выполнения работ" и полностью завершены не позднее 24 октября 2022 года, в том числе пообъектно:

            7.1.1.12 «Текущий ремонт здания Заводоуправление (Рязанская обл., г. Рязань, р-н Южный Промузел,7) инв. Р35-2» - не позднее 24.10.2022;

7.1.1.13 «Текущий ремонт здания производственного УС Филино (Владимирская обл., Ковровский район, п. Филино, территория НПС Филино) инв. 10097004» - не позднее 26.08.2022».

Контракт истцом был исполнен в полном объеме, что подтверждается:

1)     (З/У) справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.05.2022 на сумму 77274,48 рубля; актом о приемке выполненных работ № 1 от 25.05.2022 на сумму 77274,48 рубля; счетом-фактурой № 2 от 25.05.2022 на сумму 58382,66 рубля; корректирующей счетом-фактурой № 5 от 21.07.2022 к счет-фактуре № 2 от 25.05.2022 на сумму 18891,82 рубля;

2)     (З/У) справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.08.2022 на сумму 457646,34 рубля; актом о приемке выполненных работ № 2 от 25.08.2022 на сумму 457646,34 рубля; счетом-фактурой № 6 от 25.08.2022 на сумму 457646,34 рубля;

3)     (З/У) справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 10.09.2022 на сумму 437961,38 рубля; актом о приемке выполненных работ № 3 от 10.09.2022 на сумму 437961,38 рубля; счетом-фактурой № 7 от 10.09.2022 на сумму 437961,38 рубля;

4)     справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.09.2022 на сумму 95588,64 рубля; актом о приемке выполненных работ № 1 от 25.09.2022 на сумму 95588,64 рубля; счетом-фактурой № 8 от 25.09.2022 года на сумму 76810,46 рубля;

5)     (З/У) справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 25.09.2022 на сумму 76810,46 рубля; актом о приемке выполненных работ № 4 от 25.09.2022 на сумму 76810,46 рубля; счетом-фактурой № 8 от 25.09.2022 на сумму 95588,64 рубля; 

6)     (З/У) справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 17.10.2022 на сумму 618253,79 рубля; актом о приемке выполненных работ № 5 от 17.10.2022 на сумму 618253,79 рубля; счетом-фактурой № 11 от 17.10.2022 на сумму 618253,79 рубля;

7)     справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 20.10.2022 на сумму 583640,62 рубля; актом о приемке выполненных работ № 2 от 20.10.2022 на сумму 583640,62 рубля; счетом-фактурой № 12 от 20.10.2022 на сумму 583640,62 рубля;

8)     (З/У) справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 27.10.2022 на сумму 1677831,84 рубля; актом о приемке выполненных работ № 6 от 27.10.2022 на сумму 1677831,84 рубля; счетом-фактурой № 13 от 27.10.2022 на сумму 1677831,84 рубля;

9)     справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 11.11.2022 на сумму 354610,58 рубля; актом о приемке выполненных работ № 3 от 11.11.2022 на сумму 354610,58 рубля; корректировочный счетом-фактурой № 14 от 11.11.2022 на сумму 354610,58 рубля;

Ответчиком произведена оплата контракта на сумму 4 284 837, 09 руб.

Сумма задолженности составила 94 781, 03 руб.

Согласно пункту 6.5.3. контракта оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ осуществляется Подрядчиком в течение 45 календарных дней следующих за датой получения Подрядчиком оригинала счета, счета-фактуры, оформленных Субподрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон. В течение 15 рабочих дней для Субподрядчиков, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, заключивших Контракт по результатам проведения закупки.

Работы по договору сданы в полном объеме 11.11.2022. Претензий с момента передачи выполненных работ со стороны Подрядчика не имеется.

Пунктом 29.15 Контракта установлено, что в случае, если Подрядчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Статье 6 Контракта, на срок свыше 30 календарных дней, Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России на дату предъявления требования от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы задержанного/просроченного платежа».

Сумма процентов за период с 12.12.2023 до 20.02.2024 составила 5950,14 руб.

94781,03 - 5% = 4 739, 05 руб. – размер пени подлежащей взысканию с ответчика.

Пунктом 29.19. контракта устанавливает, что общая сумма штрафов, пеней, неустоек и/или иных санкций, предъявляемых сторонами по контракту, не может превышать 20% от контрактной цены.

Между ООО «Феникс» (подрядчик) и ООО «Лукас Групп» (субподрядчик) 26.12.2022 заключен контракт № 01-2022-680-Лукас Групп на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организации системы «Транснефть» при реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального ремонта.

  Согласно пункту 4.1. статьи 4 контракта контрактная цена работ и услуг, подлежащая оплате Субподрядчику, составляет 4 650 118, 29 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством, в сумме 930 023, 66 руб. Итого сумма контракта составила 5 541 069, 89 рубля.

На основании части 5.1. статьи 5 контракта работы, предусмотренные контрактом по объекту, должны быть начаты Субподрядчиком в сроки согласно Приложению 2 «График выполнения работ» и полностью завершены не позднее 27 сентября 2023 года.

     Контракт истцом был исполнен в полном объеме, что подтверждается:

1)     справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.05.2023 на сумму 509581,79 рубля; актом о приемке выполненных работ № 1 от 25.05.2023 на сумму 509581,79 рубля; счетом-фактурой № 3 от 25.05.2023 на сумму 509581,79 рубля;

2)     справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.06.2023 на сумму 232475,44 рубля; актом о приемке выполненных работ № 2 от 25.06.2023 на сумму 232475,44 рубля; счетом-фактурой № 5 от 25.06.2023 на сумму 232475,44 рубля;

3)     справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 25.07.2023 на сумму 694949,03 рубля; актом о приемке выполненных работ №№ 3 от 25.07.2023 на сумму 694949,03 рубля; счетом-фактурой № 8 от 25.07.2023 на сумму 694949,03 рубля;

4)     справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 25.08.2023 на сумму 746646,53 рубля; актом о приемке выполненных работ №4 от 25.08.2023 на сумму 746646,53 рубля; счетом-фактурой № 12 от 25.08.2023 на сумму 746646,53 рубля;

5)     справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 25.09.2023 на сумму 1726022,57 рубля; актом о приемке выполненных работ № 5 от 25.09.2023 на сумму 1726022,57 рубля; счетом-фактурой № 14 от 25.09.2023 на сумму 1726022,57 рубля;

6)     счетом-фактурой № 16 от 02.10.2023 на сумму 22180,78 рублей;

7)     справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 25.10.2023 на сумму 1609213,75 рубля; актом о приемке выполненных работ № 6 от 25.10.2023 на сумму 1609213,75 рубля; счетом-фактурой № 20 от 25.10.2023 на сумму 1609213,75 рубля;

     Ответчиком произведена оплата контракта на сумму 2 611 539, 31 руб.

     Сумма задолженности составила 5 541 069, 89 руб. – 2 611 539, 31 руб. – 277 053, 49 (гарантийный платеж 5% от суммы контракта) руб. = 2 652 477, 09 руб. 

Согласно пункту 6.5. контракта оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ производится Подрядчиком в пользу Субподрядчика с учетом зачета суммы аванса в порядке, указанном в пункте 6.4 Контракта, а также с учетом удержания из оплаты (с каждой приемки выполненных Работ, осуществляемой после принятия соответствующего решения об оплате стоимости выполненных Работ без предъявления к Субподрядчику требований по предоставлению безусловной и безотзывной банковской гарантии исполнения условий Контракта или обеспечительного платежа) в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту (взамен безусловной и безотзывной банковской гарантии исполнения условий Контракта или обеспечительного платежа) денежных средств в размере 5% от стоимости всех выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ с начала реализации Контракта. 

Удержания из оплаты, произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом Контракта в целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту (взамен безусловной и безотзывной банковской гарантии исполнения условий Контракта или обеспечительного платежа) учитываются в объеме последнего платежа по Контракту.

Последний платеж в размере 5 % от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ по Контракту (либо от стоимости Сезонных и прочих Работ) удерживается Подрядчиком на весь период Гарантийного срока в качестве обеспечения исполнения обязательств Субподрядчика по Контракту в Гарантийный срок взамен требований к Субподрядчику по предоставлению безусловной и безотзывной банковской гарантии исполнения обязательств Субподрядчика в Гарантийный срок, с его последующей выплатой в течение 80 календарных дней с даты окончания Гарантийного срока по Объекту.

Пунктом 25.1 Контракта предусмотрен гарантийный срок, который соответствует 1 (одному) году. 

Работы по договору сданы в полном объеме 25.10.2023. Претензий с момента передачи выполненных работ со стороны Подрядчика не имеется, следовательно, удержанные в качестве обеспечительной меры исполнения обязательств в гарантийный срок в размере 5% от суммы контракта денежных средств подлежат удержанию до истечения гарантийного срока – до 25.10.2024.

Сумма гарантийного платежа составляет 277 053, 49 рублей – остается у ответчика до окончания гарантийного срока.

Сумма основного долга составила 2 652 477, 09 руб., сумма процентов за период с 27.05.2023 года до 20.02.2024 составила 263 579, 24 рублей.

Пункт 26.8 в случае, если Подрядчик нарушил условия оплаты, оговоренные Контрактом, на срок свыше 30 календарных дней, Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России на дату предъявления требования от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы задержанного/просроченного платежа.

Задолженность ООО «Феникс» в пользу ООО «Лукас Групп» составляет 5 670 341, 82 руб., что подтверждается актом сверки взаимных расчетов от 02.02.2024. Учитывая гарантийную сумму удержания по  контракту № 01-2022-680-Лукас Групп от 26.12.2022 сумма задолженности с корректировкой составила 5 670 341, 82 – 277 053, 49 =               5 393 288, 31 руб.

Размер пени составил 2 652 477, 09 руб. - 5% = 132 623, 85 руб. 

ООО «Лукас Групп» направило в адрес ООО «Феникс» досудебную претензию содержащую требование об оплате задолженности по контрактам, однако ООО «Феникс» обязанности по оплате результата принятых работ по контракту не оплатило, в связи с чем ООО «Лукас Групп» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

Требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Спорное правоотношение суд квалифицирует как договор строительного подряда (ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ).

В соответствии с п.п. 1-2 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определённый объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ (ст. 740 ГК РФ). 

Основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работ в установленном законом и договором порядке (ст.ст. 711, 720, 746, 753 ГК РФ, п. 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ, которой предусмотрено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Из принципа свободы договора (статья 421 ГК РФ) следует, что стороны вправе определить порядок оплаты выполненных работ по своему усмотрению, в частности, отступить от общего правила статьи 711 ГК РФ об оплате работ после окончательной сдачи их результата, установив, что частичная оплата выполненных работ приостанавливается до истечения гарантийного срока ("гарантийное удержание").

Подобное удержание применено сторонами для покрытия возможных расходов заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением подрядчиком обязательств в отношении качества строительных работ. В соответствии со статьей 740 ГК РФ денежное обязательство заказчика по оплате является встречным по отношению к обязательству подрядчика по выполнению в натуре работ надлежащего качества (статья 328 ГК РФ). Следовательно, неисправный подрядчик не вправе требовать выплаты полной договорной цены работ, если в гарантийный период выявлены не устраненные за его счет скрытые недостатки переданного объекта.

Применительно к рассматриваемому делу судом установлено, что между ООО «Лукас Групп» и ООО «Феникс» существуют обязательственные правоотношения, возникшие из контрактов, содержанием которых являются взаимные права и обязанности по выполнению субподрядчиком определённого вида работ, приёмка и последующая оплата их результата подрядчиком. 

Результат выполненных субподрядчиком работ по контрактам принят подрядчиком по актам приёмки выполненных работ и частично оплачен ответчиком. 

Доказательств полной оплаты долга и (или) доказательств иных обстоятельств являющихся основанием для прекращения обязанности по оплате результата принятых работ ответчиком не представлено (ст.ст. 9, 65 АПК РФ). 

Совокупность установленных обстоятельств подтверждает наличие у ООО «Феникс» неисполненных денежных обязательств перед ООО «Лукас Групп» по оплате стоимости результатов выполненных работ по контрактам в размере 5 393 288, 32 руб.  

Факт наличия долга и его размер подтверждён в акте сверки взаимных расчётов, а также представленными к нему первичными документами.

До принятия судом окончательного судебного акта от ответчика поступил отзыв, в котором он признал исковые требования в полном объеме.

Согласно ч.3 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерацииответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

В соответстви с п. 5 указанной статьи арбитражный суд, в частности, не принимает признание ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Право на совершение такого процессуального действия как признание иска соответсвует полномочиям представителя ответчика. Признание ответчиком исковых требований соответствует нормам ст. 49 АПК РФ, не нарушает прав лиц, участвующих в деле, в связи с чем принимается судом.  

Поскольку требования истца подтверждены материалами дела и признаны ответчиком в полном объеме, суд пришел к выводу об обоснованности и правомерности заявленных истцом требований, в связи с чем 5 393 288, 32 руб. задолженности по контрактам подлежат взысканию с ответчика в полном объеме, в том числе:

- задолженность по обязательствам из Контракта № ТДР-3418/100-04-04/19-Л от 10.02.2020 в размере 504 680, 71 рублей;

- задолженность по обязательствам из Контракта № ТДР-754/100-04-04/20-Л от 27.04.2020 в размере 372 306, 92 рублей;

- задолженность по обязательствам из Контракта ТДР-13/100-04-04/21-Л от 24.02.2021 в размере 1 769 042, 57 рублей;

- задолженность по обязательствам из Контракта № ТДР-01-2022-90-Л от 09.03.2022 в размере 94 781, 03 рублей;

- задолженность по обязательствам из Контракта № 01-2022-680-Лукас Групп от 26.12.2022 в размере 2 652 477, 09 рублей.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает ряд мер, направленных на понуждение должника исполнить гражданско-правовое обязательство и защиту прав кредитора.

Неисполнение должником обязательства в виде конкретной обязанности в установленный для нее срок является нарушением принципа надлежащего исполнения обязательств (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации) и порождает обязательства, связанные с его невыполнением (уплата неустойки, возмещение убытков).

Одним из способов обеспечения исполнения обязательства является неустойка (статья 329 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Условиями заключенных контрактом предусмотрено, что если Подрядчик нарушил условия оплаты, оговоренные Контрактом, на срок свыше 30 календарных дней, Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России на дату предъявления требования от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы задержанного/просроченного платежа.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Поскольку факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства по контрактам № ТДР-3418/100-04-04/19-Л от 10.02.2020, № ТДР-754/100-04-04/20-Л от 27.04.2020, № ТДР-13/100-04-04/21-Л от 24.02.2021, № ТДР-01-2022-90-Л от 09.03.2022, № 01-2022-680-Лукас Групп от 26.12.2022 с учетом гарантийной суммы удержания установлен в ходе судебного разбирательства, требование о взыскании неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами заявлено истцом правомерно.

Согласно расчёту истца, подлежащая взысканию с ответчика законная и договорная неустойка (пеня) составила 1 115 022, 73 руб., в том числе:

- договорная пеня (проценты) по несвоевременному исполнению обязательства по Контракту № ТДР-3418/100-04-04/19-Л от 10.02.2020 за период с 26.10.2022 до 20.02.2024 составила 25 234,03 рублей;

- договорная пеня (проценты) по несвоевременному исполнению обязательства по Контракту № ТДР-3418/100-04-04/19-Л от 10.02.2020 за период с 26.10.2022 до 20.02.2024 составила 25 234,03 рублей;

- договорная пеня (проценты) по несвоевременному исполнению обязательства по Контракту № ТДР-3418/100-04-04/19-Л от 10.02.2020 за период с 26.10.2022 до 20.02.2024 составила 25 234,03 рублей;

- договорная пеня (проценты) по несвоевременному исполнению обязательства по Контракту № ТДР-754/100-04-04/20-Л от 27.04.2020 за период с 25.07.2020 до 20.02.2024 составила 863656,50 рублей;

- договорная пеня (проценты) по несвоевременному исполнению обязательства по Контракту ТДР-13/100-04-04/21-Л от 24.02.2021 за период с 25.05.2021 до 20.02.2024 составила 88 452,13 рублей;

- договорная пеня (проценты) по несвоевременному исполнению обязательства по Контракту № ТДР-01-2022-90-Л от 09.03.2022 договорная пеня (проценты) за период с 12.12.2023 до 20.02.2024 составила 4739,05 рублей,

- договорная пеня (проценты) по несвоевременному исполнению обязательства по Контракту № 01-2022-680-Лукас Групп от 26.12.2022 за период с 27.05.2023 до 20.02.2024 составила 132 623,85 рублей;

- законная неустойка исчисленная по правилам статьи 395 ГК РФ по несвоевременному исполнению обязательства по Контракту № ТДР-2703/100-03-14-02/20-Л от 18.03.2021 за период с 15.05.2021 до 01.06.2021 составила 317,17 рублей.

Пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 401 ГК РФ отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Ответчиком исковые требования признаны в полном объеме.

Согласно пункту 1 статьи 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. 

В соответствии с пунктом 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Ответчик ходатайства о снижении размера пени не заявил.

Обстоятельств, влекущих в силу ст.401 Гражданского кодекса РФ освобождение ответчика от ответственности за неисполнение обязательства, в ходе рассмотрения дела судом не установлено. 

Неустойка в размере 1 115 022, 73 руб. является соразмерной последствиям просрочки исполнения ООО «Феникс» денежного обязательства.

Таким образом, с ООО «Феникс» подлежит взысканию в пользу ООО «Лукас Групп» неустойка в размере 1 115 022, 73 руб., в том числе договорная неустойка за не исполнение контрактов в размере 1 114 705, 56 руб. и законная неустойка исчисленная по правилам статьи 395 ГК РФ в размере 317, 17 руб.

В соответствии с п.65 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 №7 по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). 

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). 

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

На основании вышеизложенного, суд удовлетворяет требование истца о взыскании неустойки за последующий период с 21.02.2024 по день фактического исполнения обязательства по оплате долга в сумме 5 393 288, 32 рублей, исходя из размера 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России за каждый день просрочки, в том числе:

- по контракту № ТДР-3418/100-04-04/19-Л от 10.02.2020 с 21.02.2024 продолжить начисление неустойки (пени) по день фактического погашения суммы долга           504680,71 рублей, исходя из размера 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России за каждый день просрочки;

- по контракту № ТДР-754/100-04-04/20-Л от 27.04.2020 за период с 25.07.2020 до 20.02.2024 в размере 863656,50 рублей, с 21.02.2024 продолжить начисление неустойки (пени) по день фактического погашения суммы долга 372306,92 рублей, исходя из размера 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России за каждый день просрочки;

- по контракту ТДР-13/100-04-04/21-Л от 24.02.2021 года за период с 25.05.2021 до 20.02.2024 в размере 88 452,13 рублей, с 21.02.2024 продолжить начисление неустойки (пени) по день фактического погашения суммы долга 1769042,57 рубля, исходя из размера 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России за каждый день просрочки;

- по контракту № ТДР-01-2022-90-Л от 09.03.2022 года договорная пеня (проценты) за период с 12.12.2023 года до 20.02.2024 года в размере 4739,05 рублей, с 21.02.2024 продолжить начисление неустойки (пени) по день фактического погашения суммы долга 94781,03 рубль, исходя из размера 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России за каждый день просрочки;

- по контракту № 01-2022-680-Лукас Групп от 26.12.2022 за период с 27.05.2023 до 20.02.2024 в размере 132 623,85 рублей, с 21.02.2024 продолжить начисление неустойки (пени) по день фактического погашения суммы долга 2652477,09 рублей, исходя из размера 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России за каждый день просрочки.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При подаче в арбитражный суд искового заявления истец уплатил по платежному поручению №1 от 19.02.2024 в доход федерального бюджета 135 971 руб. госпошлины.

Размер государственной пошлины по делу с учетом уточненных требований составляет 55 542 руб. (п.1 ч.1 ст.333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, далее – НК РФ).

В соответствии пп.3 пункта 1 ст. 333.40 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в  редакции ФЗ от 26.07.2019 №198-ФЗ), уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае прекращения производства по делу (административному делу) или оставления заявления (административного искового заявления) без рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции или арбитражными судами, при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

Как отмечено выше, ответчик признал исковые требования. 

При таких обстоятельствах государственная пошлина по делу в размере 16 662 руб.  (30 % от суммы государственной пошлины 55 542 руб., подлежащей уплате по настоящему делу) относится на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца. 

Государственная пошлина в размере 38 800 руб. (70% от подлежащей уплате)  подлежит возврату истцу.

Государственная пошлина в размере 80 429, 63 руб. подлежит возврату истцу как излишне уплаченная. 

Руководствуясь ст.ст.167-170, ч.2 ст.176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Лукас Групп» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Феникс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Лукас Групп» 6 623 333,77 руб., в том числе 5 393 288,31 руб. задолженности по контрактам, 1 229728,29 руб. пени по контрактам, 317,17 руб. законной неустойки исчисленной по правилам статьи 395 ГК РФ, а также пени с 21.02.2024 по день фактического погашения суммы долга, исходя из размера 1/360 двойной ключевой ставки, установленной ЦБ РФ за каждый день просрочки, а также 16 835 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Лукас Групп» из федерального бюджета Российской Федерации 119 136,63 руб. государственной пошлины, уплаченной на основании платежного поручения от 19.02.2024 №1.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня принятия и может быть обжаловано в течение указанного срока в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Тула.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской области.

 

Судья                                                                                                               Ивашина Я.В.