АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-10160/2017

г. Новосибирск

19 июля 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 июля 2017 года      

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефремовой О.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску закрытого акционерного общества "Строительно-монтажное управление № 2 Тоннельного отряда № 27" (ОГРН 1025442449064), г. Новосибирск 

к Муниципальному казенному предприятию города Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 4" (ОГРН 

<

***>), г.Новосибирск 

о взыскании 10 135 421 рубля 53 копеек,

при участии:

от истца: не явился, извещен, 

от ответчика: не явился, извещен,

установил:

закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление № 2 Тоннельного отряда № 27" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Муниципальному казенному предприятию города Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 4" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договорам №26 от 04.07.2016, №39 от 25.07.2016, №57 от 16.08.2016, №72 от 08.09.2016, №74 от 14.09.2016, №83 от 29.09.2016, №97 от 21.10.2016, №109 от 08.11.2016, №169 от 25.12.2016 в общей сумме 10 135 421 рубль 53 копейки.

В ходе судебного разбирательства истцом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ заявлено ходатайство об уточнении исковых требований в связи с частичной оплатой задолженности ответчиком на сумму 5 700 000 рублей. Согласно уточненным исковым требованиям, истец просит взыскать с ответчика задолженность в размере 4 435 421 рубль 53 копеек. Уточнения приняты судом.

В предварительном судебном заседании представитель истца поддержал заявленные исковые требования с учетом уточнений. 

Надлежащим образом извещенный ответчик в предварительное и судебное заседания не явился, мотивированный отзыв в материалы дела не направил, вместе с тем представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Дело рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Проанализировав исковые требования, исследовав и оценив все представленные доказательства в совокупности согласно части 2 статьи 64, статье 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд установил следующее.

Между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключены договоры №26 от 04.07.2016, №39 от 25.07.2016, №57 от 16.08.2016, №72 от 08.09.2016, №74 от 14.09.2016, №83 от 29.09.2016, №97 от 21.10.2016, №109 от 08.11.2016, №169 от 25.12.2016.

По условиям указанных договором подрядчик обязался выполнить в установленный договором срок подрядные работы на объекте заказчика – теплая автомобильная стоянка, а заказчик обязался принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену (пункты 1.1 договоров). Виды работ и услуг установлены сторонами в локальных сметных расчетах, технических заданиях, являющимися приложениями к договорам.

По своей правовой природе заключенные договоры являются договорами подряда. Правоотношения сторон регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 2.1 договора № 26 стоимость работ по договору составляет 3 478 158 рублей 56 копеек. Во исполнение заключенного договора, подрядчиком выполнены работы  на сумму 3 478 158 рублей 56 копеек, что подтверждается представленным истцом актом о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 18.07.2016, а так же справой о стоимости выполненных работ формы КС-3. Указанные акт и справка подписаны сторонами, содержат оттиски печатей. 

Порядок оплаты работ по договору согласован сторонами в пункте 2.4 договора и предполагает, что авансовый платеж в размере до 30% от стоимости работ по договору осуществляется заказчиком в течение 10 банковских дней с даты подписания договора, окончательный расчет за фактически выполненные работы производится в течение 15 банковских дней после передачи результата работ заказчику, но не позднее 01 сентября 2016 года. 

Согласно пункту 2.1 договора № 39 стоимость работ по договору составляет 4 988 641 рубль 16 копеек. Во исполнение заключенного договора, подрядчиком выполнены работы на сумму 4 988 641 рубль 16 копеек, что подтверждается представленным истцом актом о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 12.08.2016, а так же справой о стоимости выполненных работ формы КС-3. Указанные акт и справка подписаны сторонами, содержат оттиски печатей. 

Порядок оплаты работ по договору согласован сторонами в пункте 2.4 договора в редакции дополнительного соглашения  от 12.08.2016 и предполагает, что авансовый платеж в размере до 30% от стоимости работ по договору осуществляется заказчиком в течение 10 банковских дней с даты подписания договора, окончательный расчет за фактически выполненные работы производится после передачи результата работ заказчику. 

Согласно пункту 2.1 договора № 57 стоимость работ по договору составляет 4 949 802 рубля 64 копейки. Во исполнение заключенного договора, подрядчиком выполнены работы на сумму 4 949 802 рубля 64 копейки, что подтверждается представленными истцом актами о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 23.08.2016, № 2 от 29.08.2016, №3 от 08.09.2016, № 4 от 12.09.2016, а так же справками о стоимости выполненных работ формы КС-3. Указанные акты и справки подписаны сторонами, содержат оттиски печатей. 

Порядок оплаты работ по договору согласован сторонами в пункте 2.4 договора и предполагает, что авансовый платеж в размере до 30% от стоимости работ по договору осуществляется заказчиком в течение 10 банковских дней с даты подписания договора, окончательный расчет за фактически выполненные работы производится после передачи результата работ заказчику. 

Согласно пункту 2.1 договора № 72 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 21.10.2016 стоимость работ по договору составляет 4 328 566 рублей 86 копеек. Во исполнение заключенного договора, подрядчиком выполнены работы на сумму 1 234 125 рублей 42 копейки, что подтверждается представленными истцом актами о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 03.10.2016, № 2 от 28.10.2016, №3 от 26.01.2017, а так же справками о стоимости выполненных работ формы КС-3. Указанные акты и справки подписаны сторонами, содержат оттиски печатей. 

Порядок оплаты работ по договору согласован сторонами в пункте 2.4 договора и предполагает, что авансовый платеж в размере до 30% от стоимости работ по договору осуществляется заказчиком в течение 10 банковских дней с даты подписания договора, окончательный расчет за фактически выполненные работы производится после передачи результата работ заказчику. 

Согласно пункту 2.1 договора № 74 стоимость работ по договору составляет 4 949 802 рубля 64 копейки. Во исполнение заключенного договора, подрядчиком выполнены работы на сумму 4 949 802 рубля 64 копейки, что подтверждается представленными истцом актами о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 19.09.2016, № 2 от 03.10.2016, а так же справками о стоимости выполненных работ формы КС-3. Указанные акты и справки подписаны сторонами, содержат оттиски печатей. 

Порядок оплаты работ по договору согласован сторонами в пункте 2.4 договора и предполагает, что авансовый платеж в размере до 30% от стоимости работ по договору осуществляется заказчиком в течение 10 банковских дней с даты подписания договора, окончательный расчет за фактически выполненные работы производится после передачи результата работ заказчику. 

Согласно пункту 2.1 договора № 83 стоимость работ по договору составляет 4 463 891 рубль 62 копейки. Во исполнение заключенного договора, подрядчиком выполнены работы на сумму 3 897 807 рублей 86 копеек, что подтверждается представленными истцом актами о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 05.10.2016, № 2 от 25.11.2016, № 3 от 26.01.2017, а так же справками о стоимости выполненных работ формы КС-3. Указанные акты и справки подписаны сторонами, содержат оттиски печатей. 

Порядок оплаты работ по договору согласован сторонами в пункте 2.4 договора и предполагает, что авансовый платеж в размере до 30% от стоимости работ по договору осуществляется заказчиком в течение 10 банковских дней с даты подписания договора, окончательный расчет за фактически выполненные работы производится после передачи результата работ заказчику. 

Согласно пункту 2.1 договора № 97 стоимость работ по договору составляет 4 774 983 рубля 44 копеек. Во исполнение заключенного договора, подрядчиком выполнены работы на сумму 3 5814 068 рублей 72 копейки, что подтверждается представленным истцом актом о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 28.10.2016, а так же справкой о стоимости выполненных работ формы КС-3. Указанный акт и справка подписаны сторонами, содержат оттиски печатей. 

Порядок оплаты работ по договору согласован сторонами в пункте 2.4 договора и предполагает, что авансовый платеж в размере до 30% от стоимости работ по договору осуществляется заказчиком в течение 10 банковских дней с даты подписания договора, окончательный расчет за фактически выполненные работы производится после передачи результата работ заказчику. 

Согласно пункту 2.1 договора № 109 стоимость работ по договору составляет 608 108 рублей 28 копеек. Во исполнение заключенного договора, подрядчиком выполнены работы на сумму 398 685 рублей 42 копейки, что подтверждается представленным истцом актом о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 25.11.2016, а так же справкой о стоимости выполненных работ формы КС-3. Указанный акт и справка подписаны сторонами, содержат оттиски печатей. 

Порядок оплаты работ по договору согласован сторонами в пункте 2.4 договора и предполагает, что авансовый платеж в размере до 30% от стоимости работ по договору осуществляется заказчиком в течение 10 банковских дней с даты подписания договора, окончательный расчет за фактически выполненные работы производится после передачи результата работ заказчику. 

Согласно пункту 2.1 договора № 169 стоимость работ по договору составляет 294 375 рублей 78 копеек. Во исполнение заключенного договора, подрядчиком выполнены работы на сумму 294 375 рублей 78 копеек, что подтверждается представленным истцом актом о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 20.01.2017, а так же справкой о стоимости выполненных работ формы КС-3. Указанный акт и справка подписаны сторонами, содержат оттиски печатей. 

Порядок оплаты работ по договору согласован сторонами в пункте 2.4 договора и предполагает, что авансовый платеж в размере до 30% от стоимости работ по договору осуществляется заказчиком в течение 10 банковских дней с даты подписания договора, окончательный расчет за фактически выполненные работы производится после передачи результата работ заказчику в течение 15 банковских дней. 

Поскольку окончательный расчет по договорам заказчиком не произведен, на письменное требование от 20.04.2017 (исх. №1) об уплате долга по договору ответ не получен, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Поскольку ответчиком не представлено доказательств оспаривания количества и качества выполненных работ, следовательно, ответчик обязан был оплатить их стоимость в сроки, установленные договором. Суд полагает, что истцом подтвержден факт неисполнения ответчиком принятых на себя обязательств. 

Так как на момент рассмотрения спора сумма долга ответчиком не оплачена, долг в общей сумме 4 435 421 рубль 53 копейки подлежит взысканию с ответчика на основании статей 309, 314, 708, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования  закрытого акционерного общества "Строительно-монтажное управление № 2 Тоннельного отряда № 27" удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Муниципального казенного предприятия города Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 4" (ОГРН 

<

***>) в пользу закрытого акционерного общества "Строительно-монтажное управление № 2 Тоннельного отряда № 27" (ОГРН 

<

***>) задолженность в размере  4 435 421 рублей 53 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 45 177 рублей.

Возвратить закрытому акционерному обществу "Строительно-монтажное управление № 2 Тоннельного отряда № 27" (ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 28 518 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

О.В. Суворова