АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Республика  Ингушетия,  город Назрань, проспект имени Идриса  Базоркина ,44

телефон: (8732) 22-40-77, факс: (8732) 22-40-80, http://ingushetia.arbitr.ru/info@ingushetia.mail

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А18-3036/2024

город Назрань

25 октября 2024 года

Резолютивная часть решения оглашена 25 октября 2024 года

Полный текст решения изготовлен 25 октября 2024 года

 

Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе судьи Гелисхановой Р.З., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Аушевой З.А., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ТСУ-2021» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) к Администрации сельского поселения Сурхахи (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности по договорам строительного подряда в общей сумме 2 350 235,76 руб..  

при участии: от истца ФИО1 от ответчика - глава администрации ФИО2.

установил:

ООО «ТСУ-2021»  обратилось в арбитражный суд с заявлением к Администрации сельского поселения Сурхахи  о взыскании задолженности по договорам строительного подряда: № 10 от 17 июня 2024 года в размере 600 000 рублей, № 11 от 24 июня 2024 года в размере 550 235 рублей 76 копеек,  №12 от 01 июля 2024 года в размере 600 000  рублей,  № 13  от 08 июля 2024 в размере 600 000  рублей, а всего 2 350 235,76 рублей.

Требования обоснованы тем, что ответчиком не оплачены подрядные работы, выполненные истцом по договорам на выполнение работ по замене водопровода.

Участвующие в судебном заседании директор общества ФИО1 требования поддержал в полном объеме, представитель ответчика требования признал полностью.

Изучив материалы дела, суд, приходит к выводу, что исковое заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

17 июня 2024 года между администрацией с.п. Сурхахи» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ТСУ - 2021» (Исполнитель) заключен договор подряда № 10, по условиям которого общество по поручению заказчика обязуется осуществить комплекс работ по замене водопровода по от ул. Лесная по ул. Горная (начало).

Содержание и стоимость отдельных видов работ приводится в структуре цены по вышеуказанным работам (смета).

Стоимость работ по договору составила 600 000 руб. без НДС.

По условиям пункта 1.3 Договора срок исполнения работ - 10 дней с момента заключения Договора.

Работы по договору Исполнителем выполнены. В подтверждение принятия работ истцом представлен акт о приемке работ № 10 от 20.06.2024 по форме КС-2 и справку стоимости выполненных работ и затрат № 10 от 20.06.2024  по форме КС-3. Документы содержат все необходимые реквизиты, свойственные таким документам, имеются подписи лица, принявшего результат работ, печать.

26 июня 2024 года между администрацией с.п. Сурхахи» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ТСУ - 2021» (Исполнитель) заключен договор подряда № 11, по условиям которого общество по поручению заказчика обязуется осуществить комплекс работ по замене водопровода от ул. Овражная по ул. А.Х. Измайлова.

Содержание и стоимость отдельных видов работ приводится в структуре цены по вышеуказанным работам (смета).

Стоимость работ по договору составила 550 235 руб. без НДС.

По условиям пункта 1.3 Договора срок исполнения работ - 10 дней с момента заключения Договора.

Работы по договору Исполнителем выполнены. В подтверждение принятия работ истцом представлен акт о приемке работ № 11 от 28.06.2024 по форме КС-2 и справку стоимости выполненных работ и затрат № 11 от 28.06.2024 по форме КС-3. Документы содержат все необходимые реквизиты, свойственные таким документам, имеются подписи лица, принявшего результат работ, печать.

1 июля 2024 года между администрацией с.п. Сурхахи» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ТСУ - 2021» (Исполнитель) заключен договор подряда № 12, по условиям которого общество по поручению заказчика обязуется осуществить комплекс работ по замене водопровода по ул. Горная.

Содержание и стоимость отдельных видов работ приводится в структуре цены по вышеуказанным работам (смета).

Стоимость работ по договору составила 600 000 руб. без НДС.

По условиям пункта 1.3 Договора срок исполнения работ - 10 дней с момента заключения Договора.

Работы по договору Исполнителем выполнены. В подтверждение принятия работ истцом представлен акт о приемке работ № 12 от 05.07.2024 по форме КС-2 и справку стоимости выполненных работ и затрат № 12 от 05.07.2024 по форме КС-3. Документы содержат все необходимые реквизиты, свойственные таким документам, имеются подписи лица, принявшего результат работ, печать.

8 июля 2024 года между администрацией с.п. Сурхахи» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ТСУ - 2021» (Исполнитель) заключен договор подряда № 13, по условиям которого общество по поручению заказчика обязуется осуществить комплекс работ по замене водопровода от ул. Горная до  ул. Балхашская.

Содержание и стоимость отдельных видов работ приводится в структуре цены по вышеуказанным работам (смета).

Стоимость работ по договору составила 600 000 руб. без НДС.

По условиям пункта 1.3 Договора срок исполнения работ - 10 дней с момента заключения Договора.

Работы по договору Исполнителем выполнены. В подтверждение принятия работ истцом представлен акт о приемке работ № 13 от 12.07.2024 по форме КС-2 и справку стоимости выполненных работ и затрат № 13 от 12.07.2024 по форме КС-3. Документы содержат все необходимые реквизиты, свойственные таким документам, имеются подписи лица, принявшего результат работ, печать.

Истцом были направлены претензии об оплате задолженности по договорам, которые получены ответчиком,  что подтверждается входящим штампом администрации.

Работы ответчиком не оплачены, что и явилось основанием обращения общества в Арбитражный суд после соблюдения истцом претензионного порядка урегулирования спора.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Проанализировав условия заключенного между сторонами договора, суд установил, что правоотношения сторон регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также - ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В силу пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 ГК РФ).

В силу статьи 408 ГК РФ надлежащее исполнение прекращает обязательство.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Арбитражный суд, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (ст. 71 АПК РФ) пришел к выводу о доказанности факта исполнения истцом работ и принятия их ответчиком по договорам № 10 от 17.06.2024 г, № 11 от 20.06.2024 г., № 12 от 01.07.2024 г., и № 13 от 08.07.2024 г.  на основании чего, суд считает исковые требования в части взыскания основного долга в общей сумме 2 350 235,76 рублей правомерными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Доказательств оплаты задолженности по заключенным договорам  суду не представлено.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу

которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При подаче искового заявления обществом по платежному поручению № 1 от 23.09.2024г. уплачена госпошлина в размере 38502 руб., которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 137, 110,167-170,176   Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования   удовлетворить

Взыскать с Администрации сельского поселения Сурхахи (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТСУ-2021» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)   задолженность по договорам строительного подряда № 10 от 17 июня 2024 года 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, № 11 от 24 июня 2024 года 550235 (пятьсот пятьдесят тысяч двести тридцать пять) рублей 76 копеек,  №12 от 01 июля 2024 года 600 000 (шестьсот тысяч ) рублей,  № 13  от 08 июля 2024   600 000 (шестьсот тысяч ) рублей и расходы по  государственной пошлины  в размере 38502 рубля 00 копеек.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики  Ингушетия в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                        Гелисханова Р.З.