12/2017-51105(1) 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-7471/2017

г. Благовещенск

20 сентября 2017 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Аныша Дениса Сергеевича, 

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление закрытого акционерного  общества «Комплексная проектная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к государственному казенному учреждению управление автомобильных дорог Амурской  

области «Амурупрадор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  о внесении изменений в государственный контракт,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Внести изменения в государственный контракт от 29.03.2016 № 3352, заключенный  между закрытым акционерным обществом «Комплексная проектная компания» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) и государственным казенным учреждением  управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), изложив пункт 4.1 в следующей редакции: «4.1.  Сроки выполнения работ: начальный срок - со дня заключения настоящего Контракта,  срок окончания - 19 месяцев со дня заключения настоящего Контракта»; в Приложении №  2 «Календарный план выполнения работ» текст графы первой пятого столбца изложить в  следующей редакции: «19 месяцев с момента заключения Контракта».  

Судебные расходы по уплате государственной пошлины отнести на истца. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области  

Судья Д.С. Аныш