Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

11 марта 2024 годаДело № А56-1356/2024

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Данилова Н.П.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" (191023, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ОСТРОВСКОГО ПЛОЩАДЬ, Д 11, ОГРН: 1137800010413);

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОНА" (190121, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РИМСКОГО-КОРСАКОВА ПРОСПЕКТ, ДОМ 73/33, СТР 2, ОФИС 113, ОГРН: 1099847045440);

о взыскании по договору от 11.05.2021 №5-486/Б/ФС/2021: 191673,18 руб. неустойки за просрочку выполнения работ за период с 28.09.2021 по 09.12.2021,

от ответчика поступил отзыв, в котором он указал, что просрочка возникла по вине истца, а также просил применить положения статьи 333 ГК РФ и снизить размер неустойки, 

Принимая во внимание доводы и возражения сторон, учитывая нарушение сроков исполнения обязательств по обоюдной вине сторон, суд считает возможным применить положения статьи 404 ГК РФ и уменьшить размер неустойки до 95836,59 руб.

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОНА" в пользу НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" 95836,59 руб. неустойки, 3375 руб. судебных расходов на уплату государственной пошлины.

В остальной части отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Данилова Н.П.