АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край  

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-9860/2021

г.Чита

03 ноября 2023 года

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Альфастрой" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 30 дней со дня вступления решения в  законную силу в порядке исполнения гарантийных обязательств по договору подряда   № 596/пд/2020 от 25.08.2020, устранить недостатки, отраженные в акте от 02.08.2023,  для чего выполнить следующие виды и объемы работ:  

 № комнаты 

 №  

 Вид работ 

кв.м 

Шт. 

101 

1 

Расшивка трещин на стене в спальной комнате  

2 

Грунтовка поверхности стены в спальной комнате  

8.5 

3 

Шпатлевка стен в спальной комнате 

8.5 

4 

Покраска стены до потолка в спальной комнате  

14 

103 

1 

Демонтаж плитки в ванной комнате 

2.3 

2 

Демонтаж плиточного клея в ванной комнате 

2,3 

3 

Подготовка основания стены под укладку плитки  

2.3 

4 

Кладка плитки в ванной комнате 

2.3 

5 

Затирка швов в плитки в ванной комнате 

104 

1 

Расшивка трещин потолка в коридоре 

2 

Грунтовка поверхности потолка в коридоре 

1 

3 

Штукатурка потолка в коридоре 

1 

4 

Шпатлевка потолка в коридоре 

5 

Покраска потолка в коридоре 

1 

6 

Демонтаж плитки на стене в ванной комнате 

0,6 

7 

Демонтаж плиточного клея в ванной комнате 

0,6 

8 

Подготовка основания стены под укладку плитки  

0,6 

9 

Кладка плитки в ванной комнате 

0,6 

10  

Затирка швов в ванной комнате 

108 

1 

Расшивка трещин на стене в спальной комнате  

2 

Грунтовка поверхности стены в спальной комнате  

14.3 

3 

Штукатурка стены в спальной комнате 

14.3 

4 

Покраска стены до потолка в спальной комнате  

14.3 

5 

Демонтаж плитки в ванной комнаты 

0.1 

6 

Демонтаж плиточного клея в ванной комнаты 

0.1 

7 

Подготовка основания стены под укладку плитки  

8 

Кладка плитки в ванной комнате 

0.1 

9 

Затирка швов в ванной комнате 

10  

Ремонт балконного блока (дверей), отсутствие герметичности  

1 

110 

1 

Ремонт балконного блока (дверей), отсутствие герметичности  

1 

112 

1 

Замена раковины(35х45) на 60х70 

1 

2 

Замена душевого поддона, полосы ржавчины на эмали  

1 

114 

1 

Замена раковины(35х45) на 60х70 

1 

2 

Замена душевого поддона, полосы ржавчины на эмали  

1 

115 

1 

Замена раковины(35х45) на 60х70 

1 

2 

Замена душевого поддона, полосы ржавчины на эмали  

1 

116 

1 

Замена раковины(35х45) на 60х70 

1 

2 

Замена душевого поддона, полосы ржавчины на эмали  

1 

117 

1 

Демонтаж плитки в ванной комнаты 

1 

2 

Демонтаж плиточного клея в ванной комнаты 

1 

3 

Подготовка основания стены под укладку плитки  

4 

Кладка плитки в ванной комнате 

1 

5 

Затирка швов в ванной комнате 

6 

Замена душевого поддона, полосы ржавчины на эмали  

1 

121 

1 

Расшивка трещин на стене в спальной комнате  

0,5 

2 

Грунтовка поверхности стены в спальной комнате  

0.5 

3 

Шпаклевка стен в спальной комнате 

0,5 

4 

Покраска стены до потолка в спальной комнате  

6.5 

5 

Замена раковины (35х45) на 60х70 

1 

 122 

1 

Замена раковины (35х45) на 60х70 

1 

123 

1 

Расшивка трещин на стене в спальной комнате  

2.8 

2 

Грунтовка поверхности стены в спальной комнате  

2.8 

3 

Штукатурка стены в спальной комнате  

2.8 

4 

Покраска стены до потолка в спальной комнате  

5 

5 

Демонтаж плитки 

0.5 

6 

Демонтаж плиточного клея в ванной комнаты  

0,5 

7 

Подготовка основания стены под укладку плитки  

8 

Кладка плитки в ванной комнате 

0.5 

9 

Затирка швов в плитки в ванной комнате  

10 

Замена раковины (35х45) на 60х70 

1 

127 

1 

Расшивка трещин на стене в спальной комнате  

1.4 

2 

Грунтовка поверхности стены в спальной комнате  

1.4 

3 

Штукатурка стены в спальной комнате  

1.4 

4 

Покраска стены до потолка в спальной комнате  

5 

5 

Демонтаж плитки в ванной комнате 

7 

6 

Демонтаж плиточного клея в ванной комнате  

7 

7 

Подготовка основания стены под укладку плитки  

8 

Кладка плитки в ванной комнате 

7 

9 

Затирка швов в плитки в ванной комнате  

128 

1 

Расшивка трещин на стене в спальной комнате  

2 

Грунтовка поверхности стены в спальной комнате  

2.1 

3 

Штукатурка стены в спальной комнате  

2.1 

4 

Покраска стены до потолка в спальной комнате  

5 

5 

Демонтаж плитки в ванной комнате 

0,5 

6 

Демонтаж плиточного клея в ванной комнате  

0.5 

7 

Подготовка основания стены под укладку плитки  

8 

Кладка плитки в ванной комнате 

0.5 

9 

Затирка швов в плитки в ванной комнате  

202 

1 

Демонтаж плитки в ванной комнате 

0.3 

2 

Демонтаж плиточного клея в ванной комнате  

0.3 

3 

Подготовка основания стены под укладку плитки  

4 

Кладка плитки в ванной комнате 

0.3 

5 

Затирка швов в плитки в ванной комнате  

206 

1 

Расшивка трещин потолка в коридоре 

2 

Грунтовка поверхности потолка в коридоре 

1 

3 

Штукатурка потолка в коридоре 

1 

4 

Покраска потолка в коридоре 

1 

202 

1 

Демонтаж плитки в ванной комнате 

0.1 

2 

Демонтаж плиточного клея в ванной комнате  

0.1 

3 

Подготовка основания стены под укладку плитки  

4 

Кладка плитки в ванной комнате 

0.1 

5 

Затирка швов в плитки в ванной комнате  

210 

1 

Демонтаж плитки в ванной комнате 

0.1 

2 

Демонтаж плиточного клея в ванной комнате  

0.1 

3 

Подготовка основания стены под укладку плитки  

4 

Кладка плитки в ванной комнате 

0.1 

5 

Затирка швов в плитки в ванной комнате  

211 

1 

Демонтаж плитки в ванной комнате 

4 

2 

Демонтаж плиточного клея в ванной комнате  

4 

3 

Подготовка основания стены под укладку плитки  

4 

Кладка плитки в ванной комнате 

4 

5 

Затирка швов в плитки в ванной комнате  

6 

Демонтаж плитки в коридоре 

0.1 

7 

Демонтаж плиточного клея в коридоре 

0.1 

8 

Кладка плитки в коридоре 

0.1 

9 

Затирка швов в плитки в коридоре 

10  

Замена двери балкона (сломалась фурнитура, упала  дверь)  

1 

212 

1 

Демонтаж плитки в ванной комнате 

10,3 

2 

Демонтаж плиточного клея в ванной комнате  

10,3 

3 

Подготовка основания стены под укладку плитки  

4 

Кладка плитки в ванной комнате 

10,3 

5 

Затирка швов в плитки в ванной комнате  

213 

1 

Демонтаж плитки в ванной комнате 

11,3 

2 

Демонтаж плиточного клея в ванной комнате  

11,3 

3 

Подготовка основания стены под укладку плитки  

4 

Кладка плитки в ванной комнате 

11,3 

5 

Затирка швов в плитки в ванной комнате  

6 

Замена раковины (35х45) на 60х70  

1 

215 

1 

Замена раковины (35х45) на 60х70  

1 

216 

1 

Демонтаж плитки в ванной комнате 

4,2 

2 

Демонтаж плиточного клея в ванной комнате  

4,2 

3 

Подготовка основания стены под укладку плитки  

4 

Кладка плитки в ванной комнате 

4,2 

5 

Затирка швов в плитки в ванной комнате  

6 

Не соответствие раковина со сметой по ремонту  

1 

217 

1 

Демонтаж плитки в ванной комнате 

3,5 

2 

Демонтаж плиточного клея в ванной комнате  

3,5 

3 

Подготовка основания стены под укладку плитки  

4 

Кладка плитки в ванной комнате 

3,5 

5 

Затирка швов в плитки в ванной комнате  

6 

Не соответствие раковина со сметой по ремонту  

1 

7 

Расшивка трещин потолка в коридоре 

8 

Грунтовка поверхности потолка в коридоре 

1 

9 

Штукатурка потолка в коридоре 

1 

10  

Шпатлевка потолка в коридоре 

11  

Покраска потолка в коридоре 

1 

218 

1 

Замена раковины (35х45) на 60х70 

1 

2 

Замена душевого поддона, полосы ржавчины на эмали 

1 

221 

1 

Расшивка трещин на стене в спальной комнате  

2 

2 

Грунтовка поверхности стены в спальной комнате  

2 

3 

Шпаклевка стен в спальной комнате 

2 

4 

Покраска стены до потолка в спальной комнате  

14 

5 

Замена раковины (35х45) на 60х70  

1 

222 

1 

Замена раковины (35х45) на 60х70  

1 

228 

1 

Расшивка трещин на стене в спальной комнате  

2 

2 

Грунтовка поверхности стены в спальной комнате  

2 

3 

Шпаклевка стен в спальной комнате 

2 

4 

Покраска стены до потолка в спальной комнате 

14 

Коридор 

1этаж  

1 

Замена плитки 

6 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ""Альфастрой" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу государственного автономного учреждения  здравоохранения "Центр медицинской реабилитации Дарасун" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) судебные издержки в размере 60000 руб., расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6000 руб.  

Возвратить государственному автономному учреждению здравоохранения "Центр  

медицинской реабилитации Дарасун" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из  федерального бюджета излишне оплаченную государственную пошлину в размере  58881,40 руб.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный  апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья М.В. Сталичнова