Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-435/2024

г. Хабаровск

04 июня 2024 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена «21» мая 2024 г.

Арбитражный суд Хабаровского края

в составе судьи Трещевой  В.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Яровым Е.Р.,

рассмотрев в заседании суда дело по иску Общества с ограниченной ответственностью строительная компания «ЭВИС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, Демьяна Бедного, д. 31, кв. 23)

к Некоммерческой организации «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680030, 

<

...>)

о взыскании 64 448 руб. 00 коп.

при участии:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности № 2 от 21.03.2024, диплом о высшем образовании;

от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности б/н от 20.06.2023, диплом о высшем образовании;

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Эвис» (далее – истец, ООО СК «Эвис») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Некоммерческой организации «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (далее - ответчик, НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта», Фонд) о взыскании 64 448 руб. 00 коп.  задолженности по оплате выполненных работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирных, расположенных по адресу 

<

...>., ул. Ким Ю Чена 43, ул. Королева, 12 б, ул. Путевая, 4, ул. Трехгорная, 65а.

Определением суда от 16.01.2024 исковое заявление оставлено без движения, истцу предложено в срок до 30.01.2024 устранить следующие недостатки, а именно уточнить требования в просительной части иска.

Определением суда от 22.01.2024 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), возбуждено производство по делу № А73-435/2024. Ответчику предложено в срок до 12.02.2024 представить отзыв на исковое заявление и доказательства в обоснование возражений. Срок для представления дополнительных документов, содержащих объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, установлен не позднее 05.03.2024.

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о принятии искового заявления, возбуждении производства по делу и о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

30.01.2024 через систему электронной подачи документов «Мой арбитр» от ответчика поступил отзыв на иск, согласно которому возражал в удовлетворении исковых требований. В обоснование пояснил, что комиссионный акт №4 от 08.09.2023 г., приложенный к требованию, не согласован с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, так же в соответствии с действующим жилищным законодательством, ответчик не может распоряжаться деньгами собственников, которые формируют фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора по своему усмотрению, в том числе производить оплату работ без согласованного в порядке действующего законодательства комиссионного акта приемки работ.

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд пришел к выводу о наличии предусмотренного статьей 227 АПК РФ основания для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, в связи с чем, определением суда от 22.03.2024 перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства и назначил предварительное судебное заседание и судебное разбирательство по существу дела арбитражным судом первой инстанции на «23» апреля 2024 на 12 час. 00 мин.

Ввиду болезни судьи В.Н. Трещевой в соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 158 АПК РФ определением суда от 22.04.2024 судебное заседание отложено на «21» мая 2024 г. в 15 часов 00 минут.

21.05.2024 представитель истца в предварительном судебном заседании настаивал на заявленных требованиях в полном объёме.

Представитель ответчика в предварительном судебном заседании возражал в удовлетворении исковых требований в полном объёме.

Суд уточнил у представителей сторон мнение относительно перехода к судебному разбирательству дела.

Представители сторон не возражали относительно перехода к судебному разбирательству дела.

Зафиксированным в протоколе судебного заседания определением, при отсутствии возражений представителя истца, на основании части 4 статьи 137 АПК РФ с учетом разъяснений, изложенных в пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание первой инстанции.

В ходе судебного разбирательства суд, рассмотрев материалы дела, установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, Между НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» (далее - «заказчик») и ООО СК «Эвис» (далее - «подрядчик»), на основании протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в котором содержится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся от 07 февраля  2023 года № 202250000012300008был заключен договор от 21.02.2023 № 202250000012300008  (далее – «договор»), в соответствии с пунктом 1.1 которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора, техническими заданиями на разработку проектной документации (приложения № 1) и условиями настоящего договора осуществить разработку проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

<

...> Результатом работ является проектная документация.

Согласно пункту 2.1 договора цена договора определена по итогам электронного аукциона и составляет 580 376,00 (пятьсот восемьдесят тысяч триста семьдесят шесть) рублей 00 копеек. Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения.

- цена выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>. 38, по итогам электронного аукциона составляет 125 816,00 (сто двадцать пять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек. Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения;

- цена выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный    ремонт    внутридомовых    инженерных    систем    электроснабжении

многоквартирного лома, расположенного по адресу: 

<

...> Ю Чена, 43, по итогам электронного аукциона составляет 205 225,00 (цвести пять тысяч двести двадцать пять) рублен 00 копеек. Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения;

- цена выполнения работ по разработке проектной документации па капитальный    ремонт    внутридомовых    инженерных    систем    электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> б, по итогам электронного аукциона составляет 95 221,00 (девяносто пять тысяч двести двадцать один) рубль 00 копеек. Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения.

-цена выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный    ремонт    внутридомовых    инженерных    систем    электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>. 4. по итогам электронного аукциона составляет 64 448 руб. 00 (шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок восемь) 00 коп. Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения.

-  цена выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжении многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>. 65 а, по итогам электронного аукциона составляет 89 666,00 (восемьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек. Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения.

На основании пункта 2.6 договора, оплата работ по разработке проектной документации производится Заказчиком на основании подписанных членами комиссий и согласованных органом местного самоуправления, а также лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в соответствующих многоквартирных домах (в случае, если работы проводятся на основании решений собственников помещений) комиссионных актов о приемке работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому (виду работ по соответствующему многоквартирному дому), входящему в предмет настоящего договора, и представленной в полном объеме проектной документации (в количестве и составе, установленных в соответствующем техническом задании на разработку проектной документации (приложение № 1), счета-фактуры (в случае, если подрядчик является плательщиком НДС), иных документов, в случаях, установленных в настоящем договоре, в течение 300 календарных дней с даты получения данных документов по соответствующему многоквартирному дому (виду работ по соответствующему многоквартирному дому), путем внесения суммы оплаты на расчетный счет подрядчика.

Оплата осуществляется в установленном порядке и в сроки, при отсутствии у заказчика замечаний к поступившему пакету документов согласно условий настоящего договора. Дата получения документов определяется согласно входящим регистрационным дате и номеру, проставляемым в приемной заказчика на сопроводительном письме (накладной, акте приема-передачи документов).

Сроки, порядок сдачи и приёмки работ стороны согласовали в разделе 5 договора.

В соответствии с пунктом 5.1 договора, проверка и приемка выполненных работ по настоящему договору на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, осуществляется на основании комиссионного акта о приемке работ к проектной документации по каждому многоквартирному дому (виду работ по соответствующему многоквартирному дому). Комиссионный акт о приемке работ составляется на фактически выполненные виды и объемы работ по каждому многоквартирному дому по числу членов комиссии. В комиссионном акте о приемке работ в обязательном порядке должны быть указаны номер и дата договора, адрес многоквартирного дома и вид работ, по которому передается проектная документация, стоимость выполненных работ.

Приемка работ по каждому многоквартирному дому осуществляется комиссией в составе: заказчика, представителя органа исполнительной власти Хабаровского края, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации (далее - орган исполнительной власти края), представителя организации, осуществляющей управление соответствующим многоквартирным домом, представителей собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме (пункт 5.2 договора)

В случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения органа местного самоуправления, представителями собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме являются лица, направившие не позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания выполнения работ, указанной в пункте 3.2. настоящего договора, информацию заказчику о желании участвовать в комиссии, с приложением документов, подтверждающих право действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (доверенность, протокол общего собрания собственников), в том числе председатель совета многоквартирного дома. В случае, если в установленный срок не поступит ни 1-го заявления об участии в Комиссии, информация о дате и времени приемки работ направляется подрядчиком любому собственнику помещения в данном многоквартирном доме (информация о собственнике предоставляется заказчиком)

В случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме, представителями собственников помещений в многоквартирном доме являются лица, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, определенные в порядке, установленном в ст. 189 ЖК РФ (пункт 5.3 договора).

Согласно пункту 5.19. договора, согласование комиссионного акта о приёмке работ производится лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме), путём проставления подписи соответствующего уполномоченного лица (с расшифровкой - фамилия, инициалы) на комиссионном акте о приёмке работ.

Как следует из материалов дела, истцом 07.11.2023 письмом за исх. № 457 направлено представителю собственников ФИО3 уведомление о приёмке работ, назначенной на 17.11.2023 в 10:00. (адрес:  

<

...>)

В указанное время собственники не явились на приёмку работ.

29.11.2023 истец направил в адрес ответчика требование № 493 принять оплатить выполненные работы, в противном случае оставлял за собой право на обращение в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о принятии и об оплате выполненных работ. С претензией подрядчик направил в адрес заказчика подписанные в одностороннем порядке комиссионные акты, акты сдачи-приемки выполненных работ, счета на оплату, проектно-сметную документацию (на бумажном носителе и в электронном виде), накладные и акты приёма-передачи проектно-сметной документации.

В ответ на претензию ответчик письмом от 14.07.2023 г. № 03-07/7592 сообщил об отсутствии оснований для оплаты работ по договору.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО СК «Эвис» с рассматриваемым иском в Арбитражный суд Хабаровского края.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить.

Согласно статье 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно абзацу 2 статьи 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором: уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом подрядчику (пункты 1, 2 статьи 720 ГК РФ).

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами; при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Соответственно, удовлетворение требований, основанных на одностороннем акте приемки выполненных работ, возможно в случае установления обстоятельств необоснованного отказа ответчика от подписания акта.

Согласно пункту 2 статьи 190 Жилищного кодекса РФ основанием для перечисления региональным оператором средств по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме является акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ (за исключением случая, указанного в части 3 настоящей статьи).

Такой акт приемки должен быть согласован с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

В соответствии с нормой, предусмотренной в абзаце 2 пункта 3 статьи 308 ГК РФ, в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства.

Согласно пункту 5.1 договора проверка и приёмка выполненных работ по договору на соответствие их объёма и качества требованиям, установленным в договоре, осуществляется на основании комиссионного акта о приёмке работ к проектной документации по каждому многоквартирному дому (виду работ по соответствующему многоквартирному дому). Комиссионный акт о приёмке работ составляется на фактически выполненные виды и объемы работ по каждому многоквартирному дому по числу членов комиссии. В комиссионном акте о приёмке работ в обязательном порядке должны быть указаны номер и дата договора, адрес многоквартирного дома и вид работ, по которому передается проектная документация, стоимость выполненных работ.

В соответствии с пунктом 5.3 договора приёмка работ по каждому многоквартирному дому осуществляется комиссией в составе: заказчика, представителя органа исполнительной власти Хабаровского края, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации (далее - орган исполнительной власти края), представителя организации, осуществляющей управление соответствующим многоквартирным домом, представителей собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.

В случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме, представителями собственников помещений в многоквартирном доме являются лица, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, определенные в порядке, установленном в статьёй 189 ЖК РФ.

Согласно пункту 5.4 договора после завершения работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет договора, подрядчик не менее, чем за 15 рабочих дней письменно уведомляет заказчика о готовности передать результат выполненных работ (разработанную проектную документацию) с указанием предлагаемых даты и времени приемки выполненных работ. Одновременно с уведомлением заказчику передается по одному экземпляру (в письменной форме и в электронном виде, в том числе в формате XML и/или Гранд-СМЕТА) комплекта проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет договора.

В соответствии с пунктом 5.5 договора заказчик в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления подрядчика о завершении работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет договора, и экземпляра комплекта проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет договора, письменно уведомляет подрядчика и орган исполнительной власти края о готовности осуществления приемки работ по указанному многоквартирному дому с указанием согласованных даты и времени приёмки работ или уведомляет подрядчика о невозможности осуществления приемки работ в связи с обнаружением отступлений подрядчика от условий договора, ухудшающих результаты работ или иных недостатков (в том числе несоответствия проектной документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящего договора, а также требованиям и указаниям заказчика), при этом заказчик направляет подрядчику перечень необходимых доработок.

Подрядчик обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества своими силами и без увеличения стоимости работ.

Согласно пункту 5.7 договора приёмка результатов выполненных работ по договору осуществляется Заказчиком и Органом исполнительной власти края в присутствии Подрядчика по адресу Заказчика: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, каб. 705 в срок и во время, указанные в уведомлении Заказчика, направляемого в соответствии с пунктом 5.5 раздела договора.

Подрядчик при предъявлении выполненных работ к приёмке представляет заказчику подписанные и заверенные со своей стороны комиссионные акты о приёмке работ по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет договора.

Заказчик и орган исполнительной власти края в случае установления выполнения работ с качеством и в полном соответствии с требованиями закона и настоящего договора, подписывают комиссионные акты о приёмке работ по соответствующим многоквартирным домам (видам работ по соответствующим многоквартирным домам).

Комиссионный акт о приёмке работ по многоквартирному дому подписывается представителями подрядчика и заказчика с расшифровкой подписи (фамилия, инициалы), заверяется печатями подрядчика (при наличии) и заказчика (пункт 5.8 договора).

Подписание комиссионного акта о приёмке работ производится органом исполнительной власти края путём проставления подписи уполномоченного лица органа исполнительной власти Хабаровского края (с расшифровкой - фамилия, инициалы) на комиссионном акте о приёмке работ. Заказчику должен быть представлен документ (заверенная надлежащим образом копия документа), уполномочивающий представителя органа исполнительной власти края на подписание комиссионного акта о приёмке работ (пункт 5.9 договора).

После подписания Комиссионного акта о приёмке работ заказчиком и органом исполнительной власти края (в случае присутствия последнего при приемке работ в соответствии с пунктом 5.7 договора), Подрядчик не менее чем за 5 рабочих дней письменно уведомляет организацию, осуществляющую управление соответствующим многоквартирным домом, представителя собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме о готовности передать результат выполненных работ (разработанную проектную документацию) с указанием предлагаемых даты, времени и места приемки выполненных работ по соответствующему многоквартирному дому. Место приёмки выполненных работ должно находиться в границах населенного пункта, в котором находится многоквартирный дом, разработка проектной документации на выполнение работ по которому является предметом договора (пункт 5.10 договора).

Подписание комиссионного акта о приёмке работ производится организацией, осуществляющей управление соответствующим многоквартирным домом, путём проставления подписи уполномоченного лица организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом (с расшифровкой - фамилия, инициалы), на комиссионном акте о приёмке работ. Заказчику должен быть представлен документ (заверенная надлежащим образом копия документа), уполномочивающий представителя организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом, на подписание комиссионного акта о приёмке работ (пункт 5.11 договора).

Подписание комиссионного акта о приёмке работ производится представителями собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме путем проставления подписи данных лиц (с расшифровкой - фамилия, инициалы) на Комиссионном акте о приёмке работ (пункт 5.12 договора).

Экземпляры комплектов проектной документации по многоквартирным домам, представленные подрядчиком заказчику согласно пункту 5.4 раздела договора, являются контрольными (пункт 5.15 договора).

Работы по соответствующему многоквартирному дому считаются принятыми комиссией и исполненными подрядчиком с даты подписания всеми присутствующими при приёмке работ членами комиссии комиссионного акта о приёмке работ по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет договора (пункт 5.16 договора).

Работы по соответствующему многоквартирному дому считаются принятыми комиссией по данному дому и исполненными подрядчиком с даты подписания всеми присутствующими при приёмке работ членами комиссии по данному многоквартирному дому комиссионного акта о приёмке работ по соответствующему многоквартирному дому, за исключением уклонившихся членов комиссии (пункт 5.16.2 договора).

Документация в полном объеме (в количестве и составе, установленными в соответствующем техническом задании на разработку проектной документации по многоквартирному дому, входящему в предмет договора, должна быть передана подрядчиком заказчику по накладной и акту приёма-передачи документов одновременно с подписанным членами комиссии и согласованным органом местного самоуправления, а также лицом(-ами), которое(-ые) уполномочено(-ы) действовать от имени собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме (в случае, если работы проводятся на основании решений собственников помещений) комиссионным актом о приёмке работ по разработке проектной документации по соответствующему многоквартирному дому, входящему в предмет договора. Оплата выполненных работ осуществляется заказчиком в сроки, установленные в настоящем договоре, но не ранее получения проектной документации по соответствующему многоквартирному дому в полном объёме (пункт 5.20 договора).

Установленный договором порядок сдачи работ истцом исполнен.

Уполномоченные представители собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме на приёмку работ и подписание комиссионных актов не явились.

Претензией (требованием) от 29.11.2023 за исх. № 493 подрядчиком заказчику был передан комиссионный акт о приёмке работ, акты сдачи-приёмки выполненных работ и разработанная проектно-сметная документация.

Комиссионный акт от 08.09.2023 № 4 был подписан Обществом с ограниченной ответственностью СК «Эвис», представителями  управляющей организации и органа местного самоуправления.

Ответчик претензий по объёму и качеству выполненных работ не заявил, мотивированный отказ от приёмки выполненных работ и подписания актов не направил в адрес подрядчика.

Истец в обоснование факта выполнения работ представил в материалы дела подписанные в одностороннем порядке акты сдачи-приёмки выполненных работ на общую сумму 64 448 руб. 00 коп., комиссионный акт о приёмке работ, а также доказательства передачи результатов работ (разработанной проектно-сметной документации) ответчику.

Указанные односторонний акт суд принимает в качестве надлежащего доказательства факта выполнения работ истцом и сдачи результата работ ответчику.

Ответчиком не представлено доказательств, которые подтверждали бы факт некачественного выполнения работ по договору.

Оценив представленные истцом доказательства в соответствии со статьёй 71 АПК РФ, суд пришёл к выводу, что предусмотренный договором порядок сдачи работ подрядчиком соблюдён. ООО «СК «Эвис» представило суду доказательства надлежащего уведомления заказчика и лиц, уполномоченных на подписание комиссионного акта приемки работ от собственников.

Дав оценку условиям заключенного между сторонами договора подряда по правилам статьи 431 ГК РФ, суд пришел к выводу о том, что истцом исполнены предусмотренные договором условия для надлежащей проверки и принятия заказчиком выполненных работ, на основании чего, требование о взыскании основного долга в размере 64 448 руб. 00 коп. подлежит удовлетворению.

В связи с тем, что требования истца удовлетворяются в полном объеме  на основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы в виде уплаченной госпошлины по платежному поручению № 1 от 09.01.2024 г. в сумме 2 580 руб. 00 коп. подлежат возмещению с ответчика в размере 2 578 руб. 00 коп., а излишне уплаченная в порядке стати 333.40 НК РФ подлежит возврату из федерального бюджета в размере 2 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с Некоммерческой организации «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью строительная компания «ЭВИС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) основной долг в размере 64 448 руб. 00 коп.

Взыскать с Некоммерческой организации «Региональный оператор-Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью строительная компания «ЭВИС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в сумме 2 578 руб. 00 коп.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «ЭВИС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета уплаченную госпошлину в сумме 2 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

Судья                                                                                                  В.Н. Трещева