АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-41954/2020

город Нижний Новгород                                                                  «19» апреля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 апреля 2021 года 

В полном объеме решение изготовлено 19 апреля  2021 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Бодровой Натальи Владимировны (шифр дела 14-761),

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Калагановой Е.Г.,

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Икар Инвест», город Нижний Новгород (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

к ответчику: Администрации города Нижнего Новгорода, город Нижний Новгород (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

об изменении условий пункта 4.1. договора о развитии застроенной территории от 18.04.2013 № 083/07,

при участии в судебном заседании представителей сторон:

от истца - ФИО1 (доверенность от 08.04.2021),

от ответчика - ФИО2 (доверенность от 28.12.2020).

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Икар Инвест» (далее – Общество) обратилось в суд с иском к  Администрации города Нижнего Новгорода (далее – Администрация) и просит изменить условия пункта 4.1. договора о развитии застроенной территории от 18.04.2013 № 083/07 и продлить действие договора на срок до  18 октября 2025 года.

От сторон в судебном заседании поступило ходатайство об отложении судебного заседания для урегулирования спора мирным путем.

Согласно части 3 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными.

Из содержания указанной нормы следует, что совершение такого процессуального действия как отложение судебного заседания является правом суда, а не обязанностью.

Материалы дела располагают достаточным объемом доказательств, позволяющим рассмотреть спор по существу; рассмотрения настоящего дела суд по ходатайству сторон неоднократно откладывал; кроме того, в соответствии со статьей 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возможность заключить мировое соглашение предоставлена сторонам на любой стадии арбитражного процесса.

С учетом изложенного суд отказывает сторонам в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания в силу процессуальной нецелесообразности. 

Ответчик в отзыве на иск и его представитель устно в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленных требований.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв до 9 часов 30 минут 16.04.2021.

Резолютивная часть решения объявлена 16.04.2021. Изготовление решения в полном объеме в соответствии со статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ откладывалось до 19.04.2021.

Как следует из материалов дела, 18.04.2013 между Администрацией и Обществом  заключен договор о развитии застроенной территории № 083/07, предметом которого является развитие застроенной территории, расположенной на участке в границах улиц Невзоровых, Ашхабадская, ФИО3, Тверская в Советском районе площадью 2,12 га, в том числе 0,05 га территории общего пользования (далее – Территория), в отношении которой на основании ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации принято решение (постановление) администрации города Нижнего Новгорода от 29.10.2012 № 4565 «О развитии застроенной территории в границах улиц Невзоровых, Ашхабадская, ФИО3, Тверская в Советском районе.

На указанной территории  находятся здания, строения, сооружения, подлежащие сносу, реконструкции, согласно Приложению к настоящему договору.

Согласно условиям данного договора Общество обязалось: 

3.4.1. Подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки Территории, включая проект межевания Территории, в соответствии с функциональным зонированием, установленным генеральным планом города Нижнего Новгорода  и расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры не позднее 1 года с момента заключения Договора.

3.4.2. Создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на Территории, не позднее 3 лет с момента заключения настоящего договора.

3.4.3 Уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения Администрации, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах в случае признания их аварийными и подлежащими сносу после принятия решения о развитии Территории и расположенных на Территории, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с п.3.4.2. Договора, не позднее 1 месяца с момента принятия решения об их изъятии для  муниципальных нужд.

3.4.4.Осуществить строительство на Территории в соответствии с очередностью, определенной документацией по планировке Территории, не позднее 3 лет 6 месяцев с момента утверждения проекта планировки и межевания территории.

3.4.5.Осуществить в установленном порядке строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной и социальной инфраструктуры, предназначенных для обеспечения Территории, в соответствии с проектом планировки территории, включая проект межевания Территории не позднее 3 лет 6 месяцев с момента утверждения проекта планировки и межевания территории.

3.4.6. Передать в муниципальную собственность проекты инженерной инфраструктуры, построенные в соответствии с пунктом 3.4.5 настоящего договора, с техническими характеристиками, определенными дополнительным соглашением к договору и технической документацией, в течение 4 месяцев с момента завершения строительства, в счет исполнения обязательств по договору.

Согласно пункту 4.1 договора настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 6 лет. 

Администрация приняла на себя следующие обязательства: 

3.2.1. Утвердить проект планировки и межевания Территории не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний по представленному в полном объеме проекту   планировки   застроенной  территории,   включая   проект   межевания   застроенной территории.

3.2.2. В случае если на Территории расположены многоквартирные дома, которые будут признаны в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу после принятия решения о развитии Территории, принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, а также земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, не позднее 2 месяцев с момента истечения установленного собственникам помещений срока о сносе указанного дома.

Письмом от 24.11.2020 № 42 Общество обратилось в Администрацию с просьбой продлить договор спорный договор (л.д. 14).

Согласно пояснениям Общества невозможность исполнить договор в указанные в нем сроки связана в том числе с длительным оформлением Администрацией разрешительной документации, необходимой для реализации заключенного договора о развитии застроенной территории, а также с введением ограничительных мер в связи с распространением короновирусной инфекции. 

Письмом от 21.12.2020 Исх-07-07-582065/20 Администрация указала, что законодательством Российской Федерации порядок и условия изменения срока действия договора о развитии застроенной территории не предусмотрены

 При этом Администрация  выразила готовность заключить мировое соглашение в судебном порядке. 

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

Исследовав материалы дела, суд не усматривает оснований для удовлетворения исковых требований, исходя из следующих обстоятельств дела, норм материального и процессуального права.

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  450  Гражданского  кодекса Российской  Федерации  изменение  договора  возможно  по  соглашению сторон,  если  иное  не  предусмотрено  Гражданским  кодексом,  другими законами или договором.

Согласно части 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных кодексом, другими законами или договором.

По  требованию  одной  из  сторон  договор  может  быть  изменен  или расторгнут  по  решению  суда  только:  1)  при  существенном  нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным  признается  нарушение  договора  одной  из  сторон, которое  влечет  для  другой  стороны  такой  ущерб,  что  она  в  значительной степени  лишается  того,  на  что  была  вправе  рассчитывать  при  заключении договора (пункт 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  451  Гражданского  кодекса Российской  Федерации  существенное  изменение  обстоятельств,  из  которых стороны  исходили  при  заключении  договора,  является  основанием  для  его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение  обстоятельств  признается  существенным,  когда  они изменись  настолько,  что,  если  бы  стороны  могли  это  разумно  предвидеть, договор  вообще  не  был  бы  ими  заключен  или  был  бы  заключен  на значительно отличающихся условиях.

Пунктом  2  статьи  451  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации предусмотрено,  что  если  стороны  не  достигли  соглашения  о  приведении договора  в  соответствие  с  существенно  изменившимися  обстоятельствами, договор  может  быть  изменен  судом  по  требованию  заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: 1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; 2)  изменение  обстоятельств  вызвано  причинами,  которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той  степени  заботливости  и  осмотрительности,  какая от нее  требовалась по характеру договора и условиям оборота; 3) изменение договора без изменения его условий настолько нарушило бы  соответствующее  договору  соотношение  имущественных  интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной  степени  лишилась  бы  того,  на  что  была  вправе  рассчитывать при заключении договора;4)  из  обычаев  делового  оборота  или  существа  договора  не  вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Изменение  договора  в  связи  с  существенным  изменением обстоятельств  допускается  по  решению  суда  в  исключительных  случаях, когда  расторжение  договора  противоречит  общественным  интересам  либо повлечет  для  сторон  ущерб,  значительно  превышающий  затраты, необходимые  для  исполнения  договора  на  измененных  судом  условиях (пункт 4 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из  положений  статьи  451  Гражданского  кодекса  Российской Федерации  следует,  что  существенное  изменение  обстоятельств  может являться  основанием  для  расторжения  или  изменения  договора  лишь  в  том случае,  когда  исполнение  взятых  на  момент  заключения  договора обязательств вследствие произошедших помимо воли сторон событий будет крайне обременительным. При  этом предвидение возможности  наступления таких событий  на момент заключения договора  либо полностью исключало потребность  в  заключении  сторонами  договора,  либо  стороны  заключали договор на совершенно других условиях.

В силу статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент заключения истцом и ответчиком договора о развитии застроенной территории) по договору о развитии застроенной территории одна сторона обязуется в установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 3 - 6 части 3 настоящей статьи, а другая сторона (орган местного самоуправления) обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств в соответствии с пунктами 7 - 9 части 3 настоящей статьи. Договором могут быть предусмотрены иные обязательства сторон в соответствии с частью 4 настоящей статьи. Договор заключается органом местного самоуправления с победителем открытого аукциона на право заключить такой договор или иным лицом в соответствии с частями 25 и 28 статьи 46.3 настоящего Кодекса (часть 2 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Существенные  условия  договора  о  развитии  застроенной  территории определены  в  части  3  статьи  46.2  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации.

Согласно части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, существенными условиями договора являются:

1) сведения о местоположении и площади застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции;

2) цена права на заключение договора;

3) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; максимальные сроки подготовки таких документов;

4) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, создать либо приобрести, а также передать в государственную или муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;

5) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, уплатить возмещение за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 4 настоящей части; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;

6) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, осуществить строительство на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки;

7) обязательство органа местного самоуправления утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;

8) обязательство органа местного самоуправления принять в установленном порядке решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;

9) обязательство органа местного самоуправления после выполнения лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления, обязательств, предусмотренных пунктами 3 - 5 настоящей части, предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена (если распоряжение такими земельными участками осуществляется органом местного самоуправления) и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам; максимальные сроки выполнения указанного обязательства. Договором может быть предусмотрено предоставление таких земельных участков по мере выполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей части;

10) срок договора;

11) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.

В соответствии с частью 26 статьи 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. При заключении договора изменение условий аукциона на основании соглашения сторон такого договора или по требованию одной из его сторон не допускается.

Из анализа приведенных норм права усматривается, что срок является одним из существенных условий договора о развитии застроенной территории и его изменение сторонами законодательством не допускается.

Из условий договора о развитии застроенной территории №083/07 от 18.04.2013 следует, что он заключен в рамках статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации по результатам аукциона.

Срок действия спорного договора составил шесть лет (пункт 4.1 договора).

Следовательно, действие договора прекратилось 18.04.2019, и на момента обращения Общества в суд с настоящим иском (28.12.2020) договор не действовал..

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу, о  том,  что  указанные истцом обстоятельства, влекущие, по его мнению, невозможность исполнения договора на первоначально согласованных условиях, не могут по смыслу статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации являться основанием для внесения изменений в условия договора в редакции, предложенной истцом.

При таких обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы относятся на истца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

в удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. 

Решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Волго-Вятского округа, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы. 

          Судья                                                                                                           Н.В. Бодрова