АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-20747/2023

город Саратов

26 марта 2024 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

заявление общества с ограниченной ответственностью «Жилищник»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течении двух месяцев  устранить недостатки, жилого многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, выполнив следующие работы:  

Для ремонта ВЕНТКАНАЛОВ: 

 - ремонт кирпичной кладки вентканалов объемом 5,0445 м3;  

- ремонт штукатурки поверхностей стен с применением армирующей сетки и  соблюдением всех технологических процессов производства штукатурных работ, с  последующим нанесением окрасочного покрытия площадью 139,53 м3;  

- смена зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения в количестве 2  единиц периметром: (3,160 + 0,7) *2 = 7,72 м.п.*2 ед = 15,44 м/п.;  

- смена зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения в количестве 5  единиц периметром: (2,520 + 0,4) *2 = 5,84 м.п.*5 ед. = 29,2 м/п.;  

- смена зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения в количестве 1  единицы периметром: (2,75 + 0,4) *2 = 6,3 м.п. *1 ед. = 6,3 м/п.;  

- смена зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения в количестве 1  единицы периметром: (5,22 + 0,52) *2 = 11,48 м.п. * 1 ед. = 11,48 м/п.;  

- смена зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения в количестве 1  

единицы периметром: (5,6 + 0,4) *2 = 12,0 м./пм.п. * 1 ед. = 12,0 м/п.;  

- смена зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения в количестве 2  единиц периметром: (1,89 + 0,4) *2 = 4,58 м./пм.п. * 1 ед. = 4,58 м/п.;  

- смена зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения в количестве 1  единиц периметром: (1,44 + 0,4) *2 = 3,68 м./пм.п. * 1 ед. = 3,68 м/п.;  

- смена зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения в количестве 1  единиц периметром: (1,34 + 0,4) * 2 = 3,48 м/пм.п. * 1 ед. = 3,48 м/п.;  

- смена зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения в количестве 1  единиц периметром: (1,42 + 0,4) *2 = 3,64 м/пм.п * 1 ед. = 3,64 м/п.;  

- смена зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения в количестве 1  единиц периметром: (1,43 + 0,4) *2 = 3,66 м/пм.п. *1 ед. = 3,66 м/п.;  

- смена зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения в количестве 1  единиц периметром: (1,44 + 0,4) * 2 = 3,68 м/пм.п. * 1 ед. = 3,68 м/п.;  

- смена зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения в количестве 1  единиц периметром: (0,4 + 0,4) *2 = 1,6 м/пм.п. * 1 ед. = 1,6 м/п.;  

- устройство примыканий кровель к парапетам высотой до 600 мм. в количестве 112,18  м/п.  

Для ремонта ПАРАПЕТА согласно КС-2: - выравнивание основания под покрытие площадью 62 м2; 

- смена покрытий парапетов из листовой стали площадью 61,87 м2;  

- устройство примыканий кровель к станам парапетов высотой до 600 мм. в количестве  121,04 м2.  

Взыскать с Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Жилищник» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.; расходы по оплате экспертизы в  размере 48 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской  области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1