АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: 8(4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: 8(4842) 599-457  

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-7849/2020

18 января 2023 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Пашковой Е.А., 

руководствуясь ст.ст. 109, 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

удовлетворить иск полностью. 

Обязать Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области  устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты работ по капитальному  ремонту отмостки вокруг жилого дома № 31А по ул. Карла Маркса в г. Кирове  Калужской обл., произведенных на основании договора подряда на выполнение работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 23.03.2018   № SBR037-18000954810006/4-ЭА/18-с, выполнив следующие работы в соответствии с  действующими строительными нормами и правилами:  

выполнить заделку зазора между бетонной отмосткой и цоколем жилого  дома – 114 м.пог.;  

выполнить очистку поверхности отмостки щетками – 114 кв.м;  

выполнить огрунтовку поверхности грунтовкой глубокого  проникновения – 114 кв.м;  

выполнить устройство цементной стяжки – 114 кв.м; 

выполнить устройство железнения бетонной отмостки – 114 кв.м.  

Взыскать с Фонда поддержки строительства доступного жилья в Калужской  области в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской  области 106 700 руб. судебных расходов.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Калужской области  федеральному бюджетному учреждению Калужская лаборатория судебной экспертизы  Министерства юстиции Российской Федерации 72 000 руб., внесенных Фондом  капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области по платежному  поручению от 26.03.2021 № 2097.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Калужской области обществу  с ограниченной ответственностью "Дельтастрой" 28 700 руб., внесенных Фондом  капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области по платежному  поручению от 26.03.2021 № 2097.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Калужской области.  

Судья Е.А. Пашкова