86/2020-10245(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-11383/2019

г. Хабаровск

27 января 2020 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  Е.Е. Яцышиной,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев дело по иску по иску некоммерческой организации  «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных  домов в Хабаровском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место  нахождения: 680030, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Истим» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680009, 

<

...>, литер Е, оф.201)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ по договору подряда   № 2016/02/109 от 08.06.2016,  

третьи лица - общество с ограниченной ответственностью «Управляющая  компания «Амурлифт», главное управление регионального государственного  контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края,  

при участии представителя истца, руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Истим» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680009, 

<

...>, литер Е, оф.201) до 01.07.2020 для устранения  недостатков работ, выполненных по договору подряда № 2016/02/109 от  08.06.2016 работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме,  расположенному по адресу: 

<

...> произвести следующие ремонтно-строительные  работы:  

- демонтаж гидроизоляционного ковра - 100% площади кровли, в связи с  наличием разнонаправленных трещин по всей площади кровли;  

- ремонт цементно-песчаной стяжки кровли (заделка трещин, выравнивание  стяжки) - определить точный объем можно только после демонтажа  гидроизоляционного ковра, в связи с вероятным наличием скрытых дефектов  и повреждений, возможно выполнение дополнительной цементно-песчаной  стяжки толщиной 3-5 см. поверх существующей по всей площади кровли;  

- устройство температурно-усадочных швов по стяжки кровли, путем  нарезки борозд и заполнения их герметиком - деформационные швы  устраиваются по всей площади кровли шагом 3*3 м. для холодных  железобетонных перекрытий по всей площади кровли;  

- устройство температурно-усадочного шва, путем приклейки  дополнительного слоя наплавляемого материала, согласно п. 5.10. СП  17.1330.2011 -выполнить по температурно-усадочным швам цементно- песчаной стяжки;  

- устройство двуслойного гидроизоляционного ковра - 100% площади  кровли;  

- примыкание к парапетам, вентиляционным шахтам и т.д. - 100%  примыканий (существующие примыкания будут повреждены в ходе  демонтажа кровельного ковра).  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Истим»  уведомить некоммерческую организацию «Региональный оператор – Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» о  начале и окончании выполнения указанных ремонтно-строительных работ  путем направления в адрес Фонда письменного уведомления, пригласить  представителей Фонда на приемку скрытых работ по окончанию  выполнения работ.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Истим» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680009, 

<

...>, литер Е, оф.201) в пользу некоммерческой  организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов в Хабаровском крае» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, место нахождения: 680030, 

<

...>) судебные расходы в сумме 80 800 руб.,  в том числе: расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб.  и расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 74 800 руб.  

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

 Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

 Судья Е.Е. Яцышина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 09.04.2019 6:12:36

Кому выдана Яцышина Елена Евгеньевна