АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ Театральный переулок, дом 10, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016 E-mail: info@eao.arbitr.ru, сайт: https://eao.arbitr.ru, тел./факс: (42622) 2-37-98, 3-82-40, факс 2-11-23 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А16-2228/2023

г. Биробиджан

21 декабря 2023 года

Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе: судьи Козыревой М. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «ДальДорСтрой» (с. Птичник Еврейской  автономной области, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к департаменту автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской  автономной области (г. Биробиджан Еврейской автономной области,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об изменении условий государственного контракта № 108 от 14.09.2022 заключенного  между департаментом автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской  автономной области и ООО «ДальДорСтрой», а именно:  

изменить условия контракта изложив раздел 5 в следующей редакции: 5.1. Срок выполнения (завершения) работ: - начало выполнения работ: со дня заключения контракта; - срок завершения работ: не позднее 30.09.2023 

- работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение 2 к контракту),  

при участии: при участии: 

от истца: ФИО2, представителя по доверенности от 26.06.2023 № 8/23; ФИО3, представителя по доверенности от 22.06.2023 № 7/23;  

от ответчика: ФИО4, представителя по доверенности от 01.06.2023 № 1725,  ФИО5, на основании прав по должности;  

специалиста ООО «Прогресс-ДВ»: ФИО6 

руководствуясь статьями 49, 110, 136, 137, 163, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «ДальДорСтрой» (с. Птичник Еврейской автономной области, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) удовлетворить полностью.  

Изменить условия государственного контракта № 108 от 14.09.2022  заключенного между департаментом автомобильных дорог и транспорта правительства  Еврейской автономной области и ООО «ДальДорСтрой» изложив раздел 5 в  следующей редакции: «пункт 5.1 Срок выполнения работ: начало выполнения: со дня  заключения контракта; срок завершения выполнения работ: не позднее 30.09.2023.»;  заменить приложение 1 к Технической части «Ведомость объемов и стоимости работ  по ремонту автомобильной дороги «Биракан - Кульдур» на участке км 0 - км 5»  контракта на приложение № 1 к Технической части в новой редакции, а именно:  

 Ведомость объемов и стоимости работ  

по ремонту автомобильной дороги «Биракан – Кульдур» на участке км 0 – км 5  

 №  п/п  

Наименование 

Ед. изм. 

Кол-во 

Стоимость  

единицы руб.  

Общая  стоимость  

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Глава 1. Подготовка территории строительства  

Раздел 1.1 Подготовительные работы 

1 

Восстановление трассы 4 категории на  местности 2 категории сложности  

км 

4,988 

97 415,40  

485908,02  

Раздел 1.2 Очистка территории строительства  

2 

Валка деревьев: (ива, черёмуха, ольха,  тополь, вяз, лиственница, берёза, яблоня,  сосна, ель) диаметром до 300 мм с  разделкой на кряжи, корчевкой пней и  вывозом на полигон ТБО на расстояние  до 20 км  

шт. 

60 

1 227,97  

73678,20  

3 

Срезка редкого кустарника кусторезом с  перемещением до 30 м и  транспортировкой на расстояние до 20 км  на полигон ТБО  

га. 

0,6 

3 960,00  

2376,00  

4 

Корчевка корней редкого кустарника с  перемещением до 30 м и  транспортировкой на расстояние до 20 км  на полигон ТБО  

га. 

0,6 

30 921,67  

18553,00  

Раздел 1.3 Производство работ по сносу (демонтажу) 

Подраздел 1.3.1 Демонтаж дорожных знаков  

5 

Демонтаж существующих металлических  стоек и щитков дорожных знаков с  погрузкой в автосамосвалы и  транспортировкой в пункт приёма  металлолома на расстояние до 130 км (г.  Биробиджан)  

шт. 

7 

4 037,43  

28262,01  

Подраздел 1.3.2 Демонтаж барьерного ограждения 

6 

Демонтаж существующего барьерного  ограждения с погрузкой в автосамосвалы  и транспортировкой в пункт приёма  металлолома на расстояние до 65 км (г.  Облучье)  

п.м. 

140 

480,51  

67271,40  

Глава 2. Основные объекты строительства 

Раздел 2.1 Земляные работы 

Подраздел 2.1.1 Восстановление земляного полотна на участке ПК 2+76-2+96 

Нарезка уступов в существующей насыпи (Восстановление земляного полотна на участке ПК 2+76-2+96)  

7 

Разработка грунта 3 группы экскаватором  с ёмкостью ковша 1,0 м3 с погрузкой в  автосамосвалы и транспортировкой на  площадку для излишков грунта, на  расстояние до 20 км, γ=1,85 т/м  

м³ 

225 

421,82  

94909,50  

8 

Уплотнение сущ. грунта откосной части  земляного полотна механизированным  способом на толщину 25 см  

м³ 

225 

17,93 

4034,25  

9 

Транспортировка скального грунта из  карьера "Карьер строительного камня   № 71 п. Кульдур" (или аналог) в насыпь  на расстояние до 20 км (восстановление  земляного полотна)  

м³ 

265,5 

792,50  

210408,75  

Уплотнение насыпи (Восстановление земляного полотна на участке ПК 2+76-2+96) 

10 

Планировка грунта при засыпки места  ремонта земляного полотна  

м2  

60 

10,85 

651,00  

11 

Уплотнение грунта виброкатком 2,2 т,  толщина слоя 25 см за 5 проходов по  одному следу  

м³ 

225 

30,30 

6817,50  

Планировочные работы 

12 

Планировка грунта откосов насыпи  механизированным способом  

м2  

140 

10,88 

1523,20  

13 

Уплотнение грунта откосов насыпи  механизированным способом на толщину  25 см (вибротрамбовками)  

м³ 

35 

70,34 

2461,90  

Подраздел 2.1.2 Обыкновенные грунты 

14 

Разработка грунта 3 группы экскаватором  с ёмкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в  автосамосвалы и транспортировкой на  площадку для излишков грунта , на  расстояние до 20 км, γ=1,85 т/м³  

м³ 

7520 

546,69  

4111108,80  

Устройство откосной части насыпи 

15 

Смесь песчано-гравийная природная 

м³ 

7924,8 

960,02  

7607966,50  

Планировочные работы 

16 

Планировка откосов насыпи  механизированным способом  

м2  

2500 

13,19 

32975,00  

17 

Уплотнение откосов насыпи  механизированным способом на толщину  25 см  

м³ 

625 

21,74 

13587,50  

18 

Планировка откосов выемки  механизированным способом  

м2  

336 

25,86 

8688,96  

19 

Уплотнение откосов выемки  механизированным способом на толщину  25 см  

м³ 

85 

21,76 

1849,60  

Расчистка существующих кюветов 

20 

Расчистка существующих кюветов  механизированным способом  (экскаватором) с перемещением грунта на  расстояние до 10 м в отвал (в бурты)  

м2  

34150 

27,18 

928197,00  

Устройство верха земляного полотна 

Планировочные работы 

21 

Планировка верха земляного полотна  механизированным способом  

м2  

44910 

13,17 

591464,70  

22 

Уплотнение грунта прицепными катками  на пневмоколесном ходу 25 т на первый  проход по одному следу при толщине  слоя: 40 см  

м3 

44910 

38,07 

1709723,70  

Раздел 2.2 Искусственные сооружения 

Подраздел 2.2.1 Ремонт круглой ж/б трубы диам. 1м на ПК13+07 

Разборка существующего укрепления трубы 

23 

Разработка грунта в отвал экскаваторами  импортного производства с ковшом  вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа  грунтов: 3  

м³ 

2,5 

103,20  

258,00  

24 

Разработка грунта с перемещением до 10  м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80  л.с.), группа грунтов 3  

м³ 

2,5 

118,40  

296,00  

25 

Разработка грунта вручную в траншеях  глубиной до 2 м без креплений с  откосами, группа грунтов: 3  

м³ 

0,5 

1 272,00  

636,00  

26 

Сооружение оголовков круглых  водопропускных труб одноочковых  отверстием: 1-2 м (Демонтаж)  

м³ 

6 

4 210,00  

25260,00  

27 

Укладка звеньев удлиняемых  одноочковых водопропускных  железобетонных круглых труб под  насыпями железных и автомобильных  дорог, отверстия труб: 1 м, высота  насыпи до 3/4 м (Демонтаж)  

м³ 

1,44 

15 546,53  

22387,00  

28 

Погрузо-разгрузочные работы и  перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т  работающих вне карьера на расстояние: I  класс груза до 20 км  

1 т груза 

18,6 

535,43  

9959,00  

Укрепление откосов 

29 

Укрепление откосов насыпи камнем и  устройство каменной наброски  

м³ 

28 

3 506,64  

98185,92  

Входное русло 

30 

Устройство прослойки из нетканого  синтетического материала (НСМ) под  покрытием из сборных железобетонных  плит: сплошной  

м² 

23 

240,91  

5540,93  

31 

Укрепление входного русла камнем и  устройство каменной наброски  

м³ 

12,5 

3 761,60  

47020,00  

32 

Сооружение оголовков круглых  водопропускных труб одноочковых  отверстием: 1-2 м  

м³ 

3,01 

5 719,60  

17216,00  

33 

Портальная стенка из сборного ж/б СТ10  

шт 

1 

43 748,00  

43748,00  

34 

Откосная стенка из сборного ж/б СТ4  

шт 

2 

40 682,50  

81365,00  

35 

Устройство фундаментных плит  железобетонных: плоских  

м³ 

0,53 

19 096,23  

10121,00  

Выходное русло 

36 

Устройство прослойки из нетканого  синтетического материала (НСМ) под  покрытием из сборных железобетонных  плит: сплошной  

м² 

52 

231,98  

12062,96  

37 

Укрепление входного русла камнем и  устройство каменной наброски  

м³ 

28 

3 620,07  

101361,96  

38 

Сооружение оголовков круглых  водопропускных труб одноочковых  отверстием: 1-2 м  

м³ 

3,01 

5 507,97  

16578,99  

39 

Портальная стенка из сборного ж/б СТ10  

шт 

1 

43 748,00  

43748,00  

40 

Откосная стенка из сборного ж/б СТ4  

шт 

2 

40 682,50  

81365,00  

41 

Устройство фундаментных плит  железобетонных: плоских  

м³ 

0,53 

18 386,79  

9745,00  

Восстановление тела трубы 

42 

Укладка звеньев удлиняемых  одноочковых водопропускных  железобетонных круглых труб под  насыпями железных и автомобильных  дорог, отверстия труб: 1 м,  

м³ 

1,44 

10 406,25  

14985,00  

43 

Звенья трубы из сборного ж/б ЗКП2.100  (аналог)  

шт 

3 

19 157,33  

57471,99  

44 

Герметизация мастикой швов:  горизонтальных  

кг. 

599 

246,82  

147845,18  

Раздел 2.3Дорожная одежда 

Подраздел 2.3.1 Устройство дорожной одежды  

45 

Устройство покрытия серповидного  профиля из щебеночно песчаной смеси  C2 ГОСТ 25607- 2009, с уплотнением  гладковальцовыми катками весом 10т,  толщиной 15 см за 10 проходок по  одному следу  

м² 

45000 

130,12  

5855400,00  

45.1  

Смеси готовые щебеночно-песчаные С2  

м3 

8505 

2 216,031746 

18847350,00  

Раздел 2.4 Обустройство и обстановка дороги  

Подраздел 2.4.1 Дорожные знаки 

Монтаж щитков с двойной отбортовкой с применением пленки тип Б. 

46 

Установка дорожных знаков  бесфундаментных: на металлических  стойках  

шт 

20 

2 194,60  

43892,00  

47 

Знак дорожный на оцинкованной  подоснове со световозвращающей  пленкой предупреждающий, размер  900х900х900 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33  

шт 

4 

2 458,00  

9832,00  

48 

Знаки дорожные на оцинкованной  подоснове со световозвращающей  пленкой приоритета, треугольной формы  размером 900х900х900 мм, тип 2.3.12.3.7, 2.4  

шт 

1 

2 319,00  

2319,00  

49 

Знак дорожный на оцинкованной  подоснове со световозвращающей  пленкой запрещающий, диаметр круга  700 мм, тип 3.1-3.33  

шт 

5 

2 737,00  

13685,00  

50 

Знак дорожный на оцинкованной  подоснове со световозвращающей  пленкой информационные, размером  200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние  

шт 

6 

778,00  

4668,00  

51 

Знак дорожный, пленка тип Б, щиток  

м² 

8,4 

8 567,86  

71970,02  

2000х1500, тип 6.9.1 

Монтаж стоек 

52 

Стойка круглая металлическая для  дорожных знаков с покраской и  креплением для знака СКМ 3.50  

шт 

20 

8 019,40  

160388,00  

53 

Устройство бетонной подготовки  (прим.Омоноличивание стоек)  

м³ 

2,5 

9 849,60  

24624,00  

Устройство фундамента 

Подраздел 2.3.3 Устройство барьерного ограждения 

54 

Устройство металлических барьерных  ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м  механизированным способом, шаг стоек:  2 м  

м 

120 

231,38  

27765,60  

55 

Комплект материалов оцинкованного  ограждения барьерного типа 11ДО-2  

кг 

3537 

178,42  

631071,54  

56 

Металлоконструкции светоотражающих  устройств с болтами и гайками, сталь III,  масса до 0,05 т  

т 

0,082 

115 817,07  

9497,00  

57 

Устройство металлических барьерных  ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м  механизированным способом, шаг стоек:  2 м  

м 

12 

231,50  

2778,00  

58 

Комплект металлоконструкций конечных  участков барьерного ограждения 11-ДОК/0,75-12, горячее цинкование  

компл 

1 

58 110,00  

58110,00  

59 

Металлоконструкции светоотражающих  устройств с болтами и гайками, сталь III,  масса до 0,05 т  

т 

0,011 

115 818,18  

1274,00  

60 

Устройство металлических барьерных  ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м  механизированным способом, шаг стоек:  2 м  

м 

12 

231,50  

2778,00  

61 

Комплект металлоконструкций  начальных участков барьерного  ограждения 11-ДО-Н/0,75-12, горячее  цинкование  

компл 

1 

58 110,00  

58110,00  

62 

Металлоконструкции светоотражающих  устройств с болтами и гайками, сталь III,  масса до 0,05 т  

т 

0,011 

115 818,18  

1274,00  

Подраздел 2.3.4 Устройство направляющих сигнальных столбиков  

63 

Установка сигнальных столбиков типа С3  

шт. 

120 

680,47  

81656,40  

Раздел 3 Обеспыливание опытных участков автомобильной дороги  

Подраздел 3.1 Планировка верха земляного полотна на участке ПК +0+72…50+60 

64  

Планировка верха земляного полотна  механизированным способом  

м² 

44910 

28,41 

1275893,10  

Подраздел 3.2 Обеспыливание автомобильной дороги с применением добавки для обеспыливания Dust/Blockr на  

1-ом опытном участке ПК +0+72…25+00 

65  

Устройство основания дорожного полотна  методом холодного ресайклинга толщиной  от 15 до 25 см с применением  регенератора-смесителя с шириной реза 2,5  м с добавлением: минеральных добавок и  битумной эмульсии  

м² 

14568 

540,73  

7877354,64  

66  

Концентрат пылеподавления Dust/Block 

л 

27000 

578,87  

15629490,00  

67  

Перевозка грузов автомобилями  бортовыми грузоподъемностью до 5 т на  расстояние: I класс груза до 116 км  

1 т груза 

29,7 

1 570,57  

46645,93  

68  

Уплотнение грунта вибрационными  катками 2,2 т на первый проход по одному  следу при толщине слоя: 25 см  

м3  

14568 

45,69 

665611,92  

Подраздел 3.3 Обеспыливание автомобильной дороги с применением битумной эмульсии на на 2-ом опытном 

участке ПК +25+00…50+60 

69  

Розлив вяжущих материалов 

т 

30,72 

1 540,59  

47326,92  

70  

Эмульсия битумная дорожная катионная  ЭБДК М  

т 

32,3 

40 114,58  

1295700,93  

71  

Автогудронаторы, емкость цистерны 3500  л (Доставка битумной эмульсии,  расстояние 300 км)  

маш.-ч 

222,9 

3 889,66  

867005,21  

72  

Россыпь добавок песка для улучшения  временных профилированных грунтовых  дорог  

м³ 

78,6 

1 046,32  

82240,75  

73  

Песок природный для строительных работ  

м³ 

84,48 

1 257,81  

106259,79  

Раздел 4 Организация движения в период производства работ 

Подраздел 4.1. Организация движения в период производства работ при захватке 100 метров 

74  

Передвижной заградительные знак (1.7х2.5  м), с последующим демонтажем и  транспортировкой на базу подрядчика на  расстояние до 6 км  

шт. 

1 

68 550,00  

68550,00  

Установка дорожных знаков 

75  

Установка дорожных знаков  бесфундаментных: на металлических  стойках  

шт 

12 

51 117,83  

613413,96  

76  

Знак дорожный на оцинкованной  подоснове со световозвращающей пленкой  предупреждающий, размер 900х900х900  мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33  

шт 

4 

5 013,75  

20055,00  

77  

Знак дорожный на оцинкованной  подоснове со световозвращающей пленкой  приоритета, диаметр круга 700 мм, тип 2.6  

шт 

2 

5 583,00  

11166,00  

78  

Знак дорожный на оцинкованной  подоснове со световозвращающей пленкой  запрещающий, диаметр круга 700 мм, тип  3.1-3.33  

шт 

10 

5 583,50  

55835,00  

79  

Знак дорожный на оцинкованной  подоснове со световозвращающей пленкой  предписывающий, диаметр круга 700 мм,  тип 4.1.1-4.7  

шт 

2 

5 583,50  

11167,00  

80  

Знаки дорожные на оцинкованной  подоснове со световозвращающей пленкой  дополнительной информации,  прямоугольной формы размером 350х700  мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3  

шт 

2 

3 163,00  

6326,00  

81  

Демонтаж дорожных знаков с  транспортировкой  

шт 

20 

568,00  

11360,00  

Монтаж стоек 

82  

Стойка круглая металлическая для  дорожных знаков с покраской и  креплением для знака СКМ 3.50  

шт 

12 

12 433,75  

149205,00  

Установка дорожных знаков 

83  

Установка дорожных знаков  бесфундаментных: на металлических  стойках  

шт 

6 

4 476,90  

26861,40  

84  

Знаки индивидуального проектирования  (ЗИП), щиток 6139х2901 (Паспорт  объекта),  

м² 

35,6 

3 554,47  

126539,13  

85  

Демонтаж дорожных знаков с  транспортировкой  

шт 

2 

852,00 

1704,00  

Монтаж стоек 

86  

Стойка круглая металлическая для  дорожных знаков с покраской и  креплением для знака СКМ 3.50  

шт 

6 

12 434,00 

74604,00  

Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы 

87  

Авторский надзор-0,2% 

145031,00  

88  

Проектно-изыскательские работы 

3474799,00  

Непредвиденные работы и затраты 

89  

Непредвиденные затраты 2%  

1551838,00  

Итого: 

77000000  

 Взыскать с департамента автомобильных дорог и транспорта правительства  Еврейской автономной области (г. Биробиджан Еврейской автономной области,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «ДальДорСтрой» (с. Птичник Еврейской автономной области, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 6 000 рублей в возмещение расходов по оплате  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  течение месяца с даты его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, а  также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного  округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Еврейской  автономной области.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного  производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно  получить соответственно на интернет-сайте Шестого арбитражного апелляционного  суда http://6aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Дальневосточного округа  http://fasdvo.arbitr.ru.  

Судья М.А.Козырева