Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-108122/23

03 мая 2024 года

г.Москва

            

Резолютивная часть решения объявлена 27 марта 2024 года

Полный текст решения изготовлен 03 мая 2024 года

 

Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующий судья Е.А. Морозова, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по ООО "ОСОБЫЙ ПОДХОД" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  о взыскании 3 325 000 руб. 00 коп. 

при участии в заседании: согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «ОСОБЫЙ ПОДХОД» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» о взыскании задолженности по договору подряда № 2022.134274 от 22.08.2022 в размере 3 325 000 руб. 00 коп., ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств перед истцом по оплате выполненных работ в рамках указанного договора. 

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме, просил  их удовлетворить.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещался судом надлежащим образом, возражений и отзыв на иск не представил. 

Дело рассмотрено в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие ответчика. 

Рассмотрев материалы искового заявления ООО «ОСОБЫЙ ПОДХОД», исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителя истца, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов.

В силу статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ, доказательством передачи результата работ является акт приема-передачи или иной приравненный к нему документ.

Согласно материалам дела, Между АО «Одинцовская Теплосеть» (далее - Заказчик, Ответчик) и ООО «Особый подход» (далее - Подрядчик, Истец) 22.08.2022 заключен Договор подряда № 2022.134274 (далее - Договор) (Приложение № 1).

Согласно п.1.1. Договора Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием работы по закольцовке водопровода АО «Одинцовская теплосеть» и ЗАО «Матвеевское» методом ГНБ по адресу: 

<

...> (далее по тексту - «Работы»), а также сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.

Цена Договора твердая, фиксированная, определена по итогам закупки конкурса в электронной форме и в соответствии со Сметой (приложение № 2 к Договору) является предельной и составляет 4 750 000,00 руб. (четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) - 791 666,67 руб. (Семьсот девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 коп

В соответствии с п. 2.4.1. Договора заказчик производит оплату аванса в размере 30% от стоимости Договора, что составляет 1 425 000,00 руб. (один миллион четыреста двадцать пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) - 237 500,00 (Двести тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора и на основании счета, счета-фактуры на аванс предоставленные Заказчику Подрядчиком.

ООО «Особый подход» 22.08.2022 в адрес заказчика направлены счета, счета-фактуры на выплаты аванса (Исх. № 4 от 22.08.2022).

ООО «Особый подход» уведомляло заказчика о необходимости выплаты аванса, невозможности приступить к выполнению работ до его выплаты (исх. № 5 от 19.09.2022)

В нарушении условий договора Заказчиком аванс выплачен только (ПП № 21752 от 22.11.202).

Еще до заключения контракта 18.08.2022 после осмотра объекта строительства ООО «Особый подход» уведомило заказчика о невозможности производства работ способом предусмотренным договором необходимости замены материала прокладываемых труб со стали на полиэтилен (Исх. № 3 от 18.08.2022.).

Изменение материала труб согласовано заказчиком 29.08.2022 без изменения стоимости договора.

После получения аванса в результате повторного осмотра объекта строительства ООО «Особый подход» выявило необходимость производства дополнительных работ о чем уведомило заказчика, предложив либо выполнить их заказчику самостоятельно, либо заключить дополнительное соглашение (Исх. № 6 от 01.12.2022).

ООО «Особый подход» в адрес заказчика направлены письма о стоимости выполнения дополнительных работ (Исх. № 8 от 15.12.2022; Исх. №9 от 19.12.2022; Письмом от 21.12.2022; Исх. № 11 от 26.12.2022).

По указанию заказчика выставлены счета (письмо от 27.12.2022).

Заказчиком совершены конклюдентные действия по заключению дополнительных соглашений, а именно произведена оплата дополнительных работ (Платежные поручения № 24302 от 27.12.2022, № 235 от 11.01.2023) на сумму 138638 рублей 80 копеек и 270108 рублей 10 копеек.

После получения аванса ООО «Особый подход» приступило к выполнению работ. Наряду с выявлением дополнительных работ ООО «Особый подход» уведомило заказчика о наступлении форс-мажорных обстоятельств препятствующих выполнению Договора, а именно, наступление температурного режима в период с 01.12-07.12.2022, который не позволяет проводить работы по горизонтально направленному бурению (Исх. №7 от 05.12.2022)

ООО «Особый подход» завершило выполнение работ по договору и направило закрывающие документы заказчику (Письмо от 31.01.2023, № 14 от 30.01.2023). Выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия не представлялось возможным из-за погодных условий. Работы по укладке асфальта были завершены 1 марта 2023 года.

От заказчика были получены устные замечания к закрывающим документам. В адрес заказчика направлялась доработанная редакция закрывающих документов (письмо от 15.03.2023, письмо от 18.04.2023).

заказчиком сообщено о деформации асфальтового покрытия (письмо 31/1604 от 29.03.2023).

ООО «Особый подход» уведомило заказчика о направлении одностороннего акта приема-передачи работ.

Письмом № 31.2454 от 03.05.2023 заказчиком направлены замечания по работам. Замечания частично приняты ООО «Особый подход».

Письмом исх. № 15-17 от 03.05.2023 ООО «Особый подход» уведомило заказчика о нарушении порядка приемки работ.

Письмом № 31.3120 от 05.05.2024 заказчиком направлено письмо о необходимости восстановления асфальтового покрытия.

Письмом исх. № 15-18 от 15.05.2023 ООО «Особый подход» уведомило заказчика об исправлении недостатков и необходимости осуществления приёмки выполненных работ.

Заказчик не явился на совместный осмотр. Письмом исх. № 15-19 от 22.05.2023 в адрес заказчика был направлен односторонний акты выполнения работ.

Письмом № 31.2889 от 24.05.2023 заказчиком направлены замечания по работам.

Письмом исх. № 15-20 от 25.05.2023 ООО «Особый подход» уведомило заказчика о нарушении порядка приемки работ, а также на необоснованность части замечаний заказчика.

Письмом исх. № 15-21 от 05.06.2023 ООО «Особый подход» уведомило заказчика о необходимости присутствия технического надзора при доработке работ 09.06.2023.

Письмом исх. № 15-23 от 13.06.2023 ООО «Особый подход» уведомило заказчика о завершении работ и пригласило представителей заказчика для осуществления комиссионной приемки 16.06.2023.

Представители заказчика 16.06.2023 не явились на приемку. ООО «Особый подход» был составлен односторонние акты приема-сдачи выполненных работ, которые 29.10.2023 были отправлены в адрес заказчика (исх. № 15-25).

29.10.2023 почтовым отправлением в адрес Ответчика направлена досудебная претензия, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Мотивируя свои требования, истец сослался на нарушение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

 Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Поскольку доказательств погашения спорной задолженности по оплате выполненных работ, в предусмотренный договором подряда срок, ответчиком не представлено, требование иска о взыскании 3 325 000 руб. 00 коп. основного долга по договору подряда № 2022.134274 от 22.08.2022 подлежит удовлетворению в полном объеме.

В рамках рассмотрения судом настоящего дела представитель ответчика, в установленном законом порядке, о фальсификации имеющихся в материалах дела актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ не заявил, каких-либо доказательств оплаты выполненных истцом работ в полном объеме не представил.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110,  167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "ОСОБЫЙ ПОДХОД" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 3 325 000 руб. 00 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 39 625 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

 

Судья                                                                      Е.А. Морозова