ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-99338/23-89-566

22 января 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2023 года                                                              

Полный текст решения изготовлен 22 января 2024 года 

 

Арбитражный суд в составе судьи О.А. Акименко,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Успуном Т.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРОДОРСТРОЙ" (107031, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.11.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 770201001) к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРМ" (141068, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРОЛЁВ ГОРОД, СИЛИКАТНАЯ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.08.2018, ИНН: 

<

***>, КПП: 501801001) о взыскании 15 078 661,60 руб., встречное исковое заявление ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРМ" к АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРОДОРСТРОЙ" о взыскании 867 871,11 руб.

при участии:

от истца: ФИО1, по дов. от 18.09.2023 ; 

от ответчика: ФИО2, по дов. от 27.11.2023;

УСТАНОВИЛ:

Первоначальный иск заявлен о взыскании неосновательного обогащения в размере 1 687 267, 29 руб. (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ).

Судом, в порядке ст. 132 АПК РФ, для совместного рассмотрения с первоначальным был принят встречный иск о взыскании суммы основного долга в размере 2 500 179, 82 руб. (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ).

Истец по первоначальному иску исковые требования поддержал, против удовлетворения встречных исковых требований возражал.

Ответчик по первоначальному иску против удовлетворения первоначальных исковых требований возражал, встречные исковые требования поддержал в полном объеме.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, заслушав мнения лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил, что первоначальные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, встречные исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Судом установлено, что между АО «ЦДС» (Подрядчик) и ООО «Варм» (Субподрядчик) был заключен Договор субподряда № ТР-2021-2 от 23.03.2021, на выполнение работ на объекте: Развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (1 этап). Этап 1.1. Строительство участка магистральной улицы общегородского значения от Октябрьского проспекта до Калужского шоссе. Этап 1.2. Реконструкция ул. Заречная с организацией движения пассажирского транспорта (в части исполнения этапа 1.2.).

Согласно п. 3.1 Договора цена Договора составляет 45 436 500,77 руб.

Согласно п. 2 Дополнительного соглашения №1 от 23.03.2021 к Договору субподряда № ТР-2021-2 от 23.03.2021 стоимость дополнительных работ составляет 4 187 447,11 руб.

В счет исполнения обязательств по Договору АО «ЦДС» перечислило в адрес ООО «Варм» ряд авансовых платежей в размере 14 841 176 руб., о чем свидетельствуют следующие платежные поручения:

№ 5364 от 19.04.2021 на сумму 7 360 171,70 руб.;

№ 10270 от 28.06.2021 на сумму 1 449 033 руб.;

№ 12679 от 17.08.2021 на сумму 4 031 971,30 руб.

Согласно п. 5.1. Договора календарные сроки выполнения работ по Договору, а также промежуточные сроки выполнения этапов работ определяются Календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору).

В соответствии с п. 5.2. Договора Дата начала работ по Договору - с даты заключения договора, а дата окончания работ по Договору -15.08.2021.

Нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, промежуточных сроков выполнения этапов работ, предусмотренных Договором, является существенным нарушением Договора и служит основанием для начисления и взыскания штрафных санкций по требованию Подрядчика, а также одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора (п. 5.3. Договора).

Как указывает АО «ЦДС», ООО «Варм» не исполнило обязательство по Договору субподряда, тем самым сорвало сроки выполнения работ, предусмотренных Приложением № 2.

Согласно ч. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В связи с существенным нарушением обязательств по Договору, АО «ЦДС» руководствуясь ст. 715 ГК РФ и п.п. 18.2.1. - 18.2.2. Договора уведомило ООО «Варм» о расторжении Договора субподряда № ТР-2021-2 от 23.03.2021 с 15.06.2022, о чем свидетельствует уведомления № 3102/22 г. от 09.06.2022.

В соответствии с положением п. 1 ст. 450.1 ГК РФ, предоставленное законом или договором право на односторонний отказ от договора может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора. договор прекращается с момента получения данного уведомления.

Таким образом, договор был прекращен ввиду одностороннего отказа подрядчика от его исполнения.

В соответствии с нормой п. 4 ст. 453 ГК РФ, в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения.

По доводам АО «ЦДС», сумма неосновательного обогащения составляет 14 841 176 руб.

Между АО «ЦДС» (далее - Поставщик) и ООО «Варм» (далее - Покупатель) был заключен Договор поставки № ПП/ТР-2021 -2 от 23.03.2021.

В соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В счет исполнения обязательств по Договору АО «ЦДС» поставило, а ООО «Варм» приняло товар на сумму 237 485 (Двести тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 60 копеек.

Согласно п. 5.5. Договора оплата производится не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты отгрузки Продукции.

Тем не менее в нарушение ст. 516 ГК РФ и п. 5.5. Договора ООО «Варм» не произвело оплату за поставленный товар в размере 237 485 (Двести тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 60 копеек.

АО «ЦДС» односторонними зачетами № 379 от 30.06.2022 г., № 501 от 01.07.2023 г. уменьшило сумму неотработанного аванса 14 841 176,00 руб. на 383585,25 рублей из сумму задолженности неотработанного аванса ООО «ВАРМ» перед АО «ЦДС» по Договору субподряда № ТР-2021-2 от 23.03.2021 г., которая была зачтена в счет оплаты задолженности АО «ЦДС» перед ООО «ВАРМ» по Договору субподряда № ДМД-08-2021-5 от 12.04.2021 г., также сумма задолженности АО «ЦДС» перед ООО «Варм» по Договору субподряда МС-2018-4 от 23.08.2018 г. в размере 8 209 317,16 руб. и Договору субподряда № МС-2018-5 от 23.08.2018 г. в размере 448 686,81 руб.

Сумма задолженности по Договору поставки № ПП/ТР-2021-2 от 23.03.2021 в размере 237 485 (Двести тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 60 копеек также была зачтена, таки образом задолженность отсутствует.

Зачет встречного однородного требования допускается, когда срок такого требования наступил (ст. 410 ГК РФ), (п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16).

С момента получения заявления о зачете, обязательства не прекращаются (п. 18 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 N 65).

Для зачета необходимо и достаточно заявления одной стороны. Также после предъявления иска допускается направление заявления о зачете, при этом в требованиях указывается, что требование, по которому предъявлен иск, прекращено или уменьшено зачетом (п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6).

Таким образом сумма неотработанного аванса по Договору субподряда № ТР-2021-2 от 23.03.2021 составляет 5 799 586,78 рублей. (14 841 176,00 - 383 585,25 - 8 209 317,16 - 448 686,81).

Не согласившись с заявленными требованиями, ООО «ВАРМ» представлен отзыв и заявлен встречный иск, доводы которого сводятся к следующему.

Как указывалось ранее, между АО «ЦДС» (Подрядчик) и ООО «Варм» (Субподрядчик) был заключен Договор субподряда № ТР-2021-2 от 23.03.2021, на выполнение работ на объекте: Развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (1 этап). Этап 1.1. Строительство участка магистральной улицы общегородского значения от Октябрьского проспекта до Калужского шоссе. Этап 1.2. Реконструкция ул. Заречная с организацией движения пассажирского транспорта (в части исполнения этапа 1.2.).

По доводам ООО «Варм», согласно ведомости объемов работ Субподрядчик полностью выполнил работы по строительству дождевой канализации, а также частично выполнил работы по строительству хозяйственно-бытовой канализации, что подтверждается Актами освидетельствования скрытых работ от марта - апреля 2021г., подписанными представителями Подрядчика АО «ЦДС», а также представителем Субподрядчика ООО «Варм» и исполнительными схемами, подписанными Подрядчиком АО «ЦДС» и Заказчиком ГКУ г. Москвы «Москворечье». Следовательно,  объемы выполненных работ были полностью подтверждены.

Письмом Исх. №290 от 21.09.2021г. Субподрядчик ООО «Варм» надлежащим образом своевременно уведомил подрядчика АО «ЦДС» о приостановке работ на объекте в связи с невыполнением подрядчиком работ согласно ПОС и отсутствием Рабочей документации «В производство работ».

Ответа на вышеуказанное Письмо от АО «ЦДС» в адрес ООО «Варм» не поступило, также Подрядчик АО «ЦДС» не предпринял никаких действий для разрешения сложившейся ситуации, в связи с чем вся ответственность за срыв сроков выполнения работ по Договору должна быть возложена на подрядчика АО «ЦДС».

15.06.2022г. ООО «Варм» направило в адрес АО «ЦДС» письмо Исх.№ 56 с приложенными: Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В соответствии с п.п. 4.12 Договора субподряда № ТР-2021-2 от 23.03.2021г. Подрядчик при расторжении Договора должен произвести сверку взаимных расчетов с Субподрядчиком.

По доводам ООО «Варм», задолженность АО «ЦДС» на дату подачу встречного иска составляет - 867 871 рубль 11 копеек.

Статьей 307 ГК РФ установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

В соответствии со статьёй 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Исходя из положений ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.

При этом случаи возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

В связи с тем, что, между истцом и ответчиком возникли разногласия относительно факта выполнения работ по спорному договору, а также их объема и стоимости, в целях устранения разногласий, а также для разъяснения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, определением Арбитражного суда г. Москвы от 05.10.2023г., судом назначена строительно-техническая экспертиза, выполнение которой поручено ООО "Оценочная компания "СПАРК" (ИНН: 

<

***>), а именно: эксперту ФИО3.

Перед экспертом был поставлен следующий вопрос:

1)                 Определить объем и стоимость качественно фактически выполненных ООО «Варм» работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, а также условиями Договора субподряда №ТР-2021-2 от 23.03.2021, приложениями к нему ?

По результатам проведенного исследования, эксперт пришел к следующим выводам.

1) Объем качественно фактически выполненных работ по устройству «дождевой канализации на период строительства» соответствует условиям Договора субподряда № ТР-2021-2 от 23.03.2021 г. (доп. соглашения №1), проектной и рабочей документации:

Земляные работы 3.1 Разработка грунта - 750 м3,

3.2. Крепление инвентарными щитами стенок траншей - 709 м2

3.3. Обратная засыпка грунтом - 545 м3,

3.4. Обратная засыпка песком - 156 м3,

Крепление траншей:

3.5. Устройство крепления из труб - 227,2 м,

3.6. Демонтаж крепления из труб - 227,2 м,

3.7. Крепление стальными расстрелами - 1,913 т,

3.8. Снятие стальных расстрелов - 1,913 т,

3.9. Устройство деревянной забирки - 194 м2,

3.10 Разборка деревянной забирки - 194 м2,

3.11. Крепление продольными связями - 0,78 т,

3.12. Демонтаж продольных связей - 0,78 т,

Трубопроводы:

3.13. Укладка ПП труб диаметром 500 мм - 28,65 м,

3.14. Укладка ПП труб диаметром 315 мм - 55,6 м,

3.15. Укладка ПП труб диаметром 400 мм - 11,42 м,

3.16. Устройство водоотводных лотков из сборного железобетона -115 м,

Емкостное оборудование:

3.17.    Монтаж аккумулирующей емкости - 2 шт.

Сборные железобетонные и металлические элементы:

3.18.    Устройство колодцев сборных ж/б диаметром 1000 мм - 1 шт.

3.19.    Устройство колодцев сборных ж/б диаметром 1500 мм - 5 шт.

3.20.    Устройство колодцев дождеприемных ВД-8 - Зшт.

Стоимость качественно фактически выполненных работ по устройству «дождевой канализации на период строительства», составляет: 4 187 447,11 (Четыре миллиона сто восемьдесят семь тысяч четыреста сорок семь) рублей 11 копеек, в том числе НДС 20 % руб.

2) Работы по реконструкции хозяйственно-бытовой канализации не завершены. Объемы выполненных субподрядчиком ООО «Варм» работ, подтвержденные исполнительной и рабочей документациями:

Земляные работы:

4.1. Разработка грунта - 383,85 м3.

4.3. Обратная засыпка грунтом - 227,55 м3.

Крепление траншей:

4.10. Устройство деревянной забирки - 307,87 м2.

4.11. Разборка деревянной забирки - 307,87 м2

Бытовая канализация. I этап (временный мост):

4.19.Укладка трубопроводов из стальных труб диаметром 500 мм - 27,52 м.

4.20. Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром 200 мм с заполнением межтрубного пространства раствором - 75,65 м.

4.21. Укладка трубопроводов из стальных труб диаметром 600 мм -42,66м.

4.24. Укладка чугунных труб ВЧШГ Д=200 мм - 75,65 м.

Примечание: Согласно представленным документам, подрядчиком ООО «Варм» уложены  чугунные трубы,  изготовленные по  ТУ 1461-037-90910065-2015,  а по проектной документации чугунные трубы должны соответствовать ГОСТ ISO 2531- 2012. Изменения в рабочую документацию не внесены, согласования с Заказчиком отсутствуют.

4.27. Устройство основания под трубопроводы бетонного - 3,17 м3.

4.29. Реконструкция колодцев сборных ж/б Д=1,5 м - 4 шт.

4.30. Устройство колодцев сборных ж/б Д=0,7 м - 4 шт.

4.31. Устройство колодцев сборных ж/б Д=1,5 м -4 шт.

Дополнительные работы. Байпас:

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм -46,47 м.

Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм -46,47 м.

Качество выполненных субподрядчиком ООО «ВАРМ» работ - «Хозяйственно-бытовая канализация. Этап 1.2» - возможно установить только после повторного освидетельствования с составлением исполнительной документации, отвечающей требованиям Градостроительного кодекса РФ ст. 52, СП 48.13330.2019 «Организация строительства» и РД-11-02-2006.

Стоимость выполненных субподрядчиком ООО «Варм» работ - «Хозяйственно-бытовая канализация. Этап 1.2» - составляет: 4 112 319,49 руб., в том числе НДС 20 %.

Представленное в материалы дела экспертное заключение оценено судом по правилам статьи 71 АПК РФ  наравне с другими доказательствами по делу.

В соответствии с частью 1 статьи 55 АПК РФ  экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 86 АПК РФ экспертное заключение должно отражать содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; оценку результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их обоснование.

Суд считает, что представленное заключение является надлежащим доказательством по делу, соответствующим всем требования заключения по проведению экспертизы, предъявляемым ст. 83 АПК РФ, специальными нормами и соответствует  требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

В силу части 2 статьи 64 АПК РФ заключение эксперта является одним из доказательств по делу, которое оценивается судом в порядке, предусмотренном нормами статьи названного Кодекса наряду с иными допустимыми доказательствами.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленное в материалы дела экспертное заключение в совокупности с иными доказательствами, суд приходит к выводу, что заключение является полным и обоснованным, противоречий в выводах эксперта, иных обстоятельств, вызывающих сомнения в достоверности проведенной экспертизы, не имеется, в связи с чем данное заключение является допустимым и достоверным доказательством.

С учетом выводов экспертов, сторонами заявлены ходатайства об уточнении первоначальных и встречных исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ.

После уточнения первоначальных исковых требований АО «ЦДС» просит суд взыскать с ООО «Варм» в его пользу сумму неосновательного обогащения в размере 1 687 267, 29 руб.

После уточнения встречных исковых требований ООО «Варм» просит суд взыскать с АО «ЦДС» в его пользу сумму задолженности в размере 2 500 179, 82 руб.

Вместе с тем, судебной экспертизой установлено, что качество выполненных работ по реконструкции хозяйственно-бытовой канализации не подтверждено, следовательно, их стоимость в размере 4 112 319, 49 руб. не подлежит оплате со стороны АО «ЦДС».

Таким образом, на стороне ООО «Варм» образовалось неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса в размере 1 687 267, 29 руб., а задолженность по оплате стоимости выполненных работ на стороне АО «ЦДС» отсутствует.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ  арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности, каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Согласно  ст. 65 АПК РФ  -  каждое   лицо,  участвующее   в  деле,  должно доказать  обстоятельства,  на   которые  оно  ссылается  как  на  основание   своих  требований  и   возражений.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

На основании вышеизложенного, первоначальные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, встречные исковые требования удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы распределены на основании ст. 110 АПК РФ.

Суд, руководствуясь ст.ст. 307-310, 410, 702, 711, 746, 753, 1102 ГК РФ и ст.ст. 4, 8, 9, 65, 71, 75, 82, 110, 156, 170-175 АПК РФ, 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРМ" (ИНН: 

<

***>) в пользу АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРОДОРСТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) аванс в размере 1 687 267, 29 руб., госпошлину в размере 29 873 руб., судебные расходы в размере 248 000 руб.

Возвратить АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРОДОРСТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета госпошлину в размере 68 520 руб.

Встречные исковые требования ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРМ" (ИНН: 

<

***>) оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

О.А. Акименко