АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-30295/2024

город Новосибирск

14 октября 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при  ведении протокола секретарем судебного заседания Кудренко Р.С., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения  города Новосибирска "Гормост" (ОГРН 1025402470378), г. Новосибирск  

к обществу с ограниченной ответственностью "Практик" (ОГРН 1184205014553), п.  Краснобродский  

об обязании исполнить гарантийные обязательства, о взыскании пени в размере 554  рублей 16 копеек за период с 25.07.2024 по 05.08.2024 и по день фактического  исполнения гарантийных обязательств.  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью "Практик" (ОГРН  

<

***>) исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту  от 19.08.2022 № 0351300107022000024 на выполнение работ по ремонту лестничных  сходов на путепроводе через ул. Большевистская (ТЦ «Метро») в городе  Новосибирске и выполнить в течение четырнадцати календарных дней со дня  вступления решения суда по настоящему арбитражному делу в законную силу работы  по устранению следующих дефектов:  

п/п 

Наименование 

дефектов 

Местонахождение 

дефектов  

Объем 

работ  

Необходимые 

мероприятия 

Морозное разрушение верхнего слоя 

бетона ступеней  

Лестничные 

сходы на 

путепроводе через  

ул. 

Большевистская  (ТЦ «Метро») в  

 городе 

38,2 м2  

Ремонт верхнего слоя бетона  ступеней ремонтным составом Master  Emaco N 900, средний толщина слоя  5 мм (1,5*0,28*91)  

 № 1 

Новосибирске 

Коррозия элементов обрамления ступеней 

11,8 м2  

Очистка от загрязнений и окраска  металлических элементов ступеней  (1,5*2+0,28*8+1,5*2+0,28*8+1,5*2+0, 

28*6)*0,06+(1,5+0,28*2+0,1*2)*0,06* 50+(1,5+0,28*2+0,1*2)*0,06*30  

Разрушение  бетона косоуров  

1,6 м2  

Удаление разрушенного слабого  бетона косоуров, ремонт бетона  ремонтным составом Master Emaco N  900, средняя толщина слоя 10 мм  (0,11*0,12*3*80*50%)  

2  3  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Практик" (ОГРН  

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения города  Новосибирска "Гормост" (ОГРН 

<

***>) 554 рубля 16 копеек пени и начиная  с 16.08.2024 пени от цены контракта по день фактического исполнения обязательств  по устранению недостатков.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Практик" (ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации 3800 рублей  государственной пошлины.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Л. Серёдкина