25/2021-60057(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-11172/2020  

от 25 июня 2021 года 

Руководствуясь статьями 110, 167, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в течение  восьми месяцев со дня вступления в законную силу решения суда привести квартиры №№  4,5,8 и общедомовое имущество многоквартирного жилого дома, расположенного по  адресу: 

<

...>,  квартиры №№ 1,3,4,5,6,7 и общедомовое имущество многоквартирного жилого дома,  расположенного по адресу: 

<

...>, в соответствие с условиями муниципальных контрактов №№  0124300010815000022, 0124300010815000023, 0124300010815000024,  0124300010815000027, 0124300010815000028, 0124300010815000029,  0124300010815000030, 0124300010815000031, 0124300010815000032 от 11 декабря 2015  года посредством реализации проектных решений, отражённых в проектах 03-21  «Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>» и 04-21 «Капитальный  ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>», разработанных ИП ФИО2 в  части: конструкции наружных стен, цоколя, фундаментной плиты и пола первого этажа,  системы вентиляции, конструкции кровли, конструкции чердачного перекрытия,  организации водостока с кровли.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья С.А. Максимова