АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2024 года

Дело № А33-17876/2024

Красноярск

Резолютивная часть решения вынесена в судебном заседании 05 декабря 2024 года.

В полном объёме решение изготовлено 12 декабря 2024 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи О.С. Щёлоковой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СибИнформ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «КлиматКонтроль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании задолженности,

в присутствии от истца: ФИО1 .Д., по доверенности от 26.02.2024,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Альтерготом,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «СибИнформ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «КлиматКонтроль» (далее – ответчик) о взыскании

81 182 789,91 руб. задолженности по договору № 03-15-04 от 15.04.2021,

70 035 086,37 руб. задолженности по договору №08-07-22 от 08.07.2022,

419 746,24 руб. задолженности по договору №22-08-22 от 08.09.2022,

120 040 130,22 руб. задолженности по договору № 01-07-22 от 11.10.2022,

21 225 504,06 руб. задолженности по договору поставки № 20-10-22 от 01.09.2022.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 05.07.2024 возбуждено производство по делу.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился. Сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края. В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей ответчика.

Представитель истца в судебное заседании наставила на исковых требованиях по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

В судебном заседании, состоявшемся 25.11.2024, на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 05.12.2024. Сведения размещены в сети Интернет. После перерыва стороны явку представителей не обеспечили.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

1/ 15.04.2021 между обществом с ограниченной ответственностью «СибИнформ»              (подрядчик) и обществу с ограниченной ответственностью «КлиматКонтроль» (заказчик)  заключен договор № 03-15-04 (далее - «договор № 03-15-04, договор № 03-15-04 от 15.04.2021»), с учетом  дополнительных соглашений № 1 от 01.12.2023, № 2 от 30.08.2022, № 2.1 от 10.01.2023, № 3 от 23.05.2023, № 4 от 11.07.2023, а также протокола разногласий от 15.04.2021, по условиям которого подрядчик обязался выполнить на объекте: «Многофункциональная Ледовая арена, г. Новосибирск» (объект) следующие работы: ПНР электроснабжение внутреннее; ПНР электроосвещение внутреннее; внутреннее электроосвещение; освещение наружное и архитектурное в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к договору), графиком производства работ (Приложение № 2 к договору), проектно-сметной документацией, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену в сроки, в порядке и на условиях, установленных в договоре (пункт 1.1. договора).

Согласно пункту 3.1 договора стоимость работ, поручаемых подрядчику по договору, согласовывается сторонами в локальном сметном расчете (приложение №1 к договору). Цена договора определяется на весь срок исполнения договора. Цена договора является твердой.

Пунктом 4.3 дополнительного соглашения № 3 к договору предусмотрено, что, с учетом дополнительных работ, предусмотренных дополнительным соглашением, общая стоимость работ по договору подряда № 03-15-04 от 15.04.2021 составляет 136 490 732,52 руб., в том числе НДС 20% - 22 748 455,42 руб.

В силу пункта 3.5 договора  оплата работ производится заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), актов по унифицированной форме № КС-2 и полного комплекта исполнительной документации, разработанной в соответствии с РД-11-02-2006 и ГОСТ Р 51872-2002 требованиями иных нормативно-правовых актов и выставления счета в адрес заказчика.

Для обеспечения добросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств по договору заказчик удерживает гарантийную сумму в размере 5 % от стоимости выполненных работ. Удержанная сумма подлежит возврату заказчиком подрядчику в следующем порядке:

40 % - по истечений 6 месяцев с момента подписания итогового акта; 40 % по истечении 12 месяцев с момента подписания итогового акта и 20% - по истечении 18 месяцев с момента подписания итогового акта, за исключением сумм, потраченных заказчиком на устранение дефектов выполненных работ своими силами или с привлечением третьих, лиц. При недостаточности гарантийной суммы для покрытия расходов заказчика на устранение дефектов в работе подрядчика, разница подлежит возмещению заказчиком из любых иных сумм, причитающихся подрядчику по договору или иным основаниям, либо взысканию с подрядчика в судебном порядке (пункт 3.10. договора в редакции протокола разногласий).

Стороны в протоколе разногласий согласовали рассмотрение споров по договору в арбитражном суде по месту нахождения истца.

Во исполнение договора № 03-15-04 подрядчиком выполнены и переданы заказчику работы на сумму 131 120 793,72 руб., что подтверждается актами выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 07.12.2022, № 2, от №3 от 28.02.2023, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 от 19.06.2023, № 9, № 10 от 13.02.2024, справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 07.12.2022 на сумму 58 196 828,40 руб., № 2 от 28.02.2023 на сумму 20 063 916 руб., № 3 от 28.02.2023 на сумму 24 224 619,60 руб., № 4 от 19.06.2023 на сумму 24 250 116 руб., № 5 от 13.02.2024 на сумму 4 380 933,72 руб., подписанными уполномоченными представителями сторон настоящего спора.

Размер задолженности, подлежащей взысканию по договору, с учетом гарантийного удержания, составляет 81 182 789,91 руб. (85 116 413,72 руб. задолженности – 3 933 623,81 руб. (6 556 039,69 руб. гарантийного удержания х 60%)).

2/ 08.07.2022 между обществом с ограниченной ответственностью «СибИнформ»              (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «КлиматКонтроль» (заказчик) заключен договор № 08-07-22 (далее - «договор № 08-07-22, договор № 08-07-22 от 08.07.2022»), с учетом дополнительных соглашений № 1 от 06.02.2022, № 2 от 06.09.2022, № 3 от 17.11.2022, № 4 от 21.11.2022, № 5 без даты, № 6 от 09.01.2023, № 7 без даты, № 8 без даты, № 9 от 01.12.2023, а также протокола разногласий от 08.07.2022, по условиям которого подрядчик обязался выполнить на объекте: «Многофункциональная Ледовая арена, г. Новосибирск» комплекс следующих видов работ: автоматизация и управление противопожарными системами; автоматизация и управление противопожарными системами шифр проекта П-21-19-ПБ2.9; работы по монтажу спортивного освещения и иные работы; монтажу лестничных лотков и иные работы; сборка монтажа узла ЭС-6_Б\А1000712.006; пуско-наладочные работы систем автоматической установки противопожарной сигнализации (ПНР АУППС); монтаж концертного освещения; работы по нацеливанию светильников спортивного освещения; электромонтажные работы (далее - «работы»), в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к договору), графиком производства работ (приложение № 2 к договору), проектно-сметной документацией, а заказчик обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену в сроки, в порядке и на условиях, установленных в настоящем договоре (пункт 1.1. договора).

Пунктом договора (в редакции дополнительного соглашения № 9) предусмотрено, что стоимость работ, поручаемых подрядчику по договору, составляет 169 503 873,28 руб., в том числе НДС 20% - 28 250 645,55 руб.

В силу пункта 3.5 договора  оплата работ производится заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), актов по унифицированной форме № КС-2 и полного комплекта исполнительной документации, разработанной в соответствии с РД-11-02-2006 и ГОСТ Р 51872-2002 требованиями иных нормативно-правовых актов и выставления счета в адрес заказчика.

Для обеспечения добросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств по договору заказчик удерживает гарантийную сумму в размере 5 % от стоимости выполненных работ. Удержанная сумма подлежит возврату заказчиком подрядчику в следующем порядке: 40 % - по истечений б месяцев с момента подписания итогового акта; 40 % по истечении 12 месяцев с момента подписания итогового акта и 20% - по истечении 18 месяцев с момента подписания итогового акта, за исключением сумм, потраченных заказчиком на устранение дефектов выполненных работ своими силами или с привлечением третьих, лиц. При недостаточности гарантийной суммы для покрытия расходов заказчика на устранение дефектов в работе подрядчика, разница подлежит возмещению заказчиком из любых иных сумм, причитающихся подрядчику по договору или иным основаниям, либо взысканию с подрядчика в судебном порядке (пункт 3.10. договора в редакции протокола разногласий).

Стороны по договору в протоколе разногласий к договору согласовали рассмотрение споров по настоящему договору в арбитражном суде по месту нахождения истца.

Во исполнение договора № 08-07-22 подрядчиком выполнены и переданы заказчику работы на сумму 157 768 130,28 руб., что подтверждается актами выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 07.12.2022, № 2 от 07.12.2022, № 3, № 4, № 5 от 28.02.2023, № 6 от 29.12.2023, № 7 от 29.12.2023, справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 07.12.2022 на сумму 57 563 135,14 руб., № 2 от 28.02.2023 на сумму 37 597 335,62 руб., № 3 от 28.02.2023 на сумму 5 232 546,00 руб., № 4 от 29.12.2023 на сумму 24 889 781,72 руб., № 5 от 13.02.2024 на сумму 23 617 104 руб., № 6 от 13.02.2024 на сумму 8 858 224,80 руб., подписанными уполномоченными представителями сторон.

Размер задолженности, подлежащей взысканию по договору, с учетом гарантийного удержания, составляет 70 035 086,37 руб. (74 768 130,28 руб. задолженности – 4 733 043,91 руб. (7 888 406,51 руб. гарантийного удержания х 60%)).

3/ 08.09.2022 между обществом с ограниченной ответственностью «СибИнформ»                (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «КлиматКонтроль» (заказчик) заключен договор № 22-08-22 (далее - «договор № 22-08-22, договор № 22-08-22 от 08.09.2022»), с учетом  дополнительных соглашений № 1 от 21.04.2023, № 2 от 11.07.2023, по условиям которого подрядчик обязался выполнить на объекте: «Многофункциональная Ледовая арена, г. Новосибирск» комплекс следующих видов работ: монтаж тепловых завес: «отопление», «вентиляция», шифр проекта П-21-19-ОВ2 (далее - «работы»), в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к договору), графиком производства работ (Приложение № 2 к договору), проектно-сметной документацией, а заказчик обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену в сроки, в порядке и на условиях, установленных в настоящем договоре (пункт 1.1. договора).

Пунктом договора установлено, что стоимость работ, поручаемых подрядчику по договору, согласовывается сторонами в локальном сметном расчете (приложение №1 к договору) и составляет 4 663 846,80 руб., в том числе НДС 20% - 777 307,80 руб.

В силу пункта 3.5 договора  оплата работ производится заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), актов по унифицированной форме № КС-2 и полного комплекта исполнительной документации, разработанной в соответствии с РД-11-02-2006 и ГОСТ Р 51872-2002 требованиями иных нормативно-правовых актов и выставления счета в адрес заказчика.

Для обеспечения добросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств по договору заказчик удерживает гарантийную сумму в размере 5 % от стоимости выполненных работ. Удержанная сумма подлежит возврату заказчиком подрядчику в следующем порядке: 40 % - по истечений б месяцев с момента подписания итогового акта; 40 % по истечении 12 месяцев с момента подписания итогового акта и 20% - по истечении 18 месяцев с момента подписания итогового акта, за исключением сумм, потраченных заказчиком на устранение дефектов выполненных работ своими силами или с привлечением третьих, лиц. При недостаточности гарантийной суммы для покрытия расходов заказчика на устранение дефектов в работе подрядчика, разница подлежит возмещению заказчиком из любых иных сумм, причитающихся подрядчику по договору или иным основаниям, либо взысканию с подрядчика в судебном порядке (пункт 3.10. договора в редакции протокола разногласий).

Стороны по договору в протоколе разногласий к договору согласовали рассмотрение споров по настоящему договору в арбитражном суде по месту нахождения истца.

Во исполнение договора № 22-08-22 подрядчиком выполнены и переданы заказчику работы на сумму 4 663 846,80 руб., что подтверждается актами выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 08.12.2022, № 2 от 28.02.2023, № 3, № 4, № 5 от 24.04.2023, справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 08.12.2022 на сумму 4 227 398,40 руб., № 2 от 28.02.2023 на сумму 436 446 руб., № 3 от 24.04.2023 на сумму 2,40 руб., подписанными уполномоченными представителями сторон.

Размер задолженности, подлежащей взысканию по договору, с учетом гарантийного удержания, составляет 419 746,24 руб. (466 384,68 руб. задолженности - 46 638,44 руб. (20 % удержания, 186 553,87 руб. - 80 % от 233 192,34 руб. (5 % от 4 663 846,80 руб.)).

4/ 11.10.2022 между обществом с ограниченной ответственностью «СибИнформ»               (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «КлиматКонтроль» (заказчик) заключен договор № 01-07-22 (далее - «договор № 01-07-22, договор № 01-07-22 от 11.10.2022»), по условиям которого подрядчик обязался выполнить на объекте:                             «Многофункциональная Ледовая арена, г. Новосибирск» (далее - Объект) комплекс следующих видов работ: электроснабжение внутреннее. Питающая сеть 0,4 кВ; молниезащита, заземление и защитные меры электробезопасности; внутреннее электроосвещение (далее - «работы»), в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к договору), графиком производства работ (приложение № 2 к договору), проектно-сметной документацией, а заказчик обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену в сроки, в порядке и на условиях, установленных в настоящем договоре (пункт 1.1).

Пунктом 3.1. договора предусмотрено, что стоимость работ, поручаемых подрядчику по договору, согласовывается сторонами в локальном сметном расчете (приложение №1 к договору) и составляет 126 367 250,33 руб., в т ом числе НДС 20% - 21 061 208,39 руб.

В силу пункта 3.5 договора  оплата работ производится заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), актов по унифицированной форме № КС-2 и полного комплекта исполнительной документации, разработанной в соответствии с РД-11-02-2006 и ГОСТ Р 51872-2002 требованиями иных нормативно-правовых актов и выставления счета в адрес заказчика.

Для обеспечения добросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств по договору заказчик удерживает гарантийную сумму в размере 5 % от стоимости выполненных работ. Удержанная сумма подлежит возврату заказчиком подрядчику в следующем порядке: 40 % - по истечений б месяцев с момента подписания итогового акта; 40 % по истечении 12 месяцев с момента подписания итогового акта и 20% - по истечении 18 месяцев с момента подписания итогового акта, за исключением сумм, потраченных заказчиком на устранение дефектов выполненных работ своими силами или с привлечением третьих, лиц. При недостаточности гарантийной суммы для покрытия расходов заказчика на устранение дефектов в работе подрядчика, разница подлежит возмещению заказчиком из любых иных сумм, причитающихся подрядчику по договору или иным основаниям, либо взысканию с подрядчика в судебном порядке (пункт 3.10. договора).

11.10.2022 сторонами подписано дополнительное соглашение № 1 к договору № 01-07-22 от 11.10.2022, которым договор дополнен пунктом 3.12 следующего содержания: «заказчик на оказанные подрядные услуги и возмещение затрат на коммунальные расходы удерживает вознаграждение в размере 5 % от стоимости выполненных подрядчиком работ. Оплата за оказанные услуги перечисляется после выполнения работ, но не позднее 10 (десяти) дней с момента расчета за выполненные работы по договору либо на усмотрение заказчика оплата за выполненные работы уменьшается на сумму вознаграждения. Стороны подписывают двухсторонние акты по факту оказания подрядных услуг одновременно с подписанием актов выполненных работ.

Во исполнение договора № 01-07-22  подрядчиком выполнены и переданы заказчику работы на сумму 126 358 031,81 руб., что подтверждается актами выполненных работ (форма КС-2) № 1, № 2, № 3, № 4 от 29.12.2023, справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 29.12.2023 на сумму 40 397 862,41 руб., № 2 от 29.12.2023 на сумму 85 960 169,40 руб., подписанными уполномоченными представителями сторон.

Размер задолженности, подлежащей взысканию по договору, с учетом гарантийного удержания, составляет 120 040 130,22 руб. (38 377 969,29 руб. + 81 662 160,93 руб.), исходя из расчета:

по выполненным работам на сумму 40 397 862,41 руб. подлежит взысканию 38 377 969,29 руб. (40 397 862,41 руб. - 2 019 893,12 (5% от 40 397 862,41 руб.), поскольку для оплаты выполненных работ в части произведенного по основаниям пункта 3.10 договора для удержания не истек 6-ти и 12-ти месячный срок его действия,

по работам на сумму 85 960 169,40 руб. подлежит взысканию 81 662 160,93 руб. (85 960 169,40 руб. - 4 298 008,47 руб. (5 % от 85 960 169,40 руб.), поскольку также не истек 6-ти месячный срок удержания.

5/ 01.09.2022 между обществом с ограниченной ответственностью «СибИнформ»               (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью «КлиматКонтроль» (покупатель) заключен договор № 20-10-22 (далее - «договор поставки № 20-10-22, договор поставки № 20-10-22 от 01.09.2022»), по условиям которого поставщик обязался передать в собственность покупателя товар, в количестве, ассортиментом, стоимостью, сроками поставки и адресом поставки, указанными в спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, а покупатель обязался принять товар и уплатить за него цену, предусмотренную соответствующей спецификацией (пункт 1.1. договора).

Товар передается партиями в период действия договора, по заявкам покупателя, предусмотренным соответствующей спецификацией (пункт 1.2. договора).

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что стоимость товара указывается в спецификациях к договору.

На основании пункта 5.2 договора покупатель обязуется осуществить оплату товара в течение 14 календарных дней со дня поставки товара.

К договору сторонами подписаны спецификации № 1 от 01.09.2022, № 2 от 03.10.2022, № 3 от 26.01.2023, № 4 от 03.04.2023.

Во исполнение договора поставки № 20-10-22 истцом поставлено ответчику товара на сумму 21 225 504,06 руб., что подтверждается универсальными передаточными документами № 54 от 29.11.2022 на сумму 13 473 561,39 руб., № 4 от 06.02.2023 на сумму 7 069 468,17 руб., № 5 от 09.02.2023 на сумму 649 425,50 руб., № 30 от 24.04.2023 на сумму 33 049 руб., подписанными уполномоченными представителями сторон.

Обязательства по оплате товара покупателем не исполнены, задолженность по договору составляет  21 225 504,06 руб.

С требованием оплаты спорной задолженности подрядчик обращался к заказчику  письмами, направленными по электронной почте (скриншоты отправлений), № 108 от 10.02.2023, № 251 от 13.04.2023, № 388 от 30.06.2023, № 412 от 19.07.2023, № 485 от 22.08.2023, № 511 от 08.09.2023, № 627 от 13.11.2023, № 673 от 15.12.2023, № 2 от 09.01.2024, № 69 от 15.02.2024, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77 от 20.02.2024.

Требования об оплате задолженности оставлены заказчиком без исполнения, что послужило основанием для обращения подрядчика в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Статьями 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Между обществом с ограниченной ответственностью «СибИнформ» (подрядчик) и обществу с ограниченной ответственностью «КлиматКонтроль» (заказчик) заключены                договоры подряда № 03-15-04 от 15.04.2021, №08-07-22 от 08.07.2022, №22-08-22 от 08.09.2022, № 01-07-22 от 11.10.2022, договор поставки № 20-10-22 от 01.09.2022.

Правоотношения сторон регулируются нормами глав 30, 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Статья 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает возможность составления одностороннего акта. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации). Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу пункта 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя (пункт 2 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случае, когда в договоре поставки предусмотрена поставка товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров покупателем производится после отгрузки (выборки) последней части, входящей в комплект, если иное не установлено договором (пункт 3 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела следует, что 15.04.2021 между обществом с ограниченной ответственностью «СибИнформ» (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «КлиматКонтроль» (заказчик) заключен договор № 03-15-04 (далее - «договор № 03-15-04, договор № 03-15-04 от 15.04.2021»), с учетом  дополнительных соглашений № 1 от 01.12.2023, № 2 от 30.08.2022, № 2.1 от 10.01.2023, № 3 от 23.05.2023, № 4 от 11.07.2023, а также протокола разногласий от 15.04.2021, по условиям которого подрядчик обязался выполнить на объекте: «Многофункциональная Ледовая арена, г. Новосибирск» (объект) следующие работы: ПНР электроснабжение внутреннее; ПНР электроосвещение внутреннее; внутреннее электроосвещение; освещение наружное и архитектурное в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к договору), графиком производства работ (Приложение № 2 к договору), проектно-сметной документацией, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену в сроки, в порядке и на условиях, установленных в договоре (пункт 1.1. договора).

Согласно пункту 3.1 договора стоимость работ, поручаемых подрядчику по договору, согласовывается сторонами в локальном сметном расчете (приложение №1 к договору). Цена договора определяется на весь срок исполнения договора. Цена договора является твердой.

Пунктом 4.3 дополнительного соглашения № 3 к договору предусмотрено, что, с учетом дополнительных работ, предусмотренных дополнительным соглашением, общая стоимость работ по договору подряда № 03-15-04 от 15.04.2021 составляет 136 490 732,52 руб., в том числе НДС 20% - 22 748 455,42 руб.

В силу пункта 3.5 договора  оплата работ производится заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), актов по унифицированной форме № КС-2 и полного комплекта исполнительной документации, разработанной в соответствии с РД-11-02-2006 и ГОСТ Р 51872-2002 требованиями иных нормативно-правовых актов и выставления счета в адрес заказчика.

Для обеспечения добросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств по договору заказчик удерживает гарантийную сумму в размере 5 % от стоимости выполненных работ. Удержанная сумма подлежит возврату заказчиком подрядчику в следующем порядке: 40 % - по истечений б месяцев с момента подписания итогового акта; 40 % по истечении 12 месяцев с момента подписания итогового акта и 20% - по истечении 18 месяцев с момента подписания итогового акта, за исключением сумм, потраченных заказчиком на устранение дефектов выполненных работ своими силами или с привлечением третьих, лиц. При недостаточности гарантийной суммы для покрытия расходов заказчика на устранение дефектов в работе подрядчика, разница подлежит возмещению заказчиком из любых иных сумм, причитающихся подрядчику по договору или иным основаниям, либо взысканию с подрядчика в судебном порядке (пункт 3.10. договора в редакции протокола разногласий).

Стороны по договору в протоколе разногласий к договору согласовали рассмотрение споров по настоящему договору в арбитражном суде по месту нахождения истца.

Во исполнение договора № 03-15-04 подрядчиком выполнены и переданы заказчику работы на сумму 131 120 793,72 руб., что подтверждается актами выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 07.12.2022, № 2, от №3 от 28.02.2023, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 от 19.06.2023, № 9, № 10 от 13.02.2024, справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 07.12.2022 на сумму 58 196 828,40 руб., № 2 от 28.02.2023 на сумму 20 063 916 руб., № 3 от 28.02.2023 на сумму 24 224 619,60 руб., № 4 от 19.06.2023 на сумму 24 250 116 руб., № 5 от 13.02.2024 на сумму 4 380 933,72 руб., подписанными уполномоченными представителями сторон настоящего спора.

Размер задолженности, подлежащей взысканию по договору, с учетом гарантийного удержания, составляет 81 182 789,91 руб. (85 116 413,72 руб. задолженности – 3 933 623,81 руб. (6 556 039,69 руб. гарантийного удержания х 60%)).

08.07.2022 между обществом с ограниченной ответственностью «СибИнформ» (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «КлиматКонтроль» (заказчик) заключен договор № 08-07-22 (далее - «договор № 08-07-22, договор № 08-07-22 от 08.07.2022»), действующий с учетом   дополнительных соглашений № 1 от 06.02.2022, № 2 от 06.09.2022, № 3 от 17.11.2022, № 4 от 21.11.2022, № 5 без даты, № 6 от 09.01.2023, № 7 без даты, № 8 без даты, № 9 от 01.12.2023, а также протокола разногласий от 08.07.2022, по условиям которого подрядчик обязался выполнить на объекте: «Многофункциональная Ледовая арена, г. Новосибирск» комплекс следующих видов работ: автоматизация и управление противопожарными системами; автоматизация и управление противопожарными системами шифр проекта П-21-19-ПБ2.9; работы по монтажу спортивного освещения и иные работы; монтажу лестничных лотков и иные работы; сборка монтажа узла ЭС-6_Б\А1000712.006; пуско-наладочные работы систем автоматической установки противопожарной сигнализации (ПНР АУППС); монтаж концертного освещения; работы по нацеливанию светильников спортивного освещения; электромонтажные работы (далее - «работы»), в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к договору), графиком производства работ (приложение № 2 к договору), проектно-сметной документацией, а заказчик обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену в сроки, в порядке и на условиях, установленных в настоящем договоре (пункт 1.1. договора).

Пунктом договора (в редакции дополнительного соглашения № 9) предусмотрено, что стоимость работ, поручаемых подрядчику по договору, составляет 169 503 873,28 руб., в том числе НДС 20% - 28 250 645,55 руб.

В силу пункта 3.5 договора  оплата работ производится заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), актов по унифицированной форме № КС-2 и полного комплекта исполнительной документации, разработанной в соответствии с РД-11-02-2006 и ГОСТ Р 51872-2002 требованиями иных нормативно-правовых актов и выставления счета в адрес заказчика.

Для обеспечения добросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств по договору заказчик удерживает гарантийную сумму в размере 5 % от стоимости выполненных работ. Удержанная сумма подлежит возврату заказчиком подрядчику в следующем порядке: 40 % - по истечений б месяцев с момента подписания итогового акта; 40 % по истечении 12 месяцев с момента подписания итогового акта и 20% - по истечении 18 месяцев с момента подписания итогового акта, за исключением сумм, потраченных заказчиком на устранение дефектов выполненных работ своими силами или с привлечением третьих, лиц. При недостаточности гарантийной суммы для покрытия расходов заказчика на устранение дефектов в работе подрядчика, разница подлежит возмещению заказчиком из любых иных сумм, причитающихся подрядчику по договору или иным основаниям, либо взысканию с подрядчика в судебном порядке (пункт 3.10. договора в редакции протокола разногласий).

Стороны по договору в протоколе разногласий к договору согласовали рассмотрение споров по настоящему договору в арбитражном суде по месту нахождения истца.

Во исполнение договора № 08-07-22 подрядчиком выполнены и переданы заказчику работы на сумму 157 768 130,28 руб., что подтверждается актами выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 07.12.2022, № 2 от 07.12.2022, № 3, № 4, № 5 от 28.02.2023, № 6 от 29.12.2023, № 7 от 29.12.2023, справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 07.12.2022 на сумму 57 563 135,14 руб., № 2 от 28.02.2023 на сумму 37 597 335,62 руб., № 3 от 28.02.2023 на сумму 5 232 546,00 руб., № 4 от 29.12.2023 на сумму 24 889 781,72 руб., № 5 от 13.02.2024 на сумму 23 617 104 руб., № 6 от 13.02.2024 на сумму 8 858 224,80 руб., подписанными уполномоченными представителями сторон.

Размер задолженности, подлежащей взысканию по договору, с учетом гарантийного удержания, составляет 70 035 086,37 руб. (74 768 130,28 руб. задолженности – 4 733 043,91 руб. (7 888 406,51 руб. гарантийного удержания х 60%)).

08.09.2022 между обществом с ограниченной ответственностью «СибИнформ» (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «КлиматКонтроль» (заказчик) заключен договор № 22-08-22 (далее - «договор № 22-08-22, договор № 22-08-22 от 08.09.2022»), действующий с учетом  дополнительных соглашений № 1 от 21.04.2023, № 2 от 11.07.2023, по условиям которого подрядчик обязался выполнить на объекте: «Многофункциональная Ледовая арена, г. Новосибирск» комплекс следующих видов работ: монтаж тепловых завес: «отопление», «вентиляция», шифр проекта П-21-19-ОВ2 (далее - «работы»), в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к договору), графиком производства работ (Приложение № 2 к договору), проектно-сметной документацией, а заказчик обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену в сроки, в порядке и на условиях, установленных в настоящем договоре (пункт 1.1. договора).

Пунктом договора установлено, что стоимость работ, поручаемых подрядчику по договору, согласовывается сторонами в локальном сметном расчете (приложение №1 к договору) и составляет 4 663 846,80 руб., в том числе НДС 20% - 777 307,80 руб.

В силу пункта 3.5 договора  оплата работ производится заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), актов по унифицированной форме № КС-2 и полного комплекта исполнительной документации, разработанной в соответствии с РД-11-02-2006 и ГОСТ Р 51872-2002 требованиями иных нормативно-правовых актов и выставления счета в адрес заказчика.

Для обеспечения добросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств по договору заказчик удерживает гарантийную сумму в размере 5 % от стоимости выполненных работ. Удержанная сумма подлежит возврату заказчиком подрядчику в следующем порядке: 40 % - по истечений б месяцев с момента подписания итогового акта; 40 % по истечении 12 месяцев с момента подписания итогового акта и 20% - по истечении 18 месяцев с момента подписания итогового акта, за исключением сумм, потраченных заказчиком на устранение дефектов выполненных работ своими силами или с привлечением третьих, лиц. При недостаточности гарантийной суммы для покрытия расходов заказчика на устранение дефектов в работе подрядчика, разница подлежит возмещению заказчиком из любых иных сумм, причитающихся подрядчику по договору или иным основаниям, либо взысканию с подрядчика в судебном порядке (пункт 3.10. договора в редакции протокола разногласий).

Стороны по договору в протоколе разногласий к договору согласовали рассмотрение споров по настоящему договору в арбитражном суде по месту нахождения истца.

Во исполнение договора № 22-08-22 подрядчиком выполнены и переданы заказчику работы на сумму 4 663 846,80 руб., что подтверждается актами выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 08.12.2022, № 2 от 28.02.2023, № 3, № 4, № 5 от 24.04.2023, справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 08.12.2022 на сумму 4 227 398,40 руб., № 2 от 28.02.2023 на сумму 436 446 руб., № 3 от 24.04.2023 на сумму 2,40 руб., подписанными уполномоченными представителями сторон.

Размер задолженности, подлежащей взысканию по договору, с учетом гарантийного удержания, составляет 419 746,24 руб. (466 384,68 руб. задолженности - 46 638,44 руб. (20 % удержания, 186 553,87 руб. - 80 % от 233 192,34 руб. (5 % от 4 663 846,80 руб.)).

11.10.2022 между обществом с ограниченной ответственностью «СибИнформ» (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «КлиматКонтроль» (заказчик) заключен договор № 01-07-22 (далее - «договор № 01-07-22, договор № 01-07-22 от 11.10.2022»), по условиям которого подрядчик обязался выполнить на объекте: «Многофункциональная Ледовая арена, г. Новосибирск» (далее - Объект) комплекс следующих видов работ: электроснабжение внутреннее. Питающая сеть 0,4 кВ; молниезащита, заземление и защитные меры электробезопасности; внутреннее электроосвещение (далее - «работы»), в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к договору), графиком производства работ (приложение № 2 к договору), проектно-сметной документацией, а заказчик обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену в сроки, в порядке и на условиях, установленных в настоящем договоре (пункт 1.1).

Пунктом 3.1. договора предусмотрено, что стоимость работ, поручаемых подрядчику по договору, согласовывается сторонами в локальном сметном расчете (приложение №1 к договору) и составляет 126 367 250,33 руб., в т ом числе НДС 20% - 21 061 208,39 руб.

В силу пункта 3.5 договора  оплата работ производится заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), актов по унифицированной форме № КС-2 и полного комплекта исполнительной документации, разработанной в соответствии с РД-11-02-2006 и ГОСТ Р 51872-2002 требованиями иных нормативно-правовых актов и выставления счета в адрес заказчика.

Для обеспечения добросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств по договору заказчик удерживает гарантийную сумму в размере 5 % от стоимости выполненных работ. Удержанная сумма подлежит возврату заказчиком подрядчику в следующем порядке: 40 % - по истечений б месяцев с момента подписания итогового акта; 40 % по истечении 12 месяцев с момента подписания итогового акта и 20% - по истечении 18 месяцев с момента подписания итогового акта, за исключением сумм, потраченных заказчиком на устранение дефектов выполненных работ своими силами или с привлечением третьих, лиц. При недостаточности гарантийной суммы для покрытия расходов заказчика на устранение дефектов в работе подрядчика, разница подлежит возмещению заказчиком из любых иных сумм, причитающихся подрядчику по договору или иным основаниям, либо взысканию с подрядчика в судебном порядке (пункт 3.10. договора).

11.10.2022 сторонами подписано дополнительное соглашение № 1 к договору № 01-07-22 от 11.10.2022, которым договор дополнен пунктом 3.12 следующего содержания: «заказчик на оказанные подрядные услуги и возмещение затрат на коммунальные расходы удерживает вознаграждение в размере 5 % от стоимости выполненных подрядчиком работ. Оплата за оказанные услуги перечисляется после выполнения работ, но не позднее 10 (десяти) дней с момента расчета за выполненные работы по договору либо на усмотрение заказчика оплата за выполненные работы уменьшается на сумму вознаграждения. Стороны подписывают двухсторонние акты по факту оказания подрядных услуг одновременно с подписанием актов выполненных работ.

Во исполнение договора № 01-07-22  подрядчиком выполнены и переданы заказчику работы на сумму 126 358 031,81 руб., что подтверждается актами выполненных работ (форма КС-2) № 1, № 2, № 3, № 4 от 29.12.2023, справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 29.12.2023 на сумму 40 397 862,41 руб., № 2 от 29.12.2023 на сумму 85 960 169,40 руб., подписанными уполномоченными представителями сторон.

Размер задолженности, подлежащей взысканию по договору, с учетом гарантийного удержания, составляет 120 040 130,22 руб. (38 377 969,29 руб. + 81 662 160,93 руб.), исходя из расчета:

по выполненным работам на сумму 40 397 862,41 руб. подлежит взысканию 38 377 969,29 руб. (40 397 862,41 руб. - 2 019 893,12 (5% от 40 397 862,41 руб.), поскольку для оплаты выполненных работ в части произведенного по основаниям пункта 3.10 договора для удержания не истек 6-ти и 12-ти месячный срок его действия,

по работам на сумму 85 960 169,40 руб. подлежит взысканию 81 662 160,93 руб. (85 960 169,40 руб. - 4 298 008,47 руб. (5 % от 85 960 169,40 руб.), поскольку также не истек 6-ти месячный срок удержания.

01.09.2022 между обществом с ограниченной ответственностью «СибИнформ» (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью «КлиматКонтроль» (покупатель)             заключен договор № 20-10-22 (далее - «договор поставки № 20-10-22, договор поставки № 20-10-22 от 01.09.2022»), по условиям которого поставщик обязался передать в собственность покупателя товар, в количестве, ассортиментом, стоимостью, сроками поставки и адресом поставки, указанными в спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, а покупатель обязался принять товар и уплатить за него цену, предусмотренную соответствующей спецификацией (пункт 1.1. договора).

Товар передается партиями в период действия договора, по заявкам покупателя, предусмотренным соответствующей спецификацией (пункт 1.2. договора). Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что стоимость товара указывается в спецификациях к договору. На основании пункта 5.2 договора покупатель обязуется осуществить оплату товара в течение 14 календарных дней со дня поставки товара.

К договору сторонами подписаны спецификации № 1 от 01.09.2022, № 2 от 03.10.2022, № 3 от 26.01.2023, № 4 от 03.04.2023.

Во исполнение договора поставки № 20-10-22 истцом поставлено ответчику товара на сумму 21 225 504,06 руб., что подтверждается универсальными передаточными документами № 54 от 29.11.2022 на сумму 13 473 561,39 руб., № 4 от 06.02.2023 на сумму 7 069 468,17 руб., № 5 от 09.02.2023 на сумму 649 425,50 руб., № 30 от 24.04.2023 на сумму 33 049 руб., подписанными уполномоченными представителями сторон.

Обязательства по оплате товара покупателем не исполнены, задолженность по договору составляет  21 225 504,06 руб.

Общая сумма задолженности по договорам составляет 292 903 256,80 руб.

Ответчик в отзыве на исковое заявление указал на  неверное определение истцом                   размера задолженности по договорам № 03-15-04 от 15.04.2021, № 08-07-22 от 08.07.2022. Данный довод учтен истцом при уменьшении размера исковых требований от 20.10.2024 (поступило через систему «Мой Арбитр» 22.10.2024), принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Иных возражений против исковых требований ответчиком не приведено (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, требование истца о взыскании задолженности в сумме 292 903 256,80 руб. является правомерным и подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000,00  руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КлиматКонтроль»                           (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Москва, дата регистрации 29.09.2014) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СибИнформ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации 24.03.2009) 292 903 256,80 руб. задолженности, 200 000,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.С. Щёлокова