Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-6186/2022

г. Хабаровск

29 августа 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 22.08.2022 г.

 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  Дюковой С.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «ТСМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680009, 

<

...>, литер А)

к  Обществу с ограниченной ответственностью «Дальстрой Интернешнл» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680009, 

<

...>)

о  взыскании 176 879 926 руб. 11 коп.

 

при участии в судебном заседании: 

от истца - конкурсный управляющий ФИО2, представитель ФИО3 по доверенности от 20.05.2022 г.;

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом. 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТСМ» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Дальстрой Интернешнл» долга в размере 176 879 926 руб. 11 коп.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, не явился, отзыв на исковое заявление не представил, возражений не заявил.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено по существу в отсутствие ответчика.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2019 г. по делу № А73-20840/2018 Общество с ограниченной ответственностью «ТСМ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ФИО2.

В рамках данного дела о банкротстве конкурсный управляющийФИО2 обратилась в арбитражный суд с заявлениями (вх. 82070) обоспаривании сделок ООО «ТСМ», заключенных с ООО «Дальстрой Интернешнл», в которых просила признать недействительной сделку взаимозачета от 30.10.2018 г., совершенную между ответчиком и истцом в сумме 74 117 317 руб. 79 коп., применить последствия ее недействительности в виде восстановления задолженности ответчика перед истцом.

Определением от 17.07.2020 г. заявления конкурсного управляющего о признании недействительными сделок общества «ТСМ» объединены судом в одно производство с целью их совместного рассмотрения.

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 13.10.2021 г. по делу № А73-20840/2018 (вх. 82070), вступившим в законную силу, заявление конкурсного управляющего удовлетворено, признана недействительной сделка зачета, заключенная между ООО «ТСМ» и ООО «Дальстрой Интернешнл», оформленная актом взаимозачета от 30.10.2018 г. в сумме 74 117 317 руб. 79 коп. Применены последствия недействительности сделки в виде восстановления задолженности ООО «Дальстрой Интернешнл» перед ООО «ТСМ» по договору субподряда от 09.01.2018 г. № 3 в сумме 29 871 365 руб. 00 коп., по договору субподряда от 01.02.2018 в сумме 8 851 999 руб. 23 коп., по договору субподряда от 01.02.2018 г. в сумме 56 362 руб. 00 коп., по договору субподряда от 01.02.2018 г. в сумме 207 472 руб. 00 коп., договору субподряда от 01.03.2018 г. в сумме 29 046 руб. 00 коп., по договору субподряда от 01.03.2018 г. в сумме 170 322 руб. 00 коп., по договору субподряда от 01.08.2018 г. в сумме 51 008 руб. 00 коп., по договору субподряда от 02.07.2018 г. в сумме 7 051 589 руб. 00 коп., по договору субподряда от 02.07.2018 г. в сумме 7 375 400 руб. 00 коп., по договору субподряда от 02.07.2018 г. в сумме 6 715 200 руб. 00 коп., по договору субподряда от 02.07.2018 в сумме 7 800 700 руб. 00 коп., по договору субподряда от 02.07.2018 г. в сумме 46 317 руб. 00 коп., по договору субподряда от 02.07.2018 г. в сумме 5 890 537 руб. 56 коп. Применены последствия недействительности сделки в виде восстановления задолженности ООО «ТСМ» перед ООО «Дальстрой Интернешнл» по договору поставки от 01.10.2017 г. на сумму 74 117 317 руб. 79 коп.

Кроме того, в рамках дела о банкротстве ООО «ТСМ» конкурсныйуправляющий ФИО2 обратилась в арбитражный суд также с заявлениями (вх. 78400, 78401) о признании недействительными сделок, оформленных в виде зачетов от 30.06.2018 г. в сумме 43 250 311 руб. 00 коп., от 30.06.2018 г. в сумме 59 512 297 руб. 32 коп. и применении последствий недействительности сделок в виде восстановления задолженности ответчика перед истцом.

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 13.10.2021 г. по делу № А73-20840/2018 (вх. 78400, вх. 78401), вступившим в законную силу, заявление конкурсного управляющего удовлетворено, признана недействительной сделка зачета, заключенная между ООО «ТСМ» и ООО «Дальстрой Интернешнл», оформленная актом взаимозачета от 30.06.2018 г., в сумме 43 250 311 руб. 00 коп. Применены последствия недействительности в виде восстановления задолженности ООО «Дальстрой Интернешнл» перед ООО «ТСМ» по договору субподряда от 30.11.2017 г. в сумме 2 074 312 руб. 80 коп., по договору субподряда от 03.05.2017 г. № 32 в сумме 6 457 484 руб. 16 коп., по договору субподряда от 14.09.2017 г. № 39 в сумме 2 162 838 руб. 77 коп., по договору подряда от 09.01.2018 г. № 3 в сумме 2 882 153 руб. 00 коп., по договору субподряда от 01.02.2018 г. в сумме 3 297 351 руб. 00 коп., по договору субподряда от 01.02.2018 г. в сумме 1 797 039 руб. 00 коп., по договору субподряда от 01.02.2018 г. в сумме 2 801 754 руб. 00 коп., по договору субподряда от 01.03.2018 г. в сумме 929 960 руб. 00 коп., по договору субподряда от 01.03.2018 г. в сумме 1 489 081 руб. 00 коп., по договору субподряда от 01.03.2018 г. в сумме 3 007 351 руб. 00 коп., по договору субподряда от 09.01.2018 г. в сумме 3 003 512 руб. 00 коп., по договору субподряда от 09.01.2018 г. в сумме 13 347 474 руб. 27 коп. Применены последствия недействительности в виде восстановления задолженности ООО «ТСМ» перед ООО «Дальстрой Интернешнл» по договору субподряда от 19.05.2017 г. на сумму 948 976 руб. 00 коп., по  договору поставки от 31.03.2017 г. на сумму 26 200 138 руб. 00 коп., по договору субподряда от 17.05.2017 г. на сумму 16 101 197 руб. 00 коп. Признана недействительной сделка зачета, заключенная между ООО «ТСМ» и ООО «Дальстрой Интернешнл», оформленная актом взаимозачета от 30.09.2018 г. в сумме 59 512 297 руб. 32 коп. Применены последствия недействительности в виде восстановления задолженности ООО «Дальстрой Интернешнл» перед ООО «ТСМ» по договору субподряда от 09.01.2018 г. № 3 на сумму 6 828 400 руб. 00 коп., по договору поставки от 01.07.2017 г. на сумму 6 830 000 руб. 00 коп., по договору подряда от 09.01.2018 г. на сумму 45 853 897 руб. 32 коп. Применены последствия недействительности в виде восстановления задолженности ООО «ТСМ» перед ООО «Дальстрой Интернешнл» по договору субподряда от 12.01.2018 г. на сумму 45 684 062 руб. 00 коп., по договору поставки от 09.10.2017 г. на сумму 13 828 235 руб. 32 коп.

Таким образом, фактически стороны приведены судом в положение,существовавшее до совершения признанных судом недействительными сделок, оформленных актами взаимозачетов.

09.01.2018 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (подрядчик) заключен договор подряда № 3, предметом которого является выполнение подрядчиком, собственными силами и средствами на объекте: «Жилой дом по ул. Володарского г. Владивосток», в объемах и сроках, согласованных сторонами, комплекса строительно-монтажных работ, согласованных сторонами в локальном сметном расчете, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

В пункте 1.2 договора предусмотрено, что генподрядчик обязуется принять и оплатить качественно выполненные работы в соответствии с условиями данного договора.

Сроки выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – 31.12.2018 г. (пункт 3.1 договора).

Согласно пункту 4.1 договора оплата выполненных работ производится на основании счетов-фактур, выставленных подрядчиком, в течение 25 банковских дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 31.01.2018 г., № 2 от 28.02.2018 г., № 1 от 31.07.2018 г., № 2 от 31.08.2018 г., № 3 от 30.09.2018  г., № 1, 2, 3 от 26.02.2018 г., № 4 от 31.10.2018 г. подтверждается выполнение ООО «ТСМ» работ по договору от 01.10.2018 г. и принятие ООО «Дальстрой Интернешнл» на общую сумму 43 861 918 руб. 00 коп.

Между тем, обязанность по оплате выполненных работ исполнена ответчиком не в полном объеме, в связи с чем, возникла задолженность в размере 39 581 918 руб. 00 коп.

Задолженность по обозначенному договору составила 39 581 918 руб. 00 коп., что установлено в определении от 13.10.2021 г. (вх.78400, вх.78401) на сумму 2 882 153 руб. 00 коп. (по признанному судом недействительным акту взаимозачета от 30.06.2018 г.) и на сумму 6 828 400 руб. 00 коп. (по признанному судом недействительным акту взаимозачета от 30.06.2018 г.), а также в определении от 13.10.2021 г. (вх.82070) на сумму 29 871 365 руб. 00 коп (по признанному судом недействительным акту взаимозачета от 30.10.2018 г.).

14.09.2017 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (подрядчик) заключен договор подряда № 39, предметом которого является выполнение подрядчиком, собственными силами и средствами комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция входной группы здания литер Б, входящую в перечень мероприятий по модернизации котельной, расположенной по адресу: 

<

...>» согласно сметному расчету.

В пункте 1.2 договора предусмотрено, что генподрядчик обязуется принять и оплатить качественно выполненные работы в соответствии с условиями данного договора.

Сроки выполнения работ: начало работ – 01.09.2017 г., окончание работ – 25.09.2017 г. (пункт 3.1 договора).

Согласно пункту 4.1 договора оплата выполненных работ производится на основании счетов-фактур, выставленных подрядчиком, в течение 10 банковских дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 25.09.2017 г. подтверждается выполнение ООО «ТСМ» работ по договору и принятие ООО «Дальстрой Интернешнл» на общую сумму 2 162 838 руб. 77 коп.

Между тем, обязанность по оплате выполненных работ исполнена ответчиком не в полном объеме, в связи с чем, возникла задолженность в размере 2 162 838 руб. 77 коп.

03.05.2017 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда № 32, предметом которого является выполнение подрядчиком, собственными силами и средствами работ по строительству объекта капитального строительства – дошкольного образовательного учреждения «Детский ад на 95 мест в с. Тополево Хабаровского муниципального района» согласно сводному сметному расчету стоимости строительства № 1.

В пункте 1.2 договора предусмотрено, что генподрядчик обязуется принять и оплатить качественно выполненные работы в соответствии с условиями данного договора.

Сроки выполнения работ: начало работ – 30.05.2017 г., окончание работ – 30.12.2018 г. (пункт 3.1 договора).

Согласно пункту 4.1 договора оплата выполненных работ производится на основании счетов-фактур, выставленных подрядчиком, в течение 10 банковских дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 25.07.2017 г., № 2 от 25.07.2017 г., № 3 от 25.07.2017 г., № 4 от 25.07.2017 г., № 5 от 25.07.2017 г., № 6 от 25.07.2017 г., № 1 от 25.08.2017 г., № 1 от 25.09.2017 г., № 2 от 25.09.2017 г., № 1 от 25.01.2018 г., № 2 от 25.01.2018 г., № 3 от 25.01.2018 г., № 1 от 25.01.2018 г., № 2 от 25.01.2018 г., № 1 от 26.02.2018 г., № 2 от 26.02.2018 г., № 3 от 26.02.2018 г., б/н от 25.02.2018 г., б/н от 25.03.2018 г., б/н от 26.03.2018 г., № 1 от 25.04.2018 г., подтверждается выполнение ООО «ТСМ» работ по договору и принятие ООО «Дальстрой Интернешнл» на общую сумму 19 911 512 руб. 56 коп.

Между тем, обязанность по оплате выполненных работ исполнена ответчиком не в полном объеме, в связи с чем, возникла задолженность в размере 6 457 484 руб. 16 коп.

01.02.2018 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда, по условиям которого генподрядчик поручает, а субподрядчик обязуется в установленный данным договором срок и своими силами выполнить комплекс работ на объекте: ТРЦ Аллея в г. Южно-Сахалинске.

Сроки выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – 31.10.2018 г. (пункт 3.1 договора).

Согласно пункту 4.2 договора оплата выполненных работ производится на основании счетов-фактур, выставленных подрядчиком, в течение 10 банковских дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 28.02.2018 г., № 2 от 20.07.2018 г., № 2 от 20.07.2018 г., № 3 от 20.07.2018 г., № 4 от 31.08.2018 г., № 5 от 30.09.2018 г. подтверждается выполнение ООО «ТСМ» работ по договору и принятие ООО «Дальстрой Интернешнл» на общую сумму 12 149 350 руб. 23 коп.

Между тем, обязанность по оплате выполненных работ исполнена ответчиком не в полном объеме, в связи с чем, возникла задолженность в размере 12 149 350 руб. 23 коп., что установлено в определении суда от 13.10.2021 (вх. 78400 и 78401) на сумму 3 297 351 руб. 00 коп. и в определении от 13.10.2021 г. (вх. 82070) на сумму 8 851 999 руб. 23 коп.

01.02.2018 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда, по условиям которого генподрядчик поручает, а субподрядчик обязуется в установленный данным договором срок и своими силами выполнить комплекс работ на объекте: Спортивный объект. Реконструкция выявленного объекта культурного наследия «Плавательный бассейн» 1958 г. в г. Хабаровске.

Сроки выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – 31.10.2018 г. (пункт 3.1 договора).

Согласно пункту 4.2 договора оплата выполненных работ производится на основании счетов-фактур, выставленных подрядчиком, в течение 10 банковских дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 28.02.2018 г., № 2 от 20.07.2018 г. подтверждается выполнение ООО «ТСМ» работ по договору и принятие ООО «Дальстрой Интернешнл» на общую сумму 1 853 401 руб. 00 коп.

Между тем, обязанность по оплате выполненных работ исполнена ответчиком не в полном объеме, в связи с чем, возникла задолженность в размере 1 853 401 руб. 00 коп., что установлено в определении суда от 13.10.2021 (вх. 78400 и 78401) на сумму 1 797 039 руб. 00 коп. и в определении от 13.10.2021 г. (вх. 82070) на сумму 56 362 руб. 00 коп.

01.02.2018 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда, по условиям которого генподрядчик поручает, а субподрядчик обязуется в установленный данным договором срок и своими силами выполнить комплекс работ на объекте: Здание кинотеатра «Уссури» по ул. Светланская, 31, лит. 2 г. Владивосток.

Сроки выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – 31.10.2018 г. (пункт 3.1 договора).

Согласно пункту 4.2 договора оплата выполненных работ производится на основании счетов-фактур, выставленных подрядчиком, в течение 10 банковских дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 05.09.2018 г., № 2 от 28.01.2018 г. подтверждается выполнение ООО «ТСМ» работ по договору и принятие ООО «Дальстрой Интернешнл» на общую сумму 3 009 226 руб. 00 коп.

Между тем, обязанность по оплате выполненных работ исполнена ответчиком не в полном объеме, в связи с чем, возникла задолженность в размере 3 009 226 руб. 00 коп., что установлено в определении суда от 13.10.2021 (вх. 78400 и 78401) на сумму 2 801 754 руб. 00 коп. и в определении от 13.10.2021 г. (вх. 82070) на сумму 207 472 руб. 00 коп.

01.03.2018 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда, по условиям которого генподрядчик поручает, а субподрядчик обязуется в установленный данным договором срок и своими силами выполнить комплекс работ на объекте: Крытый теннисный корт по пер. Алтайский, 15 в г. Южно-Сахалинске.

Сроки выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – 01.07.2018 г. (пункт 3.1 договора).

Согласно пункту 4.2 договора оплата выполненных работ производится на основании счетов-фактур, выставленных подрядчиком, в течение 10 банковских дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 30.03.2018 г. подтверждается выполнение ООО «ТСМ» работ по договору и принятие ООО «Дальстрой Интернешнл» на общую сумму 929 960 руб. 00 коп.

Между тем, обязанность по оплате выполненных работ исполнена ответчиком не в полном объеме, в связи с чем, возникла задолженность в размере 929 960 руб. 00 коп., что установлено в определении суда от 13.10.2021 (вх. 78400 и 78401). 

01.03.2018 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда, по условиям которого генподрядчик поручает, а субподрядчик обязуется в установленный данным договором срок и своими силами выполнить комплекс работ на объекте: Офисное здание ДРСК в г. Благовещенске.

Сроки выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – 01.07.2018 г. (пункт 3.1 договора).

Согласно пункту 4.2 договора оплата выполненных работ производится на основании счетов-фактур, выставленных подрядчиком, в течение 10 банковских дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 30.03.2018 г., № 1 от 20.07.2018 г. подтверждается выполнение ООО «ТСМ» работ по договору и принятие ООО «Дальстрой Интернешнл» на общую сумму 1 518 127 руб. 00 коп.

Между тем, обязанность по оплате выполненных работ исполнена ответчиком не в полном объеме, в связи с чем, возникла задолженность в размере 1 518 127 руб. 00 коп., что установлено в определении суда от 13.10.2021 (вх. 78400 и 78401) на сумму 1 489 081 руб. 00 коп. и в определении от 13.10.2021 г. (вх. 82070) на сумму 29 046 руб. 00 коп.

01.03.2018 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда, по условиям которого генподрядчик поручает, а субподрядчик обязуется в установленный данным договором срок и своими силами выполнить комплекс работ на объекте: Реконструкция многоквартирного дома по адресу: 

<

...>.

Сроки выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – 31.11.2018 г. (пункт 3.1 договора).

Согласно пункту 4.2 договора оплата выполненных работ производится на основании счетов-фактур, выставленных подрядчиком, в течение 10 банковских дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 30.03.2018 г., № 1 от 20.07.2018 г. подтверждается выполнение ООО «ТСМ» работ по договору и принятие ООО «Дальстрой Интернешнл» на общую сумму 3 177 673 руб. 00 коп.

Между тем, обязанность по оплате выполненных работ исполнена ответчиком не в полном объеме, в связи с чем, возникла задолженность в размере 3 177 673 руб. 00 коп., что установлено в определении суда от 13.10.2021 (вх. 78400 и 78401) на сумму 3 007 351 руб. 00 коп. и в определении от 13.10.2021 г. (вх. 82070) на сумму 170 322 руб. 00 коп.

09.01.2018 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда, по условиям которого генподрядчик поручает, а субподрядчик обязуется в установленный данным договором срок и своими силами выполнить комплекс работ на объекте: Реконструкция многоквартирного дома по адресу: Жилой дом «Апарт комплекс Гавань Резидентс» г. Владивосток.

Сроки выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – 30.04.2019 г. (пункт 3.1 договора).

Согласно пункту 4.2 договора оплата выполненных работ производится на основании счетов-фактур, выставленных подрядчиком, в течение 10 банковских дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 31.01.2018 г., № 1 от 31.07.2018 г., № 2 от 31.08.2018 г., № 3 от 20.07.2018 г.   подтверждается выполнение ООО «ТСМ» работ по договору и принятие ООО «Дальстрой Интернешнл» на общую сумму 18 864 537 руб. 00 коп.

Между тем, обязанность по оплате выполненных работ исполнена ответчиком не в полном объеме, в связи с чем, возникла задолженность в размере 3 003 512 руб. 00 коп., что установлено в определении суда от 13.10.2021 (вх. 78400 и 78401).

09.01.2018 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда, по условиям которого генподрядчик поручает, а субподрядчик обязуется в установленный данным договором срок и своими силами выполнить комплекс работ по вертикальной планировке территории Комплексного промпарка «Амурский», расположенного по адресу: ЕАО, 

<

...>. 

Сроки выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – 31.12.2018 г. (пункт 3.1 договора).

Согласно пункту 4.2 договора оплата выполненных работ производится на основании счетов-фактур, выставленных подрядчиком, в течение 10 банковских дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 31.01.2018 г., № 2 от 28.02.2018 г., № 3 от 30.03.2018 г., № 1 от 31.05.2018 г., № 2 от 30.06.2018 г. подтверждается выполнение ООО «ТСМ» работ по договору и принятие ООО «Дальстрой Интернешнл» на общую сумму 109 597 743 руб. 24 коп.

Между тем, обязанность по оплате выполненных работ исполнена ответчиком не в полном объеме, в связи с чем, возникла задолженность в размере 59 201 371 руб. 59 коп., что установлено в определении суда от 13.10.2021 (вх. 78400 и 78401), в том числе 13 347 474 руб. 27 коп. по признанному судом недействительному акту взаимозачета от 30.06.2018 г. и 45 853 897 руб. 32 коп. по признанному судом недействительному акту взаимозачета от 30.06.2018 г.

01.07.2017 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (покупатель) и ООО «ТСМ» (поставщик) заключен договор поставки, по условиям которого поставщик обязуется передать товар, указанный в счетах, на каждую партию товара, формируется отдельный счет, который является приложением к договору, в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и сроки, указанные в договоре.

Между тем, обязанность по оплате поставленного товара исполнена ответчиком не в полном объеме, в связи с чем, возникла задолженность в размере 6 830 000 руб. 00 коп., что установлено в определении суда от 13.10.2021 г. (вх. 78400, 78401).

01.08.2018 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда, предметом которого является выполнение субподрядчиком собственными силами и средствами работ на объекте: «Административное здание, расположенное по адресу: 

<

...>».

Задолженность по договору составила в размере 51 008 руб. 00 коп., что установлено в определении суда от 13.10.2021 г. (вх. 82070).

02.07.2018 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда, предметом которого является выполнение субподрядчиком собственными силами и средствами работ на объекте: «Жилые дома по ул. Пионерской в индустриальном районе г. Хабаровска».

Задолженность по договору составила в размере 7 051 589 руб. 00 коп., что установлено в определении суда от 13.10.2021 г. (вх. 82070).

02.07.2018 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда, предметом которого является выполнение субподрядчиком собственными силами и средствами работ на объекте: «Бизнес-центр «Опора», расположенном в 

<

...> этаж».

Задолженность по договору составила в размере 7 375 400 руб. 00 коп., что установлено в определении суда от 13.10.2021 г. (вх. 82070).

02.07.2018 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда, предметом которого является выполнение субподрядчиком собственными силами и средствами работ на объекте, расположенном в 

<

...> этаж.

Задолженность по договору составила в размере 6 715 200 руб. 00 коп., что установлено в определении суда от 13.10.2021 г. (вх. 82070).

02.07.2018 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда, предметом которого является выполнение субподрядчиком собственными силами и средствами работ на объекте: «Бизнес-центр «Опора», расположенном в 

<

...> этаж».

Задолженность по договору составила в размере 7 800 700 руб. 00 коп., что установлено в определении суда от 13.10.2021 г. (вх. 82070).

02.07.2018 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда, предметом которого является выполнение субподрядчиком собственными силами и средствами работ на объекте: «Бизнес-центр «Опора», расположенном в 

<

...>».

Задолженность по договору составила в размере 46 317 руб. 00 коп., что установлено в определении суда от 13.10.2021 г. (вх. 82070).

02.07.2018 г. между ООО «Дальстрой Интернешнл» (генподрядчик) и ООО «ТСМ» (субподрядчик) заключен договор субподряда, предметом которого является выполнение субподрядчиком собственными силами и средствами работ на объекте: «Жилой комплекс по ул. Совхозной в г. Хабаровске».

Задолженность по договору составила в размере 5 890 537 руб. 56 коп., что установлено в определении суда от 13.10.2021 г. (вх. 82070).

Истец направил в адрес ответчика претензии № 192, № 193 от 16.02.2022 г. с требованием об оплате задолженности, которые оставлены последним без ответа и удовлетворения.

          Наличие задолженности в сумме 176 879 926 руб. 11 коп. послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно статье 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является передача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном законом и договором порядке (статьи 711 и 746 ГК РФ).

Материалами дела подтверждается выполнение истцом и принятие ответчиком работ по договорам: подряда № 3 от 09.01.2018 г., субподряда № 39 от 14.09.2017 г., от 30.11.2017 г., № 32 от 03.05.2017 г., от 01.02.2018 г., от 01.03.2018 г., от 09.01.2018 г., от 01.08.2018 г., от 02.07.2018 г., а также поставка истцом и принятие ответчиком товара по договору поставки от 01.07.2017 г.

Обстоятельства, установленные в рамках дела о банкротстве ООО «ТСМ» по делу № А73-20840/2018 Арбитражного суда Хабаровского края, в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеют преюдициальное значение для рассмотрения настоящего искового заявления, доказыванию не подлежат.

          Доказательств оплаты долга в полном объеме, равно как и наличие долга в ином размере, ответчиком  в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлено, возражений по иску не заявлено, в связи с чем, в силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ задолженность ответчика считается им признанной.

На основании установленных по делу обстоятельств, требование истца о взыскании долга в общей сумме 176 879 926 руб. 11 коп. подлежит удовлетворению.

В связи с тем, что требования истца удовлетворяются в полном объеме, и истцу в установленном законом порядке была предоставлена отсрочка по оплате госпошлины, а ответчик в установленном законом порядке не освобожден от уплаты госпошлины, на основании части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации госпошлина в сумме 200 000 руб. 00 коп. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с   Общества с ограниченной ответственностью «Дальстрой Интернешнл» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ТСМ» 176 879 926 руб. 11 коп.

Взыскать с   Общества с ограниченной ответственностью «Дальстрой Интернешнл» в  доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 200 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

       Судья                                                                               С.И. Дюкова