РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

  26 сентября 2024 года  по делу № А33-496/2024 Красноярск  

26.09.2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) по истечению 30 дней после вступления в законную силу  судебного акта исполнить свои обязательства, предусмотренные п. 1 договора от  31.03.2023 № 20.2400.5958.22 об осуществлении технологического присоединения к  электрической сети объекта, осуществив технологическое присоединение к электрической  сети ПАО «Россети Сибирь» объекта ООО «Торговый дом Ангара», объекта  "Производственное здание/помещение", расположенного (который будет располагаться)  по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, МО Шуваевский сельсовет,  кадастровый номер земельного участка 24:11:0130601:1673 с учетом следующих  характеристик:  

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 100 кВт;  категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым  осуществляется технологическое присоединение 10 кВ; максимальная мощность ранее  присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует, а именно осуществив:  

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы  энергопринимающих устройств ООО «Торговый дом Ангара»;  

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе  разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным  постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми  заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;  

- строительство ЛЭП 10 кВ от точки, указанной в пункте № 7 технических условий,  являющихся приложением к договору от 31.03.2023 № 20.2400.5958.22, до границы,  установленной правоустанавливающими документами ООО «Торговый дом Ангара».  Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;  

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на  отпаечной опоре ЛЭП 10 кВ Тип и место установки разъединителя;  

- обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на  напряжение 1-20 кВ трехфазного косвенного включения, в соответствии с требованиями  «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии»  (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Торговый  дом Ангара" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 150 000 руб. судебной неустойки в  месяц, и далее за каждый месяц неисполнения судебного акта; 6 000 руб. расходов по  оплате госпошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть  обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в  Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Л.В. Мозолькова