Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-39145/2020

27 февраля 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи Бутовой Р.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев 28.01.2021 в судебном заседании дело по иску

государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к акционерному обществу «Гидролекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании неустойки по государственному контракту,

 

при участии:

- от истца: ФИО2, по доверенности от 30.04.2020

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (далее – Предприятие) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском (с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; далее – АПК РФ) к акционерному обществу «Гидролекс» (далее – Общество) о взыскании 36 992 руб. 48 коп пеней по контракту от 06.07.2018 № 449/РУ-2018 (далее – контракт).

  Определением суда от 26.05.2020 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 АПК РФ.  

  Определением от 03.08.2020 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В соответствии со статьей 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражный суд признал дело подготовленным, завершил предварительное судебное заседание и перешел к судебному разбирательству.

В судебное заседание 28.01.2021 явился представитель истца, исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчик в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела извещен надлежаще.

Арбитражный суд установил следующее.

Предприятие (заказчик) и Общество (подрядчик) 06.07.2018 заключили контракт, по условиям которого  заказчик поручает, а подрядчик обязуется на свой риск, собственными силами и средствами в установленный контрактом срок выполнить работы по реконструкции тепловых сетей в кВ. 7Б БКА от ТК10К1 до ТК10К7 по пр. Королева (далее – объект), включая следующие работы:

            Строительно-монтажные работы на основании согласованной с Заказчиком проектной документации по шифру 665/98, разработанной ООО «СмолГазСпецСтрой», получившей положительное заключение негосударственной экспертизы (далее - Проектная документация), включая, приобретение (самостоятельно за свой счет и от своего имени) и передачу в собственность Заказчику оборудования, включая его погрузку, транспортировку, перегрузку, хранение, разгрузку, сертификацию, монтаж; разработку исполнительной и эксплуатационной документации, работы по восстановлению нарушенного благоустройства и работы по озеленению; предварительные испытания трубопроводов на прочность и герметичность, гидравлическую промывку трубопроводов в трехкратном объеме промываемого участка и дезинфекцию трубопроводов после выполнения строительно-монтажных работ, а также иные работы, необходимые для достижения положительного результата приемо-сдаточных испытаний, включая разработку инструкций по эксплуатации смонтированного оборудования, отдельных систем и Объекта в целом, получение необходимых разрешений и допусков от органов и организаций, ввод Объекта в эксплуатацию (пункт 1.1.1 контракта).

    По пункту 1.2 контракта работы, по Контракту, выполняются в соответствии с Проектной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, Техническим заданием (Приложение №1), Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2), определяющим сроки их выполнения, расчетом цены Контракта (Приложение № 4), определяющим цену контракта.

Цена контракта определяется по результатам закупки, рассчитывается путем применения коэффициента 1 снижения к начальной (максимальной) цене Контракта, указанной в документации о проведении закупки, и составляет 51 959 643,43 руб. (пункт 2.1 контракта).

   Пунктом 3.1 контракта установлены сроки выполнения работ.

            Начало выполнения работ по Контракту: не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты, заключения контракта (пункт 3.1.1).

             Конечный срок выполнения и сдачи работ по Контракту, в т.ч. подписание приемочной комиссией Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14): «15» октября 2019 года (пункт 3.1.2).

В силу пункта 8.4 контракта, если подрядчик не приступил к исполнению контракта в установленные сроки, либо выполняет работу с нарушением промежуточных сроков (периодов) выполнения работ, установленных Календарным планом, либо подрядчиком нарушен конечный срок выполнения работ по контракту, подрядчик обязан уплатить заказчику пени в размере, определенном в соответствии с пункт 8.7 контракта.

           В соответствии с пунктом 8.7 контракта пени начисляются за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующем на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

Подрядчик выполнил и сдал работы на сумму 43 633 935,82 руб., что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.10.2018 № 1, от 31.12.2018 № 2, от 31.03.2019 № 3, от 31.03.2019 № 4, от 30.04.2019 № 5, от 31.07.2019 № 6.

            После истечения установленного срока выполнения работ подрядчик выполнил и сдал работы на сумму 7 737 026,53 руб., что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.10.2019 № 7 на сумму 7 074 933,60 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.11.2019 № 8 на сумму 662 092,93 руб.

           Подрядчик нарушил конечный срок выполнения работ по контракту, что подтверждается последней справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.11.2019 № 8.

            Период просрочки выполнения работ с 16.10.2019 по 30.11.2019, допущенной по вине подрядчика, составляет 46 дней, согласно пунктам 8.4, 8.7 контракта.

             В связи с нарушением Общества конечного срока исполнения обязательств по контракту, подрядчик обязан уплатить заказчику пени в общей сумме 36 992 руб. 48 коп., в том числе, за период с 16.10.2019 по 30.10.2019 в сумме 28 862 руб. 45 коп. и за период с 01.11.2019 по 30.11.2019 в сумме 8130 руб.

             Согласно Информации Банка России от 25.10.2019 ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации на дату исполнении обязательства составляла 6,5 % годовых.

   Предприятие направило в адрес Общества претензию от 16.03.2020 № 07-14/11663 с требованием об уплате пени.

  Отказ Общества удовлетворить данное требование послужило основанием для обращения Предприятия в арбитражный суд с настоящим иском.

  Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В силу пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств.

Пунктом 1 статьи 329 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Предприятие начислило неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 36 992 руб. 48 коп. Расчет проверен и признан судом арифметически верным.

Поскольку доказательства уплаты пеней не представлены, иск подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

взыскать с акционерного общества «Гидролекс» в пользу государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» 36 992 руб. 48 коп. пеней и  2000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                          Бутова Р.А.