АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А84-1886/19

15 июня 2022 г.

город Севастополь

 

Полный текст судебного акта изготовлен 15.06.2022

Резолютивная часть судебного акта оглашена 09.06.2022

Арбитражный суд города Севастополя

в составе судьи Архиповой С.Н.,

При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ООО «Баутерм-Юг» ИНН 

<

***>, г. Симферополь

к ООО «Доринвест-Крым» ИНН 

<

***> г. Симферополь

о взыскании задолженности по субподрядным контрактам,

встречное исковое заявление ООО «Доринвест-Крым»

к ООО «Баутерм-Юг»

о взыскании неустойки по субподрядным контрактам,

третье лицо Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

города Севастополя.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2,

от ответчика – ФИО3,

у с т а н о в и л :

19.04.2020 в Арбитражный суд города Севастополя (суд) обратилось общество с ограниченной ответственностью «Баутерм-Юг» (истец, Субподрядчик) с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Доринвест-Крым» (ответчик, Генподрядчик) задолженности по субподрядным контрактам №15.09-17П от 15.09.2017,  4-18 от 15.01.2018, №26-18 от 22.02.2018, №27-18 от 22.02.2018, №79-18 от 07.08.2018 в общей сумме 9 783 399,71 руб., их которых 9 563 102,37 руб. составляет основной долг, 41 846,42 руб. - неустойка на сумму основного долга, 178 450,92 руб. процент неустойки за несвоевременную оплату счетов, с продолжениемначисления процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за период с 05.03.2019 по день фактической уплаты суммы долга (с учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ).

В свою очередь, ООО "Доринвест-Крым" обратилось со встречным иском о взыскании пени за просрочку выполнения обязательств по вышеуказанным субподрядным контрактам в общей сумме 2 604 117,83 руб. (с учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда города Севастополя от 10.03.2020 первоначальные требования удовлетворены полностью. Встречный иск удовлетворен частично: с ООО "Баутерм-Юг" в пользу ООО "ДорнивестКрым" взысканы неустойка в сумме 361 176,04 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 4 995,90 руб. В удовлетворении остальной части встречного иска отказано. С учетом произведенного зачета с ООО "Доринвест-Крым" в пользу ООО "Баутерм-Юг" взысканы задолженность в сумме 9 422 223,67 руб. и расходы по оплате госпошлины в сумме 55 454,80 руб..

Постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2021 решение суда отменено. Судом апелляционной инстанции первоначальный иск удовлетворен частично: с ООО "Доринвест-Крым" в пользу ООО "Баутерм-Юг" взыскана задолженность по контракту №27-18 от 22.02.2018 в размере 1 000 000 руб. и проценты за несвоевременную оплату выполненных работ в сумме 46 377,36 руб., с продолжением взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке, установленном ст. 395 ГК РФ с 05.03.2019 по день фактической уплаты, исходя из суммы задолженности в размере 1 000 000 руб.; проценты за несвоевременную оплату выполненных работ по контракту №15-09-17П от 15.09.2017 в размере 127 349,31 руб.; проценты за несвоевременную оплату выполненных работ по государственному контракту от 15.01.2018 № 4-18 в размере 4 724,25 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины по первоначальному иску в размере 8 662,70 руб. В остальной части первоначального иска отказано. Встречный иск удовлетворен частично: с ООО "Баутерм-Юг" в пользу ООО "Доринвест-Крым" взыскана неустойка по государственному  контракту от 07.08.2018 № 79-18 в размере 283 600,31 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины по встречному иску в размере 3 922,85 руб. В остальной части встречного иска отказано. В результате проведенного зачета с ООО "Доринвест-Крым" в пользу ООО "Баутерм-Юг" взыскана задолженность в размере 899 590,46 руб..

Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 10.08.2021 судебные акты отменены, дело передано на новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Повторно исследовав и оценив представленные доказательства, выслушав пояснения сторон, принимая во внимание выводы судебной экспертизы, суд пришел к следующему:

Как следует из материалов дела, 15.09.2017 между ООО «ДоринвестКрым» (генподрядчик) и ООО «Баутерм-Юг» (субподрядчик) заключен субподрядный контракт №15.09-17П, по условиям которого субподрядчик принял обязательство своевременно выполнить работы по объекту «Капитальный ремонт 67 Н-190 «пр-кт Октябрьской революции (ПОР) (устройство наружного освещения, контактной сети и светофоров), а генподрядчик принять и оплатить их. Цена контракта является твердой и составляет 67 185 899,52 руб. (пункт 2.1 контракта).

В соответствии с пунктом 2.4.4 контракта расчет за выполненные субподрядчиком и принятые генподрядчиком работы осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также выставленных подрядчиком счетов, счет-фактур. Генподрядчик удерживает с субподрядчика 15% от стоимости выполненных работ за оказанные генподрядные услуги. Стоимость генподрядных услуг удерживается с субподрядчика при расчетах за выполненные работы.

Стороны подписывают двухсторонние акты по факту оказания генподрядных услуг, а также акт зачета взаимных требований на сумму генподрядных услуг (пункт 2.4.5 контракта).

Согласно пункту 4.2 контракта работы должны быть закончены в срок, определенный календарным графиком производства работ (приложение № 2 к договору).

По условиям пункта 5.1 контракта субподрядчик не позднее следующего дня после окончания работ направляет в адрес генподрядчика извещение о готовности работы к сдаче. Одновременно с указанным извещением субподрядчик направляет комплект отчетной и исполнительной документации: акты скрытых работ, прочую исполнительную документацию, содержащую, в том числе, общий журнал работ, журнал входного контроля поставляемых материалов и изделий, сертификаты, паспорта; акт выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах; справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; счета на оплату выполненных работ.

Приемка выполненных работ осуществляется уполномоченным представителем генподрядчика в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о готовности работ к сдаче и оформляется актом сдачи-приемки работ (пункт 5.3 контракта).

В силу пункта 5.9 контракта датой надлежащего исполнения обязательств субподрядчика по контракту является подписанный обеими сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ.

Ответственность сторон предусмотрена разделом 7 контракта. Контракт вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту (пункт 12.1 контракта).

Факт выполнения подрядчиком работ по контракту на общую сумму 65 156 225,94 руб. подтверждается подписанными сторонами и скрепленными печатями справками формы КС-3 от 26.12.2017 № 1, от 31.01.2018 № 2, от 15.03.2018 № 3, от 26.03.2018 № 4, от 18.05.2018 № 5, от 17.07.2018 № 6, актами выполненных работ формы КС-2 от 26.12.2017 № 1 на сумму 26 717 152,23 руб., от 31.01.2018 № 2 на сумму 3 712 865,62 руб., от 15.03.2018 № 3 на сумму 15 067 203,78 руб., от 26.03.2018 № 4 на сумму 2 963 138,84 руб., от 18.05.2018 № 5 на сумму 6 067 029,15 руб., от 17.07.2018 № 6 на сумму 10 628 836,32 руб. ООО «Баутерм-Юг» были выставлены счета на оплату от 18.09.2017 № 292 на сумму 500 000 руб., от 26.12.2017 № 473 на сумму 1 000 000 руб., от 26.12.2017 № 482 на сумму 25 217 152,23 руб., от 26.12.2018 № 62 на сумму 700 000 руб., от 28.02.2018 № 67 на сумму 2 455 935,78 руб. от 15.03.2018 № 107 на сумму 12 807 123,21 руб., от 26.03.2018 № 108 на сумму 2 518 668,01 руб., от 08.06.2018 № 211 на сумму 5 156 974,77 руб., от 19.07.2018 № 404 на сумму 10 628 836,32 руб., которые оплачены платежными поручениями от 18.09.2017 № 795731 на сумму 500 000 руб., от 26.12.2017 № 800077 на сумму 1 000 000 руб., от 29.12.2017 № 800163 на сумму 21 209 579,39 руб., от 26.02.2018 № 292 на сумму 700 000 руб., от 01.03.2018 № 334 на сумму 2 455 935,78 руб., от 06.04.2018 № 591 на сумму 10 000 000 руб., от 13.04.2018 № 711 на сумму 1 000 000 руб., от 24.04.2018 № 917 на сумму 1 807 123,21 руб., от 09.06.2018 № 1281 на сумму 1 500 000 руб., от 14.06.2018 № 1333 на сумму 500 000 руб., от 21.06.2018 № 1392 на сумму 518 668,01 руб., от 21.06.2018 № 1391 на сумму 2 000 000 руб., от 29.06.2018 № 1460 на сумму 1 000 000 руб., от 24.07.2018 № 1734 на сумму 5 000 000 руб., от 01.08.2018 № 1825 на сумму 2 500 000 руб., от 08.08.2018 № 1889 на сумму 1 600 000 руб., от 01.10.2018 № 2479 на сумму 1 000 000 руб., от 09.11.2018 № 273660 на сумму 1 091 485,65 руб. Также между сторонами подписаны акты на оказание услуг генподряда от 27.12.2017 № 311 на сумму 4 007 572,83 руб., от 01.04.2018 № 33 за период с 01.01.2018 по 31.03.2018 на сумму 3 261 481,24 руб., от 30.06.2018 № 127 за период с 01.04.2018 по 30.06.2018 на сумму 910 054,37 руб., от 17.07.2018 № 138 за период июль-сентябрь 2018 года на сумму 1 594 325,45 руб.

Ссылаясь на то, что генподрядчик нарушил срок по оплате счетов за выполненные работы, ООО «Баутерм-Юг» направило ему претензию от 14.03.2019 № 28, в которой содержалось требование об уплате неустойки.

15.01.2018 между ООО «Доринвест-Крым» (генподрядчик) и ООО «Баутерм-Юг» (субподрядчик) заключен субподрядный контракт №4-18, по условиям которого субподрядчик принял обязательство своевременно выполнить работы по объекту «Капитальный ремонт а/д 67 Н-264 «Генерала Острякова от «Славинского» рынка до ул. Генерала Хрюкина (дорога дублер) (устройство наружного освещения)», а генподрядчик – принять и оплатить их. Цена контракта является твердой и составляет 6 049 735,86 руб. (пункт 2.1 контракта).

В соответствии с пунктом 2.4.3 контракта расчет за выполненные субподрядчиком и принятые генподрядчиком работы осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также выставленных подрядчиком счетов, счет-фактур. Генподрядчик удерживает с субподрядчика 15% от стоимости выполненных работ за оказанные генподрядные услуги. Стоимость генподрядных услуг удерживается с субподрядчика при расчетах за выполненные работы.

Стороны подписывают двухсторонние акты по факту оказания генподрядных услуг, а также акт зачета взаимных требований на сумму генподрядных услуг (пункт 2.4.4 контракта).

Согласно пункту 4.2 контракта работы должны быть закончены в срок не позднее 20 марта 2018 года.

По условиям пункта 5.1 контракта субподрядчик не позднее следующего дня после окончания работ направляет в адрес генподрядчика извещение о готовности работы к сдаче. Одновременно с указанным извещением субподрядчик направляет комплект отчетной и исполнительной документации: акты скрытых работ, прочую исполнительную документацию, содержащую, в том числе, общий журнал работ, журнал входного контроля поставляемых материалов и изделий, сертификаты, паспорта; акт выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах; справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; счета на оплату выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется уполномоченным представителем генподрядчика в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о готовности работ к сдаче и оформляется актом сдачи-приемки работ (пункт 5.3 контракта).

В силу пункта 5.9 контракта датой надлежащего исполнения обязательств субподрядчика по контракту является подписанный обеими сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ.

Ответственность сторон предусмотрена разделом 7 контракта. Контракт вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до 30 апреля 2018 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту (пункт 12.1 контракта).

Факт выполнения подрядчиком работ по контракту на общую сумму 5 225 902,01 руб. подтверждается подписанными сторонами и скрепленными печатями справками формы КС-3 от 23.03.2018 № 1, от 03.05.2018 № 2 на сумму 4 252 038,02 руб., актами выполненных работ формы КС-2 от 22.03.2018 № 1 на сумму 973 863,99 руб., от 03.05.2018 № 2 на сумму 4 252 038,02 руб. ООО «Баутерм-Юг» были выставлены счета на оплату от 22.03.2018 № 109 на сумму 973 863,99 руб., от 17.05.2018 № 161 на сумму 3 614 232,31 руб., которые оплачены платежными поручениями от 23.04.2018 № 812 на сумму 827 784,39 руб., от 17.05.2018 № 1118 на сумму 3 614 232,31 руб.

Также между сторонами подписаны акты на оказание услуг генподряда от 01.04.2018 № 34 за период с 01.01.2018 по 31.03.2018 на сумму 146 079,60 руб., от 30.06.2018 № 126 за период с 01.04.2018 по 30.06.2018 на сумму 637 805,70 руб.

Ссылаясь на то, что генподрядчик нарушил срок по оплате счетов за выполненные работы, ООО «Баутерм-Юг» направило ему претензию от 05.03.2019 № 21, в которой содержалось требование об уплате неустойки.

22.02.2018 между ООО «Доринвест-Крым» (генподрядчик) и ООО «Баутерм-Юг» (субподрядчик) заключен субподрядный контракт №27-18, по условиям которого субподрядчик принял обязательство своевременно выполнить работы по объекту «Капитальный ремонт а/

<

...> (устройство наружного освещения)», а генподрядчик – принять и оплатить их. Цена контракта является твердой и составляет 10 052 812,53 руб. (пункт 2.1 контракта).

В соответствии с пунктом 2.4.3 контракта расчет за выполненные субподрядчиком и принятые генподрядчиком работы осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также выставленных подрядчиком счетов, счет-фактур. Генподрядчик удерживает с субподрядчика 15% от стоимости выполненных работ за оказанные генподрядные услуги, что составляет 1 507 921,88 руб. Стоимость генподрядных услуг удерживается с субподрядчика при расчетах за выполненные работы. Стороны подписывают двухсторонние акты по факту оказания генподрядных услуг, а также акт зачета взаимных требований на сумму генподрядных услуг (пункт 2.4.4 контракта).

Согласно пункту 4.2 контракта работы должны быть закончены в срок не позднее 30 мая 2018 года.

По условиям пункта 5.1 контракта субподрядчик не позднее следующего дня после окончания работ направляет в адрес генподрядчика извещение о готовности работы к сдаче. Одновременно с указанным извещением субподрядчик направляет комплект отчетной и исполнительной документации: акты скрытых работ, прочую исполнительную документацию, содержащую, в том числе, общий журнал работ, журнал входного контроля поставляемых материалов и изделий, сертификаты, паспорта; акт выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах; справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; счета на оплату выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется уполномоченным представителем генподрядчика в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о готовности работ к сдаче и оформляется актом сдачи-приемки работ (пункт 5.3 контракта).

В силу пункта 5.9 контракта датой надлежащего исполнения обязательств субподрядчика по контракту является подписанный обеими сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ.

Ответственность сторон предусмотрена разделом 7 контракта. Контракт вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до 30 июня 2018 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту (пункт 12.1 контракта).

Факт выполнения подрядчиком работ по контракту на общую сумму 9 031 646,07 руб. подтверждается подписанными сторонами и скрепленными печатями справкой формы КС-3 от 18.09.2018 № 1, актом выполненных работ формы КС-2 от 18.09.2018 № 1 на сумму 9 031 646,07 руб. ООО «Доринвест-Крым» перечислило на счет подрядчика денежные средства в общей сумме 7 350 108,81 руб., что подтверждается платежными поручениями от 07.09.2018 № 2227 на сумму 500 000 руб., от 01.10.2018 № 2478 на сумму 4 602 654 руб., от 19.10.2018 № 2729 на сумму 1 000 000 руб., от 09.11.2018 № 273661 на сумму 574 245,16 руб., от 29.12.2018 № 274288 на сумму 673 209,65 руб. Также между сторонами подписан акт на оказание услуг генподряда за период сентябрь от 30.09.2018 № 197 на сумму 1 354 746,91 руб.

Ссылаясь на то, что генподрядчик нарушил срок по оплате выполненных работ, ООО «Баутерм-Юг» направило ему претензию от 05.03.2019 № 23, в которой содержалось требование об уплате задолженности и неустойки.

Исковые требования ООО «Баутерм-Юг» в части взыскания задолженности по субподрядному контракту от 22.02.2018 №27-18 на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт а/

<

...> (устройство наружного освещения)» в размере 1 000 000 руб. подлежат удовлетворению на основании следующего. Факт выполнения подрядчиком работ по контракту на общую сумму 9 031 646,07 руб. подтверждается подписанными сторонами и скрепленными печатями справкой формы КС-3 от 18.09.2018 № 1, актом выполненных работ формы КС-2 от 18.09.2018 № 1 на сумму 9 823 657,43 руб. ООО «Доринвест-Крым» перечислило на счет подрядчика денежные средства в общей сумме 7 350 108,81 руб., что подтверждается платежными поручениями от 07.09.2018 № 2227 на сумму 500 000 руб., от 01.10.2018 № 2478 на сумму 4 602 654 руб., от 19.10.2018 № 2729 на сумму 1 000 000 руб., от 09.11.2018 № 273661 на сумму 574 245,16 руб., от 29.12.2018 № 274288 на сумму 673 209,65 руб. Также между сторонами подписан акт на оказание услуг генподряда за период сентябрь от 30.09.2018 № 197 на сумму 1 354 746,91 руб. В нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ООО «Доринвест-Крым» доказательства оплаты выполненных работ в полном объеме суду не представило. Учитывая все изложенные обстоятельства, исковые требования в части взыскания суммы задолженности по субподрядному контракту от 22.02.2018 №27-18 на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт а/

<

...> (устройство наружного освещения)» в размере 1 000 000 руб. подлежат удовлетворению.

Согласно представленному ООО «Баутерм-Юг» расчету сумма процентов неустойки за несвоевременную оплату счетов в размере 178 450,92 руб. складывается из следующих сумм: - по субподрядному контракту №15.09-17П от 15.09.2017 в размере 127 349,31 руб., - по субподрядному контракту №4-18 от 15.01.2018 в размере 4 724,25 руб., - по субподрядному контракту №27-18 от 22.02.2018 в размере 46 377,36 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Произведенный истцом расчет процентов проверен судом, признан правильным, соответствующим требованиям действующего законодательства, а также фактическим обстоятельствам дела.

Таким образом, учитывая, что ООО «Доринвест-Крым» вопреки части 1 статьи 65 АПК РФ не представило в материалы дела доказательств надлежащего исполнения обязательств по контрактам по оплате выполненных работ, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что требования истца по первоначальному иску о взыскании с ответчика процентов за несвоевременную оплату выполненных работ в общей сумме 178 450,92 руб. следует признать правомерными и подлежащими удовлетворению.

Как следует из пункта 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ).

Следовательно, требования истца в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты суммы основного долга, подлежат удовлетворению, исходя из задолженности по субподрядному контракту от 22.02.2018 № 27-18 в размере 1 000 000 руб., начиная с 05.03.2019 и по день фактической уплаты.

Контрактами №15.09-17П от 15.09.2017, №4-18 от 15.01.2018, №26-18 от 22.02.2018 и №27-18 от 22.02.2018 ответственность субподрядчика за несвоевременное выполнение работ в виде оплаты штрафов или пени не предусмотрена.

Таким образом, оснований для начисления неустойки по контрактам №15.09-17П от 15.09.2017, №4-18 от 15.01.2018, №26-18 от 22.02.2018 и №27-18 от 22.02.2018 не имеется. В связи с чем в удовлетворении требования ООО «Доринвест-Крым» о взыскании с ООО «Баутерм-Юг» пени по контрактам №15.09-17П от 15.09.2017 в размере 1 163 607,38 руб., №4-18 от 15.01.2018 в размере 122 850,14 руб., №26-18 от 22.02.2018 в размере 666 130,66 руб., №27-18 от 22.02.2018 в размере 290 353,61 руб. не имеется.

В ходе рассмотрения дела стороны признали, что фактически между ними возникли разногласия по работам по субподрядным контрактам №26-18 от 22.02.2018 и №79-18 от 07.08.2018.

07.08.2018 между ООО «Доринвест-Крым» (генподрядчик) и ООО «Баутерм-Юг» (субподрядчик) заключен субподрядный контракт №79-18, по условиям которого субподрядчик принял обязательство своевременно выполнить работы по объекту «выполнение работ по капитальному ремонту а/

<

...>» (устройство наружного освещения), а генподрядчик принять и оплатить их. Цена контракта является твердой и составляет 5 601 413,04 руб. (пункт 2.1 контракта).

В соответствии с пунктом 2.4.3 контракта расчет за выполненные субподрядчиком и принятые генподрядчиком работы осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также выставленных подрядчиком счетов, счет-фактур. Генподрядчик удерживает с субподрядчика 15% от стоимости выполненных работ за оказанные генподрядные услуги.

Стоимость генподрядных услуг удерживается с субподрядчика при расчетах за выполненные работы. Стороны подписывают двухсторонние акты по факту оказания генподрядных услуг, а также акт зачета взаимных требований на сумму генподрядных услуг (пункт 2.4.4 контракта).

Согласно пункту 4.2 контракта работы должны быть закончены в срок не позднее 01 октября 2018 года. По условиям пункта 5.1 контракта субподрядчик не позднее следующего дня после окончания работ направляет в адрес генподрядчика извещение о готовности работы к сдаче. Одновременно с указанным извещением субподрядчик направляет комплект отчетной и исполнительной документации: акты скрытых работ, прочую исполнительную документацию, содержащую, в том числе, общий журнал работ, журнал входного контроля поставляемых материалов и изделий, сертификаты, паспорта; акт выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах; справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; счета на оплату выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется уполномоченным представителем генподрядчика в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о готовности работ к сдаче и оформляется актом сдачи-приемки работ (пункт 5.3 контракта).

В силу пункта 5.9 контракта датой надлежащего исполнения обязательств субподрядчика по контракту является подписанный обеими сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ.

Ответственность сторон предусмотрена разделом 7 контракта. Контракт вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до 30 ноября 2018 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту (пункт 12.1 контракта).

ООО «Доринвест-Крым» перечислило на счет подрядчика денежные средства в общей сумме 1 000 000 руб., что подтверждается платежными поручениями от 06.12.2018 № 273943 на сумму 200 000 руб., от 19.12.2018 № 274145 на сумму 800 000 руб..

 

22.02.2018 между ООО «Доринвест-Крым» (генподрядчик) и ООО «Баутерм-Юг» (субподрядчик) заключен субподрядный контракт №26-18, по условиям которого субподрядчик принял обязательство своевременно выполнить работы по объекту «выполнение работ по капитальному ремонту а/

<

...>» (устройство наружного освещения), а генподрядчик принять и оплатить их. Цена контракта является твердой и составляет 8 020 375,73 руб. (пункт 2.1 контракта).

В соответствии с пунктом 2.4.3 контракта расчет за выполненные субподрядчиком и принятые генподрядчиком работы осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также выставленных подрядчиком счетов, счет-фактур. Генподрядчик удерживает с субподрядчика 12% от стоимости выполненных работ за оказанные генподрядные услуги, что составляет 962 445,09 руб. Стоимость генподрядных услуг удерживается с субподрядчика при расчетах за выполненные работы. Стороны подписывают двухсторонние акты по факту оказания генподрядных услуг, а также акт зачета взаимных требований на сумму генподрядных услуг (пункт 2.4.4 контракта).

Согласно пункту 4.2 контракта работы должны быть закончены в срок не позднее 30 июня 2018 года. По условиям пункта 5.1 контракта субподрядчик не позднее следующего дня после окончания работ направляет в адрес генподрядчика извещение о готовности работы к сдаче. Одновременно с указанным извещением субподрядчик направляет комплект отчетной и исполнительной документации: акты скрытых работ, прочую исполнительную документацию, содержащую, в том числе, общий журнал работ, журнал входного контроля поставляемых материалов и изделий, сертификаты, паспорта; акт выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах; справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; счета на оплату выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется уполномоченным представителем генподрядчика в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о готовности работ к сдаче и оформляется актом сдачи-приемки работ (пункт 5.3 контракта).

В силу пункта 5.9 контракта датой надлежащего исполнения обязательств субподрядчика по контракту является подписанный обеими сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ.  Ответственность сторон предусмотрена разделом 7 контракта. Контракт вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до 30 июля 2018 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту (пункт 12.1 контракта).

ООО «Баутерм-Юг» был выставлен счет на оплату от 25.12.2018 № 591 на сумму 6 023 719,44 руб.

ООО «Доринвест-Крым» перечислило на счет подрядчика денежные средства в общей сумме 3 500 000 руб., что подтверждается платежными поручениями от 29.12.2018 № 274349 на сумму 2 000 000 руб., от 17.01.2019 № 35 на сумму 1 500 000 руб.

Определением суда от 03.12.2021 была назначена судебная экспертиза. Экспертом сделаны следующие выводы по поставленным вопросам в отношении субподрядного контракта №79-18 от 07.08.2018:

какой фактический объем выполненных работ и материалов, затраченных при выполнении работ, был осуществлен ООО «Баутерм-Юг» по субподрядному контракту №79-18 от 07.08.2018 «на устройство наружного освещения. Наименование объекта: Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 67 Н-120 «ул. Яблочкова»? Какова стоимость выполненных работ?

Предусмотренные работы по  субподрядному контракту №79-18 от 07.08.2018 субподрядной организацией ООО «Баутерм-Юг» не проводились Определить объем материалов, затраченных при выполнении работ, был осуществлен ООО «Баутерм-Юг» по субподрядному контракту №79-18 от 07.08.2018 «на устройство наружного освещения. Наименование объекта: Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 67 Н-120 «ул. Яблочкова» не представляется возможным

Возможно ли установить, кем, кроме ООО «Баутерм-Юг», были выполнены работы и какие материалы затрачены при осуществлении работ по устройству наружного освещения: Наименование объекта: Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 67 Н-120 «ул. Яблочкова»? Если да, то какой организацией? Какой объем фактически выполненных работ и затраченных материалов произвела данная организация? Какова стоимость выполненных работ?

Факт выполнения работ на объекте именно субподрядной организацией ООО «Баутерм-Юг» или субподрядной организацией ООО «Каштак» не подтверждается. Установлео, что на объекте все работы выполнены генподрядной организацией РРР «Доринвест-Крым». Установить, кем и какие материалы были затрачены при осуществлении работ, не представляется возможным.

Поскольку истец не доказал, что именно он проводил работы по субподрядному контракту №79-18 от 07.08.2018, и данное обстоятельство не опровергнуто экспертом, требование о взыскании задолженности за выполненные работы подлежит отклонению.

Экспертом сделаны следующие выводы по поставленным вопросам в отношении субподрядного контракта №№26-18 от 22.08.2018:

Какой фактический объем выполненных работ и материалов, затраченных при выполнении работ, был осуществлен ООО «Баутерм-Юг» по субподрядному контракту №26-18 от 22.08.208 «на устройство наружного освещения, контактной сети и светофоров. Наименование объекта: Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 67 Н-161 «ул. ФИО4»? Какова стоимость выполненных работ?

Факт выполнения работ на объекте именно субподрядной организацией ООО «Баутерм-Ю» подтверждается частично, в объеме, указанном в исполнительной документации. Стоимость фактически выполненных работ именно ООО «Батерм-Юг» составляет 2 820 297,42 руб.. Определить объем материалов, затраченных при выполнении работ, осуществленных ООО «Баутерм-Юг» не представляется возможным.

Возможно ли установить, кем, кроме ООО «Баутерм-Юг», были выполнены работы и какие материалы затрачены при осуществлении работ по устройству наружного освещения, контактной сети и светофоров. Наименование объекта: Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 67 Н-161 «ул. ФИО4»? Если да, то какой организацией? Какой объем фактически выполненных работ и затраченных материалов произвела данная организация? Какова стоимость выполненных работ?

Факт выполнения работ на объекте именно субподрядной организацией ООО «Баутерм-Юг» подтверждается частично, в объеме, указанном в исполнительной документации. Установлено, что работы выполнялись как генподрядной организацией ООО «Доринвест-Крым», так и субподрядной организацией ООО «Баутерм-Юг».

При этом, экспертом установлено, что стоимость фактически выполненных ООО «Доринвест-Крым» работ составляет 3 028 778,44 руб., общая стоимость работ составляет 7 554 954,49 руб.. Соответственно, стоимость фактически выполненных ООО «Баутерм-Юг» работ составляет 4 256 176,05 руб.. С учетом произведенной оплаты в размере 3 500 000 руб. остаток задолженности составляет 1 026 176,05 руб., который и подлежит взысканию с ответчика.

Рассмотрев встречные исковые требования, суд установил следующее.

Обращаясь в суд со встречными исковыми требования, ООО «Доринвест-Крым», ссылаясь на ненадлежащее исполнение субподрядчиком взятых на себя обязательств по контрактам, просило взыскать с ООО «Баутерм-Юг» пени за просрочку выполнения обязательств по контрактам №15.09-17П от 15.09.2017 в размере 1 163 607,38 руб., №4-18 от 15.01.2018 в размере 122 850,14 руб., №26-18 от 22.02.2018 в размере 666 130,66 руб., №27-18 от 22.02.2018 в размере 290 353,61 руб., №79-18 от 07.08.2018 в размере 361 176,04 руб.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с нормами статей 330 - 333 ГК РФ в случае нарушения обязательства наступают правовые последствия, установленные договором или законом, в частности, уплата неустойки. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Вместе контрактами №15.09-17П от 15.09.2017, №4-18 от 15.01.2018, №26-18 от 22.02.2018 и №27-18 от 22.02.2018 ответственность субподрядчика за несвоевременное выполнение работ в виде оплаты штрафов или пени не предусмотрена. Таким образом, оснований для начисления неустойки по контрактам №15.09-17П от 15.09.2017, №4-18 от 15.01.2018, №26-18 от 22.02.2018 и №27-18 от 22.02.2018 не имеется.

В связи с чем в удовлетворении требования ООО «Доринвест-Крым» о взыскании с ООО «Баутерм-Юг» пени по контрактам №15.09-17П от 15.09.2017 в размере 1 163 607,38 руб., №4-18 от 15.01.2018 в размере 122 850,14 руб., №26-18 от 22.02.2018 в размере 666 130,66 руб., №27-18 от 22.02.2018 в размере 290 353,61 руб. не имеется.

Относительно требования ООО «Доринвест-Крым» о взыскании пени за просрочку выполнения обязательств по субподрядному контракту №79-18 от 07.08.2018 суд отмечает следующее. Пунктом 4.2 контракта №79-18 от 07.08.2018 предусмотрен срок окончания выполнения работ до 01.10.2018. Пунктом 7.4 контракта определено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды от цены контракта, уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Как установлено судом, работы по контракту №79-18 от 07.08.2018 к установленному контрактом сроку ООО «Баутерм-Юг» не выполнены, следовательно, начисление неустойки и требование о ее взыскании является правомерным.

Согласно представленному расчету истца по встречному иску сумма неустойки за период с 02.10.2018 по 05.08.2019 составляет 361 176,04 руб. При этом общество при расчете применило ключевую ставку Банка России по периодам действия ставки.

Как разъяснено Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка на день его 19 вынесения. Данный механизм расчета неустойки позволит обеспечить правовую определенность в отношениях сторон на момент разрешения спора в суде (ответ на вопрос N 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016).

Согласно Информации Банка России от 07.02.2020 "О ставке рефинансирования Банка России" с 10.02.2020 размер ключевой ставки Банка России составил 6% годовых.

По расчету суда за нарушение сроков выполнения работ по контракту №79-18 от 07.08.2018 размер пени составит 283 600,31 руб.

С учетом изложенного, встречные исковые требования ООО «Доринвест-Крым» подлежат частичному удовлетворению в размере 283 600,31 руб. за просрочку выполнения обязательств по субподрядному контракту №79-18 от 07.08.2018.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции ООО «Баутерм-Юг» было заявлено ходатайство о снижении размера неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для применения положений статьи 333 ГК РФ к должнику.

Ходатайство о снижении размера неустойки судом не может быть удовлетворено ввиду отсутствия соответствующей нормы права, позволяющей суду снижать размер процентов на сумму долга ниже Ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Суд не усматривает оснований для применения положений статьи 333 ГК РФ к должнику.

Расходы на оплаты судебной экспертизы подлежат распределению пропорционально удовлетворенным требованиям ООО «Баутерм-Юг».

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ООО «Доринвест-Крым» в пользу ООО «Баутерм-Юг» задолженность в сумме 2 204 626,97 руб. задолженности, расходы по оплате госпошлины в сумме 16 391,95 руб., расходы на оплату экспертизы в сумме 13 619,39 руб.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

По встречному иску:

Взыскать с ООО «Баутерм-Юг» в пользу ООО «Дорнивест-Крым» неустойку в сумме 283 600,31 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 3 922,85 руб..

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать.

С учетом произведенного зачета:

Взыскать с ООО «Доринвест-Крым» в пользу ООО «Баутерм-Юг» задолженность в сумме 1 921 026,66 руб. и расходы по оплате госпошлины в сумме 12 469,10 руб., расходы на оплату экспертизы в сумме 13 619,39 руб.

Перечислить ФБУ Севастопольская ЛСЭ Минюста России с депозитного счета суда денежные средства в сумме 60 530,40 руб..

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.

 

 

 

 

Судья

С.Н. Архипова