АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248000, г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-9553/2022

16 августа 2023 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Жадан В.В., 

руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

обязать Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской  области, устранить недостатки работ, выполнив гарантийный ремонт кровли  многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, выполненных по  договору подряда о проведении капитального ремонта № 203750000011900147/10- эА/20с от 17.01.2020, обнаруженных в пределах гарантийного срока, выполнив  следующие работы, а именно обязать ответчика:  

1) привести в соответствие требованиям проекта № 249/19-АС заход  карнизной планки на обрешетку по всему периметру кровли дома, который  составляет по длине 28 см, чем не соответствует проектным требованиям к  конструкции кровли, подлежит в местах несоответствия его размера приведению в  такое соответствие с указанными требованиями проекта, - листом 5 спецификации  материалов крыши, наименование «водосточная система» поз.46 - планка  карнизная);  

2) устранить нарушения в соединении карнизных планок и торцевых планок,  которое выполнено внахлест, - привести данные соединения согласно проектной  документации требованиям в проекте № 249/19-АС, - данное соединение подлежит  монтажу в соответствие листом 5 спецификации материалов крыши, наименование  «водосточная система» поз.46 -планка карнизная;  

3) привести в соответствие с проектом длину карнизного свеса кровли,  который выполнен на разных уровнях от фасада и определен в размере 45-60 мм,  что полностью не соответствует требованиям проекта 249/19-АС (лист 4 «схема  карнизного свеса»), который предусмотрен проектом на длину L=140 мм.;  

4) привести водосточные желоба по периметру кровельного покрытия,  крепление которых к обрешетке осуществляется с помощью металлических крюков  в месте примыкания к водосборной воронке (узел отвода воды с кровли), так как  они уложены не в соответствии с проектом № 249/19-АС, - предусмотрены  проектом в соответствие с листом 7 «принципиальная схема устройства настенного  желоба»;  

5) установить по периметру всей кровли карнизно-лобовую доску с  вентиляционным зазором 50 мм, - согласно листу проектной документации № 44  Т2 «Схема устройства водосточной системы»;  

6) в местах предусмотренных проектной документацией № 249/19-АС  отсутствует аэроэлемент (уплотнитель конька/хребта), который подлежит  установке; - установка аэроэлемента (уплотнителя конька/хребта), а так же  соединение листов (целый профиль), слуховых окон кровли дома должны быть  приведены в соответствие с разделом МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»  пунктами 7.14; 7.20; 7.21; 7.26.  

7) соединение кровельных листов в местах несоответствий не выполнено со  сдвижкой их на одну волну (целый профиль) с герметизацией стыков, - подлежит  установке согласно требованиям проекта № 249/19-АС.  

Взыскать с Фонда капитального ремонта многоквартирных домов  Калужской области в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЖРЭУ"  расходы по уплате государственной пошлины на сумму 6 000 руб., расходы на  проведение экспертизы на сумму 30 000 руб.  

В случае неисполнения решения суда присудить к взысканию с Фонда  капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области г. Калуга в  пользу общества с ограниченной ответственностью "ЖРЭУ" г. Калуга на  основании статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации судебную  неустойку в размере 1 000 рублей в день за каждый день просрочки до момента  исполнения ответчиком решения суда.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы  через Арбитражный суд Калужской области.  

Судья В.В. Жадан