Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«12» сентября 2019 г.  Дело № А12-26338/2019  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пономаревой Елены  Викторовны,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козленковой Викторией  Александровой,  

при участии в судебном заседании: 

от муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и  содержания – ФИО1, доверенность от 15.05.2019 № 1084/03;  

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению  муниципального учреждения Коммунально-дорожного строительства, ремонта и  содержания (МУ «Комдорстрой») (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Альфа-Холдинг» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) об обязании выполнить работы по устранению дефектов;  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

обязать общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Холдинг» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления в  законную силу решения суда по настоящему делу за счет собственных денежных средств  выполнить работы по устранению дефектов выполненных работ по муниципальному  контракту от 04.08.2015 № 1616 на ремонт автомобильных дорог общего пользования  Волгограда в 2015 году согласно акту комиссионного обследования объектов улично- дорожной сети Волгограда, отремонтированных в 2015 - 2018 годах, а именно:  

улица Инициативная: деформация и повреждения проезжей части: ямочность - 0,5  квадратных метра, не заделана вырубка;  

улица Пархоменко (от улицы Невская до улицы Хиросимы): разрушение  асфальтобетонного покрытия ориентировочно 7 квадратных метров, поперечные трещины  ориентировочно 85 п.м., провал асфальтобетонного покрытия после разрытия  инженерных коммуникаций ориентировочно 23 квадратных метра;  

ремонт улицы Автозаводская (выборочно): разрушение асфальтобетонного  покрытия ориентировочно 5 квадратных метров, поперечные трещины ориентировочно 50  п.м., не заделана вырубка - 1 штука;  

ремонт улицы Морфлотская: разрушение асфальтобетонного покрытия  ориентировочно 20 квадратных метров, просадка люка - 1 штука;  

ремонт автомобильной дороги по улицы Козловской (от улицы Баррикадной  до ул.ицы Азербайджанской), включая дорогу от улицы Козловской до улицы Рабоче- Крестьянской: разрушение асфальтобетонного покрытия ориентировочно 5 квадратных  метров, не заделана вырубка - 1 штука, провал и разрытие от коммунальных служб  ориентировочно - 7 квадратных метров, просадка люков - 2 штуки;  

ремонт улицы им. Римского-Корсакова, улицы им. Хорошева: разрушение  асфальтобетонного покрытия ориентировочно 45 квадратных метров, разрушение  продольных спаек ориентировочно 70 п.м, просадка люка и асфальтобетонного покрытия  - 2 штуки, разрытие от коммунальных служб ориентировочно 7 квадратных метров;  

ремонт улицы им. Землячки (на участках от проспекта им. Маршала Советского  Союза ФИО2 до бульвара 30 летия Победы и от проспекта Дорожников до улицы им.  Рокоссовского): разрушение асфальтобетонного покрытия ориентировочно 60 квадратных  метров, разрушение продольных спаек ориентировочно 180 п.м.  

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Холдинг» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 рублей  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение  месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Волгоградской области.  

СУДЬЯ Е.В. Пономарева