6_542170  

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, пр. им. И. Базоркина 44 

тел: (8873) 22- 40-57, 22-40-77 факс: (8873) 22-40-80. 

http://ingushetia.arbiтр 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А18-3879/2024

город Назрань

25 февраля 2025 года

Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе судьи Цечоева Р.Ш., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Далаковой З.В. рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Капитал» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.02.2008, ИНН: 

<

***>) к Министерству строительства Республики Ингушетия (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2014, ИНН: 

<

***>) об обязании Министерство строительства Республики Ингушетия заключить дополнительное соглашение к государственному контракту № 0114500000823000215_309089 от 28.03.2023 г. в части изменения цены контракта в соответствии с Положительным заключением повторной экспертизы, Федерального автономного учреждения « Главное управление государственной Республики Ингушетия» № 06-1-1-2-072618-2023 от 29.11.2023 г.,  

при участи в судебном заседании: 

от истца – ФИО1 (доверенность № 21 от 27.01.2025 г.) от ответчика – ФИО2 (доверенность № 120 от 25.11.2024 г.)  

руководствуясь статьями 167-170, 176, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

РЕШИЛ:

Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Капитал» удовлетворить.  

Обязать Министерство строительства Республики Ингушетия (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2014, ИНН: 

<

***>) заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Капитал» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.02.2008, ИНН: 

<

***>) дополнительное соглашение к государственному контракту № 0114500000823000215_309089 от 28.03.2023г. в части изменения цены контракта в соответствии с Положительным заключением повторной государственной экспертизы Федерального автономного учреждения « Главное управление Республики Ингушетия» № 06-1-1-2-072618-2023 от 29.11.2023 г.,  

Взыскать с Министерства строительства Республики Ингушетия (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2014, ИНН: 

<

***>) пользу Общества с ограниченной ответственностью «Капитал» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.02.2008, ИНН: 

<

***>) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при обращении в суд, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей .  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через суд, принявший решение, в апелляционном порядке в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.  

 Судья Р.Ш. Цечоев .