АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А39-7338/2023

город Саранск13 октября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 12 октября 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 13 октября 2023 года.

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Пышковой Е.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ-13" (ОГРН 1131326003775, ИНН 1326226492)

к Администрации Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании задолженности в размере 3 188 761 руб., неустойки в размере 583 441 руб. 32 коп. и по день фактической оплаты задолженности и судебных расходов,

при участии в заседании:

от истца: не явился,

от ответчика: не явился,

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ-13" (далее – ООО "ПРОЕКТ-13", истец) обратилось в суд с иском к Администрации Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (далее – Администрация, ответчик) о взыскании задолженности по оплате работ и пени.

Заявление мотивировано тем, что в соответствии с договорами истцом выполнены работы по выполнению проектно-сметных работ. Работы выполнены, приняты ответчиком, но не оплачены. За ответчиком образовалась задолженность в общей сумме 3 188 761 руб. Просит взыскать задолженность, неустойку за нарушение сроков оплаты работ в сумме 583 441 руб. 32 коп (с учетом уточнения иска), а также расходы по оплате госпошлины и юридических услуг.

В судебное заседание стороны явку представителей не обеспечили, о дате заседания извещены в установленном законом порядке, ходатайств об отложении рассмотрения дела не поступило. Истец в предварительном заседании требования поддержал. На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие сторон.

Из материалов дела следует, что между сторонами заключены:

- муниципальный контракт № 6-ЭА-909/22 от 14.06.2022 на разработку проектной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения и водонапорной башни на территории Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия». Стоимость работ составляет 2 260 000 руб. Работа по контракту выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 09.03.2023. Оплата работ не произведена;

- договор № 60 от 03.08.2020 на выполнение проектных работ по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 13 к2 в Микрорайоне № 3 г.Краснослободск Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» (дизайн проект). Стоимость работ составляет 40000 руб. Работа по договору выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 21.08.2020. Оплата работ не произведена;

- договор № 61 от 13.08.2020 на выполнение проектных работ по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 13 к2 в Микрорайоне № 3 г.Краснослободск Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» (смета на строительство). Стоимость работ составляет 25 000 руб. Работа выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 21.08.2020. Оплата работ не произведена;

- договор № 146 от 07.09.2020 на выполнение проектных работ по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Красная Подгора, ул.Литвиновская Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия». Стоимость работ составляет 40 000 руб. Работа выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 24.09.2020. Оплата работ не произведена;

- договор № 136 от 26.03.2021 на выполнение проектных работ по объекту «Ремонт в рамках благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома № 15 в 3-м Микрорайоне г.Краснослободска Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» (смета на ремонт). Стоимость работ составляет 25 000 руб. Работа выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 15.04.2021. Оплата работ не произведена;

- договор № 137 от 26.03.2021 на выполнение проектных работ по объекту «Ремонт в рамках благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома № 15 в 3-м Микрорайоне г.Краснослободска Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» (дизайн-проект). Стоимость работ составляет 40 000 руб. Работа выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 15.04.2021. Оплата работ не произведена;

- договор № 42 от 17.05.2021 на выполнение проектных работ по объекту «Ремонт в рамках благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома № 14 в 3-м Микрорайоне г.Краснослободска Краснослободского муниципального района Республики Мордовия». Стоимость работ составляет 15 000 руб. Работа выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 04.06.2021. Оплата работ не произведена;

- договор № 054 от 21.06.2021 на выполнение проектных работ по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Б.Хмельницкого Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия». Стоимость работ составляет 18 000 руб. Работа выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 09.07.2021. Оплата работ не произведена;

- договор № 058 от 21.06.2021 на выполнение проектных работ по объекту «Ремонт тротуара в 3-м микрорайоне г.Краснослободск Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» (смета по дефектной ведомости). Стоимость работ составляет 15 000 руб. Работа выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 09.07.2021. Оплата работ не произведена;

- договор № 74ЕП-909/221 от 04.07.2021на выполнение проектных работ по объекту «Ремонт тротуара в 3-м микрорайоне г.Краснослободск Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» (смета по дефектной ведомости). Стоимость работ составляет 15 000 руб. Работа выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 26.07.2021. Оплата работ не произведена;

- договор № 66 от 08.07.2021 на выполнение проектных работ по объекту «Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Сквер в 3-м микрорайоне г.Краснослободска Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» в рамках участия в конкурсе лучших проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Республики Мордовия. Стоимость работ составляет 185 000 руб. Работа выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 05.08.2021. Оплата работ не произведена;

- договор № 108 от 09.09.2021 на выполнение проектных работ по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Московская Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия». Стоимость работ составляет 22 000 руб. Работа выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 23.09.2021. Оплата работ не произведена;

- договор № 109 от 14.09.2021 на выполнение проектных работ по объекту «Установка светильников наружного освещения на опоре», расположенном по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>». Стоимость работ составляет 25 000 руб. Работа выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 01.10.2021. Оплата работ не произведена;

- договор № 112 от 23.09.2021 на выполнение проектных работ по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Красная Подгора Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» (ремонт участка автомобильной дороги длиной 120 м, шириной 3 м). Стоимость работ составляет 24 000 руб. Работа выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 11.10.2021. Оплата работ не произведена;

- договор № 021 от 11.02.2022 на выполнение проектно-сметных работ по объекту «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Интернациональная Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района 

<

...> этап (ориентир от ул.Калинина до 1-го Пролетарского переулка)». Стоимость работ составляет 128 569 руб. Работа выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 15.02.2022. Оплата работ не произведена;

- договор № 022 от 11.02.2022 на выполнение проектно-сметных работ по объекту «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Интернациональная Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района 

<

...> этап (ориентир от 1-го Пролетарского переулка до ул.Халтурина, Комсомольская площадь)». Стоимость работ составляет 141 838 руб. Работа выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 18.02.2022. Оплата работ не произведена;

- договор № 023 от 11.01.2022 на выполнение проектных работ по объекту «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.3-й микрорайон Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия». Стоимость работ составляет 25 000 руб. Работа выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 12.03.2022. Оплата работ не произведена;

- договор № 83 от 03.08.2022 на выполнение проекта планировки и межевания территории для объекта «Строительство сетей водоснабжения и водонапорной башни на территории Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия». Стоимость работ составляет 144 354 руб. Работа по договору выполнена, Акт приемки выполненных работ подписан сторонами 23.09.2023. Оплата работ не произведена.

Общая сумма задолженности составляет 3 188 761 руб.

Претензия с требованием погасить задолженность оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения в суд с рассматриваемыми требованиями.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что исковые требования истца подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно статье 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик принять и оплатить их результат.

Пунктом 1 статьи 760 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором, согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Факт выполнения работ по вышеупомянутым  договорам ответчиком не оспаривался, претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ ответчик не предъявлял. Обязательство по оплате выполненных работ ответчик не исполнил, что им не оспаривается. На основании изложенного, задолженность в общей сумме 3 188 761 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В пункте 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Условиями договоров предусмотрена ответственность Заказчика за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных Исполнителем работ в виде взыскания неустойки в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

В соответствии с пунктом 7.3 муниципального контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от не уплаченной в срок суммы. 

За просрочку оплаты выполненных по договорам и контракту работ истец начислил ответчику неустойку с учетом периода моратория по состоянию не 07.08.2023 в общей сумме 583 441 руб. 32  коп.  

Правильность данного расчета судом проверена, временной период начисления неустойки по каждому договору истцом определен верно. Расчет неустойки ответчиком не оспаривается.

Указанная сумма неустойки, учитывая период просрочки исполнения обязательств, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в полном объеме. На несоразмерность суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ответчик не ссылался, в связи с чем, оснований для применения положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд не усматривает. 

Согласно части 9 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" сторона освобождается от уплаты неустойки только в том случае, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны договора.

Ответчик доказательств тому, что ненадлежащее исполнение обязательства по контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине истца, суду не представил, в связи с чем, отсутствуют основания для освобождения ответчика от ответственности в виде оплаты неустойки.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию неустойка в общей сумме 583 441 руб. 32  коп.

В пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

В связи с чем, требование истца о взыскании с ответчика неустойки по договорам на сумму долга 928 761 руб. по день фактической оплаты долга подлежит удовлетворению. При этом процентная ставка неустойки составляет 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. В случае частичного погашения задолженности неустойка за следующий период подлежит начислению на сумму непогашенного остатка.

В части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

В подтверждение факта несения расходов на оплату юридических услуг в размере 29 000 руб. истцом в материалы дела представлены: соглашение об оказании юридической помощи №22 от 28.07.2023, акт от 07.08.2023, платежные поручения на общую сумму 29 000 руб.

В пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 №1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" разъяснено, что разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 13 указанного Постановления Пленума разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства (п. 13 указанного Постановления Пленума).

Оценив представленные письменные доказательства, учитывая объем проделанной работы, характер спора, степень сложности дела, отсутствие доказательств чрезмерности заявленных к взысканию судебных расходов, суд приходит к выводу, что понесенные истцом расходы на оплату юридических услуг разумны и документально подтверждены. Указанная сумма расходов подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

При подаче иска истцом была оплачена госпошлина в сумме 42 290 руб. При заявленной (уточненной) цене иска размер госпошлины должен составлять 41 861 руб. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Следовательно, понесенные истцом расходы по оплате госпошлины в сумме 41 861 руб. подлежат возмещению ответчиком, излишне оплаченная сумма госпошлины 429 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 

На основании изложенного, и, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

р е ш и л:

исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ-13" удовлетворить.

Взыскать с Администрации Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ-13" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 3 188 761 руб., неустойку в размере 583 441 руб. 32 коп., неустойку с 08.08.2023 по день фактической оплаты задолженности из расчета 0,1% на сумму долга (928 761 руб.) за каждый день просрочки, расходы по оплате юридических услуг в сумме 29 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 41 861 руб.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ-13" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 429 руб., оплаченную по платежному поручению № 14 от 08.08.2023.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

СудьяС.Н. Макеева