АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-5949/2019

г. Южно-Сахалинск

11 февраля 2020 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по исковому заявлению  

муниципального казенного учреждения городского округа «Город  Южно-Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 693007, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Остров» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 693000, 

<

...>)  

об обязании устранить выявленные недостатки в рамках гарантийных  обязательств по муниципальному контракту № 027-029-18 от 12.07.2018, о  взыскании денежных средств на случай неисполнения судебного акта  

при участии: 

от истца: ФИО2 по доверенности № 010/2019 от  06.03.2019;  

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 01.01.2020. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казенного учреждения  городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление дорожного  хозяйства и благоустройства» удовлетворить частично.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Остров» в срок  не позднее 1 июня 2020 года исполнить принятые на себя обязательства по  муниципальному контракту № 027-029-18 от 12.07.2018 и произвести  работы по устранению выявленных недостатков на объекте в рамках  гарантийных обязательств, а именно:  

- устранить дефекты в виде сетки трещин с раскрытием до 5 мм с  восточной стороны дома 76 Б по ул. Авиационной, с северной стороны  дома 74 по ул. Авиационной площадью 20 м²;  

- восстановить разрушенный фундамент сушек белья в количестве 4  шт. с восточной стороны дома 76 Б по ул. Авиационной, с северной  стороны дома 74 по ул. Авиационной;  

- восстановить анкерное соединение на карусели детской площадки в  количестве 1 шт. на детской площадке дома по ул. Авиационной 76 Б, 74 Б;  

- восстановить разрушенные ступени на подходе к хоккейному корту в  количестве 4 шт. на спортивной площадке по ул. Авиационной 76 Б, 74 Б;  

- восстановить разрушенный фундамент сушек белья в количестве 4  шт. по ул. 30 лет Победы 

<

...>;  

- восстановить разрушенное резиновое покрытие в объеме 1 м² по ул.  30 лет Победы 

<

...>;  

- устранить застой воды на проезжей части в объеме 30 м² на участках  по адресу 30 лет Победы 

<

...> А северная сторона, 7Б южная  сторона, 7 западная сторона;  

- восстановить входные дверцы детской площадки в количестве 2 шт.  

на детской площадке по ул. 30 лет Победы д. 7, 8Б, 17 А;  

- заделать вырубки в асфальте в количестве 6 шт. по ул. 30 Победы 

<

...>;  

- устранить трещины на асфальте тротуара до 5 мм. на участке д. 7 с  запанной стороны по ул. 30 лет Победы в объеме 2 м.п., на участке д. 7 А с  южной стороны по ул. 30 лет Победы в объеме 3 м.п., на участке д. 18 А с  северной стороны по ул. 30 лет Победы в объеме 2 м.п.;  

- устранить застой воды на проезжей части возле мусорной площадки  с южной стороны дома 7 Б по ул. 30 лет Победы в объеме 10 м²;  

- устранить множество прогалов на участке пер. Железнодорожный  18, 18а, ул. 30 лет Победы 7, 7 А, 7Б, 3 А, 3 Б;  

- устранить множество прогалов по всему периметру 

<

...> по  ул. Авиационной;  

- заменить кизильник в количестве 7 шт. на участке 

<

...> по ул.  Авиационной;  

- заменить сирень обыкновенную в количестве 2 шт. на участке 

<

...> по ул. Авиационной;  

- заменить гортензию древовидную в количестве 5 шт. на участке 

<

...> по ул. Авиационной.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Остров»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 693000, 

<

...>) в пользу  муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно- Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 693007, 

<

...>) денежные средства на случай  неисполнения судебного акта в размере 3 000 (три тысячи) рублей в день,  за первые 30 календарных дней неисполнения судебного акта, начиная со  следующего дня после истечения двухдневного срока со дня вступления  

его в законную силу, 5 000 (пять тысяч) рублей в день в течение  следующих 30 календарных дней неисполнения судебного акта, 10 000  (десять тысяч) рублей в день за все последующие дни неисполнения  судебного акта.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Остров»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 693000, 

<

...>) в доход  федерального бюджета 6 000 (шесть тысяч) рублей государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников