ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-136722/23-67-1115

г. Москва

20 октября 2023 г.

Резолютивная часть решения оглашена 06 октября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 20 октября 2023 года

 

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                    

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР" (129343, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВИБЛОВО, НАНСЕНА ПР-Д, Д. 4, К. 2, ПОМЕЩ. 1/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.09.2006, ИНН: 

<

***>)

к ФОНДУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ (129090, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2015, ИНН: 

<

***>)

третьи лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ОДИП" (117452, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЮЗИНО, ЧЕРНОМОРСКИЙ Б-Р, Д. 17, К. 1, ЭТАЖ 5, ПОМЕЩ. I, ОФИС 131, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.11.2015, ИНН: 

<

***>) 

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ "ЭКСПЕРТСТРОЙ" (107078, 

<

...>, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ/КОМНАТА 2/I/6, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.06.2012, ИНН: 

<

***>)

об обязании ответчика в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в законную силу решения суда устранить нарушения, допущенные ответчиком при выполнении работ по капитальному ремонту, а именно:

-  привести в порядок фасады многоквартирных домов путем удаления шелушения старой покраски с последующей окраской;

-устранить выгоревшие участки и разнооттеночность  фасадов многоквартирных домов с подписанием соответствующих документов о сдаче работ между истцом и ответчиком.,

при участии: 

от истца: ФИО2, дов. от 05.06.2023г., ФИО3, дов. от 24.07.2023

от ответчика: ФИО4, дов. от 17.02.2022г.

третьи лица: неявка, извещены

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ФОНДУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ (далее – ответчик) об обязании ответчика в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в законную силу решения суда устранить нарушения, допущенные ответчиком при выполнении работ по капитальному ремонту, а именно: привести в порядок фасады многоквартирных домов путем удаления шелушения старой покраски с последующей окраской; устранить выгоревшие участки и разнооттеночность  фасадов многоквартирных домов с подписанием соответствующих документов о сдаче работ между истцом и ответчиком.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве.

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, ООО «УК «Партнер» является управляющей организацией в Бабушкинском районе в многоквартирных домах по адресам 

<

...> и 

<

...>.  

13.05.2023 года по результатам объезда территории Бабушкинского района заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ФИО5 выявлено, что фасады многоквартирных домов по адресам 

<

...> и 

<

...> имеют шелушение окрасочного слоя и выгорание окраски.  

В данных многоквартирных домах в 2018 году проведены работы по капитальному ремонту фасада подрядной организацией ООО "СК ОДИП" Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее по тексту - ФКР Москвы) и находятся на гарантийном сроке эксплуатации (договор № КР-003024-17, договор ПСД № ПКР-000816-18). 

Факт наличия нарушений выявлены в ходе комиссионного обследования 31 мая 2023 года с участием представителя строительного контроля ФКР ГАУ «МосжилНИИпроект» и управляющей организацией, а именно;

- на локальных участках происходит шелушение окрасочного слоя,

- на локальных участках выявлена разнооттеночность окраски. 

 В адрес ответчика была направлена почтой РФ истцом, досудебная претензия № 424 от 06.06.2023 года по вышеуказанным многоквартирным домам с целью исполнения гарантийных обязательств, которая ответчиком была проигнорирована.

Вышеуказанные дефекты выявлены ООО «УК «Партнер» в срок действия гарантийных обязательств и подлежат устранению за счет лица, выполняющего услугу капитальный ремонт, то есть ФКР города Москвы Гарантийный срок выполнения работ составляет 5 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ (п. 10.3 договора № КР-003024-17 и ПСД № ПКР-000816-18). В многоквартирном доме по адресу 

<

...> шелушение и отслоение окрасочного слоя фасада происходит на большем участке и составляет в объеме площади примерно 35%, по адресу 

<

...> – шелушение и отслоение окрасочного слоя фасада – 40%.

Согласно электронной переписке ответчика ФКР города Москвы с гражданами и истцом ООО «УК «Партнер» по вышеуказанным адресам многоквартирных домов ответчиком сообщено следующее. В ходе комиссионного обследования, проведенного 13.09.2021 года установлено, что фасады находятся в удовлетворительном техническом состоянии, наблюдаются локальные трещины и отслоения межпанельных швов. Имеется разноотеночность окрасочного слоя фасада дома № 2 в районе квартиры № 35.

Факсограммами подрядчику ФКР города Москвы сообщено, что в случае подтверждения информации о наступлении гарантийного случая будет составлен рекламационный акт и акт об обнаружении дефектов с применением мер ответственности в соответствии с договором.

Согласно выводам комиссии в акте обследования межпанельных швов и состояния элементов фасада жилого помещения № 126 от 19.08.2021 года по улице Енисейской дом № 2, город Москва по результатам обращения жителя квартиры № 35 (заявка на ЕДЦ № 03785815/21 от 18.08.2021) указано заявителю обратиться с рекламацией в ФКР города Москвы в досудебном или судебном порядке с целью проведения ревизионного вскрытия межпанельного шва по всей площади квартиры с внешней сторона многоквартирного дома на предмет выявления нарушений технологии заполнения шва, по окончании работ произвести окраску фасада с учетом колористики в существующий цвет.

В соответствии с пунктами контрактов 10.3-10.15 гарантийный срок на результаты выполненных работ по каждому Объекту устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет с момента подписания Акта приемки выполненных работ по Объекту, а в случае досрочного расторжения настоящего Договора (на выполненные Генподрядчиком до даты расторжения Договора и принятые Заказчиком работы) - с даты расторжения настоящего Договора.

Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком (его поставщиками и/или привлеченными им субподрядными организациями) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик организует составление Рекламационного акта, где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению недостатков (дефектов). Течение срока исковой давности начинается с даты составления Рекламационного акта. Для участия в составлении Рекламационного акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан в срок, указанный в письменном извещении Заказчика о выявленных недостатках (дефектах), направить своего надлежащим образом уполномоченного представителя с предъявлением соответствующей доверенности. Рекламационный акт составляется комиссией в составе Заказчика, Генподрядчика, представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом. Генподрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (двух) дней (без учета выходных и праздничных дней) с момента подписания Рекламационного акта или получения оформленного Рекламационного акта (в отсутствие надлежаще уведомленного Генподрядчика при составлении). В случае необходимости немедленного выхода Генподрядчика на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в Рекламационном акте. Если Генподрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные Материалы, изделия, конструкции и/или Оборудование, то Заказчик применяет к Генподрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором. При отказе Генподрядчика от составления или подписания Рекламационного акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подписывается присутствующими лицами и Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком принятых им на себя обязательств. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного срока) обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании или узлах оборудования, Генподрядчик за свой счет обязан заменить все оборудование (узлы оборудования) данного вида, установленное на Объекте, в срок, определяемый Рекламационным актом. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использованных при проведении работ, Генподрядчик не вправе использовать тс же материалы либо материалы такого же качества при устранении недостатков (дефектов) в Работах. Если Генподрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые Рекламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии с настоящим Договором имеет право устранить недостатки (дефекты), заменить оборудование силами третьих лиц за счет Генподрядчика.

Приемка работ по устранению недостатков (дефектов) осуществляется на основании проверки работ с оформлением Акта приемки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок после проведения капитального ремонта многоквартирного дома. Акт приемки работ по устранению недостатков (дефектов) подписывается комиссией, состав которой определяется согласно п. 10.5 настоящего Договора. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья собственников, жителей или пользователей, а также порче их имущества, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Генподрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика, Генподрядчика. Мосжилинспекции, лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, эксплуатирующей организации, уполномоченного депутата и др. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, оборудованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период Гарантийного срока, возмещается за счет виновных лиц. Генподрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

Согласно позиции истца, Фонд, как заказчик по договору подряда, в соответствии с действующим законодательством и договором подряда обязан принять меры по устранению выявленных недостатков.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 1 статьи 754 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении (пункт 4 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда в силу статьи 756 Гражданского кодекса РФ составляет пять лет.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Многоквартирные дома, расположенные по адресу: 

<

...>, 

<

...> годов постройки, включены в план по региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на территории города Москвы на 2015-2044 годы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 г. №832-ПП «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы».

Между ФКР Москвы и ООО «СК Одип» был заключен Договор №КР-003024-17 от 06.12.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>.

ФКР Москвы надлежащим образом исполнил обязательства регионального оператора, предусмотренные ст. 182 ЖК РФ, заключив в установленные Региональной программой сроки заключив вышеуказанный договор.

30.06.2018 г. комиссией без замечаний с участием, в том числе, представителя управляющей компании ООО «УК «Партнер» был подписан акт приемки выполненных работ по ремонту фасада, в соответствии с которым работы выполнены в полном соответствии с требованиями СНиП, материалы и технология проведения работ и технические требования соответствуют проектной документации и техническому заданию.

Между ФКР Москвы и ООО «СК Одип» был заключен Договор №ПКР-000816-18 от 31.05.2018 г. на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>.

ФКР Москвы надлежащим образом исполнил обязательства регионального оператора, предусмотренные ст. 182 ЖК РФ, заключив в установленные Региональной программой сроки заключив вышеуказанный договор.

31.08.2019 г. комиссией без замечаний с участием, в том числе, представителя управляющей компании ООО «УК «Партнер» был подписан акт приемки выполненных работ по ремонту фасада, в соответствии с которым работы выполнены в полном соответствии с требованиями СНиП, материалы и технология проведения работ и технические требования соответствуют проектной документации и техническому заданию.

Таким образом, на основании вышеуказанных актов о приемке работ управляющая компания приняла в эксплуатацию данные системы и элементы, содержание и их ремонт должен осуществляться в рамках текущей эксплуатации дома, учитывая, что работы были сданы в 2018 и 2019 годах. В свою очередь, поддержание и обслуживание общего имущества должно осуществляться надлежащим образом.

Так, согласно положениям ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, п. п. 151-153 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), п. 4.6. постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и п. п. 11, 18, 42 постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», на ООО «УК «Партнер» как на управляющую компанию, действующую на основании Протокола общего собрания собственников и договора управления с собственниками помещений многоквартирного дома возложена обязанность по содержанию общего имущества многоквартирного дома, при котором были бы обеспечены безопасность содержания внутридомовых инженерных систем и элементов.

В силу ч. 2. 3. ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение готовности инженерных систем.

Положениями ч. 2 ст. 53 ГрК РФ предусмотрено, что строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда строительный контроль проводится также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

Как следует из п. 4.2.1.6. Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» чтобы предотвратить разрушения облицовки, штукатурки и окрасочных слоев фасада следует не допустить увлажнение стен атмосферной, технологической, бытовой влагой.

Из п. 4.2.1.9. вышеуказанных Правил следует, что для предупреждения высолов, щелушений, пятен и т.д. выполняется своевременная окраска фасадов.

Пунктом 4.2.3.9. вышеуказанных Правил предусмотрено, что фасады зданий следует очищать и промывать в сроки, установленные в зависимости от материала, состояния поверхностей зданий (степень загрязнения, наличие выколов, разрушение покрытия) и условий эксплуатации.

Вышеуказанными правилами также установлено, что в перечень работ, относящихся к текущему ремонту, входят: герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

В силу ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, обеспечить готовность инженерных систем, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

На основании п. 30 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021) сам по себе факт выявления строительных дефектов вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей застройщика и наличия у него обязанности по устранению допущенных нарушений в течение гарантийного срока не освобождает управляющую организацию от исполнения обязанностей, установленных законодательством и договором управления многоквартирным домом, по содержанию общего имущества такого дома в надлежащем состоянии.

А в свою очередь, бремя доказывания факта надлежащего содержания общего имущества возложено на управляющую компанию, т.к. ее вина в неисполнении обязательств по договору управления презюмируется, пока не доказано обратное.

Для привлечения ФКР Москвы и подрядной организации к ответственности за недостатки выполненных работ по капитальному ремонту согласно ч. 2 ст. 755 ГК РФ необходимо в силу ст. 65 АПК РФ доказать их наличие, а ответственность из деликта наступает при совокупности условий, которая включает в себя наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда, а также причинно-следственную связь между противоправными действиями и наступившими неблагоприятными последствиями, вину причинителя вреда. 

Также при обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в ч. 1 ст. 754 ГК РФ, заказчик должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении (ч. 4 ст. 755 ГК РФ).

Кроме того, истцом не представлены доказательства ненадлежащего факта исполнения обязательств со стороны регионального оператора и подрядной организации.

Исковые требования истца основываются на комментариях (особом мнении), отраженных в комиссионных Актах осмотров общего имущества многоквартирного дома б/н от 31.05.2023 г.

Истцом не представлены в материалы дела какие-либо заключения специалистов и экспертов, которые бы указывали о наличии конкретных дефектов в выполненных работах по указанным инженерным системам, с выводами о том, какие обязательные нормы и требования нарушены подрядчиком при производстве работ по капитальному ремонту.

Согласно ст. 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые, согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Обязанность подрядной организации устранить дефекты в работах, выявленных в гарантийный период, или представить доказательства того, что дефекты возникли в результате ненадлежащей эксплуатации, является обусловленной, и возникает только в случае исполнения заказчиком обязанности о представлении такого дефекта в разумный срок после его обнаружения.

Для привлечения ООО «СК Одип» к ответственности за недостатки в выполненных работах согласно ч. 2 ст. 755 ГК РФ необходимо в соответствии со ст. 65 АПК РФ необходимо доказать их наличие.

В силу ч. 3 ст. 328 ГК РФ ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Таким образом, ООО «УК «Партнер» не представлено в материалы дела документов, подтверждающих отсутствие вины, а положениями действующего законодательства ответственность за безопасное состояние общедомового имущества возлагается на управляющую как на лицо, осуществляющее управление многоквартирного дома после проведения капитального ремонта в рамках договоров на техническое обслуживание по следующим основаниям:

- законодательством прямо предусмотрена обязанность управляющей организации осуществлять текущее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома;

- денежные средства уплачиваются жителями многоквартирного дома по услуге «содержание и текущий ремонт» вне зависимости от проведения капитального ремонта;

- жилищным законодательством, региональной программой, заключаемыми договорами в рамках реализации данной программы не предусмотрено возложение обязанности по содержанию общего имущества многоквартирного дома на подрядную организацию, проводившую капитальный ремонт, или регионального оператора, являющегося техническим заказчиком данных работ.

Соответственно, доводы истца о наличии недостатков в выполненных работах по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, д. 4 не могут подтверждаться только выводами специалистов и мастеров ООО «УК «Партнер».

На основании изложенного, суд отказывает в удовлетворении заявленных требований.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                            В.Г. Джиоев