126_25895384 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Р Е Ш Е Н И Е

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-79863/20-126-585

г. Москва

08 июля 2020 г.

Резолютивная часть решения объявлена 26.06.2020  

Полный текст решения изготовлен 08.07.2020 Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Новикова М.С. протокол судебного заседания вел секретарь Остроушко В.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКИС" (105066  МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ОЛЬХОВСКАЯ ДОМ 45СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ 4 ПОМ.120 К.4,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.08.2013, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ № 2 ТРЕСТА № 16" (192019, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА  ХРУСТАЛЬНАЯ, ДОМ 21, ЛИТЕР А, СТР 1 ПОМЕЩЕНИЕ 7, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 04.02.2003, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 2 756 997 руб. 65 коп. В судебное заседание явились: от истца: ФИО1, доверенность от 21.08.2019 от ответчика: ФИО2, доверенность от 04.06.2020 

УСТАНОВИЛ:

АО «ДЕКИС» (истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым  заявлением к АО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2 ТРЕСТА № 16»  (ответчик) о взыскании 2 756 997 руб. 65 коп. неустойки.  

Истец явку представителя в судебное заседание обеспечил, исковые требования  поддержал.  

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям,  изложенным в отзыве на иск.  

Суд, изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, пришёл к выводу о том,  что иск подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.  

Согласно ч.1 ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо,  участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на  основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч.2 ст.9 Арбитражного  процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий  совершения или не совершения ими процессуальных действий.  

В соответствии со ст.9 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица по  своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.  

Согласно положениям ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны  исполняться надлежащим образом в соответствии с законом, иными правовыми актами,  условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.  

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны  (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его.  

Как установлено судом, 15 июля 2018г. между ООО «ДекИс» (Генеральный подрядчик)  и ЗАО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2 ТРЕСТА № 16» (в настоящее  время - АО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2 ТРЕСТА № 16», в  соответствии с уведомлением об изменении реквизитов от 04.12.2019 года исх. № 251)  (Подрядчик) заключен договор подряда № LM\TALL\SMU-15718 (далее -Договор) в  редакции Дополнительного соглашения № 1 от 06 августа 2018 года, Дополнительного  соглашения № 2 от 24 августа 2018 года, согласно которому Генподрядчик обязался  выполнить Работы, предусмотренные Договором и Приложениями к нему, а Генеральный  подрядчик обязался создать условия для выполнения Работ, выполнить Приемку Работ на  Объекте и уплатить Цену Договора на Объекте - гипермаркет строительных материалов  «Леруа Мерлен», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Старр-Паново, Таллиннское  шоссе, дом 163, корпус 1, литера A).  

В соответствии с п.п. 6.2, 6.3 Договора начальный срок выполнения работ – 15.07.2018,  окончательный срок производства работ – 06.09.2018.  

Согласно п. 1.9 Договора термин «Приемка результата выполненных работ на Объекте»  означает проведение совместно представителями Заказчика, Генерального подрядчика и  

Подрядчика проверки состояния готовности результата выполненных работ, исполнительной  и технической документации на предмет соответствия соблюдения проектных  согласованных решений, требований ГОСТ, СНИП, СанПин и других правил безопасности, с  последующим оформлением Окончательного акта приема-передачи или дефектной  ведомости, в случае обнаружения недостатков.  

Согласно п. 1.10 Договора, термин «Окончательный акт приема-передачи» означает  документ, подписываемый после завершения Подрядчиком всех Работ по настоящему  Договору, за исключением Работ, подлежащих выполнению в Гарантийный срок.  

В соответствии с п. 7.2 Договора, в качестве обеспечения надлежащего исполнения  Подрядчиком своих обязанностей по Договору, в том числе обязанностей по устранению  недостатков (дефектов), обнаруженных в период гарантийного срока, Генеральный  подрядчик при ежемесячной оплате выполненных объемов Работ производит удержание 10%  (Десяти процентов) от суммы каждого платежа. Сумма, удерживаемая Генеральным  подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом, является гарантийной (Гарантийный  депозит).  

Возврат Гарантийного депозита производится в следующем порядке:  

- 5% (пять процентов) выплачиваются по завершении работ не позднее 2 (двух)  календарных месяцев после подписания Окончательного акта приема-передачи и  выставления счета.  

- 5% (пять процентов) выплачиваются равными частями (по 2,5% от Цены Договора) по  окончании первого и второго года с даты подписания Окончательного акта приема-передачи.  По окончании первого года с даты подписания Окончательного акта приема-передачи, при  наличии положительного заключения организации, привлеченной Генеральным  подрядчиком/Заказчиком для проведения строительного контроля, и организации,  привлеченной Генеральным подрядчиком/Заказчиком для осуществления дополнительного  надзора за строительством.  

Окончательный акт приема-передачи работ подписан 13 сентября 2019 года.  

В соответствии с п. 12.2.6 Договора Генеральный подрядчик вправе потребовать от  Подрядчика выплаты неустойки:  

- в случае нарушения Подрядчиком окончательного срока выполнения работ,  установленного пунктом 6.3. Договора более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней в  размере 0,05% от Цены Договора за каждый календарный день просрочки.  

Во избежание сомнений, указанная в настоящем подпункте неустойка не подлежит  уплате при отсутствии письменного требования Генерального подрядчика.  

Таким образом, сумма выполненных работ по Договору составила 15 445 365,74 руб.  (пятнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч триста шестьдесят пять рублей  

семьдесят четыре копейки), в т.ч. НДС (18%) 2 356 072,74 руб. (два миллиона триста  пятьдесят шесть тысяч семьдесят два рубля семьдесят четыре копейки). Срок выполнения  всех работ по Договору (п.п. 6.2. и 6.3. Договора) и дополнительным соглашениям к нему - с  15 июля 2018 года (начальный срок производства работ) по 06 сентября 2018 года  (окончательный срок производства работ). Окончательный акт приема-передачи  выполненных работ направлен Подрядчиком Генподрядчику для утверждения 09 сентября  2019 года, что подтверждается письмом исх. № 162 от 09 сентября 2019 года (трек номер  отправления SVT00853585, почтовая служба СВТ-Петербург, получен Генподрядчиком 10  сентября 2019 года). Генподрядчик обязан рассмотреть окончательный акт в течении 5 (пяти)  рабочих дней (по аналогии с пунктом 10.2.3. Договора, и при учете пункта 10.2.6. Договора).  Окончательный акт приема-передачи выполненных работ подписан Генподрядчиком 13  сентября 2019 года.  

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что Ответчик допустил  просрочку выполнения своих обязательств по сдаче результата работ Генподрядчику и  количество дней просрочки исполнения принятых по Договору обязательств Подрядчиком  составляет 357 дней (дата окончания работ (п. 6.3. Договора - 06 сентября 2018 года, период  за который неустойка не начисляется 15 (Пятнадцать) календарных дней (п. 12.2.6  Договора); 21 сентября 2018 года - предельный срок сдачи результата работ, 22 сентября  2018 года, с которой начинается исчисление неустойки.  

Письмом, а именно досудебной претензией исх. № 01\АС-ТАЛ-15718\20 от «24» марта  2020 г. (РПО № 12109945055580 и РПО № 12109945055627, получено на руки 09 апреля 2020  года и ожидает адресата в месте вручения соответственно) Истец заявил требование о  взыскании неустойки, данное требование было оставлено без ответа, в связи с чем истец  обратился в суд с настоящим иском.  

Согласно представленному истцом расчету размер ответственности Ответчика перед  Истцом по состоянию на 25.03.2020 года (на день направления претензии) составляет 2 756  997 (Два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто семь) руб. 65 коп.  

Ответчик возражал против заявленного истцом периода просрочки, заявил о том, что  работы были закончены не 13.09.2019, а 24.10.2018.  

Из материалов дела усматривается, что работы в объеме, предусмотренном договором,  были выполнены и сданы истцу по актам приемки выполненных работ от 24.08.2018, от  24.10.2018, подписанными сторонами, и соответствующими справкам по форме КС-3.  

Работы по указанным актам приняты истцом без замечаний; доказательств выполнения  каких-либо дополнительных работ после 24.10.2018 суду не представлено.  

Условиями договора не предусмотрено начисление неустойки за нарушение срока  подписания окончательного акта приема-передачи выполненных работ.  

Учитывая изложенное, суд считает, что ответчиком допущено нарушение срока  выполнения работ по договору за период с 22.09.2018 по 24.10.2018.  

Кроме того, учитывая, что по акту приемки выполненных работ № 2 от 24.10.2018  истцом были сданы работы на сумму 6 894 824 руб. 96 коп., суд считает неправомерным  начисление суммы неустойки на стоимость всех работ по договору.  

При таких обстоятельствах, произведя самостоятельно перерасчет исковых требований,  суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в размере 113 764 руб. 61  коп.  

Расходы по уплате госпошлины распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 702, 709, 711, 720 ГК РФ,  ст.ст. 65, 110, 121, 123, 137, 156, 176 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ № 2 ТРЕСТА № 16" (192019, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА  ХРУСТАЛЬНАЯ, ДОМ 21, ЛИТЕР А, СТР 1 ПОМЕЩЕНИЕ 7, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 04.02.2003, ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКИС" (105066 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА  ОЛЬХОВСКАЯ ДОМ 45СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ 4 ПОМ.120 К.4, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 19.08.2013, ИНН: 

<

***>) 113 764 (сто тринадцать тысяч семьсот  шестьдесят четыре) руб. 61 коп. неустойки, а также 1 517 (одна тысяча пятьсот семнадцать)  руб. 89 коп. расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый  арбитражный апелляционный суд.  

 Судья М.С. Новиков 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 29.06.2020 12:22:16

Кому выдана "Новиков " Михаил Сергеевич