ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А http://13aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А56-40294/2024

15 октября 2024 года

г. Санкт-Петербург

  Постановление изготовлено в полном объеме 15 октября 2024 года.  

Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Новикова Е.М.,  рассмотрев без вызова сторон апелляционные жалобы (регистрационный номер  

13АП-24439/2024, 13АП-24440/2024) общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания Велс» и саморегулируемой организации ассоциация  компаний строительного комплекса «Союзпетрострой-Стандарт» на решение  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от  17.07.2024 по делу № А56-40294/2024, принятое по иску некоммерческой  организации  

«Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах» к обществу с ограниченной ответственностью  «Строительная компания Велс» о взыскании,  

установил:

некоммерческая организация «Фонд-региональный оператор капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – истец) обратилось  в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым  заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «строительная компания  Велс» (далее – ответчик) о взыскании 756 296 руб. 77 коп. неустойки по договору от  09.01.2023 № 1/4/12-249/А/ИС/2023.  

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по правилам главы  29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  (далее – АПК РФ).  

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 26.06.2024 требования истца удовлетворены, отказано  саморегулируемой организации ассоциация компаний строительного комплекса  «Союзпетрострой-стандарт» (далее – организация) в удовлетворении ходатайства о  привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора.  

Мотивированный текст решения изготовлен 17.07.2024 ввиду подачи  ответчиком ходатайства в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 229 АПК РФ.  

Не согласившись с решением суда, ответчик и организация обратились с  апелляционными жалобами, в которых просят решение суда первой инстанции  отменить, принять новый судебный акт.  

Оспаривая судебный акт, ответчик выразил несогласие с отказом суда первой  инстанции в удовлетворении ходатайства организации о привлечении ее к участию  

в деле в качестве третьего лица, сослался на отсутствие его вины в нарушении  сроков окончания выполнения работ, указав, что при производстве работ в рамках  договора велись общие журналы работ по капитальному ремонту внутридомовых  инженерных систем ХВС, ВО, по завершению работ общие журналы работ были  переданы истцу; апеллянт отметил, что тот факт, что заказчик подписал  предоставленные акты выполненных работ только датами, указанными в КС-14, не  свидетельствует о нарушении подрядчиком сроков выполнения работ, кроме того  подписание акта приемки выполненных работ – это совместное действие сторон  договора, соответственно, подрядчик не может нести единоличную ответственность  за его не подписание. Ответчик также сослался на несоразмерность взысканной  судом первой инстанции неустойки.  

По мнению организации, суд первой инстанции неправомерно отказал в  удовлетворении ходатайства о привлечении ее к участию в деле в качестве  третьего лица, сам факт членства ответчика в организации является бесспорным  основанием для признания судебного акта по спору затрагивающим права и  обязанности организации.  

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены  Тринадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 АПК РФ с  учетом особенностей, предусмотренных статьей 272.1 АПК РФ.  

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой,  09.01.2023 между сторонами заключен договор № 1/4/12-249/А/ИС/2023  (далее – договор), в соответствии с условиями которого заказчик (истец) поручает, а  подрядчик (ответчик) принимает на себя обязательства по оказанию услуг и  выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества объекта в  соответствии с техническим заданием и проектной документацией, сметной  документацией, графиком выполнения строительно-монтажных работ,  определяющими объем и содержание работ. Заказчик после приемки рабочей  комиссией работ по капитальному ремонту общего имущества на объекте  оплачивает выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные договором.  

Согласно пункту 3.1 договора начало выполнения работ по договору: по  истечении 5 календарных дней с момента подписания акта передачи  соответствующего объекта для производства работ по капитальному ремонту  общего имущества в порядке и сроки, установленные договором, но не ранее даты,  с которой выполнение строительно-монтажных работ разрешено уполномоченным  органом (включая, но не ограничиваясь получением разрешения КГИОП, ордера  ГАТИ), в случаях необходимости получения таких разрешений для начала  выполнения работ.  

В соответствии с пунктом 3.3 договора продолжительность сроков  выполнения работ на объекте указана в приложении № 1 к договору.  

Пунктом 12.1.1 договора за нарушение подрядчиком срока выполнения видов  работ, а также технологических этапов видов работ, предусмотренных договором и  графиком выполнения работ, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере  0,1% от стоимости вида работ по объекту, сроки по которому нарушены, за каждый  день просрочки, но не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты  неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от  стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены.  

В обоснование требований истец указал, что в процессе исполнения договора  установлены факты нарушения сроков окончания выполнения работ со стороны  ответчика.  

Истец направил в адрес ответчика претензию № 2-10373/24 от 05.03.2024 с  требованием оплатить неустойку за нарушение сроков окончания выполнения  

работ. Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для  обращения истца в суд с рассматриваемыми требованиями.  

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело в порядке  главы 34 АПК РФ, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 272.1 АПК РФ,  о порядке рассмотрения апелляционных жалоб на решения арбитражного суда по  делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, проанализировав  доводы апелляционных жалоб, изучив материалы дела, оценив доказательства в  деле в их совокупности, достаточности и взаимной связи, проверив правильность  применения судом первой инстанции норм процессуального и материального права,  пришел к следующим выводам.  

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных законом.  

В силу статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу  и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и  оплатить его.  

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда  указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию  между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения  отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено  законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик  несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и  промежуточных сроков выполнения работы.  

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,  поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,  предусмотренными законом или договором.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую  должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Из вышеприведенных положений статей 329, 330 ГК РФ следует, что под  неустойкой законодатель понимает денежную сумму, являющуюся мерой  гражданско-правовой ответственности и одним из способов обеспечения  обязательств, основанием для исчисления и последующего взыскания которой  является неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, в частности  просрочка исполнения обязательства.  

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела  доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, принимая во внимание  установленный разделом 8 договора порядок сдачи результата работ, отсутствие в  материалах дела доказательств, свидетельствующих о своевременном  предъявлении ответчиком истцу результата работ по договору для их приемки,  признал правомерным начисление неустойки в порядке пункта 12.1.1 договора в  сумме 756 296 руб. 77 коп. по состоянию на 25.12.2023, в связи с чем удовлетворил  требования истца в заявленном размере.  

Вопреки позиции ответчика нарушение сроков окончания выполнения работ  по договору с учетом дат оформления подрядчиком актов КС-2 согласно условиям  

договора подтверждается доказательствами, представленными в материалы дела.  При этом, как верно отметил суд первой инстанции, общий журнал работ не  является документом, подтверждающим передачу результата работ заказчику и его  приемку последним.  

Довод ответчика относительно несоразмерности предъявленной к взысканию  неустойки отклоняется.  

В порядке статьи 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить  неустойку.  

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума  Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых  положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за  нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7) если должником является  коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно  некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход  деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному  заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 71  Постановления).  

Из пункта 77 Постановления № 7 следует, что снижение размера договорной  неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным  предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей  обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается  в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения  обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды.  

Ответчик должен обосновать явную несоразмерность неустойки  последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер  убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения  обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для  опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие  соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства. Поскольку в силу  пункта 1 статьи 330 ГК РФ по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан  доказывать причинение ему убытков, он может в опровержение заявления  ответчика о снижении неустойки представить доказательства, свидетельствующие о  том, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора,  действующего в гражданском обороте разумно и осмотрительно при сравнимых  обстоятельствах, в том числе основанные на средних показателях по рынку  (изменение процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные  виды товаров в соответствующий период, колебания валютных курсов).  

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды  кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды  могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора,  которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже  начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).  Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие  тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими  кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество  ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств  контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день  рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций,  наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными  средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 Гражданского кодекса  

Российской Федерации) сами по себе не могут служить основанием для снижения  неустойки (пункт 73 Постановления № 7).  

Вопреки статье 65 АПК РФ ответчик не представил каких-либо доказательств  несоразмерности предъявленной неустойки последствиям нарушения  обязательства.  

В рассматриваемом случае условие о договорной неустойке определено по  свободному усмотрению сторон. При подписании договора и принятии на себя  взаимных обязательств у сторон не возникало споров по поводу размера неустойки.  Согласованный в договоре размер неустойки в размере 0,1 процента от стоимости  вида работ по объекту, сроки по которому нарушены, за каждый день просрочки  является обычно применяемым в аналогичных правоотношениях хозяйствующих  субъектов и не считается чрезмерно высоким.  

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно не усмотрел оснований  для уменьшения размера взыскиваемой с ответчика неустойки в порядке статьи 333  ГК РФ.  

В силу части 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие  самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело  на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается  рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт  может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они  могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по  инициативе суда.  

Согласно части 2 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие  самостоятельных требований относительно предмета спора, пользуются  процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за  исключением права на изменение основания или предмета иска, увеличение или  уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или  заключение мирового соглашения, предъявление встречного иска, требование  принудительного исполнения судебного акта.  

Из приведенных положений законодательства следует, что третьими лицами  являются предполагаемые субъекты материальных правоотношений,  взаимосвязанных со спорным правоотношением, которые являются предметом  судебного разбирательства, привлекаемые или вступающие в начавшийся между  первоначальными сторонами процесс с целью защиты своих субъективных прав  либо охраняемых законом интересов.  

В обоснование заявленного ходатайства о вступлении в дело третьим лицом  необходимо представить доказательства того, что судебный акт, которым  заканчивается рассмотрение настоящего дела, может повлиять на права или  обязанности заявителя по отношению к одной из сторон. Целью участия третьих  лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, является  предотвращение неблагоприятных для такого лица последствий и при решении  вопроса о допуске в процесс суд обязан исходить из того, какой правовой интерес в  данном споре имеет это лицо.  

Для того чтобы быть привлеченным к участию в процессе лицо должно иметь  очевидный материальный интерес, то есть после разрешения дела судом у таких  лиц возникают, изменяются или прекращаются материально-правовые отношения с  одной из сторон.  

Таким образом, критерием привлечения к участию в деле третьих лиц  является обоснованный легитимный прямой юридический интерес, выражающийся  в том, что решение по делу может создать, изменить или прекратить субъективные  права или обязанности третьего лица по отношению к одной из сторон в споре или  

повлечь факт нарушения лично принадлежащих ему прав или возложения на него  обязанностей вынесенным решением.  

Привлечение третьего лица является правом, а не обязанностью суда,  поскольку данный вопрос разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств  каждого дела.  

Отказывая в удовлетворении ходатайства, суд первой инстанции вопреки  доводам апеллянтов правомерно указал, что организация не является участником  материально-правовых отношений между истцом и ответчиком, в связи с которыми  возник настоящий спор, в связи с чем отсутствуют основания для привлечения ее к  участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора.  

Аргументы апелляционных жалоб проверены судом второй инстанции в  полном объеме и отклонены по вышеуказанным основаниям.  

Арбитражным судом первой инстанции обстоятельства спора исследованы  всесторонне и полно, нормы материального и процессуального права применены  правильно, выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Основания  для переоценки обстоятельств, правильно установленных судом первой инстанции,  у суда апелляционной инстанции отсутствуют. Несогласие заявителей с выводами  суда, иная оценка ими фактических обстоятельств дела и иное толкование закона  не означают допущенной при рассмотрении дела ошибки и не подтверждают  существенных нарушений судом норм права, в связи с чем доводы заявителя  жалобы признаются необоснованными.  

Учитывая вышеизложенное, оснований для удовлетворения апелляционных  жалоб не имеется. Обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального  права, а содержащиеся в нем выводы – установленным по делу фактическим  обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4  статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом  апелляционной инстанции не установлено.  

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционным  жалобам подлежат распределению в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ и  в силу оставления апелляционных жалоб без удовлетворения относятся на  апеллянтов.  

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269 – 271, 272.1  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый  арбитражный апелляционный суд  

постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 17.07.2024 по делу № А56-40294/2024 оставить без изменения,  апелляционные жалобы – без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд 

Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его  принятия.  

Судья Е.М. Новикова