АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е 

(резолютивная часть)

Дело № А76-48860/2020

г. Челябинск

30 мая 2024 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Бахарева Е.А.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Воронцовой  Е.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью "КУРС", ОГРН  

<

***>, г. Магнитогорск,  

к специализированной некоммерческой организации – фонд  "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах Челябинской области", ОГРН 

<

***>,  г. Челябинск,  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора ООО  «ЭнергоСтройКом», г. Магнитогорск,  

об обязанности устранить недостатки. 

Руководствуясь ст. ст. 110,167, 168, ч.2 ст. 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "КУРС", ОГРН 

<

***>, г. Магнитогорск, удовлетворить.  

Обязать специализированную некоммерческую организацию – фонд  "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах Челябинской области", ОГРН 

<

***>,  г. Челябинск, в течение трех месяцев после вступления в законную силу  решения суда, устранить выявленные недостатки по  ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: пр. Ленина, д. 19  кор.1, а именно произвести:  

- ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и  бетону декоративным раствором с земли и лесов - 1,5 м2;  

- ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором  площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20мм (плита и  ребра балкона) - 3,66 м2;  

- очистку вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и  масляных красок с земли и лесов - 243,055 м2;  

 - шпатлевку ранее окрашенных фасадов под окраску  перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов - 243,055 м2;  

- огрунтовку ранее окрашенных фасадов под окраску  перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов - 243,055 м2;  

- окраску перхлорвиниловыми красками по подготовленной  поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов - 243,055 м2;  

- смену обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов,  карнизов) шириной до 0,4м - 4,2 м2;  

 Взыскать с специализированной некоммерческой организации –  фонд "Региональный оператор капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах Челябинской области", ОГРН  

<

***>, г. Челябинск, в пользу общества с ограниченной  ответственностью "КУРС", ОГРН 

<

***>, г. Магнитогорск,  расходы по экспертизе – 50 000 руб., в возмещение расходов по уплате  государственной пошлины – 6 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме),  путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления  арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья Е.А. Бахарева