И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Москва                                                                                  дело № А40-53179/24-151-397

07.06.2024 года.

Резолютивная часть решения объявлена 30.05.2024 года.

Решение в полном объеме изготовлено 07.06.2024 года.

 

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В.

при ведении секретарем судебного заседания Пономаревым В.А

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по исковому заявлению ООО «БЬЮФОРТ» (ОГРН: 

<

***>)

к ответчику: ООО «АТОНСТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 3 571 327 руб. 35 коп.

при участии

от истца: ФИО1 по доверенности от 15.03.2024

от ответчика: представитель не явился 

 

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании задолженности по договору №А-01-40/БР-22 от 06.04.2022 в размере 3 571 327 руб. 35 коп.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме. Надлежащим образом извещенный представитель ответчика в судебное заседание не явился, в порядке ст. 123, 156 АПК РФ, суд считает возможным провести судебное заседание в его отсутствие.

Изучив материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что «06» апреля 2022 года между Истцом (Субподрядчик) и Ответчиком (Подрядчик) был заключен Договор субподряда № А-01-40/БР-22 от 06.04.2022 г. (именуемый далее - «Договор»).

В соответствии с условиями Договора Ответчик поручил, а Истец принял на себя обязательства в счет цены Договора выполнить следующие работы:

-          автоматизация, Телемеханника и диспетчеризация камеры теплосети в т. 17;

-          автоматизация, Телемеханника и диспетчеризация камеры теплосети в т.35;

-          тепломеханические решения тепловых сетей в т.т. 35-40, 41-44 и в т.т. 14-34. Электроборудование, освещение и охранная сигнализация камер-павильонов теплосети в т.35 и т.17, на объекте «Участок линейного объекта улично-дорожной сети г. Москвы - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД». Этап 3.1 Переустройство теплосети вдоль Кутузовского проспекта», в объеме предусмотренном условиями Договора, Проектной Документацией, Рабочей Документацией, действующими строительными нормами и правилами.

В соответствии с пунктом 2.2. Договора с цена Договора составила 32 415 124 (тридцать два миллиона четыреста пятнадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля 86 копеек, в том числе НДС в размере 20 % - 5 402 520 (пять миллионов четыреста две тысячи пятьсот двадцать) рублей 81 копейка.

Ответчик в соответствии с пунктом 3.4. Договора «11» апреля 2022 г, и «23» мая 2022 г. произвел авансовые платежи на расчетный счет Истца на общую сумму 21 096 266 (двадцать один миллион девяносто шесть тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 51 копейка, в том числе НДС 20 % - 3 516 044 рубля 42 копейки (платежные поручения № 784 от 11.04.2022 г. и № 1088 от 23.05.2022 г.).

Истец указывает, что полностью выполнил и сдал, а Ответчик принял работы по Договору, о чем свидетельствуют подписанные Истцом и Ответчиком приемо-сдаточные документы:

Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 № Р0023 от ЗОЛ 1.2022г. на сумму 20 412 051,80 руб., в т.ч. НДС 20%:

-          Акт сдачи-приемки выполненных работ ф.КС-2 № 1 от 30.11.2022г. (Тепломеханические решения тепловых сетей в т. 14-34, 35-40, 41-44. Электрооборудование, освещение камеры теплосети в т.17 и камеры-павильона в т.35) на сумму 12 739 558,22 руб., в т.ч. НДС 20%.

-          Акт сдачи-приемки выполненных работ ф.КС-2 № 2 от 30.11.2022г. (Тепломеханические решения тепловых сетей в т. 14-34, 35-40, 41-44. Автоматизация. Телемеханика и диспетчеризация камеры теплосети в т. 17) на сумму 4 259 788,13 руб., в т.ч. НДС 20%.

-          Акт сдачи-приемки выполненных работ ф.КС-2 № 3 от 30.11.2022г. (Тепломеханические решения тепловых сетей в т. 14-34, 35-40, 41-44. Автоматизация, Телемеханика и диспетчеризация камеры-павильона теплосети в т.35) на сумму 3 412 705,45 руб., в т.ч. НДС 20%.

2.         Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 № Р0025 от 30.12.2022г. на сумму 2 595 543,72 руб., в т.ч. НДС 20%:

-          Акт сдачи-приемки выполненных работ ф.КС-2 № 1 от 30.12.2022г. (Тепломеханические решения тепловых сетей в т. 14-34, 35-40, 41-44. Электрооборудование, освещение камеры теплосети в т.17 и камеры-павильона в т.35) на сумму 1 538 711,41 руб., в т.ч. НДС 20%.

-          Акт сдачи-приемки выполненных работ ф.КС-2 № 2 от 30.12.2022г. (Тепломеханические решения тепловых сетей в т. 14-34, 35-40, 41-44. Автоматизация, Телемеханика и диспетчеризация камеры теплосети в т.17) на сумму 894 216,61 руб., в т.ч. НДС 20%.

-          Акт сдачи-приемки выполненных работ ф.КС-2 № 3 от 30.12.2022г. (Тепломеханические решения тепловых сетей в т. 14-34, 35-40, 41-44. Охранная сигнализация камеры-павильона теплосети в т.35) на сумму 162 615,70 руб., в т.ч. НДС 20%.

3.         Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 № Р007 от 15.02.2023г. на сумму 1 752 583,71 руб., в т.ч. НДС 20%:

-          Акт сдачи-приемки выполненных работ ф.КС-2 № 1 от 15.02.2023г. (Тепломеханические решения тепловых сетей в т. 14-34, 35-40, 41-44. Автоматизация, Телемеханика и диспетчеризация камеры-павильона в т.35) на сумму 606 673,48 руб., в т.ч. НДС 20%.

-          Акт сдачи-приемки выполненных работ ф.КС-2 № 2 от 15.02.2023г. (Тепломеханические решения тепловых сетей в т. 14-34, 35-40, 41-44. Охранная сигнализация камеры теплосети vA т. 17 и камеры-павильона теплосети в т.35) на сумму 1 008 110,83 руб., в т.ч. НДС 20%).

-          Акт сдачи-приемки выполненных работ ф.КС-2 № 3 от 15.02.2023г. (Тепломеханические решения тепловых сетей в т. 14-34, 35-40, 41-44. Охранная сигнализация камеры теплосети в т. 17) на сумму 137 799,40 руб., в т.ч. НДС 20%.

4.         Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 № 4 от 15.08.2023г. на сумму 7 654 945,63 руб., в т.ч. НДС 20%:

-          Акт сдачи-приемки выполненных работ ф.КС-2 № 4 от 15.08.2023г. (Тепломеханические решения тепловых сетей в т. 14-34, 35-40, 41-44. Электрооборудование, освещение камеры теплосети в т.17 и камеры-павильона в т.35) на сумму 7 478 573,03 руб., в т.ч. НДС 20%).

-          Акт сдачи-приемки выполненных работ ф.КС-2 № 5 от 15.08.2023г. (Тепломеханические решения тепловых сетей в т. 14-34, 35-40, 41-44. Автоматизация, Телемеханика и диспетчеризация камеры-павильона в т.35) на сумму 176 372,60 руб., в т.ч. НДС 20%.

Согласно пункта 3.8 Договора промежуточная оплата выполненных Субподрядчиком работ осуществляется на основании подписанных КС-2 и КС-3 в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующих счета и счета-фактуры.

В соответствии с пунктом 3.6. Договора сумма очередного промежуточного платежа, подлежащая выплате Субподрядчику, определяется как стоимость выполненных Субподрядчиком работ в соответствии с КС-2 и КС-3, за вычетом суммы погашения аванса, суммы неустоек и иных удержаний, предусмотренных условиями Договора.

Договором (пункт 3.15.) согласовано гарантийное удержание в размере 5% (пять процентов) от стоимости выполненных Субподрядчиком работ, включая НДС, указанной в каждой КС-2, обеспечивающее обязательства Субподрядчика по устранению недостатков работ в период их выполнения и в течение Гарантийного срока.

В соответствии с пунктом 3.15.3. Договора возврат сумм гарантийного удержания осуществляется при отсутствии неустраненных недостатков/дефектов работ в следующем порядке:

(А) 50 % (пятьдесят процентов) от общей суммы, произведенных гарантийных удержаний, возвращаются после Даты завершения выполнения работ (т.е. после 15.08.2023 г.);

(Б) 50 % (пятьдесят процентов) от общей суммы, произведенных гарантийных удержаний, возвращаются в течение 12 (двенадцати) месяцев с Даты завершения выполнения работ.

Согласно пункта 3.15.5 Договора возврат сумм гарантийных удержаний осуществляется Подрядчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента наступления соответствующего события, определенного подпунктами (А) и (Б) пункта 3.15.3 Договора, за вычетом средств, израсходованных Подрядчиком в соответствии с условиями Договора в период Гарантийного срока на устранение обнаруженных недостатков.

Общая стоимость выполненных Истцом и принятых Ответчиком работ по Договору составляет 32 415 124 (тридцать два миллиона четыреста пятнадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля 86 копеек, в том числе НДС 20% - 5 402 520 (пять миллионов четыреста две тысячи пятьсот двадцать) рублей 81 копейка.

Общая сумма гарантийных удержаний по работам, выполненным Истцом по Договору, составила (5%) - 1 620 756 рублей 25 копеек, в т.ч. НДС 20% - 270 126 (двести семьдесят тысяч сто двадцать шесть) рублей 04 копейки.

Стоимость выполненных Истцом и принятых Ответчиком работ по Договору за вычетом гарантийных удержаний составила 30 794 368 рублей 61 копейка, в том числе НДС 20% - 5 132 394 рубля 77 копеек.

Ответчик оплатил Истцу за работы, выполненные по Договору, сумму в размере 28 033 419 рублей 38 копеек, в том числе НДС 20% - 4 672 236 рублей 56 копеек (платежные поручения № 784 от 11.04.2022 г., № 1088 от 23.05.2022 г., № 130 от 01.02.2023 г. № 264 от 03.03.2023 г. и № 929 от 18.08. 2023 г.).

На сегодняшний день за Ответчиком числится общая задолженность по Договору перед Истцом в размере 3 571 327 рублей 35 копеек, в т.ч. НДС 20% - 595 221,23 (пятьсот девяносто пять тысяч двести двадцать один) рубль 23 копейки, а именно:

1. Задолженность по выполненным и принятым работам по Акту сдачи-приемки выполненных работ ф.КС-2 № 4 от 15.08.2023г., - 2 760 949 рублей 23 копейки, в т.ч. НДС 20% - 460158 (четыреста шестьдесят тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 21 копейка.

Соответствующие счет № 32 от 15.08.2023 г. на оплату работ в сумме 7 272 198 рублей 35 копеек т.ч НДС 20% — 1 275 824 рубля 27 копеек и счет-фактура № 190 от 15.08.2023 г., были получены Ответчиком в день подписания справки ф. КС-3 № 4 от 15.08.2023г., актов ф.КС-2 № 4 от 15.08.2023г., № 5 от

15.08.2023г., следовательно оплата работ по ним в соответствии с пунктом 3.8. Договора должна быть произведена не позднее «05» сентября 2023 г.

Ответчик произвел частичную оплату по счету № 32 от 15,08.2023 г. в сумме 4 972 198 (четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи сто девяносто восемь) рублей 35 копеек, в т.ч. НДС 20% - 828 699 рублей 73 копейки (платежное поручение № 929 от 18.08.2023 г.).

Истец повторно направлял Ответчику счет № 32 от 15.08.2023 г., счет-фактуру № 190 от 15.08.2023 г. и копии подписанных справки ф. КС-3 № 4 от 15.08.2023 г., актов ф.КС-2 № 4 от 15.08.2023г., № 5 от 15.08.2023г. с требованием погасить задолженность по Договору.

2. Задолженность по невозвращенному гарантийному удержанию (2,5%) - 810 378  рублей 12 копеек, в т.ч. НДС 20% -135 063 рубля 02 копейки., возврат которого в соответствии с подпунктом А) пункта 3.15.3. Договора должен был быть произведен не позднее 30 (тридцать ) календарных дней с Даты завершения выполнения работ, то есть не позднее «16» сентября 2023 года.

14.12.2023 г. Истец направил Ответчику претензию с требованием об уплате задолженности по Договору посредством почтового отправления (идентификатор 12516790212912) с описью вложения по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц в качестве места нахождения Ответчика.

В соответствии с данными сервиса отслеживания почтовых отправлений по номеру идентификатора 12516790212912 ценное письмо 14.12.2023 г. было принято в почтовом отделении, 19.12.2023 г. прибыло в место вручения, 25.01.2024 г. по истечении срока хранения было возвращено Истцу.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.

Удовлетворяя требования в полном объеме, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 307-310, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее.

Совокупность относимых, допустимых и достаточных доказательств (ст. 65, 67, 68, 71 АПК РФ) подтверждает обоснованность требований истца к ответчику о взыскании убытков в сумме 3 571 327 руб. 35 коп.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (ст. 70 АПК РФ).

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит требования истца подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 10, 12, 307-310, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 ГК РФ, ст. 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «АТОНСТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>) в пользу ООО «БЬЮФОРТ» (ОГРН: 

<

***>) задолженность в размере 3 571 327 руб. 35 коп., а также расходы на оплату госпошлины в размере 40 857 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                    К.В. Вольская