АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-11588/2022

г. Ставрополь

22 ноября 2023 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении  протокола секретарем ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по иску  администрации Шпаковского муниципального округа, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, г. Михайловск, к обществу с ограниченной ответственностью «Юг-Строй»,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, с. Юца Предгорного района, об обязании ООО  «Юг-Строй» в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу исполнить  гарантийные обязательства в рамках муниципального контракта от 29.10.2019   № 0821600002219000174_157755, выполнить гарантийное обслуживание объекта, ремонт  которого произведен в рамках исполнения муниципального контракта от 29.10.2019   № 0821600002219000174_157755; безвозмездно устранить недостатки и дефекты,  выявленные в течение гарантийного срока по муниципальному контракту от 29.10.2019   № 0821600002219000174_157755, а именно:  

- на асфальтобетонном покрытии тротуара к остановочному автопавильону на  км 2+500 (право) устранить трещины раскрытием до 10 мм;  

- на тротуаре к остановочному павильону км 2+365 (лево) устранить просадку  асфальтобетонного покрытия;  

- искусственную неровность трапециевидного профиля, совмещенную с пешеходным  переходом, устроенную в хуторе Холодногорский и искусственную неровность  волнообразного профиля, устроенную в поселке Цимлянский, привести в соответствие с  требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Искусственные неровности. Общие технические  требования. Правила применения» по геометрическим параметрам при установленной на  этих участках скорости движения 40 км/час»;  

- произвести засыпку грунтом вручную тыльной стороны бортового камня на  незаполненных участках;  

- качество лицевой поверхностей монолитного бетона укреплений привести в  соответствие с категорией А6 бетонной поверхности изделия, предусмотренной ГОСТ  13015-2003, ввиду наличия многочисленных следов опалубки, раковин, усадочных трещин,  наплывов и впадин. Устранить на трубе км 1+300, км 2+400, км 2+670 обсыпание  выполненной штукатурки, устранить разрушения бетона укрепления откосов;  

- привести толщину цинкового покрытия знаков в соответствие с требованием ГОСТ  32945-2014 - не менее 20 мкм;  

- устранить трещины и просадки на дорожном полотне км 5+220, км 5+600, км 12+700,  км 16+130, км 18+300, км 18+360, км 19+250,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать устранить в месячный срок со дня вступления в силу решения суда  выявленные в рамках исполнения гарантийных обязательств недостатки и дефекты в  выполненных работах по муниципальному контракту № 0821600002219000174_157755 от  29.10.2019:  

- на асфальтобетонном покрытии тротуара к остановочному автопавильону на  км 2+500 (право) устранить трещины раскрытием до 10 мм, на тротуаре к остановочному  павильону км 2+365 (лево) устранить просадку асфальтобетонного покрытия;  

- искусственную неровность трапециевидного профиля, совмещенную с пешеходным  переходом, устроенную в хуторе Холодногорский и искусственную неровность  волнообразного профиля, устроенную в поселке Цимлянский, привести в соответствие с  требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Искусственные неровности. Общие технические  требования. Правила применения» по геометрическим параметрам при установленной на  этих участках скорости движения 40 км/час;  

- произвести засыпку грунтом вручную тыльной стороны бортового камня на  незаполненных участках;  

- качество лицевой поверхностей монолитного бетона укреплений привести в  соответствие с категорией А6 бетонной поверхности изделия, предусмотренной ГОСТ  13015-2003, ввиду наличия многочисленных следов от опалубки, раковин, усадочных  трещин, наплывов и впадин. Устранить на трубе км 1+300, км 2+400, км 2+670 обсыпание  выполненной штукатурки, устранить разрушения бетона укрепления откосов.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юг-Строй», ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, с. Юца Предгорного района, в доход федерального  бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Поручить финансовому отделу перечислить автономной некоммерческой  организации «Центр независимых исследований и судебной экспертизы», ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Ставрополь, денежные средства в счет проведения  судебной экспертизы в размере 80 000 руб., поступившие на депозитный счет Арбитражного  суда Ставропольского края от ООО «Строй-Град» на основании платежного поручения   № 208 от 07.04.2023 по следующим реквизитам: р/с 

<

***> в АО  «ТИНЬКОФФ БАНК», к/с 30101810145250000974, ИНН банка 7710140679, БИК банка  044525974.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края  в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в  двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Н.В. Демкова