АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25

http://www.kursk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А35-9024/2022

13 января 2023 года

г. Курск

 

Резолютивная часть решения объявлена 11.01.2023.

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Бесединой А.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании материалы дела по иску

общества с ограниченной ответственностью «Электростроймонтаж» (ИНН 

<

***>) 

к акционерному обществу «Курские электрические сети» (ИНН 

<

***>) 

о взыскании задолженности по договорам подряда №176-22 ЕИ от 23.12.2021, №174-21 ЕИ от 11.01.2022, №70-21 ОЗП от 11.01.2022, №06-22 ЕИ от 18.02.2022, №181-21 ЕИ от 14.03.2022, №01-22 ОК от 15.03.2022, №09-22 ОЗП от 01.03.2022, №23-22 ЕИ от 23.03.2022, №27-22 ЕИ от 14.03.2022, №35-22 ЕИ от 25.03.2022, №36-22 ЕИ от 25.03.2022, №08-22 ЕИ от 11.04.2022, №10-22 ОЗП от 15.04.2022, №11-22 ОЗП от 15.04.2022, №12-22 ОЗП от 15.04.2022, №14-22 ОЗП от 25.04.2022, №15-22 ОЗП от 25.04.2022, №16-22 ОЗП от 25.04.2022, №17-22 ОЗП от 25.04.2022, №18-22 ОЗП от 29.04.2022, №39-22 ЕИ от 13.04.2022, №40-22 ЕИ от 18.04.2022, №42-22 ЕИ от 18.04.2022, №44-22 ЕИ от 18.04.2022, №51-22 ЕИ от 22.04.2022, №43-22 ОЗП от 11.05.2022, №50-22 ЕИ от 11.05.2022, №20-22 ЕИ от 18.05.2022, №22-22 ЕИ от 18.05.2022, №57-22 ЕИ от 19.05.2022, №58-22 ЕИ от 19.05.2022, №13-22 ОЗП от 03.06.2022, №55-22 ЕИ от 03.06.2022, №02-22 ОК от 14.06.2022, №41-22 ЕИ от 15.06.2022, №64-22 ЕИ от 15.06.2022, №65-22 ЕИ от 15.06.2022, №09-22 ЕИ от 16.06.2022, №25-22 ЕИ от 16.06.2022, №74-22 ЕИ от 16.06.2022, №22-22 ОЗП от 17.06.2022, №24-22 ОЗП от 16.06.2022, №21-22 ЕИ от 16.06.2022, №70-22 ЕИ от 16.06.2022, №68-22 ЕИ от 06.07.2022, №73-22 ЕИ от 07.07.2022, в размере 90 959 916 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 535 119 руб. 88 коп. за период с 01.10.2022 по 20.12.2022, расходов по оплате государственной пошлины.

В судебном заседании участвуют представители:

от истца: ФИО2, по доверенности от 10.01.2023,

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. 

Общество с ограниченной ответственностью «Электростроймонтаж» обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «Курские электрические сети» о взыскании задолженности по договорам подряда №01-22 ОК от 15.03.2022, №09-22 ОЗП от 01.03.2022, №23-22 ЕИ от 23.03.2022, №27-22 ЕИ от 14.03.2022, №35-22 ЕИ от 25.03.2022, №36-22 ЕИ от 25.03.2022, №08-22 ЕИ от 11.04.2022, №10-22 ОЗП от 15.04.2022, №14-22 ОЗП от 25.04.2022, №15-22 ОЗП от 24.04.2022, №16-22 ОЗП от 25.04.2022, №17-22 ОЗП от 25.04.2022, №18-22 ОЗП от 29.04.2022, №29-22 ЕИ от 13.04.2022, №40-22 ЕИ от 18.04.2022, №42-22 ЕИ от 18.04.2022, №44-22 ЕИ от 18.04.2022, №51-22 ЕИ от 22.04.2022, №13-22 ОЗП от 03.06.2022, №22-22 ОЗП от 17.06.2022, №24-22 ОЗП от 16.06.2022, №21-22 ЕИ от 16.06.2022, №70-22 ЕИ от 16.06.2022, №22-22 ЕИ от 18.05.2022, №58-22 ЕИ от 19.05.2022 в размере 61 229 589 руб. 60 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 131 910 руб. 54 коп., расходов по оплате государственной пошлины.

В процессе судебного разбирательства от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований в соответствии со ст. 49 АПК РФ, в котором просил суд взыскать с акционерного общества «Курские электрические сети» задолженность по договорам подряда №176-22 ЕИ от 23.12.2021, №174-21 ЕИ от 11.01.2022, №70-21 ОЗП от 11.01.2022, №06-22 ЕИ от 18.02.2022, №181-21 ЕИ от 14.03.2022, №01-22 ОК от 15.03.2022, №09-22 ОЗП от 01.03.2022, №23-22 ЕИ от 23.03.2022, №27-22 ЕИ от 14.03.2022, №35-22 ЕИ от 25.03.2022, №36-22 ЕИ от 25.03.2022, №08-22 ЕИ от 11.04.2022, №10-22 ОЗП от 15.04.2022, №11-22 ОЗП от 15.04.2022, №12-22 ОЗП от 15.04.2022, №14-22 ОЗП от 25.04.2022, №15- 22 ОЗП от 25.04.2022, №16-22 ОЗП от 25.04.2022, №17-22 ОЗП от 25.04.2022, №18-22 ОЗП от 29.04.2022, №39-22 ЕИ от 13.04.2022, №40-22 ЕИ от 18.04.2022, №42-22 ЕИ от 18.04.2022, №44-22 ЕИ от 18.04.2022, №51-22 ЕИ от 22.04.2022, №43-22 ОЗП от 11.05.2022, №50-22 ЕИ от 11.05.2022, №20-22 ЕИ от 18.05.2022, №22-22 ЕИ от 18.05.2022, №57-22 ЕИ от 19.05.2022, №58-22 ЕИ от 19.05.2022, №13-22 ОЗП от 03.06.2022, №55-22 ЕИ от 03.06.2022, №02-22 ОК от 14.06.2022, №41-22 ЕИ от 15.06.2022, №64-22 ЕИ от 15.06.2022, №65-22 ЕИ от 15.06.2022, №09-22 ЕИ от 16.06.2022, №25-22 ЕИ от 16.06.2022, №74-22 ЕИ от 16.06.2022, №22-22 ОЗП от 17.06.2022, №24-22 ОЗП от 16.06.2022, №21-22 ЕИ от 16.06.2022, №70-22 ЕИ от 16.06.2022, №68-22 ЕИ от 06.07.2022, №73-22 ЕИ от 07.07.2022, в размере 90 959 916 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 535 119 руб. 88 коп. за период с 01.10.2022 по 20.12.2022, расходы по оплате государственной пошлины. Уточненные требования приняты судом к производству.

Через канцелярию суда от ответчика поступил письменный отзыв на исковое заявление с ходатайством о применении ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отзыв приобщен к материалам дела, ходатайство принято судом к рассмотрению.

Соглашение сторон по фактическим обстоятельствам дела и заявленным требованиям и возражениям.     

Представитель истца поддержал заявленные требования с учетом уточнения.

Дело рассмотрено в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Электростроймонтаж» (адрес - 305007, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН 10.02.2006, ИНН 

<

***>).

Акционерное общество «Курские электрические сети» (адрес- 305035, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН 19.04.2006, ИНН 

<

***>).

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 01-22 ОК от 15.03.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка КТП и ЛЭП-10/0,4 кВ по улице 50 лет Октября в городе Курске. Заявитель ФИО3.»

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. 

В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору которая составила 11 400 000 руб. 00 коп. вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение шестидесяти дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 29.04.2022 за отчётный период с 01.04.2022 по 30.04.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 9 819 152 руб. 40 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №1 и №2 от 29.04.2022 года. Справка выполненных работ № 2 от 13.05.2022 за отчетный период с 01.05.2022 по 13.05.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 1 192 042 руб. 80 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №3 и №4 №5, №6, №7 от 13.05.2022 года. В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 11 011 195 руб. 20 коп.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 09-22 ОЗП от 01.03.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка 2 КТПН по улице Полевая 19 в городе Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору.

В соответствии со сводным сметным расчетом определена стоимость работ по договору которая вместе с НДС составила 9 700 000 руб. 00 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течении одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 90 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 31.03.2022 за отчётный период с 01.03.2022 по 31.03.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 1 226 377 руб. 20 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1, №2, №3 от 31.03.2022 года. Справка выполненных работ № 2 от 29.04.2022 за отчётный период с 01.04.2022 по 30.04.2022, стоимость выполненных работ и затрат составила 6 594 264 руб. 00 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №4, №5, №6 от 29.04.2022 года. Справка выполненных работ № 3 от 27.05.2022  за отчётный период с 01.05.2022 по 27.05.2022, стоимость выполненных работ и затрат составила 1 639 814 руб. 40 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №7, №8, №9 от 27.05.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 9 460 455 руб.60 коп.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 23-22 ЕИ от 23.03.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1520 до ГУЗ станции связи по Майскому бульвару в городе Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 1 028 080 руб. 00 коп. вместе с НДС. 

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение шестидесяти дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 31.05.2022 за отчётный период с 01.05.2022 по 31.05.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 935 372 руб. 40 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ № 1, №2, №3 от 31.05.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 27-22 ЕИ от 14.03.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТП до ГУЗ по адресу 

<

...>. 46:31:010805:849».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 259 880 руб. 00 коп. вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение шестидесяти дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 31.03.2022 за отчётный период с 14.03.2022 по 31.03.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 254 780 руб. 00 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ № 1, №2, №3, №4, №5 от 31.03.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 35-22 ЕИ от 25.03.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КЛ 0,4 кВ от ТП 702 до ВРУ жилого дома по улице Сумская 23 в городе Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 887 090  руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение девяносто дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 31.05.2022 за отчётный период с 01.05.2022 по 31.03.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 799 770 руб. 00 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ№1, №2 от 31.05.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 36-22 ЕИ от 25.03.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от ТП 816 до ГЗУ нежилого помещения по улице Харьковская 14 в городе Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 1 824 140 руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течении одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течении тридцати дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 22.04.2022 за отчётный период с 01.04.2022 по 22.04.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 1 719 946 руб. коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №1 №2 №3 от 22.04.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течении тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 08-22 ЕИ от 11.04.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от ТП 610 до ГЗУ жилого дома по улице Малых 46 в городе Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику, Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 346 430  руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение сорока пяти дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 26.05.2022 за отчётный период с 01.05.2022 по 26.05.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 279 216 руб. 00 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №1, №2, №3 от 26.05.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчетом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 10-22 ОЗП от 15.04.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка КТП по улице Сумская в городе Курске перевод нагрузок с ТП 701».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчетом определена стоимость работ по договору, которая составила 4 777 000 руб. 00 коп., вместе с НДС. Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение шестидесяти дней после подписания договора подряда. 

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 29.04.2022 за отчётный период с 15.04.2022 по 30.04.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 138 134 руб. 40 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №1 от 29.04.2022 года.

В соответствии со справкой выполненных работ № 2 от 31.05.2022 за отчётный период с 01.05.2022 по 31.05.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 4 022 094 руб. 40 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №2 №3 №4 №5 №6 №7 от 31.05.2022 года.

В соответствии со справкой выполненных работ № 3 от 14.06.2022 за отчётный период с 01.06.2022 по 14.06.2022  стоимость выполненных работ и затрат составила 474 900 руб. 00 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 от 14.06.2022 года.

Итого работ по договору выполнено на 4 635 128,40 руб. 40 коп.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчетом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 14-22 ОЗП от 25.04.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от ТП 1515 до ГЗУ школы по проспекту В. Клыкова кад. № 5146 городе Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 2 332 000 руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение сорока пяти дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 31.05.2022 за отчётный период с 01.05.2022 по 31.05.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 2 226 454 руб. 80 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ № 1, №2, №3 от 31.05.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 15-22 ОЗП от 25.04.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка КТП - 252 кВА для электроснабжения нежилого здания по адресу: Курская область Пристенский район ст. Ржава перевод нагрузок ТП 28».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 2 172 000 руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение шестидесяти дней после подписания договора подряда. 

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 01.06.2022 за отчётный период с 01.06.2022 по 30.06.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 1 967 109 руб. 60 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №1 №2 от 01.06.2022 года.

В соответствии со справкой выполненных работ № 2 от 29.07.2022 за отчётный период с 01.07.2022 по 29.07.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 93 352 руб. 80 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №3 от 29.07.2022 года.

Итого работ по договору выполнено на 2 060 462 руб. 40 коп.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 16-22 ОЗП от 25.04.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «Установка КТП, ЛЭП 10/0,4 кВ по улице Верхняя Луговая. Заявитель ФИО4.».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 2 903 000 руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение девяноста дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 22.07.2022 за отчётный период с 01.07.2022 по 22.07.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 2 840 707 руб. 20 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №1, №2, №3, №4, №5 от 22.07.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ. 

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 17-22 ОЗП от 25.04.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка КТПП, ЛЭП 10/0,4 кВ по улице Гремяченская 6 в г. Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны ыыполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 4 266 000 руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение шестидесяти дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 24.06.2022 за отчётный период с 01.06.2022 по 24.06.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 4 176 640 руб. 80 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №1, №2, №3, №4, №5 от 24.06.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 18-22 ОЗП от 29.04.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «Установка КТП, ЛЭП 10/0,4 по улице Смородиновая в городе Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 3 735 000 руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение шестидесяти дней после подписания договора подряда. 

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 28.06.2022 за отчётный период с 01.06.2022 по 28.06.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 3 486 548 руб. 40 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1, №2, №3, №4 от 28.06.2022 года.

В соответствии со справкой выполненных работ № 2 от 29.07.2022 за отчётный период с 14.07.2022 по 29.07.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 78 270 руб. 00 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №5 №6, №7 от 29.07.2022 года.

Итого работ по договору выполнено на 3 564 818 руб. 40 коп.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 39-22 ЕИ от 13.04.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от проектируемой КТП до здания по адресу Курская область Пристенский р-н станция Ржава».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчетом определена стоимость работ по договору, которая составила 917 650 руб. 00 коп., вместе с НДС. Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение шестидесяти дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 31.05.2022 за отчётный период с 01.05.2022 по 31.05.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 883 982 руб. 40 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №1, №2 от31.05.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 40-22 ЕИ от 18.04.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от ТП 136 до ГЗУ административного здания по улице Горького, 47 в городе Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 1 178 130 руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение тридцати дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 15.06.2022 за отчётный период с 01.06.2022 по 15.06.2022 стоимость выполненных, работ и затрат составила 1 081 030 руб. 80 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №1, №2, №3, №4 от 15.06.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 42-22 ЕИ от 18.04.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от ТП 795 до ГЗУ ГСК по улице Черняховского гараж57 в городе Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 730 250 руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение двадцати дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 06.05.2022 за отчётный период с 01.05.2022 по 06.05.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 607 862 руб. 40 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №1, №2, №3 от 06.05.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 44-22 ЕИ от 18.04.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от ТП 698 объекта придорожного сервиса по улице К. Воробьева в городе Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 1 319 600 руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение тридцати дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 31.05.2022 за отчётный период с 01.05.2022 по 31.05.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 1 216 213 руб. 20 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ № 1, №2, №3 от 31.05.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 51-22 ЕИ от 22.04.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от ТП 721 до ГЗУ по улице Энгельса в городе Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 735 960  руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение тридцати дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 20.05.2022 за отчётный период с 01.05.2022 по 20.05.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 721 522 руб. 80 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №1, №2, №3, №4 от 20.05.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 13-22 ОЗП от 03.06.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,6 кВ до ГЗУ нежилого здания по второму Литовскому переулку 4е к городе Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 2 055 00 руб. 00 коп., вместе с НДС. Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение девяноста дней после подписания договора подряда. 

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 30.06.2022 за отчётный период с 01.06.2022 по 30.06.2022  стоимость выполненных работ и затрат составила 465 378 руб. 40 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1 от 30.06.2022 года.

В соответствии со справкой выполненных работ № 2 от 29.07.2022 за отчётный период с 01.07.2022 по 29.07.2022, стоимость выполненных работ и затрат составила 1 464 764 руб. 40 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №2, №3, №4 от 29.07.2022 года.

Итого работ по договору выполнено на 1 930 142 руб. 40 коп.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 22-22 ОЗП от 17.06.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка КТП ЛЭП-бкВ по улице Энгельса 152 в городе Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 3 395 000 руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение шестидесяти дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 31.08.2022 за отчётный период с 01.08.2022 по 31.08.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 3 323 110  руб. 80 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ № 1, №2, №3, №4, №5 от 31.08.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 24-22 ОЗП от 16.06.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ от ТП 586 в городе Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 4 220 000 руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение сорока пяти дней после подписания договора подряда. 

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 30.06.2022 за отчётный период с 10.06.2022 по 30.06.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 1 369 410 руб. 00 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1 от 30.06.2022 года.

В соответствии со справкой выполненных работ № 2 от 29.07.2022 за отчётный период с 01.07.2022 по 29.07.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 2 767 845 руб. 60 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №2, №3, №4 от 29.07.2022 года.

Итого работ по договору выполнено на 4 137 255 руб. 60 коп.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 21-22 ЕИ от 16.06.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «Установка КТП, ЛЭП - 6/0,4 кВ по улице 3-я Агрегатная в городе Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 2 634 000 руб. 00 коп., вместе с НДС. Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение шестидесяти дней после подписания договора подряда.

В соответствии  со справкой выполненных работ № 1 от 29.07.2022 за отчётный период с 01.07.2022 по 29.07.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 2 533 536 руб. 00 коп, включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1, №2 от 29.07.2022 года.

В соответствии  со справкой выполненных работ № 2 от 15.08.2022 за отчётный период с 01.08.2022 по 15.08.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 44 179 руб. 20 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №3, №4 от 29.07.2022 года.

Итого работ по договору выполнено на 2 577 715 руб. 20 коп.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 70-22 ЕИ от 16.06.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от РУ 04кВ ТП6/2 до ГЗУ Набережная 1а г. Курчатов».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 1 347 130 руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение девяносто дней после подписания договора подряда,

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 29.07.2022 за отчётный период с 01.07.2022 по 29.07.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 1 321 369 руб. 20 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №1, №2, №3, №4 от 29.07.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 22-22 ЕИ от 18.05.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-795 до ВРУ жилого дома улица Черняховского 52а в городе Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 677 730 руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 45 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 30.06.2022 за отчётный период с 01.06.2022 по 30.06.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 598 442 руб. 40 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ № 1, №2, №3, №4 от 30.06.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 58-22 ЕИ от 19.05.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «Установка ВЛ-0,4 кВ от РП-0,4 до нежилого помещения 

<

...>».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 679 170  руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

 - Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 30 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 18.06.2022 за отчётный период с 01.06.2022 по 18.06.2022  стоимость выполненных работ и затрат составила 604 994 руб. 40 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №1, №2, №3 от 18.06.2022 года.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 11-22 ОЗП от 15.04.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. 7007 ПС «КОММУНАЛЬНАЯ» в п. Конышевка».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая, вместе с НДС, составила 7 014 000  руб. 00 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 90 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 2 от 31.05.2022 за отчётный период с 01.05.2022 по 31.05.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 2 771 848 руб. 80  коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №3, №4, №5, №6, №7 от 31.05.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 2 771 848 руб. 80 коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 12-22 ОЗП от 15.04.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф. от ТП №6 по ул. Фрунзе ул. Фестивальная в п. Пристень».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчетом определена стоимость работ по договору, которая вместе с НДС составила 2 456 591 руб. 67 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 90 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 2 от 14.07.2022 за отчётный период с 01.07.2022 по 14.07.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 582 045 руб. 60 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №3 от 14.07.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 582 045 руб. 60  коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 43-22 ОЗП от 11.05.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 38 до ГЗУ многоквартирных жилых домов ул. Можаевская - ул. Володарского в г. Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая, вместе с НДС, составила 821 610 руб. 00 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 45 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 24.06.2022 за отчётный период с 01.06.2022 по 24.06.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 741 184,80 (Семьсот сорок одна тысяча сто восемьдесят четыре ) рубля 80 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1, №2, №3, №4, №5 от 24.06.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 741 184 руб. 80 коп.,  включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 50-22 ЕИ от 11.05.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «ЛЭП-0,4 кВ от ТП 765 до ГЗУ заявителей по адресу СНТ «Сельхозработник».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 1 454 320 руб. 00 коп. вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение шестидесяти дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 31.05.2022 за отчетный период с 11.05.2022 по 31.05.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 523 258 руб. 80 80 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №1 от 31.05.2022 года. Справка выполненных работ № 2 от 30.06.2022 за отчётный период с 01.06.2022 по 30.06.2022, стоимость выполненных работ и затрат составила 844 855 руб. 20 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №2, №3, №4 от 30.06.2022 года. 

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 1 368 114 руб. 00 коп.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 57-22 ЕИ от 19.05.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «Участок ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-20 до нежилого помещения по адресу 

<

...>».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая вместе с НДС составила 337 090 руб. 00 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 30 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 31.05.2022 за отчётный период с 19.05.2022 по 31.05.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 270 325 руб. 20  коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1, №2, №3 от 31.05.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 270 325 руб. 20 коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 09-22 ЕИ от 16.06.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от сущ. 04 ТП 1050 до ГЗУ нежилого помещения по проспекту Кулакова д. 146В в г. Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая, вместе с НДС, составила 465 230 руб. 00 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 30 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 30.06.2022 за отчётный период с 01.06.2022 по 30.06.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 375 994 руб. 80 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1, №2 от 30.06.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 375 994 руб. 80  коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 25-22 ЕИ от 16.06.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от ТП - 413 до ГЗУ до общежития по улице Гоголя д. 65 в г. Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая вместе с НДС составила 2 583 000 руб. 00 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 45 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 29.07.2022 за отчётный период с 01.07.2022 по 29.07.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 1 904 367 руб. 60 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1, №2 от 29.07.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 1 904 367 руб. 60  коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 41-22 ЕИ от 15.06.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от ТП - 251 до ГЗУ административного здания по ул. Димитрова 18 в г. Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая вместе с НДС составила 352 650  руб. 00 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 30 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ №1 от 01.07.2022 за отчётный период с 01.07.2022 по 15.07.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 290 444 руб. 40  коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1, №2, №3 от 15.07.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 290 444 руб. 40 коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 64-22 ЕИ от 15.06.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от РП-9 до ГЗУ жилого дома по ул. Дубровинского 28 в г. Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая, вместе с НДС, составила 879 420 руб. 00 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 60 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 31.08.2022 за отчётный период с 01.08.2022 по 31.08.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 688 718 руб. 40 руб. 40 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ № 1, №2, №3 от 31.08.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 688 718 руб. 40 коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 65-22 ЕИ от 15 июня 2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация ТП 680 по ул. 50-лет Октября в г. Курске»

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая, вместе с НДС, составила 367 180 руб. 00 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 45 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 31.08.2022 за отчётный период с 01.08.2022 по 31.08.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 356 764 руб. 80 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1, №2  от 31.08.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 356 764 руб. 80  коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 68-22 ЕИ от 06.07.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ ТП 505 до ГЗУ жилого дома по ул. Ильича 149 А в г. Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору которая вместе с НДС составила 367 180  руб. 00 коп. 

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 45 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 29.07.2022 за отчётный период с 06.07.2022 по 29.07.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 145 867 руб. 20 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1, №2, №3 №4 от 29.07.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 145 867 руб. 20  коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 55-22 ЕИ от 03.06.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка КТП ЛЭП-6/0,4кВ по ул. Чайковского в г. Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны вВыполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая, вместе с НДС, составила 792 320 руб. 00 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 45 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 30.06.2022 за отчётный период с 03.06.2022 по 30.06.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 662 668 руб. 80 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ № 1, №2, №3, №4 от 30.06.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 662 668 руб. 80 коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 70-21 ОЗП от 11.01.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка КТП для электроснабжения жилого дома по адресу 

<

...>. 1175».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая, вместе с НДС, составила 2 513 000  руб. 00 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора,

- Срок окончание работ в течение 60 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 28.02.2022 за отчётный период с 01.02.2022 по 28.02.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 2 467 390 руб. 80 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1, №2, №3 от 28.02.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 2 467 390 руб. 80  коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 73-22 ЕИ от 07.07.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от ТП623 до ГЗУ станции технического обслуживания по улице 50 лет Октября кад№646 в г. Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая, вместе с НДС, составила 615 060 руб. 00 коп. 

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 30 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 05.08.2022 за отчётный период с 01.08.2022 по 05.08.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 505 165 руб. 20 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1, №2 от 05.08.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 505 165 руб. 20 коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчетом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 74-22 ЕИ от 16.06.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «ЛЭП 0,4 кВ от ТП442 до ГЗУ общежития по ул. Гоголя 10 в г. Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая, вместе с НДС, составила 1 118 920  руб. 00 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 30 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 15.07.2022 за отчётный период с 01.07.2022 по 15.07.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 1 096 959 руб. 60 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1, №2 от 15.07.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 1 096 959 руб. 60 коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчетом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 176-22 ЕИ от 23.12.2021 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка КТП для электроснабжения жилого дома по адресу 

<

...>. 1175. Дополнение».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая, вместе с НДС, составила 1 716 460  руб. 00 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 60 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 18.02.2022 за отчётный период с 01.02.2022 по 18.02.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 442 155 руб. 60 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №3, №4 от 18.02.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 442 155 руб. 60 коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 181-21 ЕИ от 14.03.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «Вынос участков КЛ-10 кВ ТП 54 - ТП - 348 и ПС Высокая ф.20 - РП в/ч 25741 с территории объекта недвижимого имущества по адресу 

<

...>.».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая, вместе с НДС, составила 1 692 260 руб. 00 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 45 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 27.04.2022 за отчётный период с 01.04.2022 по 27.04.2022  стоимость выполненных работ и затрат составила 1 659 075 руб. 60  коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1, №2 от 27.04.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 1 659 075 руб. 60 коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 02-22 ОК от 14.06.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «КЛ-6 кВ от проектируемой РП-6 до врезки в ф, 44Ш ПС «Волокно» в п. Ворошнево, Курского района».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая составила 13 190 000 руб. 00 коп., вместе с НДС.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 90 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 29.07.2022 за отчётный период с 01.07.2022 по 29.07.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 534 045 руб. 60 коп., включая НДС. Так же подписан Акт о приёмке выполненных работ №1 от 29.07.2022 года. Справка выполненных работ № 2 от 31.08.2022 за отчётный период с 01.08.2022 по 31.08.2022,стоимость выполненных работ и затрат составила 11 342 554 руб. 80 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №2, №3 от 31.08.2022 года. Справка выполненных работ № 3 от 12.09.2022 за отчётный период с 01.09.2022 по 12.09.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 1 026 214 руб. 80 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №4, №5, №6, №7 от 12.09.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 12 902 815 руб. 20 коп.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 06-22 ЕИ от 18.02.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «ЛЭП-0,4 кВ от ТП 398 до ГЗУ нежилого помещения по ул. Красный октябрь д.21 пом.2 в г. Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая, вместе с НДС, составила 241 000 руб. 00 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 45 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 28.02.2022 за отчётный период с 18.02.2022 по 28.02.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 195 374 руб. 40 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1 от 28.02.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 195 374 руб. 40 коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ.

Между ООО «Электростроймонтаж» (Подрядчик) и АО «Курские электрические сети» (Заказчик) заключен Договор подряда № 174-21 ЕИ от 11.01.2022 года на выполнение строительно монтажных работ по объекту «ЛЭП-0,23 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ ТП 134 до ГЗУ информационного табло по проспекту Победы 2 В г. Курске».

По настоящему договору Подрядчик взял на себя обязательство по заданию Заказчика своими силами, материалами и оборудованием (за исключением оборудования предоставленного Заказчиком) выполнить комплекс работ и сдать результаты Заказчику. Строительно монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к настоящему договору. В соответствии со сводным сметным расчётом определена стоимость работ по договору, которая, вместе с НДС, составила 309 110 руб. 00 коп.

Установлен срок выполнения работ по договору:

- Срок начала работ в течение одного дня с даты подписания настоявшего договора.

- Срок окончание работ в течение 90 дней после подписания договора подряда.

В соответствии со справкой выполненных работ № 1 от 31.01.2022 за отчётный период с 11.01.2022 по 31.01.2022 стоимость выполненных работ и затрат составила 303 045 руб. 60 коп., включая НДС. Так же подписан Акт выполненных работ №1, №2 от 31.01.2022 года.

В соответствии с указанными документами стоимость выполненных работ по договору составила 303 045 руб. 60 коп., включая НДС.

Оплата по договору подряда осуществляется безналичным расчётом в течение тридцати рабочих дней, после подписания акта приёмки выполненных работ

Как следует из искового заявления и представленных в материалы дела документов, соответствующие работы на общую сумму 90 959 916 руб. 00 коп. были выполнены ООО «Электростроймонтаж»  в полном объеме и приняты заказчиком без каких-либо замечаний. 

Однако ответчиком обязательства по своевременной и полной оплате выполненных работ исполнены не были, что явилось основанием для начисления процентов за пользование чужими денежными средствами и обращения истца в суд с настоящим иском.

Арбитражный суд считает уточненные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом. 

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В силу пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В пункте 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. 

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Факт выполнения истцом соответствующих работ подтверждается представленными в материалы дела доказательствами и не оспорен ответчиком.

Доказательств оплаты выполненных работ в полном объеме ответчиком в материалы дела не представлено.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Частью 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Ввиду изложенного, оценив представленные документы, суд приходит к выводу о том, что поскольку ответчик своевременно не оплатил задолженность, исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в части взыскания сумму задолженности в размере 90 959 916 руб. 00 коп.

Так же истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере в размере 1 535 119 руб. 88 коп. за период с 01.10.2022 по 20.12.2022.

Частью 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. 

Ввиду неоплаты ответчиком в полном объеме и в установленный срок стоимости выполненных работ, суд считает обоснованным начисление истцом в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами.

Расчет процентов проверен судом и признан верным.

Довод ответчика о применении положений статьи 333 ГК РФ при взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами не может являться основанием к уменьшению заявленной суммы процентов, поскольку в соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», к размеру процентов, взыскиваемых по пункту 1 статьи 395 ГК РФ, по общему правилу, положения статьи 333 ГК РФ не применяются.

На основании вышеизложенного, суд удовлетворяет уточненные исковые требования в полном объеме.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 6 – 10, 49, 65, 70, 71, 110, 167-170, 176, 177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «Курские электрические сети» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Электростроймонтаж» (ИНН 

<

***>) 92 495 035 руб. 88 коп., в том числе задолженность по договорам подряда №176-22 ЕИ от 23.12.2021, №174-21 ЕИ от 11.01.2022, №70-21 ОЗП от 11.01.2022, №06-22 ЕИ от 18.02.2022, №181-21 ЕИ от 14.03.2022, №01-22 ОК от 15.03.2022, №09-22 ОЗП от 01.03.2022, №23-22 ЕИ от 23.03.2022, №27-22 ЕИ от 14.03.2022, №35-22 ЕИ от 25.03.2022, №36-22 ЕИ от 25.03.2022, №08-22 ЕИ от 11.04.2022, №10-22 ОЗП от 15.04.2022, №11-22 ОЗП от 15.04.2022, №12-22 ОЗП от 15.04.2022, №14-22 ОЗП от 25.04.2022, №15-22 ОЗП от 25.04.2022, №16-22 ОЗП от 25.04.2022, №17-22 ОЗП от 25.04.2022, №18-22 ОЗП от 29.04.2022, №39-22 ЕИ от 13.04.2022, №40-22 ЕИ от 18.04.2022, №42-22 ЕИ от 18.04.2022, №44-22 ЕИ от 18.04.2022, №51-22 ЕИ от 22.04.2022, №43-22 ОЗП от 11.05.2022, №50-22 ЕИ от 11.05.2022, №20-22 ЕИ от 18.05.2022, №22-22 ЕИ от 18.05.2022, №57-22 ЕИ от 19.05.2022, №58-22 ЕИ от 19.05.2022, №13-22 ОЗП от 03.06.2022, №55-22 ЕИ от 03.06.2022, №02-22 ОК от 14.06.2022, №41-22 ЕИ от 15.06.2022, №64-22 ЕИ от 15.06.2022, №65-22 ЕИ от 15.06.2022, №09-22 ЕИ от 16.06.2022, №25-22 ЕИ от 16.06.2022, №74-22 ЕИ от 16.06.2022, №22-22 ОЗП от 17.06.2022, №24-22 ОЗП от 16.06.2022, №21-22 ЕИ от 16.06.2022, №70-22 ЕИ от 16.06.2022, №68-22 ЕИ от 06.07.2022, №73-22 ЕИ от 07.07.2022 в размере 90 959 916 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 535 119 руб. 88 коп. за период с 01.10.2022 по 20.12.2022, а также 200 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области.

 

Судья                        А.Ю. Беседина