АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А71-15668/2017

г. Ижевск

21 ноября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 20 ноября 2017 года.

Решение в полном объеме изготовлено 21 ноября 2017 года.

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Кашеваровой О.А., при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску Акционерного общества "Ижевские электрические сети", г.Ижевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "ЛанКом" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 1902095руб. 54коп., в том числе: 1046185руб. 24коп. долга, 855910руб. 30коп. неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.09.2013 №ТП-23/756, об обязании ответчика исполнить в натуре договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.09.2013 №ТП-23/756, а именно: в течение 5 дней  со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему иску подписать и передать истцу в одном экземпляре акт от 04.07.2017 №14288 об осуществлении технологического присоединения (акт о выполнении работ),

При участии представителей сторон:

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от 20.06.2017

от ответчика: не явился, уведомлен

установил:

Иск заявлен о взыскании 1902095руб. 54коп., в том числе: 1046185руб. 24коп. долга, 855910руб. 30коп. неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.09.2013 №ТП-23/756, об обязании ответчика исполнить в натуре договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.09.2013 №ТП-23/756, а именно: в течение 5 дней  со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему иску подписать и передать истцу в одном экземпляре акт от 04.07.2017 №14288 об осуществлении технологического присоединения (акт о выполнении работ).

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не направил.

Судебное заседание проведено в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации на интернет-сайте Арбитражного суда Удмуртской Республики, в порядке ст.ст. 121-123, 156 АПК РФ.

Истец требования поддержал.

Как следует из материалов дела, 20.09.2013 между истцом (сетевая организация) и ответчиком (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП-23/756 (л.д. 15-18), в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.03.2014, в соответствии с которым сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) ВРУ объекта «Жилые дома №№28,29», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 167 кВт; категория надежности II; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ., а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 1.1 договора). Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: «Жилые дома №№28,29», расположенных (которые будут располагаться) г.Ижевск, Индустриальный район, жилой район «Сельхозвыставка», микрорайон «Дарьинский» кад. №18:26:020116:30 (пункт  1.2 договора).

В соответствии с пунктами 10 раздела 3 договора, размер платы на технологическое присоединение составляет 2615463руб. 09коп., в том числе НДС 398968руб. 95коп. Внесение арендной платы на технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке и сроки:

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

Дополнительным соглашением сторон № 1 от 25.03.2014 стороны согласовали:

«11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

• 523 092,62 руб. (20 процентов платы за технологическое присоединение) - до 15.05.2014 г.;

• 348 728,41 руб.- до 31.05.2014 г.;

• 348 728,41 руб.- до 31.07.2014 г.;

• 348 728,41 руб.- до 31.08.2014 г.;

• 784 638,93 руб. (30 процентов платы за технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания Сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласования расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

• 261 546,31 руб. (10 процентов платы за технологическое присоединение) вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения».

Истец принятые на себя обязательства по договору, исполнило, акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписан ответчиком без замечаний.

По расчетам истца, сумма задолженности ответчика за технологическое присоединение  составляет 1046185руб. 24коп.

Направленное истцом претензионное письмо с требованием об оплате задолженности ответчиком оставлено без удовлетворения.

Исследовав и оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно статье 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (статья 26 Закона об электроэнергетике).

Правила N 861 определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, регламентируют процедуру технологического присоединения, устанавливают существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с подпунктом 1, 2 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике) для сетевых организаций обязательными для заключения с любым обратившимся к ней лицом являются договоры: договор об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, договор оказания услуг по передаче электроэнергии.

Обязательства предусмотренные разделом 3 договора по внесению платы за технологическое присоединение ответчиком исполнены ненадлежащим образом.

При этом в материалы дела истцом представлены документы, подтверждающие тот факт, что Акционерное общество "Ижевские электрические сети", г.Ижевск выполнило обязательства по договору в полном объеме.

При изложенных обстоятельствах, требования истца в части взыскания с ответчика суммы основного долга в размере 1046185руб. 24коп. признаны судом обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме на основании статьями 309, 310, 779, 781 Гражданского  кодекса Российской Федерации.

В связи с тем, что в предусмотренные договором сроки ответчик мероприятия по технологическому присоединению не осуществил, истцом начислена неустойка в размере 855910руб. 30коп. за период просрочки с 03.06.2016 по 01.08.2017.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Пунктом 1 статьи 330 ГК РФ установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании статьи 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

В случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня поступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ по договору за каждый день просрочки (пункт 17 договора). 

Факт просрочки истцом подтвержден документально и ответчиком не оспорен. Оснований для освобождения ответчика от ответственности в виде уплаты неустойки, исходя из обстоятельств спора и представленных по делу доказательств, не имеется.

Расчет неустойки проверен судом и признан обоснованы и соответствует условиям договора. Контррасчет неустойки ответчиком не представлен.

С учетом изложенного, требование истца о взыскании неустойки в сумме 855910руб. 30коп. является обоснованным на основании статей 329, 330, 331 ГК РФ, пункта 17 договора и подлежит удовлетворению.

Истцом также заявлено требование об обязании ответчика исполнить в натуре договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.09.2013 №ТП-23/756, а именно: в течение 5 дней  со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему иску подписать и передать истцу в одном экземпляре акт от 04.07.2017 №14288 об осуществлении технологического присоединения (акт о выполнении работ).

Согласно пункту 36 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный потребителем и сетевой организацией, является документом, подтверждающим технологическое присоединение к электрическим сетям. Указанный документ необходим для подтверждения того факта, что электроустановки в установленном законом порядке присоединены к электрическим сетям сетевой организации, а также для подтверждения параметров технологического присоединения (мощности, категории надежности, источника электроснабжения и т.д.).

Таким образом, технологическое присоединение может считаться выполненным, если имеются акты, предусмотренные пунктом 19 Правил.

Материалами дела подтверждается, что истец представил ответчику на подписание предусмотренный договором акт об осуществлении технологического присоединения, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям в порядке, предусмотренном Правилами № 861 и в объеме, предусмотренном условиями договора. Тем самым истец как исполнитель оказываемых услуг, надлежащим образом выполнил принятые на себя обязательства по указанному договору.

Акт от 04.07.2017 №14288 об осуществлении технологического присоединения не был подписан со стороны ООО «ЛанКом». 

В соответствии с абзацем шестым п.8  договора,  после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5    рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации.

После получения 24.07.2017 акта ответчик мотивированного отказа от его подписания истцу не заявил.

Факт выполнения истцом принятых в рамках договора обязательств и осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств спорного объекта к электрическим сетям АО «Ижевские электрические сети» подтвержден материалами дела. 

С учетом изложенного, суд находит требование истца об обязании в течение 5 дней  со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу подписать и передать Акционерному обществу "Ижевские электрические сети", г.Ижевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) акт от 04.07.2017 №14288 об осуществлении технологического присоединения (акт о выполнении работ) подлежащим удовлетворению.

С учетом принятого решения на основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики, 

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЛанКом" г.Ижевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества "Ижевские электрические сети", г.Ижевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1902095руб. 54коп., из которых 1046185руб. 24коп. долг, 855910руб. 30коп. неустойка, а также 38020 руб. 95 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "ЛанКом" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 5 дней  со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу подписать и передать Акционерному обществу "Ижевские электрические сети", г.Ижевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) акт от 04.07.2017 №14288 об осуществлении технологического присоединения (акт о выполнении работ).

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Пермь в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики. 

Судья                                        О.А.Кашеварова