АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

город Назрань                                                                                     Дело №А18-367/18

Резолютивная часть решения оглашена 22 октября 2018 года.          

Полный текст решения изготовлен  22 октября 2018 года.

Арбитражный суд Республики Ингушетия  в составе  судьи Гелисхановой Р.З., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шадиевым М.Х., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия, к Обществу с ограниченной ответственности «Гарант-Строй»  (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>), о взыскании пени за нарушение срока выполнения работ по государственному контракту, при участии: от истца- не явились (уведомлены), от ответчика- не явились (уведомлены),

установил:

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия обратилась в Арбитражный суд Республики Ингушетия с заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй», о взыскании пени за нарушение срока выполнения работ по государственному контракту.

Представители сторон, надлежащем образом уведомленные о времени и месте рассмотрения дела, в  судебное заседание не явились.

Судебное заседание проведено в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителя истца, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 30.06.2017 между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия (государственный заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» (подрядчик) заключен государственный контракт N 04/16-ФЦП (далее - контракт), на выполнение работ по строительству объекта «Мероприятия по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне Малгобекского района Республики Ингушетия, строительство многоквартирных жилых домов на участке площадью 110 га, прилегающем к Юго-Западной части г. Малгобек,»  

Согласно п 1.2 контракта Подрядчик обязуется выполнить все работы собственными и привлеченными силами на свой страх и риск в соответствии с проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объемов работ в срок до 24 декабря 2016г.

Результат работ по контракту считается переданным со дня представления заказчику следующих документов:

1) акт приемки завершенного строительства объекта;

2) документ, подтверждающий соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

3) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство и заказчиком;

4) документы, подтверждающие соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;

5) схема, отображающая расположение строящего объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство и заказчиком;

6) заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

При этом днем сдачи результатов работ считается день подписания сторонами акта о сдаче-приемке вышеперечисленных документов в полном объеме.

Согласно пункту 2.1 контракта стоимость работ по строительству объекта составляет 462 411 200 руб., в том числе НДС.

По состоянию на 12.02.2018г. Подрядчиком работы по строительству многоквартирных жилых домов выполнены на общую сумму 385 591 900 (83%).

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить для другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).

В соответствии с ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

В соответствии с п. 12.4 контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с пунктом 2.1. Контракта цена контракта составляет 462 411 200 рублей с учетом НДС.

Сроки выполнения работ определены разделом 3 Контракта.

Подрядчик приступает к выполнению Работ со дня заключения Контракта.

Срок выполнения Работ - течение 12 месяцев со дня заключения Контракта.

Согласно п.3.3 Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Контракта, а также Графиком производства работ.

В нарушение указанных условий, Подрядчиком в обусловленный срок работы по Контракту не выполнены.

В рамках претензионного досудебного урегулирования спора, заказчиком была направлена претензия №2667 от 22.08.2017 года в адрес подрядчика с требованиями выполнения своих договорных обязательств. Указанные требования подрядчиком оставлены без удовлетворения.

В соответствии с п. 8.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ, невыполнения либо ненадлежащего выполнения 11одрядчиком Робот по Контракту, Подрядчик выплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одного процента от цены Контракта за каждый день просрочки, но не менее 1\300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта.

Таким образом, в соответствии с ч.5 ст.34 ФЗ №44 от 05.04.2013 г., Подрядчик должен оплатить неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 280 914 825 рублей.

В соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) Подрядные строительные работы проектные и изыскательские работы предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту па выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

К государственному контракту на выполнение подрядных работ применяются правила, установленные главой 37 ГК РФ.

Так согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект или выполнить определенные иные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

На основании п. 1 ст.329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В силу ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации под неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно положениям статьи 309 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу части 8 статьи 34 Закона N 44-ФЗ штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что при подаче исковых заявлений, содержащих одновременно требования как имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачивается государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера.

Согласно пункту 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при цене иска в размере 280 914 825 рублей размер государственной пошлины составляет 200 000 рублей.

В силу части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В связи с удовлетворением исковых требований в полном объеме судебные расходы в сумме 200 000 суд относит на ответчика ООО «Гарант-Строй».

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>) в пользу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия   (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> 0601021407)  за нарушение срока выполнения работ неустойку по государственному контракту №04/16-ФЦП от 30.06.2016 г. в размере 280 914 825 рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере – 200 000 рублей.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления апелляционной инстанции.

Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия (изготовления в полном объеме).

Кассационная жалоба может быть подана в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, в течение двух месяцев при условии, что решение суда первой инстанции было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы на решение суда первой инстанции подаются через Арбитражный суд Республики Ингушетия. 

Судья                                                                                       Гелисханова Р.З.