АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-7812/24

02 августа 2024 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   30 июля 2024 г.

Полный текст решения изготовлен            02 августа 2024 г.

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи З.П. Алмазовой

при ведении протокола секретарем судебного заседания Болдыревой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела № А53-7812/24

по исковому заявлению муниципального бюджетного учреждения Парк культуры и отдыха Дружба (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Автомагистраль СК" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании,

 

при участии:

от истца: представитель ФИО1  по доверенности от 23.01.2024г.,

от ответчика: представитель не явился, 

 

установил:

муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха Дружба обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Автомагистраль СК" о взыскании неустойки по контракту от 04.05.2022 № 36 в размере 1 900 000 рублей.

Представитель истца заявленные требования поддержал, представил письменные пояснения по иску, которые судом приобщены к материалам дела.

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв не направил.

Поскольку, в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, неявка в судебное заседание представителей сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте разбирательства дела, не является препятствием для рассмотрения дела по имеющимся материалам, суд считает возможным рассмотреть исковое заявление по существу в отсутствие представителя ответчика.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд установил следующее.

Между муниципальным бюджетным учреждением парк культуры и отдыха Дружба (заказчик) и ООО «Автомагистраль СК» (подрядчик) 04 мая 2022 года заключен контракт № 36 (ИКЗ 22361610190996161010010050014399612), по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по объекту: «Благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКиО Дружба, расположенного по адресу: 

<

...> а».

В соответствии с пунктом 2.1 контракта его цена составляет 562 351 500  (пятьсот шестьдесят два миллиона триста пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 93 725 250,00 (девяносто три миллиона семьсот двадцать пять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

На основании пункта 4.1 контракта подрядчик ежемесячно (не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным) по факту выполнения работ на объекте предоставляет заказчику документы по выполненным работам, подписанные со своей стороны и со стороны лица, осуществляющего строительный контроль: справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты о приеме выполненных работ (форма КС-2), исполнительную документацию.

Пунктом 4.6 контракта установлено, что подрядчик в течение 2 рабочих дней в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ формирует с использованием единой информационной системы (далее - ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) информацию об объеме выполненной работы;

г) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона № 44-ФЗ.

Согласно подпункту 5.1.3 контракта подрядчик обязан обеспечить в процессе проведения работ систематическую уборку объекта от отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны.

Подпунктами 5.1.4 и 5.1.18 контракта на подрядчика возложены обязанности по предоставлению заказчику копии сертификатов соответствия и деклараций о соответствии или других документов, удостоверяющих качество материалов, конструкций, деталей, применяемых при производстве работ, а также ведению исполнительной документации согласно установленным требованиям нормативных документов.

В соответствии с актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 16.11.2022 № 1 на демонтажные работы (1 этап ЛСР № 02-01-01) ответчиком производилась разборка ж/б лотков, демонтаж ж/б ограждений, демонтаж конструкций для сушки белья, спортивного оборудования, демонтаж детского оборудования, демонтаж клумб, вазонов, урн, скамеек, демонтаж туалета, демонтаж модулей, демонтаж облицовки подпорных стен, демонтаж входной группы, валка деревьев, погрузка и вывоз мусора.

В нарушение условий контракта подрядчиком в подтверждение выполнения работ, заявленных в акте о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 16.11.2022 № 1, не представлена исполнительная документация: договоры с перевозчиками и получателями строительных отходов на их транспортирование, переработку, обезвреживание; журнал учета размещения строительных отходов в местах хранения и их удаления; сопроводительные талоны строительных отходов; транспортные схемы перемещения отходов; приемо-сдаточный акт лома цветных металлов и лома черных металлов; общий журнал работ.

Также, в соответствии с актами о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 16.11.2022 № 2 (конструктивные решения (1 этап ЛСР № 02-01-03)) и от 16.11.2022 № 6 (конструктивные решения 2 этап (ЛСР № 02-01-03)) ответчиком проводились земляные работы, работы по устройству подпорных стен, фундаментов, плит железобетонных, камер из бетонных блоков, чаши фонтанов, камеры фонтанов.

В нарушение условий контракта подрядчиком в подтверждение выполнения работ, заявленных в актах о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 16.11.2022 № 2 (конструктивные решения (1 этап ЛСР № 02-01-03)) и от 16.11.2022 № 6 (конструктивные решения 2 этап (ЛСР № 02-01-03)) не представлена следующая исполнительная  документация: схемы, планы земляных масс, таблицы перемещения объемов земляных масс; схемы разрытия котлованов; акты освидетельствования скрытых работ по уплотнению основания под бетонную подготовку, уплотнению грунта, поведению бетонной подготовки, армированию основания ПС, укладке бетонного основания, устройству арматурного каркаса ПС, плит, чаши и камер фонтана, укладке бетона, гидроизоляции, обратной засыпке пазух ПС, устройству щебеночного основания под ПС; не представлен общий журнал работ, журналы работ по монтажу строительных конструкций, сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений, замоноличивания монтажных стыков и узлов, выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением, журнал бетонных работ, общий журнал работ; протокол испытания образцов бетона, паспорт на применяемый щебень, сертификат качества на мастику и арматуру.

Также в соответствии с актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 16.11.2022 № 3 (вертикальная планировка (1 этап ЛСР № 02-01-06)) ответчиком проводились земляные работы по разработке грунта, обустройству насыпи и разработке плодородного грунта.

В нарушение условий контракта подрядчиком в подтверждение выполнения работ, заявленных в акте о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 16.11.2022 № 3, не представлена следующая исполнительная документация: схемы, планы земляных масс, таблицы перемещения объемов земляных масс; общий журнал работ.

Также, в соответствии с актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 16.11.2022 № 4 (система электроснабжения 1 этап ЛСР-04-01) подрядчиком проводились земляные работы по разработке грунта в траншеях, перевозке грунта, засыпке траншей и котлованов, бетонные работы по устройству фундаментов-столбов бетонных, прокладке кабеля, устройству трубопроводов из полиэтиленовых труб.

В нарушение условий контракта подрядчиком в подтверждение выполнения работ, заявленных в акте о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 16.11.2022 № 4 (система электроснабжения 1 этап ЛСР-04-01), не представлена следующая исполнительная документация: схемы, планы земляных масс, таблицы перемещения объемов земляных масс; схемы разрытия котлованов; акты освидетельствования скрытых работ на устройство щебеночного основания под фундамент опор, установку- закладных частей опор, бетонирование опор, разработку грунта в траншеях, устройство песчаной подушки под кабель, отсыпку траншеи песком, укладку сигнальной ленты, обратную засыпку траншеи с послойным уплотнением грунта; не представлен общий журнал работ, журналы работ по монтажу строительных конструкций, сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений, замоноличивания монтажных стыков и узлов, выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением, журнал бетонных работ, общий журнал работ; протокол испытания образцов бетона; материалы испытания грунта, паспорт на применяемый щебень, сертификат качества на кабельные изделия, полиэтиленовые трубы, колодцы электроснабжения, сигнальную ленту.

Также, в соответствии с актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 16.11.2022 № 5 (демонтаж облицовки подпорных стен (2 этап ЛСР № 02-01-01)) ответчиком проводились работы по демонтажу облицовки подпорных стен, погрузке и вывозу мусора.

В нарушение условий контракта подрядчиком в подтверждение выполнения работ, заявленных в акте о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 16.11.2022 № 5, не представлена исполнительная документация: договоры с перевозчиками и получателями строительных отходов на их транспортирование, переработку, обезвреживание; журнал учета размещения строительных отходов в местах хранения и их удаления; сопроводительные талоны строительных отходов; транспортные схемы перемещения отходов; общий журнал работ.

Также, в соответствии с актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 16.11.2022 № 7 малые архитектурные формы этап 3 (ЛСР № 02-01-02) ответчиком проводились работы по обустройству фонтана верхней главной лестницы и нижнего фонтана главной лестницы.

В нарушение условий контракта подрядчиком в подтверждение выполнения работ, заявленных в акте о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 16.11.2022 № 7 (малые архитектурные формы этап 3 (ЛСР № 02-01-02)), не представлена следующая исполнительная документация: схемы, планы земляных масс, таблицы перемещения объемов земляных масс; схемы разрытия котлованов; акты освидетельствования скрытых работ по уплотнению основания под бетонную подготовку, уплотнению грунта, поведению бетонной подготовки, армированию основания ПС, укладке бетонного основания, устройству арматурного каркаса ПС, плит, чаши и камер фонтана, укладке бетона, гидроизоляции, обратной засыпке пазух ПС, устройству щебеночного основания под ПС; не представлен общий журнал работ, журналы работ по монтажу строительных конструкций, сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений, замоноличивания монтажных стыков и узлов, выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением, журнал бетонных работ, общий журнал работ; протокол испытания образцов бетона, паспорт на применяемый щебень, сертификат качества на арматуру.

Также, в соответствии с актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 24.11.2022 № 8 (проезды, тротуары, площадки 1 этап (ЛСР № 02-01-02)) ответчиком проводились работы по устройству тротуаров, площадки с плиточным покрытием, устройству прослойки из дарнита в земляном полотне, плитки и бортовых камней бетонных.

В нарушение условий контракта подрядчиком в подтверждение выполнения работ, заявленных в акте о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 24.11.2022 № 8 проезды, тротуары, площадки 1 этап (ЛСР № 02-01-02), не представлена исполнительная документация: акты освидетельствования скрытых работ на уплотнение основания под устройство плиточного покрытия, устройство дарнита, щебеночного, песочного основания и ЦПС; не представлены протоколы испытания уплотнённого грунта, сертификат качества на дарнит и цемент, паспорта на щебень, бортовые камни, тротуарную плитку, протокол испытания образцов бетона, общий журнал работ, журнал бетонных работ.

Также, в соответствии с актами о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 24.11.2022 № 9 (1 этап) и от 24.11.2022 № 12 (2 этап) ответчиком проводились работы по приему отходов автомобилями-самосвалами.

В нарушение условий контракта подрядчиком в подтверждение выполнения работ, заявленных в актах о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 24.11.2022 № 9 (1 этап) и от 24.11.2022 № 12 (2 этап), не представлена исполнительная документация: договоры с перевозчиками и получателями строительных отходов на их транспортирование, переработку, обезвреживание; журнал учета размещения строительных отходов в местах хранения и их удаления; сопроводительные талоны строительных отходов; транспортные схемы перемещения отходов.

Также, в соответствии с актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 24.11.2022 № 10 (Система связи, система видеонаблюдения 1 этап ЛСР-05-01) ответчиком проводились работы по разработке траншей и грунта в траншеях, перевозке грузов автомобилями самосвалами, засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта, устройство постели при одном кабеле в траншее, трубопроводов из полиэтиленовых труб, прокладка кабелей.

В нарушение условий контракта подрядчиком в подтверждение выполнения работ, заявленных в акте приемке выполненных работ (формы КС-2) от 24.11.2022 № 10 (Система связи, система видеонаблюдения 1 этап ЛСР-05-01), не представлена следующая исполнительная документация: схемы, планы земляных масс, таблицы перемещения объемов земляных масс; схемы разрытия котлованов; акты освидетельствования скрытых работ на разработку грунта в траншеи, устройство песчаной постели, прокладку труб полиэтиленовых, кабелей, отсыпку траншеи песком, укладку сигнальной ленты, обратную засыпку траншеи и уплотнение грунта; также не представлены общий журнал работ; материалы испытания грунта, паспорт на применяемый щебень, сертификат качества на кабельные изделия, полиэтиленовые трубы, сигнальную ленту.

Также, в соответствии с актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 24.11.2022 № 11 (сети водоснабжения и водоотведения 1 этап № 11 ЛСР № 06-01) подрядчиком проводились земляные работы, разработка траншей экскаватором, разработка грунта, перевозка грузов автомобилями-самосвалами, устройство основания под трубопроводы, засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта, уплотнение грунта, устройство колодцев, укладка трубопроводов.

В нарушение условий контракта подрядчиком в подтверждение выполнения работ, заявленных в акте приемке выполненных работ (формы КС-2) от 24.11.2022 № 11 (сети водоснабжения и водоотведения 1 этап № 11 ЛСР № 06-01), не представлена следующая исполнительная документация: схемы, планы земляных масс, таблицы перемещения объемов земляных масс; схемы разрытия котлованов; акты освидетельствования скрытых работ на разработку грунта в траншей, устройство песчаной постели, укладку трубопроводов, обратную засыпку траншеи и уплотнение грунта; также не представлены общий журнал работ, материалы испытания грунта, сертификат качества на трубопроводы и фасонные части.

Также, в соответствии с актами о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 02.12.2022 № 13 (озеленение 3 этап ЛСР-02-1-03), от 09.12.2022 № 14 (озеленение 1 этап ЛСР-02-01-05), от 13.12.2024 № 15 (озеленение 1 этап ЛСР-02-01-05), от 25.01.2023 № 18 (озеленение 1 этап ЛСР-02-01-05), от 26.01.2023 № 19 (озеленение 3 этап ЛСР-02-01-03) ответчиком проводились работы по подготовке и посадке деревьев и кустарников.

В нарушение условий контракта подрядчиком в подтверждение выполнения работ, заявленных в актах о приемке выполненных работ от 02.12.2022 № 13 (озеленение 3 этап ЛСР-02-1-03), от 09.12.2022 № 14 (озеленение 1 этап ЛСР-02-01-05), от 13.12.2024 № 15 (озеленение 1 этап ЛСР-02-01-05), от 25.01.2023 № 18 (озеленение 1 этап ЛСР-02-01-05), от 26.01.2023 № 19 (озеленение 3 этап ЛСР-02-01-03), не представлена исполнительная документация: результаты испытания грунта, паспорта и карантинные свидетельства на посадочный материал.

Также, в  соответствии с актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 25.01.2023 № 16 (система электроснабжения 1 этап ЛСР-04-01) подрядчиком проводились работы по прокладке кабеля, разработке грунта, перевозке грузов автомобилями-самосвалами, засыпка траншей с перемещением грунта, устройство траншеи при кабеле в траншее, трубопроводов, основания для фундаментов щебеночного, прокладка кабелей и сигнальной ленты.

В нарушение условий контракта подрядчиком в подтверждение выполнения работ, заявленных в акте приемке выполненных работ (формы КС-2) от 25.01.2023 № 16 (система электроснабжения 1 этап ЛСР-04-01), не представлена следующая исполнительная документация: схемы, планы земляных масс, таблицы перемещения объемов земляных масс; схемы разрытия котлованов; акты освидетельствования скрытых работ на разработку грунта в траншеи, устройство песчаной постели, укладку трубопроводов, отсыпку траншеи песком, укладку сигнальной ленты, обратную засыпку траншеи и уплотнение грунта, монтаж ж/б колодцев, также не представлены общий журнал работ, материалы испытания грунта, сертификаты качества на трубопроводы и фасонные части, кабельную продукцию, паспорта на ж/б колодцы и щебень.

Также, в соответствии с актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 25.01.2023 № 17 (конструктивные решения 2 этап ЛСР-02-01-03) подрядчиком проводились работы по устройству подпорных стен, монолитных плит, бетонные работы.

В нарушение условий контракта подрядчиком в подтверждение выполнения работ, заявленных в актах о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 25.01.2023 № 17 (конструктивные решения 2 этап ЛСР-02-01-03) не представлена следующая исполнительная документация: акты освидетельствования скрытых работ по устройству основания под фундаменты, армированию основания ПС, плит ж/б плоских, стен ж/б подпорных, не представлен общий журнал работ, журналы работ по монтажу строительных конструкций, сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений, замоноличивания монтажных стыков и узлов, выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением, журнал бетонных работ, общий журнал работ; протокол испытания образцов бетона, паспорт на применяемый щебень, сертификат качества на арматуру.

Согласно пункту 8.1 контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Пунктом 8.3 контракта установлено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, в том числе за представление документов, указанных в пунктах 5.1.28-5.1.30 контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, размер штрафа устанавливается 100 000  рублей, если цена контракта превышает 100 000 000 рублей.

Поскольку, подрядчик не предоставил заказчику исполнительную документацию и не разместил в ЕИС документы о приемке, подписанные усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, истцом произведено начисление штрафа в размере 1 900 000 рублей, исходя из расчета: 100 000 рублей х 19.

Истцом в адрес ответчика направлены претензионные письма от 10.11.2022 № 242/11-22, от 11.01.2023 № 05/01-23, от 30.01.2024 № 12/01-24 о предоставлении исполнительной документации, размещении документов в ЕИС и уплате неустойки. Письмом от 20.02.2024 № 30 сообщил об отказе в удовлетворении претензий истца.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Согласно части 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (пеней, штрафом), предусмотренной законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Частью 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) установлено, что в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии частью 6 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пунктом 8.3 контракта установлено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, в том числе за представление документов, указанных в пунктах 5.1.28-5.1.30 контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, размер штрафа устанавливается 100 000  рублей, если цена контракта превышает 100 000 000 рублей.

Таким образом, для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности в виде неустойки необходимо констатировать факт ненадлежащего исполнения им своих обязательств.

Истец ссылается на то, что ответчиком, в нарушение условий контракта, не предоставлена соответствующая исполнительная документация, а потому подлежит взысканию штраф в размере 1 900 000 рублей.

В соответствии со статьей 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором, либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Обязанность подрядчика подготовить исполнительную документацию в соответствии с требованиями законодательства, строительными нормами и правилами установлена пунктами 4.1, 4.2, 5.1.3., 5.1.4,5.1.7, контракта.

Обосновывая применение ответственности к подрядчику за не предоставление исполнительной документации, истец ссылается на отсутствие возможности проверить соответствие фактически выполненных работ требованиям проекта, рабочей документации и технических регламентов, а также проверить  годность и прочность результата работ. В том числе отсутствуют акты скрытых работ.

Поскольку требование заказчика о представлении исполнительной документации, которая носит обязательный характер, подрядчиком не исполнено, начисление штрафа правомерно.

При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере  1 900 000 рублей.

Истцом уплачена государственная пошлина в размере 32 000 рублей по платежному поручению от 29.02.2024 № 48731.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика со взысканием в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 169-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Автомагистраль СК" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу муниципального бюджетного учреждения Парк культуры и отдыха Дружба (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) - 1 900 000 рублей штрафа, а также 32 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, через суд принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                               З.П. Алмазова