Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-1345/2023  «26» марта 2024 года  

 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В.  при ведении протокола судебного заседания и осуществлении его аудиозаписи  помощником судьи Ремизовой О.В., рассмотрев в судебном заседании материалы  дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СК  «ВолгоградСтройМонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  муниципальному учреждению коммунально-дорожного строительства, ремонта и  содержания (ИНН 3444070252, ОГРН 

<

***>) о признании  недействительной сделкой решение № 4630/03 от 27.12.2022г. об одностороннем  отказе от исполнения муниципального контракта № 2201 от 27.05.2022г. на  выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство дороги  по ул. им. Зины ФИО1 от примыкания к ул. Электролесовской до ул. им.  Кирова в Кировском районе г. Волгограда», о взыскании денежных средств по  муниципальному контракту № 2201 от 27.05.2022г. в размере 1 353 959 руб. 95 коп.,  штрафа по муниципальному контракту № 2201 от 27.05.2022г. в размере 5 000 руб.,  и по встречному исковому заявлению муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ИНН 3444070252, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СК  «ВолгоградСтройМонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании  неустойки (пени) за нарушение обязательства, предусмотренного муниципальным  контрактом от 27.05.2022г. № 2201 в размере 101 491 руб. 01 коп., из которых:  16 814 руб. 67 коп. – неустойка (пени) за период с 19.07.2022г. по 26.12.2022г. по 1  этапу Контракта; 83 296 руб. 58 коп. неустойки (пени) за период с 18.09.2022г. по  26.12.2022г. по 2-му этапу Контракта; 1 379 руб. 76 коп. неустойки (пени) за период  с 21.12.2022г. по 26.12.2022г. по 3-му этапу Контракта; суммы неотработанного  аванса по муниципальному контракту от 27.05.2022г. № 2201 в размере 466 945 руб.  98 коп.,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора, Департамента  городского хозяйства администрации Волгограда, Администрации Волгограда,  

при участии в судебном заседании: 

от ООО «СК «ВолгоградСтройМонтаж» – ФИО2, по доверенности,  посредством участия с использованием системы онлайн-заседания;  

от МУ «Комдорстрой» – ФИО3, по доверенности, ФИО4, по  доверенности;  

остальные лица – не явились, извещены. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

В удовлетворении первоначального иска общества с ограниченной  ответственностью «СК «ВолгоградСтройМонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) отказать.  

Встречный иск муниципального учреждения коммунально-дорожного  строительства, ремонта и содержания (ИНН 3444070252, ОГРН 

<

***>)  удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК  «ВолгоградСтройМонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и  содержания (ИНН 3444070252, ОГРН 

<

***>) 568 436 руб. 99 коп., из  которых 466 945 руб. 98 коп. неосновательного обогащения, 101 491 руб. 1 коп.  неустойки, а также 280 000 в счёт возмещения судебных издержек по проведению  судебной экспертизы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК  «ВолгоградСтройМонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 451 руб.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд  Волгоградской области.  

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.  

Судья Л.В. Напалкова