487/2024-59147(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-33799/2023

город Саратов

04 марта 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

исковые требования Государственного унитарного проектного предприятия «Институт  Саратовгражданпроект» Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  удовлетворить.  

Внести изменения в п. 3.2 государственного контракта № 0860500000223000030 от 13.06.2023  и изложить его в следующей редакции: «Дата окончания выполнения работ 30.04.2024 г.»; внести  изменения в п. 12.3 государственного контракта № 0860500000223000030 от 13.06.2023 и изложить  его в следующей редакции: «Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту, но не позднее «30» декабря 2024  г., а по гарантийным обязательствам до полного их исполнения»  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской  области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1