АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-6047/2023

г. Челябинск

23 мая 2024 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Шаяхметов И.С.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Никитиной С.Е., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Главное строительное управление»,  ИНН 7453318524,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Вега», ИНН 7453334830, о взыскании 28 902 920 руб. 90 коп., при участии в судебном заседании: 

от истца: Зырянов Д.С. – представитель, действующий на основании  доверенности от 16.01.2023, личность удостоверена паспортом  

Руководствуясь статьями 101, 110, 112, 167-171, 176, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вега»,  ИНН 7453334830, в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Главное строительное управление», ИНН 7453318524, неосновательное  обогащение по договору строительного субподряда № ГСУ-МЗ-БР-2  от 19.08.2022 в размере 7 174 612 руб. 00 коп., неустойка за нарушение срока  выполнения работ за период с 26.10.2022 по 09.11.2022 в размере 57 568 руб.  32 коп., неустойка за нарушение срока возврата неотработанного аванса за  период с 10.11.2022 по 10.11.2023 в размере 787 772 руб. 40 коп.  с продолжением начисления неустойки на сумму 7 174 612,00 руб.  за нарушение срока возврата неотработанного аванса с 11.11.2023 по дату  фактического исполнения нарушенного обязательства, штраф  за непредоставление исполнительной документации на выполненный объем  работ в размере 300 000 руб. 00 коп.; неосновательное обогащение по договору  строительного субподряда № ГСУ-МЗ-ТР-4/01 от 09.12.2021 в размере  461 655 руб. 60 коп., неустойка за нарушение срока выполнения работ  

за период с 26.10.2022 по 09.11.2022 в размере 79 126 руб. 63 коп., неустойка  за нарушение срока возврата неотработанного аванса за период с 10.11.2022  по 10.11.2023 в размере 50 689 руб.78 коп. с продолжением начисления  неустойки на сумму 461 655 руб. 60 коп. за нарушение срока возврата  неотработанного аванса с 11.11.2023 по дату фактического исполнения  нарушенного обязательства, штраф за непредоставление исполнительной  документации на выполненный объем работ в размере 300 000 руб. 00 коп.,  неосновательное обогащение по Договору строительного субподряда № ГСУ- МЗ-ТР-4/02 от 25.01.2022 в размере 1 467 732 руб. 60 коп., неустойка  за нарушение срока выполнения работ за период с 26.10.2022 по 09.11.2022  в размере 145 820 руб. 49 коп., неустойка за нарушение срока возврата  неотработанного аванса за период с 10.11.2022 по 10.11.2023 в размере  161 157 руб. 04 коп. с продолжением начисления неустойки на сумму  1 467 732 руб. 60 коп. за нарушение срока возврата неотработанного аванса  с 11.11.2023 по дату фактического исполнения нарушенного обязательства,  штраф за непредоставление исполнительной документации на выполненный  объем работ в размере 300 000 руб. 00 коп.; неосновательное обогащение по  Договору строительного субподряда № ГСУ-МЗ-ТР-4/04 от 30.03.2022  в размере 10 314 152 руб. 40 коп., неустойка за нарушение срока выполнения  работ за период с 02.10.2022 по 29.10.2022 в размере 250 984 руб. 78 коп.,  неустойка за нарушение срока возврата неотработанного аванса за период с  01.11.2022 по 10.11.2023 в размере 1 160 342 руб. 15 коп. с продолжением  начисления неустойки на сумму 10 314 152 руб. 40 коп. за нарушение срока  возврата неотработанного аванса с 11.11.2023 по дату фактического исполнения  нарушенного обязательства, штраф за непредоставление исполнительной  документации на выполненный объем работ в размере 300 000 руб. 00 коп.;  неосновательное обогащение по Договору строительного субподряда № ГСУ- МЗ-ОКТ-2 от 13.04.2022 в размере 4 627 871 руб. 20 коп., неустойка  за нарушение срока выполнения работ за период с 02.10.2022 по 29.10.2022  в размере 142 800 руб. 00 коп., неустойка за нарушение срока возврата  неотработанного аванса за период с 01.11.2022 по 10.11.2023 в размере  520 635 руб. 51 коп. с продолжением начисления неустойки на сумму  4 627 871 руб. 20 коп. за нарушение срока возврата неотработанного аванса.  С 11.11.2023 по дату фактического исполнения нарушенного обязательства,  штраф за непредоставление исполнительной документации на выполненный  объем работ в размере 300 000 руб. 00 коп., всего в размере 28 902 920 руб.  90 коп., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в  размере 167 515 руб. 00 коп.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Главное  

строительное управление», ИНН 7453318524, из средств федерального бюджета  излишне уплаченную госпошлину в размере 32 485 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи  жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает  в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Судья И.С. Шаяхметов  

В полном объеме решение суда будет изготовлено в течение десяти рабочих дней, размещено на сайте суда в сети  «Интернет» и направлено в адрес лиц, участвующих в деле по почте в установленный законом срок.