10_725763 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  23.11.2023 Дело № А62-8857/2023  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Бажановой Е.Г.  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Смоленской области" (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙ" (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>),  

третье лицо: 

Общество с ограниченной ответственностью "УК Единство" (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>)  

об обязании безвозмездно устранить недостатки, обнаруженные в пределах  гарантийного срока, допущенные при выполнении работ по договору от  01.06.2027 № 110/ЭА42а-2017/1,  

при участии в судебном заседании: от истца: не явился, извещен надлежаще; от ответчика: не явился, извещен надлежаще; от третьего лица: не явился, извещен надлежаще; 

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙ"  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в течение 30 календарных дней  после вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить  недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, допущенные при  выполнении работ по договору от 01.06.2027 № 110/ЭА42а-2017/1 на  оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего  

имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Смоленская  область, г. Ярцево, ул. К.Маркса, д.9, согласно акту обследования от  07.12.2021, а именно:  

- устранить разрушение карниза над входом в библиотеку; - устранить места отслоения штукатурного слоя над окнами; 

- устранить места отслоения штукатурного слоя около входов в подъезд  на цоколе;  

- устранить частичное отслоение краски газовой трубы; 

- устранить отслоения штукатурного слоя над 6-ым подъездом на  карнизе;  

- устранить места ржавчины металлических дверей;  

- устранить места отслоения окрашенного слоя металлических  пожарных лестниц.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "ПРОМСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу  Некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Смоленской области" (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>) 6000 руб. в возмещение судебных расходов.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по  письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется  для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при  условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья Е.Г. Бажанова