100230_2503214  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

25 января 2023 года Дело № А74-8082/2022 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Г.И.Субач при ведении  протокола секретарём судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению некоммерческой организации  «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное  управление 9» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об устранении недостатков работ.  

Руководствуясь статьями 110, 166 – 170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск. 

Обязать общество с ограниченной ответственной «Строительное управление 9» в целях  устранения выявленных недостатков по договору подряда от 27.06.2019 № 513-69д, указанных в  актах осмотра общедомового имущества от 01.09.2020 № 513-246/а, от 22.09.2020 № 513-292/а, с  учётом дефектной ведомости объёма работ на ремонт лотковой кровли многоквартирного дома,  расположенного по адресу: 

<

...>, в срок один месяц  со дня вступления настоящего решения в законную силу выполнить следующие работы:  

 № п\п 

Наименование работ  

Ед. из. м. 

Кол-во 

1 

2 

3 

4 

Демонтажные и ремонтно-строительные работы 

1 

Разборка покрытий водосборного лотка из 

гидроизоляционного материала R-COMPOSIT-(FROST)  с очисткой щетками  

м2 

536,7 

 

Обеспыливание поверхности 

м2 

536,7 

 

Разборка фартука из оцинкованной стали 

деформационных швов в водосборном лотке с  сохранением материала  

м2 

90,0 

 

Строительные работы 

2 

Ремонт примыканий вокруг водоприёмных воронок  

шт. 

45 

 

Заделка вокруг воронки цементным раствором М100  

м3 

0,384 

 

Огрунтовка вокруг воронки битумной эмульсией 

м2 

7,68 

 

Укладка геотекстильного полотна (по размерам  огрунтованного участка и отверстию воронки)  

м2 

7,68 

 

Пропитка геотекстильного вкладыша битумной  эмульсией за 2 раза  

м2 

7,68 

3 

Ремонт стыка кровельной панели и водосборного лотка  

 

Зачеканивание швов цементно-песчаным раствором  М100  

п.м. 

831,1 

 

Заделка стыка кровельной и лотковой (водосборной)  панели герметиком  

п.м. 

831,1 

4 

Ремонт водосборного лотка 

 

Грунтовка битумная эмульсия для водосборного лотка 

м2 

536,7  

 

Оклейка (водосборного лотка) из наплавляемого  материала Унифлекс ЭКП-4,2 мм  

м2 

536,7  

5 

Установка фартука из существующего материала  деформационных швов в водосборном лотке  

м2 

90,0 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственной «Строительное управление 9» в  пользу некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта  многоквартирных домов» 6 000 (шесть тысяч) рублей расходов по уплате государственной  пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия. Жалоба подаётся через  Арбитражный суд Республики Хакасия.  

Судья Г.И.Субач  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 21.11.2022 1:31:00Кому выдана Субач Галина Ивановна