12_15056125 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-248759/15-117-2075

г. Москва

31 января 2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи – Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1 рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению 

Акционерного общества "КОМПАКТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Объединенная дирекция по  проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых  технологий (Инновационного центра "Сколково") (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

третьи лица: 1) Публичное акционерное общество "Сбербанк", 2) Акционерное  общество "ЮниКредит Банк", 3) Межрегиональный коммерческий банк развития связи  и информатики (Публичное акционерное общество)  

о взыскании 714 421 009 руб. 74 коп. в заседании приняли участие: 

от истца: ФИО2 (доверенность от 30 декабря 2016 г.), ФИО3 (доверенность от 30 декабря 2016 г.), ФИО4 (доверенность от 30 декабря  2016 г.),  

от ответчика: ФИО5 (доверенность № 84 от 18 августа 2016 г.),  ФИО6 (доверенность № 114 от 13 октября 2016 г.),  

от третьего лица: 1) ФИО7 (доверенность № 115-Д от 25 февраля 2016  г.), ФИО8 (доверенность № 520-Д от 12 августа 2016 г.), 2)не явился,  уведомлен судом надлежащим образом, 3) ФИО9 (доверенность № 755 от 14  декабря 2016 г.),  

РЕШИЛ:

Признать незаконным односторонний отказ Общества с ограниченной  ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству  Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Инновационного центра  «Сколково»)» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) от исполнения договора  подряда на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных  работ, выполнение пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию объекта  «Технопарк», 1 этап строительства (здания 3А, 3В, 3С) № 50104/05-05003/14-2013 от  11.10.2013 года в соответствии с Уведомлением от 19.10.2015 года исх. № 7158-ОДПС- ИП, заявленного на основании п. 24.2 данного договора.  

Переквалифицировать основание одностороннего отказа от исполнения  договора со ссылкой на статью 717 Гражданского кодекса Российской Федерации и  применить последствия расторжения Договора подряда на разработку рабочей  документации, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение пуско- 

наладочных работ и ввод в эксплуатацию объекта «Технопарк», 1 этап строительства  (здания 3А, 3В, 3С) № 50104/05-05003/14-2013 от 11.10.2013 года, предусмотренные  статьей 717 ГК РФ.  

Признать прекращенным обязательство Акционерного общества "КОМПАКТ"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по возврату Общества с ограниченной  ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству  Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Инновационного центра  «Сколково»)» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) авансового платежа в размере  3.061.625.136 (три миллиарда шестьдесят один миллион шестьсот двадцать пять тысяч  сто тридцать шесть) руб. 05 коп. по договору подряда на разработку рабочей  документации, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение пуско- наладочных работ и ввод в эксплуатацию объекта «Технопарк», 1 этап строительства  (здания 3А, 3В, 3С) № 50104/05-05003/14-2013 от 11.10.2013 г.  

Признать незаконными действия Общества с ограниченной ответственностью  «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и  коммерциализации новых технологий (Инновационного центра «Сколково»)» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) по предъявлению ПАО АКБ «Связь-банк»  требования № 8695-ОДПС-ИП от 14.12.2015 года о выплате денежных средств в  размере 370068069,92 руб. по Банковской гарантии № 18-15/3955 от 13.08.2015 г.;  

Признать незаконными действия Общества с ограниченной ответственностью  «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и  коммерциализации новых технологий (Инновационного центра «Сколково»)» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) по предъявлению АО «ЮниКредит Банк»  требования № 8694-ОДПС-ИП от 14.12.2015 года о выплате денежных средств в  размере 350.000.000 руб. по Банковской гарантии № SP/OGR/5140336 от 14.10.2014 г.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная  дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации  новых технологий (Инновационного центра «Сколково»)» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу Акционерного общества "КОМПАКТ" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) сумму фактических расходов в размере 223.437.529 (двести двадцать  три миллиона четыреста тридцать семь тысяч пятьсот двадцать девять) руб. 52 коп. в  связи с досрочным прекращением Договора подряда на разработку рабочей  документации, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение пуско- наладочных работ и ввод в эксплуатацию объекта «Технопарк», 1 этап строительства  (здания 3А, 3В, 3С) № 50104/05-05003/14-2013 от 11.10.2013 г. и расходы по оплате  государственной пошлины в размере 230.000 (двести тридцать тысяч) руб.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в  течении одного месяца со даты его принятия.  

Судья: А.С.Чадов