АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А39-2479/2021

город Саранск

09 июля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 июля 2021 года.

Решение в полном объеме изготовлено 09 июля 2021 года.

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "СДС-Управление строительства"

к обществу с ограниченной ответственностью "Стройэнергокомплект"

о взыскании 3171118 рублей 84 копеек,

при участии представителей:

от истца: ФИО2, по доверенности №04-12-2020 от 04.12.2020 г., диплом №101318 0867827 от 28.06.2017 г.,

от ответчика: ФИО3, по доверенности от 14.05.2021 г., диплом ЭВ №689456 от 26.06.1995 г.,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью "СДС-Управление строительства" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Стройэнергокомплект" о взыскании 4842618руб. 34коп. неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ по договорам подряда.

Ответчик исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве на иск, заявил о пропуске истцом срока исковой давности.

Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика неустойку в размере 3171118руб. 84коп.

Из материалов дела судом установлено, что между истцом (Заказчиком) и ответчиком (Подрядчиком) заключены следующие договоры подряда:

№ 03-06/17 от 01.06.2017 (далее - Договор №1) на выполнение работ по устройству системы кондиционирования на объекте: «Строительство гостинично-жилого комплекса «Тавла» г. Саранск, в том числе 380 номеров категории «три звезды» и 470 номеров категории «четыре звезды», а именно: 1 (Одно) нежилое здание (Гостиница 4*, Корпус №2, 16 этажей) Комплекса (далее – Объект 1);

№ 29-ПНР/02-01 от 29.08.2017 (далее - Договор №2) на выполнение пусконаладочных работ автоматизации вентиляционных систем на Объекте 1;

№ 29-АВС/02-01 от 29.08.2017 на выполнение работ по автоматизации вентиляционных систем на Объекте 1;

№ 29-О/02-01 от 29.08.2017 (далее - Договор №4) на выполнение работ по устройству системы отопления на объекте: «Строительство гостинично-жнлого комплекса «Тавла» г. Саранск, в том числе 380 номеров категории «три звезды» и 470 номеров категории «четыре звезды», а именно: 1 (один ) жилой дом (№2, корп.А) Комплекса (далее – Объект 2);

№ 29-ЭЛ/02-01 от 29.08.2017 (далее - Договор №5) на выполнении работ по устройству системы электроснабжения на Объекте 2;

№ 01-06/17 от 01.06.2017 (далее - Договор №6) на выполнение работ по устройству системы электроснабжения на Объекте 1;

№ 04-06/17 от 01.06.2017 (далее - Договор №7), на выполнение работ по устройству системы электроснабжения на Объекте 1;

№ 02-06/17 от 01.06.2017 (далее - Договор №8) на выполнение работ по устройству системы отопления на Объекте 1;

№ 472/02-01 от 13.10.2017 (далее - Договор №9) на выполнение работ по пробивке отверстий для инженерных коммуникаций на Объекте 1;

№ 502/02-01 10.07.2017 (далее - Договор №10) на выполнение работ на объекте «Крытый футбольный манеж, г. Саранск» (далее – Объект 3);

№ 2016/02-01 от 01.08.2016 в редакции дополнительного соглашения №1 от 30.09.2017 (далее - Договор №11) на выполнение работ по строительству внутриплощадочных сетей водоотведения (хозяйственно-бытовая и ливневая канализации) с устройством прифундаментного дренажа на Объекте 1;

По Договору №1 ответчик выполнил, а истец принял работы на общую сумму 3193008руб., что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №2 от 31.08.2017 на сумму 2250688руб.,  №3 от 29.06.23018 на сумму 942320руб.

По Договору №2 ответчик выполнил, а истец принял работы на общую сумму 477663руб., что подтверждается справкой КС-3 №1 от 29.06.2018.

По Договору №3 ответчик выполнил, а истец принял работы на общую сумму 267433руб., что подтверждается справкой КС-3 №1 от 31.07.2018.

По Договору №3 ответчик выполнил, а истец принял работы на общую сумму 267433руб., что подтверждается справкой КС-3 №1 от 31.07.2018.

По Договору №4 ответчик выполнил, а истец принял работы на общую сумму 16779444руб., что подтверждается справками КС-3 №1 от 31.10.2017 на сумму 6763152руб., №2 от 30.11.2017 на сумму 912457руб., №4 от 29.06.2018 на сумму 8572075руб., №5 от 31.07.2018 на сумму 531760руб.

По Договору №5 ответчик выполнил, а истец принял работы на общую сумму 10296841руб., что подтверждается справками КС-3 №1 от 31.10.2017 на сумму 402539руб., №2 от 30.11.2017 на сумму 503049руб., №4 от 17.05.2018 на сумму 1791241руб., №5 от 29.06.2018 на сумму 1891781руб., №6 от 29.06.2018 на сумму 1358123руб., №7 от 13.07.2018 на сумму 800773руб., №8 от 31.07.2018 на сумму 1108060руб., №9 от 10.08.2018 на сумму 1394537руб., №10 от 17.08.2018 на сумму 1046738руб.

По Договору №6 ответчик выполнил, а истец принял работы на общую сумму 14336408руб., что подтверждается справками КС-3 №1 от 01.07.2017 на сумму 152621руб., №2 от 31.07.2017 на сумму 2659814руб., №3 от 31.08.2017 на сумму 2280246руб., №4 от 31.10.2017 на сумму 471542руб., №5 от 09.01.2018  на сумму 1166215руб., №6 от 09.02.2018 на сумму 1777406руб., №9 от 17.08.2018 на сумму 5243419руб., №10 от 17.08.2018 на сумму 585145руб.

По Договору №7 ответчик выполнил, а истец принял работы на общую сумму 14003042руб., что подтверждается справками КС-3 №1 от 31.07.2017 на сумму 543225руб., №2 от 31.08.2017 на сумму 7948671руб., №3 от 30.11.2017 на сумму 670231руб., №4 от 13.06.2018 на сумму 1386564руб., №5 от 29.06.2018  на сумму 1884620руб., №6 от 20.07.2018 на сумму 1230853руб., №7 от 27.07.2018  на сумму 338878руб.

По Договору №8 ответчик выполнил, а истец принял работы на общую сумму 18343415руб., что подтверждается справками КС-3 №1 от 30.06.2017 на сумму 524302руб., №2 от 31.07.2017 на сумму 4061021руб., №3 от 31.08.2017 на сумму 3079813руб., №4 от 31.10.2017 на сумму 2510141руб., №5 от 09.01.2018  на сумму 7433036руб., №6 от 29.06.2018  на сумму 645206руб., №7 от 17.08.2018  на сумму 89896руб.

По Договору №9 ответчик выполнил, а истец принял работы на общую сумму 187199руб., что подтверждается справкой КС-3 №1 от 28.08.2018.

По Договору №10 ответчик выполнил, а истец принял работы на общую сумму 5377985руб., что подтверждается справкой КС-3 №1 от 29.06.2018.

По Договору №11 ответчик выполнил, а истец принял работы на общую сумму 4849322руб., что подтверждается справками КС-3 №1 от 29.06.2018 на сумму 4443394руб., №2 от 31.07.2018 на сумму 405928руб.

Срок окончания выполнения работ по Договору №1 – 15.11.2017, по Договору №2 – 01.12.2017, по Договору №3 – 01.11.2017, по Договору №4 – 01.10.2017, по Договору №5 – 15.10.2017, по Договору №6 – 30.11.2017, по Договору №7 – 15.11.2017, по Договору №8 – 30.11.2017, по Договору №9 – 15.12.2017, по Договору №10 – 30.12.2017, по Договору №11 – 15.09.2017.

Согласно пункту 7.1. договоров №№ 1 – 9 в случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства.

В соответствии с пунктом 7.1 договоров №10, №11 в случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки.

За нарушение срока окончания выполнения работ по вышеуказанным договорам истец начислил ответчику неустойку по Договору №1 в размере 47 116руб. (5% от 942320руб.), по Договору №2 в размере 23883руб. 15коп. (5% от 477663руб.), по Договору №3 в размере 13371руб. 65коп. (5% от 267433руб.), по Договору №4 в размере 455191руб. (5% от 9103835руб.), по Договору №5 в размере 469562руб. 65коп. (5% от 9391253руб.), по Договору №6 в размере 380298руб. 50коп. (5% от 7605970руб.), по Договору №7 в размере 242045руб. 75коп. (5% от 4840915руб.), по Договору №8 в размере 36755руб. 10коп. (5% от 735102руб.), по Договору №9 в размере 37627руб., по Договору №10 за период с 08.02.2018 по 31.07.2018 в размере 763673руб. 87коп., по Договору №11 за период с 08.02.2018 по 31.07.2018 в размере 701593руб. 42коп.

Направленная истцом в адрес ответчика претензия от 20.11.2020 с требованием выплатить неустойку по вышеуказанным договорам осталась последним без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с рассматриваемым иском.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.

Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (пункт 2 статьи 330 ГК РФ).

Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 1 статьи 401 ГК РФ).

Ответчик заявил о пропуске истцом срока исковой давности.

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Кодекса (статья 196 ГК РФ).

Согласно пунктам 1, 2 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Согласно пункту 7.1 договоров за нарушение сроков выполнения работ предусмотрена ответственность Подрядчика в виде неустойки за каждый день просрочки.

Таким образом, каждый день за период с момента нарушения обязательства до момента исполнения обязательства на стороне Подрядчика возникало обязательство по уплате неустойки.

Пунктом 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" (далее - Постановление N 43) предусмотрено, что срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки (статья 330 ГК РФ) или процентов, подлежащих уплате по правилам статьи 395 ГК РФ, исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки.

Трехлетний срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки, ежедневно начисляемой за просрочку исполнения обязательства, подлежит исчислению с учетом следующего. Срок исковой давности по требованиям об уплате периодического платежа должен исчисляться отдельно по каждому просроченному платежу за соответствующий период. Поэтому, если основное обязательство было исполнено с просрочкой, но до истечения срока исковой давности, неустойка подлежит взысканию с момента нарушения исполнения основного обязательства до момента его исполнения за период в пределах трех лет, предшествующих дате предъявления иска о взыскании неустойки. За период, который входит в трехлетний срок, предшествующий дате предъявления иска о взыскании неустойки, срок исковой давности нельзя признать истекшим.

В соответствии с пунктом 3 статьи 202 ГК РФ течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному претензионному порядку. В этих случаях течение исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения этой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры (пункт 16 Постановления N 43).

По смыслу указанной нормы соблюдение сторонами предусмотренного законом претензионного порядка в срок исковой давности не засчитывается, фактически продлевая его на этот период времени.

В части 5 статьи 4 АПК РФ установлен обязательный досудебный порядок по гражданско-правовым спорам денежного характера, срок рассмотрения претензии установлен в 30 дней.

Истец направил  исковое заявление в суд 10 марта 2021 года.

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ по договорам следует исчислять с 09.02.2018. 

Кроме того, возражая относительно заявленных требований, ответчик указывает, что просрочка выполнения работ произошла по вине истца вследствие несоответствий проектной документации, несвоевременным предоставлением Заказчиком строительной готовности на объекте для выполнения Подрядчиком предусмотренных спорными договорами работ, несвоевременным предоставлением оборудования для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, о чем Подрядчик уведомлял Заказчика в письмах №153 от 18.12.2017, №240 от 12.01.2018, №239 от 12.01.2018,  №4 от 16.01.2018, №6 от 19.01.2018, №18 от 23.01.2018, №20 от 29.01.2018, №83 от 16.05.2018, №219 от 27.11.2017, №194 от 03.11.2018, №81 от 13.06.2017,  №82 от 13.06.2017, №225 от 07.12.2017, №3 от 16.01.2018, №218 от 25.11.2017,  №219 от 27.11.2017,  №88 от 30.05.2018, №82 от 13.06.2017, №206 от 09.11.2017,  №225 от 07.12.2017, №226 от 07.12.2017, указывая на приостановление работ на объекте.

Как установлено статьей 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, а именно непредоставление технической документации, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Статья 716 ГК РФ обязывает подрядчика немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу.

В силу части 1 статьи 404 ГК РФ, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

Согласно части 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Из анализа представленных ответчиком в материалы дела писем следует, что Подрядчик уведомлял Заказчика о приостановлении работ на объектах по причинам, не зависящим от Подрядчика. Вместе с тем, документального подтверждения обоснованности приостановления работ по спорным договорам по причинам, указанным в вышеперечисленных письмах, доказательств, свидетельствующих об устранении Заказчиком обстоятельств, препятствующих выполнению работ Подрядчиком, ответчиком не представлено (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Кроме того, в отсутствии доказательств возобновления работ на объекте после их приостановления не позволяет суду достоверно исключить период приостановления работ из срока их выполнения, установленного спорными договорами.

Решение суда не может основываться на предположениях.

При указанных обстоятельствах у суда нет оснований для применения части 1 статьи 404, части 3 статьи 405 ГК РФ.

Кроме того, ответчик указывает, что истец неправомерно начисляет неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В отношении Объекта 1 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №13ru 13301000-33-2018 от 21.03.2018

В отношении Объекта 2 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №13ru 13301000-59-2018 от 31.05.2018.

В отношении Объекта 3 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №13ru 13301000-30-2018 от 15.03.2018.

В силу части 1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного объекта проектной документации.

Принимая во внимание представленные в материалы дела разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в отсутствии доказательств выполнения ответчиком каких либо работ на Объектах после ввода их в эксплуатацию, суд приходит к выводу, что акты КС-2 и справки КС-3, сами по себе не свидетельствуют о фактическом окончании выполнения работ на дату, проставленную в данных документах, в связи с чем, неустойку за просрочку выполнения работ в рассматриваемом случае правомерно начислять до даты ввода объектов в эксплуатацию.

Ответчиком заявлено ходатайство об уменьшении размера начисленной неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 333 ГК РФ уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Согласно разъяснениям, данным Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, в пункте 73 постановления от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Пунктом 77 постановления N 7 разъяснено, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Следовательно, должник обязан представить доказательства явной несоразмерности договорной неустойки, а также того, что кредитор может за счет неустойки получить необоснованный размер выгоды, поскольку в предпринимательских отношениях сторон презюмируется соразмерность установленной сторонами соглашения неустойки последствиям нарушения обязательства.

Между тем доказательств явной несоразмерности заявленной к взысканию неустойки последствиям нарушения обязательств не представлено.

Величина санкции, как на Заказчика, так и на Подрядчика в размере 0,1% согласована сторонами при заключении договоров, а в гражданско-правовых отношениях действует принцип свободы договора и определения его условий по усмотрению сторон (статья 421 ГК РФ).

Кроме того, размер неустойки по договорам №№ 1- 9 уже ограничен пятью процентами от суммы просроченного обязательства.

На основании изложенного, требование истца о взыскании с ответчика неустойки подлежит удовлетворению по Договору №1 за период с 09.02.2018 по 21.03.2018 в размере 39577руб. 44коп., по Договору №2 за период с 09.02.2018 по 21.03.2018 в размере 20061руб. 85коп., по Договору №3 за период с 09.02.2018 по 21.03.2018 в размере 11232руб. 19коп., по Договору №4 за период с 09.02.2018 по 31.05.2018 в размере 455191руб. (5% от 9103835руб.), по Договору №5 за период с 09.02.2018 по 31.05.2018 в размере 469562руб. 65коп. (5% от 9391253руб.), по Договору №6 за период с 09.02.2018 по 21.03.2018 в размере 238971руб. 12коп.,  по Договору №7 за период с 09.02.2018 по 21.03.2018  в размере 203318руб. 43коп., по Договору №8 за период с 09.02.2018 по 21.03.2018 в размере 30874руб. 28коп., по Договору №9 за период с 09.02.2018 по 21.03.2018  в размере 7862руб.36коп., по Договору №10 за период с 09.02.2018 по 15.03.2018 в размере 188229руб. 48коп., по Договору №11 за период с 09.02.2018 по 21.03.2018 в размере 198822руб. 20коп.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных уточненных исковых требований и подлежат возмещению истцу в сумме 22836руб.

Излишне уплаченная по платежному поручению №54 от 24.03.2021 госпошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета в сумме 8357руб. на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройэнергокомплект" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СДС-Управление строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 1873931руб. 05коп., расходы на оплату госпошлины 36048руб.

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью "СДС-Управление строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  их федерального бюджета излишне уплаченную платежным поручением №54 от 24.03.2021 госпошлину в сумме 8357руб.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                          Ю.А. Кшняйкин