АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-122347/24-14-866

г. Москва

25 октября 2024 года

Резолютивная часть объявлена 08 октября 2024 г.  Дата изготовления решения в полном объеме 25 октября 2024 г.  

Арбитражный суд города Москвы в составе: председательствующего - судьи Лихачевой О.В. Судьей единолично 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ушаковой Ю.Ю., с  использованием средств аудиозаписи  

рассмотрел дело по исковому заявлению ПАО НПО "ИСКРА" (ОГРН 

<

***>)  к ответчику ООО "НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ" (ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 4 318 440 руб. 

в судебное заседание явились: 

от ответчика – ФИО1 по доверенности от 09.01.2024г.  судебное заседание не явились:  

от истца – извещен; 

УСТАНОВИЛ:

ПАО НПО «Искра» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с  исковым заявлением к ООО «Нефтегазинжиниринг» о взыскании суммы  задолженности по договору от 10.07.2020 г. № НГИ032-2020-РГА-02-04 в размере 4 200  000 руб., пени за период с 01.01.2024 г. по 20.05.2024 г. в размере 118 440 руб., пени за  период с 21.05.2024 г. по день фактического исполнения обязательства.  

Истец, извещённый надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ, своих  представителей в заседание суда первой инстанции не направил.  

Представитель ответчика огласил отзыв. 

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность  каждого доказательства в отдельности, а также достаточность доказательств в их  совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что  требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

Как установлено судом и следует из материалов дела, 10.07.2020 между ПАО  НПО «Искра» (Поставщик) и ООО «Нефтегазинжиниринг» (Покупатель) был заключен  договор № НГИ032-2020-РГА-02-04 (далее - Договор), согласно которому Поставщик  

обязуется изготовить, а Покупатель принять и оплатить Товар для объекта  “Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь. ШМР и ПНР”  (далее - Товар), в соответствии со спецификацией (Приложение № 2) к  дополнительному соглашению № 4 от 10.08.2021 к Договору от 10.07.2020 № НГИ032- 2020-РГА-02-04.  

В рамках заключенного Договора ПАО НПО «Искра» обязалось выполнить  пуско-наладочные работы Компрессоров центробежных НЦ16ДКС/100-03 зав. №№ 1,2  ДВС (далее - Работы) на сумму 4 200 000 руб., с учетом НДС 20%.  

В соответствии с условиями договора ПАО НПО «Искра» выполнило пусконаладочные работы в полном объеме.  

29.06.2023 исх. № 903-338-ор-З ПАО НПО «Искра» направило на электронный  адрес ООО «Нефтегазинжиниринг» (r.udovichenko@ng-eng.ru) для подписания Акт о  приемке выполненных пуско-наладочных работа (услуг) № 2 от 05.06.2023 на сумму200 000 руб., с учетом НДС 20%. с приложением счета-фактуры № 1577 от 05.06.2023.  

05.07.2023 ООО «Нефтегазинжиниринг» направило на электронный адрес ПАО  НПО «Искра» ответ о том, что Акт о приемке выполненных пуско-наладочных работ  (услуг) № 2 от 05.06.2023 не может быть подписан, по причине того, что ПАО НПО  «Искра» должно осуществить допоставку форсунок и поверку датчиков вибрации.  

Однако указанные в электронном письме от 05.07.2023 ООО  «Нефтегазинжиниринг» замечания не имели отношения к выполнению обязательств по  пуско-наладочным работам Компрессоров центробежных НЦ16ДКС/100-03 зав. №№  1,2 ДВС на объекте «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая  очередь. ШМР и ПНР» по Договору от 10.07.2020 № НГИ032-2020-РГА-02-04.  

Данные замечания были устранены ПАО НПО «Искра» в рамках выполнения  обязательств по поставке Товара (письмо от 30.10.2023 исх. № ПНА-927-2493, письмо  от 17.11.2023 исх. № ПНА-927-2632).  

02.11.2023 ПАО НПО «Искра» по почте направило в адрес ООО  «Нефтегазинжиниринг» письмо за исх. № 903-338-ор-З от 29.06.2023 с приложением  оригинала Акта о приемке выполненных пуско-наладочных работ (услуг) № 2 от  05.06.2023 на сумму 4 200 000 руб., с учетом НДС 20%, оригинала счет-фактуры №  1577 от 05.06.2023.  

20.11.2023 исх. № 23-1152 ООО «Нефтегазинжиниринг» направило в адрес ПАО  НПО «Искра» письмо о том, что Акт о приемке выполненных пуско-наладочных работ  (услуг) № 2 от 05.06.2023 не может быть подписан, по причине того, что ПАО НПО  «Искра» не оплатило задолженность за транспортную перевозку, питание и  проживание специалистов ПАО НПО «Искра» по Договору от 10.07.2020 № НГИ032- 2020-РГА-02-04, а также не устранило замечания, в части поверки оборудования с  истекшим сроком поверки.  

Требование ООО «Нефтегазинжиниринг» об оплате задолженности за  транспортную перевозку, питание и проживание специалистов ПАО НПО «Искра» по  Договору от 10.07.2020 № НГИ032-2020-РГА-02-04, является неправомерным.  

В Договоре от 10.07.2020 № НГИ032-2020-РГА-02-04 не предусмотрена  обязанность ПАО НПО «Искра» по оплате услуг за перевозку, питание и проживание  специалистов ПАО НПО «Искра».  

Кроме того, ПАО НПО «Искра» была выполнена поверка оборудования с  истекшим сроком поверки, о чем указано в письме от 27.11.2023 исх. № ПНА-927- 2692  направленным в адрес ООО «Нефтегазинжиниринг».  

Пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком  оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от  подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.  

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан  судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта  признаны им обоснованными.  

ООО «Нефтегазинжиниринг» Акт о приемке выполненных пуско-наладочных  работ (услуг) № 2 от 05.06.2023 не подписало.  

Однако ООО «Нефтегазинжиниринг» мотивированных возражений по объему,  качеству и стоимости оказанных пуско-наладочных работ по Акту № 2 от 05.06.2023 в  адрес ПАО НПО «Искра» не направило.  

Фактическое выполнение ПАО НПО «Искра» пуско-наладочных работ  подтверждается Актом от 16.06.2023 о завершении 72-х часовых испытаний  НЦ16ДКС/100-03.0000-000 зав. № 1 агрегата ГПА-16-100/1,7, Актом от 11.06.2023 о  завершении 72-х часовых испытаний НЦ16ДКС/100-03.0000-000 зав. № 2 агрегата ГПА- 16-100/1,7, подписанными, в том числе представителем Заказчика (ООО  «РусГазАльянс») без замечаний.  

Таким образом, ООО «Нефтегазинжиниринг» немотивированно отказывается от  подписания Акта № 2 от 05.06.2023 и оплаты выполненных пуско-наладочных работ.  

Как следует из судебной практики, односторонний акт приема-передачи  самостоятельно или в совокупности с другими доказательствами подтверждает факт  выполнения подрядных работ в ситуации, когда заказчик уклоняется от их приемки  либо немотивированно отказывается от подписания акта приема-передачи.  (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.07.2018 № Ф05- 11026/2018 по делу № А40-144896/17, Определение ВАС РФ от 23.04.2013 № ВАС4388/13 по делу № А75-6636/2011).  

Учитывая то, что ООО «Нефтегазинжиниринг» Акт о приемке выполненных  пуско-наладочных работ (услуг) № 2 от 05.06.2023 получило, мотивированных  возражений по объему, качеству и стоимости оказанных пуско-наладочных работ по  Акту № 2 от 05.06.2023 ПАО НПО «Искра» не предоставило, пуско-наладочные работы  по указанному Акту считаются принятыми и подлежат оплате.  

На дату предъявления искового заявления Акт о приемке выполненных пусконаладочных работ (услуг) № 2 от 05.06.2023 на сумму 4 200 000 руб., с учетом НДС  20% ООО «Нефтегазинжиниринг» не подписан и не возвращен.  

В соответствии с п. 8.4.2. Договора оплата выполненных Поставщиком указанной  в Спецификации работ и/или услуг производится Покупателем в размере 100 (сто) %  после выполнения конкретного вида работ и/или услуг, в течение 60 (шестидесяти)  календарных дней с даты подписания Сторонами без замечаний Акта о приемке  выполненных работ, а также предоставления Поставщиком счета на оплату, оригинала  счета-фактуры на соответствующий вид работ и/или услуг.  

Учитывая то, что Акт о приемке выполненных пуско-наладочных работ (услуг) №  2 от 05.06.2023 направлен в адрес ООО «Нефтегазинжиниринг» 02.11.2023, срок  оплаты пуско-наладочных работ - 31.12.2023.  

По состоянию на дату предъявления искового заявления ООО  «Нефтегазинжиниринг» свои обязательства по оплате выполненных пуско-наладочных  работ по Акту № 2 от 05.06.2023 к Договору от 10.07.2020 № НГИ032- 2020-РГА-02-04  не выполнило.  

Сумма задолженности ООО «Нефтегазинжиниринг» перед ПАО НПО «Искра» по  оплате выполненных пуско-наладочных работ по Акту № 2 от 05.06.2023 к Договору от  10.07.2020 № НГИ032-2020-РГА-02-04 составляет 4 200 000 руб.  

В соответствии с п. 10.3. Договора в случае нарушения Покупателем сроков  оплаты Поставщик вправе потребовать с покупателя выплату неустойки в размере  0,02% от стоимости неоплаченного в срок Товара или стоимости соответствующего  вида работ/услуг по Договору за каждый календарный день просрочки.  

По состоянию на 20.05.2024 сумма пени за нарушение сроков оплаты  выполненных пуско-наладочных работ по Договору составляет 118 440 руб. согласно  расчёту:  

4 200 000 руб. (стоимость выполненных работ)*0,02%*141 (дни просрочки с  01.01.2024 по 20.05.2024)= 119 280.  

22.03.2024 исх. № 891-210-ор-3 в целях соблюдения претензионного порядка  ПАО НПО «Искра» в адрес ООО «Нефтегазинжиниринг» была направлена претензия с  просьбой оплатить задолженность.  

Претензия была оставлена без удовлетворения, в связи, с чем у ПАО НПО  «Искра» возникло право на обращение в Арбитражный суд г. Москвы с настоящим  исковым заявлением.  

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом  в соответствии с условиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно  предъявляемыми требованиями.  

В соответствии со ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и  сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить  его.  

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена  предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан  уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов  работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный  срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Указанные в отзыве на исковое заявление ООО «Нефтегазинжиниринг»  замечания не имели отношения к выполнению обязательств по пуско-наладочным  работам Компрессоров центробежных НЦ16ДКС/100-03 зав. №№ 1,2 ДВС на объекте  «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь. ШМР и ПНР»  по Договору от 10.07.2020 № НГИ032-2020-РГА-02-04.  

Данные замечания были устранены ПАО НПО «Искра» в рамках выполнен  обязательств по поставке Товара (письмо от 30.10.2023 исх. № ПНА-927-2493, письмо  от 17.11.2023 исх. № ПНА-927-2632).  

02.11.2023 ПАО НПО «Искра» по почте направило в адрес ООО  «Нефтегазинжиниринг» письмо за исх. № 903-338-ор-3 от 29.06.2023 с приложением  оригинала Акта о приемке выполненных пуско-наладочных работ (услуг) № 2 от  05.06.2023 на сумму 4 200 000 руб., с учетом НДС 20%., оригинала счет-фактуры №  1577 от 05.06.2023.  

В соответствии с п. 8.4.2. Договора оплата выполненных Поставщиком указанной  в Спецификации работ и/или услуг производится Покупателем в размере 100 (сто) %  после выполнения конкретного вида работ и/или услуг, в течение 60 (шестидесяти)  календарных дней с даты подписания Сторонами без замечаний Акта о приемке  выполненных работ, а также предоставления Поставщиком счета на оплату, оригинала  счета-фактуры на соответствующий вид работ и/или услуг.  

Учитывая то, что Акт о приемке выполненных пуско-наладочных работ (услуг) №  2 от 05.06.2023 направлен в адрес ООО «Нефтегазинжиниринг» 02.11.2023, срок  оплаты пуско-наладочных работ - 31.12.2023.  

По состоянию на текущую дату ООО «Нефтегазинжиниринг» свои обязательства  по оплате выполненных пуско-наладочных работ по Акту № 2 от 05.06.2023 к Договору  от 10.07.2020 № НГИ032-2020-РГА-02-04 не выполнило.  

Сумма задолженности ООО «Нефтегазинжиниринг» перед ПАО НПО «Искра» по  оплате выполненных пуско-наладочных работ по Акту № 2 от 05.06.2023 к Договору от  10.07.2020 № НГИ032-2020-РГА-02-04 составляет 4 200 000 руб.  

Таким образом, ПАО НПО «Искра» верно произвело расчет неустойки за  нарушение сроков оплаты по Договору от 10.07.2020 № НГИ032-2020-РГА-02-04.  

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или  договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения.  

Доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не  состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела,  представленным в дело доказательствам и неправильным применением норм  материального права.  

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает  доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем,  полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле  доказательств.  

Пунктом 1 статьи 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле,  должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений. Пунктом 2 статьи 9 АПК РФ установлено, что лица,  участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или  несовершения ими процессуальных действий.  

С учетом изложенного, при отсутствии в материалах дела доказательств,  подтверждающих уплату задолженности, суд признает требования Истца  обоснованными и подлежащими удовлетворению с учетом положений статей 309, 310,  702, 711, 753 ГК РФ, расчет неустойки в соответствии с условиями договора судом  проверен, признан составленным верно, ответчиком расчет по существу не оспорен,  контррасчет не представлен.  

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110  АПК РФ подлежат отнесению на ответчика.  

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ" (ОГРН 

<

***>) в пользу  ПАО НПО"ИСКРА" (ОГРН 

<

***>) 4 200 000руб. – задолженности, 118  440руб. – неустойки, дальнейшее взыскание неустойки производить путем начисления  на сумму долг начиная с 21.05.2024г. по день фактической оплаты и 44 592руб. –  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в  течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд  Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший  решение.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его  ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Судья: О.В. Лихачева